DODATEK č.1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 05/DK/2024         

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto: 
1.	Smluvní strany

Dům kultury Teplice, p.o.
Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice
IČ: 00081221
DIČ: CZ 00081221
Bankovní spojení: 533501/0100, KB a.s. Teplice

Zástupci ve věcech:
a)	smluvních:	
Ing. Přemysl Šoba – ředitel organizace
Bc. xxxxxx xxxxxxxxxxxx – ved. EO 
				b)  technických:
				Ing. xxxxxxxx xxxxxxxxx – ved. TaP							
E-mail/telefon:			xxxxxxxxx@dkteplice.cz / xxx xxx xxx 

Dům kultury Teplice je příspěvkovou organizací, která byla zřízena dne 15.3.1986 městem Teplice. Zřizovací listina v platném znění byla schválena Zastupitelstvem města Teplice dne 11.12.2015 usn. č. 156/15.
(na straně jedné – dále jen „objednatel“ )

a

HAVE 2000 s.r.o.
Sokolská 744, 417 05 Osek
IČ:  28703464 
DIČ: CZ28703464 
Bankovní spojení:  230446374/0300 ČSOB Teplice

         E-mail/telefon: 		 xxxxxxxxx@have.cz   / 777 004 942  
	
Osoby oprávněné k jednání: 	Jan Havelka – jednatel
Osoby oprávněné ve věcech technických: 	xxx xxxxxx – OTZ
			xxxxx xxxxxxxx – TPZ
			xxxxx xxxxxx -TPZ

(na straně druhé – dále jen „zhotovitel“ )

2.	Předmět Dodatku č.1
2.1.	Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro zhotovení díla  „ALU služební vstup s automatickými posuvnými dveřmi“ -- nový termín prací je  do 30.06.2025  (včetně). 
2.2.	Veškerá další ujednání a ustanovení zůstávají v platnosti dle SoD  č. 05/DK/2024 ze dne 07.11.2024. 

3.        Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem  	zveřejnění v registru smluv. 
3.2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, 1 výtisk pro objednatele a 1 výtisk  pro zhotovitele.

V Teplicích, dne  28.04.2025 

…………………………………………….			…………………………………………
Ing. Přemysl Šoba – ředitel organizace			Jan Havelka  jednatel 
Objednatel							Zhotovitel