Spisový znak.podznak – 91.1, skartační znak/skart. lhůta – V/10
Spisová značka: S-SMOL/157401/2025/OMZOH	    Č. j.: SMOL/157401/2025/OMZOH/KZ/Při
SMLOUVA  č. OMZOH-KZ/NVY/001615/2025/Pri
o výsadbě a následné péči
„Lošov – krajinné úpravy“
Dotační program „Operační program životní prostředí – 2021-2027“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.	Smluvní strany

1. Objednatel:	statutární město Olomouc 	
	Horní náměstí 583	
	779 11 Olomouc	
	IČ: 00299308		

Zastoupen:	
- kontaktní osoba ve věcech smluvních	
Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora	
tel.: 	xxxx	e-mail:   xxxx	
- kontaktní osoby ve věcech technických:	
xxxxx	
tel.: 	xxxx	e-mail:   xxxx	
xxxxx	
tel.: 	xxxx	e-mail:   xxxx	
	
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.	
číslo výdajového účtu: č. u. 13260282/0800	

2. Zhotovitel:	Kavyl, spol.  s r.o.	
	Mohelno 563, 675 75 Mohelno	
IČ: 	49975358	DIČ:	CZ 49975358	
	
Obchodní rejstřík: 	vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C 	
pod sp. zn. 13954	
ID datové schránky: xd6fc6e                      	
	
Zastoupen:	
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	
Ing. Romana Rousová, jednatelka	
tel.: 	xxxx	e-mail: xxxx   	
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:	
xxxxx	
tel.: 	xxxx	e-mail: xxxx  	
- technik zajišťující kontrolu jakosti:	
xxxx	
tel.:	xxxx	e-mail: xxxx   	
-	technik - zahradník	
xxxx	
tel.:	xxxx	e-mail: xxxx	
-	technik - arborista	
xxxx	
tel.:	xxxx	e-mail: xxxx	
	
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  	
č. účtu: 86-3602390257/0100  	
II.	Preambule
1.	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2.	Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky č. 20010 s názvem „Lošov – krajinné úpravy“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
3.	Na realizaci díla byla schválena dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny v rámci Operačního programu Životní prostředí s názvem projekt „Lošov – krajinné úpravy“, identifikační číslo OPZP 22_01_3_01_00322. Zhotovitel se zavazuje ke splnění podmínek dle článku IX. Zvláštní podmínky dotace.  
III.	Předmět plnění
1.	Zhotovitel se zavazuje provést realizaci vegetačních krajinných úprav včetně následné péče po dobu 3 let (dále „dílo“) na pozemcích p.č. 1007, 1050, 1523 a 1894 v k.ú. Lošov v souladu s: 
a)	touto smlouvou a jejími přílohami,
b)	projektovou dokumentací s názvem „Lošov – krajinné úpravy “ zpracovatel Paměť krajiny – projekce s.r.o., IČO: 09012061, 
c)	dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
d)	zadávací dokumentací k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele,
e)	podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánu státní správy a správců sítí a dále podmínkami uvedenými v územním rozhodnutí o změně využití území č. 4/2023 ze dne 19.10.2023.
2.	Výsadby dřevin budou respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitách a jejich ochranná pásma uvedená např. ve standardu AOPK ČR SPPK A02 001 Výsadba stromů.
3.	Výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženému v projektové dokumentaci, pro ověření pravosti poskytne zhotovitel objednateli list původu školkařské sazenice.   
4.	Výsadba dřevin bude provedena dle standardů AOPK ČR SPPK A02 001 Výsadba stromů, SPPK A02 002 Řez stromů, SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů, SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a SPPK C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. 
5.	Seznam výsadbového materiálu:

Listnaté stromy 
Quercus robur, dub letní - bal, OK 10-12 cm - 6 ks
Acer platanoides, javor mléč - bal, OK 10-12 cm - 6 ks 
Salix alba, vrba bílá - bal, OK 10-12 cm - 6 ks 
Tilia cordata, lípa malolistá - odrostek 121-250 cm - 225 ks 
Carpinus betulus, habr obecný - odrostek 121-250 cm - 158 ks 
Acer campestre, javor babyka - odrostek 121-250 cm - 122 ks 
Betula pendula, bříza bělokorá - odrostek 121-250 cm - 103 ks 
Populus tremula, topol osika - odrostek 121-250 cm - 114 ks 
Sorbus aucuparia, jeřáb ptačí - odrostek 121-250 cm - 112 ks 
Celkem 852 ks 

Ovocné stromy
Malus domestica, jabloň domácí - vysokokmen 170+ cm - 10 ks 
Pyrus communis, hrušeň obecná - vysokokmen 170+ cm - 6 ks 
Prunus avium, třešeň ptačí (ovocná) - vysokokmen 170+ cm - 26 ks 
Prunus domestica, slivoň švestka - vysokokmen 170+ cm - 10 ks 
Celkem 52 ks 

Při výsadbě ovocných vysokokmenů budou preferovány staré odrůdy uvedené v projektové dokumentaci. 

Keře
Viburnum opulus, kalina obecná – krytokořenný keř 40-60 cm - 116 ks 
Ligustrum vulgare, ptačí zob obecný – krytokořenný keř 40-60 cm - 130 ks 
Prunus padus, střemcha obecná – kryokořenný keř 40-60 cm - 20 ks 
Cornus sanguinea, svída krvavá – krytokořenný keř 40-60 cm - 10 ks 
Corylus avellana, líska obecná – krytokořenný keř 60-100 cm - 9 ks 
Celkem 285 ks

Výsadba dřevin bude realizována dle situačních plánů (viz příloha č. 1, 2 a 3) této smlouvy.
 
6.	Pokud budou během následné péče realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle projektové dokumentace a dle podmínek uvedených v této smlouvě. 
7.	Složení osevní travní nebo travinobylinné směsi bude respektovat standard AOPK ČR SPPK C02 007 Krajinné trávníky a doporučení ohledně travních směsí uvedené v projektové dokumentaci.
8.	Zvolené náhradní taxony budou podléhat schválení AOPK ČR.
IV.	Lhůta plnění
A) Realizace krajinné zeleně 
1.	Zhotovitel se zavazuje provést realizaci krajinné zeleně (zatravnění a výsadby dřevin) a provést práce a povinnosti s tím související uvedené v projektové dokumentaci a této smlouvě v těchto lhůtách: 
a)	předání a převzetí místa plnění	11. 8. 2025	
b)	dokončení díla 	do 110 dnů od předání a převzetí místa plnění	
		
2.	Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici, popř. je schopen zajistit výsadbový materiál tak, aby splnil termín plnění dle čl. IV. část A), odst. 1. písm b) této smlouvy. 

B) Následná péče
3.	Následná péče bude zahájena na základě podpisu prvního protokolárního předání a ukončena na základě podpisu posledního protokolárního předání (tzn. za tři roky od podpisu prvního protokolárního předání).
V.	Cena díla 
1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí: 

Vegetační krajinné úpravy	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena celkem vč. DPH (Kč)	
Mokřad	135 747,47	28 506,97	164 254,44	
Pod Hvězdárnou	508 520,19	106 789,24	615 309,57	
Pod Lipovským	565 966,59	118 852,98	684 819,57	
Realizace krajinné zeleně – celkem:	1 210 234,25	254 149,19	1 464 383,44	
Mokřad – následná péče	57 171,80	12 006,08	69 177,88	
Pod Hvězdárnou – následná péče	284 141,90	59 669,80	343 811,70	
Pod Lipovským – následná péče	261 466,20	54 907,90	316 374,10	
Následná péče po dobu 3 let – celkem:	602 779,90	126 583,78	729 363,68	
Ostatní 	5 000,00	1 050,00	6 050,00	
Cena celkem	1 818 014,15	381 782,97	2 199 797,12	

2.	Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3.	V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel bude fakturovat cenu vč. DPH se sazbou DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).
4.	Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena formou písemného dodatku této smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
5.	Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění zhotovitelem. 
6.	Záloha na cenu díla se nesjednává.
7.	V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na ušlý zisk, který mu případně v důsledku méněprací vznikl.
VI.	Platební podmínky 
1.	Platby budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
2.	Platba za realizaci krajinné zeleně, dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude provedena na základě faktury provedených a odsouhlasených prací objednatelem.
3.	Platba za následnou péči, jejíž celková výše je uvedena v čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude provedena v třech ročních splátkách v letech 2026, 2027, 2028 dle skutečně provedených prací na základě faktury zhotovitele. Na základě provedené následné péče, dle harmonogramu projektu nejpozději do 31.8. daného roku, bude po provedení kontrol prací ze strany objednatele i zástupce poskytovatele dotace AOPK ČR a po odsouhlasení formou předávacího protokolu, vystavena faktura. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací a vystavení předávacího protokolu.  
4.	Lhůta splatnosti faktur je do 30 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli.
5.	Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech. 
6.	 Faktury musí mít náležitosti stanovené ZDPH.
VII.	Povinnosti zhotovitele
1.	Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 kalendářních dní před zahájením výsadby dřevin přizvat zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy ke kontrole a odsouhlasení kvality výsadbového materiálu.
2.	Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 kalendářních dní předem informovat zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy o datu zahájení výsadby dřevin a následně jej k výsadbě přizvat (zejména ke způsobu provádění výsadby a kontrole materiálu). Neučiní-li tak, nemá objednatel povinnost tuto výsadbu převzít a uhradit.
3.	Zhotovitel je dále povinen nejpozději 10 kalendářních dní před dokončením výsadby dřevin vyzvat zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy ke kontrole vysázené zeleně a k prvnímu protokolárnímu předání. 
4.	Objednatel si vyhrazuje právo přizvat ke kontrole a kvalitě provádění díla odborný dozor objednatele a zhotovitel je povinen jeho přítomnost strpět a řídit se jeho pokyny.
5.	Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla včetně termínu zahájení výsadby dřevin a lhůty plnění. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy k odsouhlaseným změnám na realizovaném díle s tím, že zhotovitel v návrhu dodatečných prací nebo méněprací uvede stručný, ale přesný technický popis změn díla, včetně zpracování položkových rozpočtů s návrhem na zvýšení nebo snížení ceny. Veškeré změny oproti projektu je zhotovitel povinen předem projednat/odsouhlasit s autorem projektu, objednatelem a poskytovatelem dotace, přičemž se zavazuje postupovat při uvedených změnách v souladu s pokyny objednatele.
6.	V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady za dodávky či práce, které zhotovitel nedodal či neprovedl v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) a vrátit cenu zpět nebo předmětné dodávky či práce dodat či provést dle povahy konkrétního případu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v  době následné údržby.
7.	V rámci realizace výsadby dřevin a následné péče nesmí dojít k mechanickému poškození samotných vysazovaných ani stávajících dřevin. V případě poškození okolní vegetační (travnaté) plochy, v rámci realizace výsadby nebo následné péče, je zhotovitel povinen poškozené vegetační plochy uvést do řádného stavu. Veškeré takto upravované plochy oset travním osivem a předat do správy a údržby objednateli po provedení seče plně zapojeného travního porostu bez dvouděložných a jednoděložných plevelů.
8.	Zhotovitel je dále povinen při realizaci krajinné zeleně dodržet tento technologický postup:
-	zajistit geodetické vytýčení pozemků určených pro zatravnění a výsadbu dřevin;
-	provést přípravu plochy pro výsadbu provedením zatravnění, které bude v lokalitě Pod Lipovským navazovat na provedení terénních modelací; 
-	před výsadbou odsouhlasit se zástupcem oprávněného přesné vytyčení místa výsadby dřevin; 
-	výsadbové jámy budou mít dostatečnou velikost a jejich stěny a dno budou nakypřené; 
-	prostokořenný materiál bude před výsadbou odborně ošetřen;
-	k dřevinám bude aplikován půdní kondicionér a hnojivo s pomalým uvolňováním živin;
-	rostliny budou vysazeny tak, aby kořenový krček byl v úrovni terénu a na svahu v úrovni dolní hrany odkopaného terénu, u keřů nepatrně níž;
-	kořeny prostokořenných sazenic budou volně rozloženy a nesmějí se stáčet vzhůru a musí být prosypány zeminou tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy;
-	u sazenic se zemním balem je nezbytné uvolnit drátěné pletivo a přestřihnout stahovací drát;
-	při výsadbě bude proveden arboristou či zahradníkem odborný povýsadbový (srovnávací) řez dle standardů AOPK ČR dle čl. III., odst. 4. této smlouvy, tj. budou odstraněny nebo zakráceny suché větve, pahýly, výhony mechanicky poškozené při skladování nebo transportu výsadbového materiálu, koterminální výhony, výhony nevyzrálé nebo příliš zahušťující korunu;
-	bezprostředně po výsadbě bude vytvořena u alejových stromů a ovocných vysokokmenů závlahová mísa a vysazená dřevina bude důkladně zalita tak, aby došlo k rovnoměrnému prosycení půdy v celé jámě, ale aby nedošlo k přemokření. Závlahová dávka je pro alejové stromy 50l, ovocné vysokokmeny 30l, odrostky 30l a keře 10l;
-	následně budou sazenice alejových stromů a ovocných vysokokmenů opatřeny 8-10 cm silnou vrstvou mulče ze štěpky nebo kůry tak, aby nebyl přihrnut krček;
-	záhony se skupinovou výsadbou budou zamulčovány;
-	alejové stromy a ovocné vysokokmeny budou ukotveny třemi kůly, odrostky jedním kůlem a upevněny úvazky. Kotvení nesmí poškozovat strom ani při větru, úvazky budou ploché, neškrtící, s možností postupného uvolňování, zajištěné proti sklouznutí; 
-	kmen alejových stromů, ovocných vysokokmenů a odrostků bude opatřen ochrannou rohoží; 
-	individuální ochrana proti okusu zvěří bude provedena z drátěného pletiva o výšce 1,5 m a bude upevněna ke kůlům a nikoli ke kmeni. Ochrana kmene nesmí poškozovat dřevinu; 
-	skupinová ochrana proti okusu zvěří bude provedena oplocením z lesnického pletiva, bude vysoká min. 1,6 m, do výše 0,8 m s oky o velikosti 5 cm, zabezpečená proti podhrabání (přioráním či použitím kovových úchytů v nerovném terénu). Minimální životnost oplocenky bude podobu následné péče;
-	vzniklý odpad vč. přebytečné zeminy bude odvezen a zlikvidován v souladu s platnými zákony bezprostředně po výsadbě.
9.	Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
10.	Zhotovitel se zavazuje informovat svého případného poddodavatele o povinnostech zhotovitele, plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržení povinností zhotovitele poddodavatelem.
11.	Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu, která spočívá v umístění plakátu A3 na místě realizace.

12.	Zhotovitel se zavazuje o realizovanou krajinnou zeleň po dobu následné péče náležitě pečovat, tj. zejména:
-	provádět dostatečnou zálivku v závislosti na srážkách během vegetačního období, a to podle stavu porostu min. 6x do roka v množství, které zajistí, aby došlo k rovnoměrnému prosycení půdy v celé jámě, ale aby nedošlo k přemokření. Závlahová dávka je pro alejové stromy 50l, ovocné vysokokmeny 30l, odrostky 30l a keře 10l;
-	min. 2x ročně provést kontrolu a případné opravy či výměnu poškozené individuální i skupinové ochrany proti okusu, kotvení, úvazků (prevence zaškrcování kmene);
-	min. 2x ročně provést odplevelení závlahových mís a záhonů, odstranění kmenných obrostů a vyžínání kolem sazenic;
-	min. 1x ročně upravit závlahovou mísu do původního tvaru a doplnit mulč; 
-	min. 1x ročně zajistit odborníkem (arboristou či zahradníkem) výchovný řez stromů a keřů; 
-	min. 2x ročně provést sečení travního porostu; 
-	v případě kalamitního výskytu škůdců či chorob provést ošetření dle doporučení odborných organizací;
-	dosazovat na vlastní náklady v souladu s článkem IV odst. 2 smlouvy uhynulé dřeviny, a to po dobu tří let od prvního protokolárního předání.
VIII.	Bankovní záruky

1.	Bankovní záruka za řádné provedení díla:
Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 250 000,- Kč. 
-	Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus tři měsíce po lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 21 dnů od předání a převzetí místa plnění. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více jak 45 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do 21 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus tři měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně. 
-	Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
2.	Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 250 000,- Kč.
-	Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 21 dnů od podpisu prvního protokolárního předání dle čl IV. této smlouvy, jejíž platnost bude 36 měsíců od podpisu prvního protokolárního předání.
-	Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
3.	Společná ustanovení k bankovním zárukám:
-	Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Pokud bude bankovní záruka vystavena elektronicky, je zhotovitel povinen zajistit, doručení elektronické bankovní záruky do datové schránky objednatele.  
-	Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
-	Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.
-	Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
-	Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.
IX.	Zvláštní podmínky dotace
1.	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, minimálně do konce roku 2038, příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.
2.	Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a identifikační číslo projektu.
3.	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (AOPK ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4.	Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a identifikační číslo projektu dle čl. II. odst. 3.
5.	Zhotovitel je povinen poskytnout stavební deník, pokud o něj v rámci hodnocení realizace projektu zažádá poskytovatel dotace.
6.	Zhotovitel zajistí kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků.
7.	Zhotovitel zajistí doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (pokud vzniknou) – stasky, záznamy, výpisy, fotografie.
8.	V rámci realizace akce nesmí dojít k zamezení průchodnosti krajiny ve vztahu k turistickým trasám a evidovaným cestám dle § 63 ZOPK.
9.	Provizorní komunikace včetně štěrkového podsypu budou po realizaci předmětu plnění odstraněny.
10.	Při provedení odlišného rozsahu opatření, než je schváleno v projektové dokumentaci, budou doloženy aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření. 
11.	Nejméně 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném Rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého přímo na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

X.	Způsob provádění díla, následná péče
1.	Objednatel je oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné péče včetně všech povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
2.	Od okamžiku prvního protokolárního předání začíná běžet tříletá lhůta pro následnou péči. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že od okamžiku prvního protokolárního předání se dřeviny vysazené dle této smlouvy stávají majetkem objednatele. 
3.	V případě poškození či úhynu (zničení) dřevin, z důvodu zanedbání povinností zhotovitele dle této smlouvy během následné péče je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu za poškozené či uhynulé (zničené) dřeviny tak, že vysadí na vlastní náklady dle pokynů objednatele nové dřeviny za stejných smluvních podmínek, jak je uvedeno v této smlouvě.
4.	O poškození či úhynu dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele.
5.	Po uplynutí následné péče, proběhne poslední protokolární předání dřevin, kdy dřeviny musí být na stanovišti zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin včetně doby následné péče. Záhony s výsadbou dřevin musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném stavu.
6.	V případě poškození či zničení dřevin, způsobeným vandaly, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele. Na dřeviny prokazatelně poškozené či zničené vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na náklady zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku. 
7.	Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci celého realizovaného díla a předat ji objednateli (min. 1 x v průběhu výsadby, 1x po dokončení celé výsadby a 3x ročně v rámci následné péče). 
8.	Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

XI.	Sankční ujednání
1.	V případě, že realizace krajinné zeleně nebude dokončena ve lhůtě, uvedené v čl. IV. písm. A) odst. 1 písm. b) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2.	V případě, že zhotovitel poruší povinnosti, uvedené v čl. VII. odst. 1 a odst. 3 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení povinnosti.
3.	V případě, že zhotovitel vymění osobu, uvedenou v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení povinnosti. Současně je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zjištění objednatele o neodsouhlasené výměně, předložit objednateli ke schválení takovou osobu, která splňuje technickou kvalifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
4.	V případě, že objednatel zjistí na straně zhotovitele porušení kterékoli z povinností, uvedených v ustanovení čl. VII. odst. 6, odst. 7, odst. 8 a odst. 12 a čl. X. odst. 3 a odst. 5 této smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je povinen provést nápravu ve lhůtě stanovené objednatelem, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Pokud tuto nápravu zhotovitel nesplní ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po uplynutí stanovené, příp. dohodnuté lhůty.
5.	V případě, že objednatel zjistí na straně zhotovitele porušení kterékoli z povinností, uvedených v ustanovení čl. III. odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je povinen provést nápravu ve lhůtě stanovené objednatelem, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Pokud tuto nápravu zhotovitel nesplní ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení povinnosti, a to za každou jednotlivou položku či jednotlivý kus dřeviny.
6.	V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. VI. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7.	Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % celkové ceny díla vč. DPH.
8.	Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
9.	Smluvní strany se dohodly ve vztahu ke smluvním pokutám dle tohoto článku této smlouvy na vyloučení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výší.
10.	Smluvní pokuty dle tohoto článku lze udělit i opakovaně.
11.	Sjednané smluvní pokuty zaplatí strana povinná nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda.
XII.	Závěrečné ujednání
1.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle. 
2.	Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním.   
3.	Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).	
4.	Smlouvu je možno měnit a doplnit jedině písemným, číslovaným, oboustranně podepsaným dodatkem, účinným ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
5.	Smluvní strany se dohodly na tom, že plnění veškerých závazků zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, bude po zhotoviteli vyžadovat a uplatňovat objednatel.   
6.	Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností v jakékoliv formě se pro účely této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
7.	Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 6.5.2025 usnesením č.8.
8.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 
XIII.	Přílohy
Nedílnou součástí smlouvy je: 
příloha č. 1 – Situační plán lokalita Mokřad
příloha č. 2 – Situační plán lokalita Pod Hvězdárnou
příloha č. 3 – Situační plán lokalita Pod Lipovským
příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Olomouci dne  		V Mohelně dne

Objednatel:
Ing. Otakar Štěpán Bačák	
náměstek primátora
statutární město Olomouc

Zhotovitel:
Ing. Romana Rousová
jednatelka
Kavyl, spol. s r.o.

	

___________________________		             	______________________________