shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(21494,0);(5633,0);(5633,3301);(5503,3301);(5503,4393);(3796,4393);(3796,7149);(0,7149);(0,15964);(5107,15964);(5107,19266);(5237,19266);(5237,21477);(21494,21477)posrelh0posrelv0pib
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dno 
č.04/2017 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Akce "Oprava zadního zahradního vstupu kamínkovým kobercem do MŠ, Ostrava-Poruba, 
	Žmnská 132119", včetně materiálu a dopravy. 	' 

I. 
Smluvní strany 

	Objeduatel: 	Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovska 1168, přispěvková organizace 
Sídlo: 70800 Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168/8 
Zastoupena ředitelkou, Zlatuší Peterkovou 
IČ: 70984654 
Bankovní s ď 
číslo 
(dále jen "obj . 

Zhotovitel: 

Frame Servise S.Jr.O. 
Kotkova 863 
74283 Klimkovice 
IČ: 28621751 
DIé: CZ28621751 
(dále jen "zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 04/2017 ze dne 30.6.2017 takto: 

II. 

Po zahájení prací byly zjištěny vícepráce, které jsou uvedeny v čl, Il. tohoto dodatku. 

Na základě prováděných stavebních prací - mezi výše uvedenými partnery a dle SOD 04/2017, byly 
po odkrytí vnější vrstvy opěrné betonové zídky (keramický obklad) zjištěny tyto skutečnosti: 
pod keramickým obkladem je souvislá vl~kost - z části vytéká voda ... 

po osekání podkladu - místy až 80mm (vápenné omítky - nevhodné do těchto podrníneklll) 
bylo zjištěno narušení konstrukce opěrné stěny, a to jak v horizontálním směru, tak i statická 
trhlina v podélném směru 

trhlinami proniká vlhkost z vnější strany zídky do její konstrukce 
Celá zjištěna skutečnost byla fotodokumentována. 

- 1 -