, 
\ 
I 
Vzhledem ke zjištěné situaci nelze provádět obklad svislých stěn dle SOD 04/2017 (obklad 
polystyrénem XPS 40mm + mozaiková omítka) z důvodu stálého vlhnutí konstrukce a tím nevhodných 
podmínek pro zvolený materiál. 
Předmět smlouvy. ČI. 1 se proto vypouští a nově zní takto: 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
"Oprava zadního zahradního vstupu kamínkovým kobercem do MŠ, Ostrava-Poruba, Žilinská 
1321/9", včetně materiálu a dopravy, dále realizovat provětrávaný systém obkladu opěrné zídky 
zapenetrování současné, osekaně konstrukce 
svislé plochy srovnat cemeutovou omítkou 
potažení fasádnim lepidlem se skelnou síťkou 
po vyschnutí zapenetrování - jako finální vrstva 
zabetonovat do roviny hlavu zídky a osadit betonové dlaždice 600x600 mm s okapovou 
drážkou - jako krycí deska konstrukce zídky (spoje tmeleny) - v mírném spádu do 
travnaté části 
svisle osadit nosné hranoly ThermoWood SHP 42/68 

- a provést obklad stěn profilem ThermoWood SSS26x68 - horizontálně 

Při provádění díla postupuje zhotovítel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětněho díla a upozorňující na možné 
porušováni smluvních povinností zhotovitele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 
12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční náklady vícepráce jsou součástí samostatného rozpočtu ( příloha č.I ) - více/méně prací dle 
SOD 04/2017. 
- 2 -