,L,2	y2 )i) (2770‚,00/9		

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 4.9.2024,
číslo objednatele: 226/42727201/2024 číslo dodavatele: dále jen
"Dodatek č.1 "

Objednatel:
IČO:
sídlem:
zastoupena:
bankovní spojení:
dále jen "Objednatel" a
Dodavatel:
IČO:
DIČ:
sídlem:
zastoupena: 

Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace
42727201
Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš
Mgr. Marií Doležalovou, ředitelkou Domova seniorů Dobříš
Komerční banka, číslo účtu 12132211/0100
STRAET ARCHITECTS s.r.o.
27864618
CZ27864618
Na Poříčí 1918/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ing. Dianou Hockovou, jednatelkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122601 bankovní

spojení:		

dále jen "Dodavatel"
Objednatel a Dodavatel dále společně také jako "Smluvní strany"
PREAMBULE
Dne 4.9.2024 uzavřely Smluvní strany dle výsledků poptávkového výběrového řízení s názvem "Projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení ke stavbě - Přístavba Domova seniorů Dobříš II." (dále jen "Stavba") v souladu s ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o dílo, která byla dne 4.9.2024 z důvodu legislativních změn právní úpravy zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, změněna a dopiněna Dodatkem č. 1, kdy předmětem této Smlouvy o dílo, je závazek Dodavatele ke zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení ke Stavbě včetně zpracování projektové dokumentace k demolici stávajícího objektu, zpracování projektové dokumentace, zpracování položkového rozpočtu, podkladů pro stavební úřad, výkaz výměr, plán organizace výstavby, technická pomoc objednateli a následné zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen "Smlouva o dílo").
VZHLEDEM k situaci ve městě Dobříš týkající se změny závazného územního plánu, kterým je fakticky a zásadně zasahováno do záměru Objednatele zahájit proces realizace Stavby, dohodly se Smluvní strany na následující úpravě vzájemných vztahů plynoucích ze Smlouvy o dílo:
Stránka 1 z2

L	Plnění smluvních podmínek Smluvních stran ze Smlouvy o dílo se přerušuje, a to do doby schválení změny územního plánu města Dobříš anebo do doby změny majetkoprávního vypořádání pozemků, které přímo sousedí s pozemky součástí kterých, se má stát zamýšlena Stavba Objednatele.
Dodavateli za zhotovení části Díla - Předprojektová příprava a architektonická studie náleží Cena Díla v částce 240.000,-Kč bez DPH, která je splatná nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na profilu Objednatele dle zákona o veřejných zakázkách.
IV.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
Vzhledem k tomu, že se na tento Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho pinění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
V Dobříši dne	uť.o.4f'
Objednatel	Dodavatel

Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace	STRAET ARCH ITECTS s.r.o.
Mgr. Marie Doležalová, ředitelka	Ing. Diana Hocková, jednatel Domova seniorů Dobříš
Stránka 2 z 2