Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
se sídlem společnosti a adresou pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

Správce Společnosti:	Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČO:	45146802
DIČ:	CZ45146802
zastoupená: 	xxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Společník 2 Společnosti:	EUROGAS a.s.
se sídlem	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
IČO:	61859974
DIČ:	CZ61859974
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)
na straně druhé

Preambule
Ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem je v článku 6.6. uvedeno toto: „Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na překotný nárůst cen stavebních materiálů v návaznosti na změny trhu způsobené pandemií Covid-19, bude provedena indexace ceny díla. Tato indexace bude provedena na základě kladného nebo záporného přírůstku indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem. Indexace bude provedena v závěrečné faktuře po předání díla objednateli (částka indexace se nezapočítá do limitu dle bodu 7.7) průměrem indexů za období od prvního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání staveniště, do posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání dokončeného díla.“

Z veřejně dostupných zdrojů zveřejněných Českým statistickým úřadem vyplývá, že indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb byly pro budovy nebytové nevýrobní odpovídající předmětu smlouvy v uvedeném období následující:

Aritmetický průměr bazických indexů cen materiálových vstupů za období 4.Q. 2023 až 2.Q 2025 je dán (148,00 + 151,70 + 151,70 + 151,20 + 151,40 + 152,00+152,90) / 7 = 151,27
Výsledná hodnota bazického indexu cen materiálových vstupů je (151,27 / 148,70) = 1,01728
Na základě tohoto ustanovení se tímto dodatkem upravuje cena díla indexací ceny dle indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem.

Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 6.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:
cena bez DPH: 69 754 976,02 Kč (slovy: šedesát devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc devět set sedmdesát šest korun českých dva haléře)
sazba DPH: 21 %
DPH v Kč: 14 648 544,96 Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých devadesát šest haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 84 403 520,98 Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů čtyři sta tři tisíc pět set dvacet korun českých devadesát osm haléřů) se navyšuje indexací ceny díla dle indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem průměrem indexů za období od prvního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k předání staveniště, tedy 4. Q. 2023, do posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k předání dokončeného díla, tedy 2.Q 2025, o hodnotu bazického indexu cen materiálových vstupů 1,01728.  
Cena navýšení bez DPH činí 1 205 365,99 Kč (jeden milión dvě stě pět tisíc tři sta šedesát pět korun českých devadesát devět haléřů)

Konečná cena díla, včetně započítání Dodatků č.1, č.2, č.3, činí:

cena bez DPH: 77 227 631,52 Kč (sedmdesát sedm miliónů dvě stě dvacet sedm tisíc šest set třicet jedna korun českých padesát dva haléřů)
sazba DPH: 21%, DPH:  16 217 802,62 Kč (šestnáct milionů dvě stě sedmnáct tisíc osm set dva korun českých šedesát dva haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 93 445 434,14 Kč (devadesát tři miliónů čtyři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých čtrnáct haléřů)

2.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________		___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.		Ing. Oldřich Vytiska
prorektorka pro výstavbu				předseda představenstva
České vysoké učení technické v Praze		Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“