DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI UPGRADE SYSTÉMU PRO ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBU, A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH ZE DNE 29. 6. 2023

(dále jen „Dodatek“)

Název:	České vysoké učení technické v Praze, Rektorát
Se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
Zastoupené:	prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc., prorektorem pověřeným vedením univerzity
IČ:		68407700
DIČ:		CZ68407700
Číslo smlouvy: 	5123000096
(dále jen „Kupující“)

a

Název:	PragoData a.s.
Se sídlem:	Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
Zapsaná: 	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892
Statutární orgán:	Ing. Břetislav Moc, předseda správní rady
IČ:	05433622
DIČ:	CZ05433622
Bankovní spojení a číslo účtu:	xxx
Číslo smlouvy:	CVUT_PD2301
(dále jen „Prodávající“)
(dále též společně jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dodávce a implementaci upgrade systému pro elektronickou spisovou službu, a souvisejících službách dle § 1746 odst. 2                    a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1	Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dodávce a implementaci upgrade systému pro elektronickou spisovou službu, a souvisejících službách uzavřené dne 29. 6. 2023 mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Smlouva“), a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2024, jejímž předmětem je dodávka a implementace upgrade ESSL včetně modulu umožňujícího kompletní správu dokumentů, vedení spisové služby v souladu s legislativními požadavky, zajištění podpory provozu a rozvoje tohoto upgrade.
1.2	Kupující uzavírá tento Dodatek s Prodávajícím z důvodu provozní potřeby změny závazku ze Smlouvy                     na veřejnou zakázku v souladu s:
1.2.1.	§ 222 odst. 6 ZZVZ, tedy jedná se o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změna dle čl. 2.1., čl. 2.5. tohoto Dodatku).
1.3	Smluvní strany společně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku nemá vliv na výši nároku na odměnu Zhotovitele vzniklého ze Smlouvy.
2.	PŘEDMĚT DODATKU
2.1.	Původní znění čl. 3.1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Prodávající se zavazuje provést dodávku Předmětu plnění dle čl. 2.2.1 až čl. 2.2.4. Smlouvy (dále jen „Implementace“) v následujících dílčích termínech plnění:
Dílčí plnění	Mezní termín plnění	
a)	Zahájení projektu, kickoff	do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	
b)	Provedení pilotního testovacího provozu:
­	dodávka licencí ESSL a dalšího SW (podpůrný SW třetích stran), 
­	provedení testovací provozu ESSL,
­	kompletní implementace do pilotního testovacího prostředí,
­	provedení pilotního testovacího provozu ESSL, 
­	akceptace pilotního testovacího provozu ESSL
(dle čl. 2.2.1.,2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. písm. a) až k) Smlouvy)	nejpozději do 
31. 5. 2024	
c)	Převedení ESSL do produkčního provozu, akceptace produkčního prostředí ESSL 
(dle čl. 2.2.4. písm. l) až n) Smlouvy)	převedení do produkčního provozu od 2.11.2026, akceptace produkčního prostředí nejpozději          do 30.9.2026	

2.2.	Původní znění čl. 3.4. Smlouvy se ruší a v návaznosti na aktuální plán zbývajících prací v projektu se nahrazuje následujícím zněním:
„3.4. Prodávající se zavazuje zahájit poskytování služby Správy a podpory ESSL dle čl. 2.2.6. Smlouvy                          od 2.11.2026. Služba Správy a podpory ESSL bude poskytována po dobu 51 měsíců od termínu uvedeného v předchozí větě.
2.3.	S ohledem na čl. 2.2. tohoto Dodatku se mění taktéž znění čl. 4.4. Smlouvy na následující znění:
„4.4. Prodávající se zavazuje zahájit poskytování hrazené Správy a podpory ESSL ke dni 2.11.2026. Správa a podpora bude poskytována po dobu 51 měsíců od termínu uvedeného v předchozí větě.“
2.4.	Původní znění čl. 10.22. Smlouvy se ruší, a to z důvodu nedokončeného legislativního procesu novely zákona 
č. 499/2004 Sb. ke dni podpisu tohoto Dodatku. Dále je v současné době v přípravě novela vyhlášky                              č. 259/2012 Sb. a změny souvisejícího NSESSS, které stanovují povinnost veřejnoprávních původců vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v atestovaném elektronickém systému spisové služby, a dále určují výrobcům elektronických systémů spisových služeb povinnosti ve smyslu plnění uvedené legislativy definované ve formě atestačních scénářů. Výše uvedené znemožňuje Prodávajícímu zajistit atestaci spisové služby v původní stanovené lhůtě (tj. nejpozději do 31. 12. 2025). Znění čl. 10.22. se nahrazuje následujícím zněním:
„10.22. Dne 1. února 2022 nabyl účinnosti zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony                                    v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, tzv. „DEPO“, který novelizoval i zákon                           č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Pro Kupujícího z tohoto předpisu vyplývá povinnost vést pouze spisovou službu v elektronické podobě, která prošla certifikací (atestací) podle výše uvedeného zákona, tzn. Prodávající elektronické spisové služby musí prokázat, že je jejich aplikace v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. i ostatní legislativou. Kupující je povinen uvést vedení spisové služby do souladu s novelou zákona do 1.1.2027, nebude-li právními předpisy stanoveno jinak. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu atest potvrzující, že ESSL je systémem, který naplňuje požadavky podle výše uvedeného zákona, a to bez zbytečného odkladu od jeho získání.“
2.5.	Smluvní strany se dohodly, že činnost „napojení na USERMAP“ nebude realizována během etapy II a III plnění (dle kap. 3.3.2. a 3.4.1. Přílohy č. 1 Smlouvy), ale až v průběhu etapy IV. Integrace USERMAP bude s ohledem na potřeby testování systému připravena k 31. 1. 2026. Finální integrace bude realizována až                  na atestovaný elektronický systém spisové služby. 
2.6.	Smluvní strany se dohodly, že činnost „napojení na Public Key Infrastructure (PKI) ČVUT – systém Obelisk s HSM servery“ nebude realizována během etapy II a III plnění (dle kap. 3.3.2. a 3.4.1. Přílohy č. 1 Smlouvy), ale až v průběhu etapy IV. Integrace systému OBELISK bude s ohledem na potřeby testování systému připravena k 1. 5. 2026. Finální integrace bude realizována až na atestovaný elektronický systém spisové služby. 
2.7.	Článek 20.6. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech provozně-technických jsou:
za Prodávajícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
	za Kupujícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
.

2.8.	Článek 20.7 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:
za Prodávajícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
	za Kupujícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
2.9.	Článek 20.8 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Odpovědnými osobami k podpisu akceptačního protokolu jsou:
za Prodávajícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
	za Kupujícího:
	jméno a příjmení:		xxx
	telefon:	xxx
	e-mail:	xxx
3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
3.2.	Dodatek je vyhotoven v analogové podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeden jeho analogový originál opatřený podpisy.
3.3.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.4.	Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 22.9.2025	V Praze dne 22.9.2025
___________________________	______________________    
 za Kupujícího 	za Prodávajícího
            prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.	                                Ing. Břetislav Moc 
 prorektor pověřený vedením univerzity 	 předseda správní rady PragoData a.s