Evidenční číslo Objednatele 	 	 	 	 	 	       Evidenční číslo Zhotovitele 
   ………………………………. 	 	 	 	 	 	         25-420 
  SMLOUVA O DÍLO  
 
„VN Brno - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu - realizace stavby“ 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL: 
Vojenská nemocnice Brno 
Sídlo: 	 	 	 	Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno 
Zastoupený:  	 	 	 	plk. gšt. MUDr. Petrem Králem, MBA, ředitelem 
IČO:  	 	 	 	60555530 
DIČ:  	 	 	 	CZ60555530 
Bankovní spojení:   	 	 	ČNB 
Číslo účtu:  	 	 	 	.............
(dále jen „Objednatel") 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: 
SKR stav, s.r.o. 
Sídlo: 	 	 	 	 	Nováčkova 18, 614 00 Brno 
Zastoupený:  	 	 	 	........................................ jednatelé 
IČ:  	 	 	 	269 61 474 
DIČ:  	 	 	 	CZ26961474 
Bankovní spojení:  	 	 	Oberbank AG  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C48480 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění: 
 
PREAMBULE 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-011201 pod názvem „VN Brno - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu - realizace stavby“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  
Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. 	DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „VN Brno - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu“ podle:  
?	Projektové dokumentace s názvem „VN Brno - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu“, zpracovaná projektantem MAZOK s.r.o., IČO 11920360, v 11/2024 v souladu s vyhl. č. 169/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 
?	pravomocného stavebního povolení záměru č.j. 469827/2025-1322 ze dne 22.5.2025, v právní moci 16.6.2025 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ). 
?	Právních předpisů: 
a)	Zákon č. č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“. 
b)	Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS“ 
c)	Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
d)	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“ 
e)	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„ZZVZ“ 
f)	Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality. 
g)	Právní předpisy v oblasti památkové péče, hygieny, bezpečnosti práce, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla. 
Dílo je specifikováno PROJEKTEM, právními předpisy, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
	1.1.1.1. 	Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ. 
	1.1.1.2. 	Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 
?	Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. Dodavatelskou projektovou dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové (editovatelné) podobě. 
?	Výrobní projektové dokumentace (RDS) pro dílčí části díla, které takovou dokumentaci vyžadují, a to v rozsahu přílohy č. V. této smlouvy.  
?	Dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek oproti ověřené DSP ve stavebním řízení podle § 232 stavebního zákona, a to pro účely podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. 
?	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohou č. IV. této smlouvy.  
1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ), a to v rozsahu podle přílohy č. VI. této smlouvy, a její předání Objednateli. 
	1.1.1.4. 	Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v čl. I. odst. 1.1.2. této smlouvy. 
	 	1.1.2.  	Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 
?	Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 
?	Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla. 
?	Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby. 
?	Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví pří práci na staveništi.  
?	Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného statika po celou dobu realizace stavby.  
?	Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla. 
?	Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních 
tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků. 
?	Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
?	Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
?	Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 
?	Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla.   
Návod na provoz a údržbu díla bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.  
?	Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví dílo podle požárně bezpečnostního řešení z PROJEKTU. 
?	Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 
?	Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla. 
?	Zhotovitel v průběhu provádění díla  
a)	umožní postupem prací na stavbě dokončování jednotlivých místností tak, aby mohlo být zahájeno jejich vybavování interiérovým vybavením a zdravotnickou technologií; 
b)	umožní před ukončením realizace stavby zaměření pro účely výroby interiérového vybavení a montáž interiérového vybavení v dokončených prostorách stavby;  
c)	je povinen koordinovat práce na stavbě s činností dodavatele interiérového vybavení, jehož identifikační údaje oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně; 
d)	v případě vestavných kuchyňských linek je Zhotovitel povinen oznámit písemně dodavateli interiérového vybavení termín provedení stavební připravenosti pro montáž kuchyňských linek. Dodavatel kuchyňských linek bude mít smluvně sjednanou povinnost informovat Zhotovitele předem, do jakého termínu budou kuchyňské linky dodány a osazeny. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže kuchyňských linek provést napojení kuchyňských linek na media. 
?	Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím díla provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
?	Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla. 
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno. 
?	Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel 
o	zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,  
o	poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního rozhodnutí  
Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
23.9.4. 	Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:  
?	PROJEKTU; 
?	ROZPOČTU;  
?	podmínek POVOLENÍ; 
?	NABÍDKY  
?	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v čl. I. odst. 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 
	1.1.4. 	ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle čl. I. odst. 
1.1.3. této smlouvy, jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:  a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.  
b)	Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  
c)	Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. OZ, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.  
1.1.6.	Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 
1.1.7.	Vůle smluvních stran je vyjádřena v této smlouvě a v dále uvedených dokumentech a podkladech, které předal Objednatel Zhotoviteli, nebo které vznikly / vzniknou při realizaci díla: 
?	vlastní text této smlouvy o dílo; 
?	POVOLENÍ; 
?	PROJEKT; 
?	ROZPOČET; 
?	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
?	NABÍDKA; 
?	protokol o předání a převzetí staveniště; ? 	protokol o předání a převzetí díla. 
Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. 
1.2. 	ZMĚNY DÍLA 
1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.   
	1.2.2. 	Změnou díla je: 
a)	pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 
b)	pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 
c)	pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 
Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 
d)	pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 
Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4-7 ZZVZ. Požadavek na 
změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 
1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  
1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 
1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ). 
1.3. 	FUNKČNÍ ZKOUŠKY 
1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 
1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 
1.3.3. 	V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:  
	1.3.3.1. 	Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla. 
	1.3.3.2. 	Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 
2.2.4. této smlouvy. 
1.3.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 
1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných kontrolních dnech min. 1x za 14 dnů, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.  
1.4. 	NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.  
	1.4.2.  	Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 
	1.4.2.1. 	Dokumentace údržby, která bude obsahovat 
?	seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění; 
?	předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; ? 	plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 
	1.4.2.2. 	Manipulační a provozní řády. 
	 	1.4.2.3. 	Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 
1.5. 	OZNAČOVÁNÍ DÍLA 
Smluvní strany jsou povinny označovat dílo takto: 
Název díla: „VN Brno - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu“ reg. č.:  107V752002509 
1.6. 	REALIZAČNÍ TÝM 
	1.6.1.  	Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 
1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 
1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. X. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 
1.6.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
1.7. 	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 
1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZZVZ, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 
1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky. 
1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 
1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů. 
1.7.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR). 
1.7.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu. 
1.8. 	PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
1.8.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 
	1.8.1.1. 	Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  
	1.8.1.2. 	Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  
1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  
1.8.3. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnosti zajišťované stavbyvedoucím - vedoucím stavby plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.7. této smlouvy.  
1.8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. 
Článek II. Doba plnění 
2.1. 	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 
2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. 
2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.  
2.2. 	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 
	2.2.1. 	zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 
2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 
2.2.3. 	řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek,  nejpozději do 358 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 
2.2.4. 	odstranění veškerých vad a nedodělků,  nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 
2.3. 	HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů podle čl. II. odst. 2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU. 
2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (čl. II. odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 
2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou. 
2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 
Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě Zábrdovická 174/18, Brno. 
Článek IV. Cena  
4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.  
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 
51.900.000 Kč bez DPH 
(slovy: padesátjedenmiliondevětsettisíckorunčeských Kč)  
4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání dokončeného díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady Zhotovitele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. 
4.3. 	Smluvní strany se dohodly, že díla může být změněna pouze v těchto případech: 
4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
	4.3.2. 	Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 
4.4. 	SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených. 
4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 
4.4.3. 	Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu. 
4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. IV. odst. 4.4.2. této smlouvy. 
Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis provedených prací a dodávek TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního 
měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  
	5.1.2. 	SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
 	Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací a dodávek bude obsahovat: 
?	počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
?	počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky); 
?	počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
?	počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.  
Soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I. této smlouvy.  
 
	5.1.3. 	SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje: 
?	celková cena díla v Kč bez DPH; 
?	do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; ? 	v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; ? 	zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH. 
5.1.4. 	Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  	 
5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
?	označení díla; 
?	číslo smlouvy; 
?	číslo faktury; 
?	den uskutečnění zdanitelného plnění; ? 	den splatnosti faktury; ? 	označení díla. 
Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
?	souhrnný zjišťovací protokol; 
?	soupis provedených prací a dodávek.  
5.3.	Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5.5. této smlouvy. Pokud zjistí Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5.5. této smlouvy. 
5.4.	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě faktury odpadne. 
5.5.	Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky, pokud si to Objednatel vyhradí a sdělí Zhotoviteli elektronickou adresu pro doučování faktur. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum schválení soupisu skutečně provedených prací a dodávek ze strany TDS podle čl. V. odst. 5.7.1. této smlouvy. 
5.6. 	POZASTÁVKA 
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.2. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.2. této smlouvy slouží jako pozastávka. 
	5.6.2. 	Fakturu za pozastávku vystaví Zhotovitel po předání a převzetí celého díla. Objednatel uhradí fakturu až 
po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost faktury. Objednatel může rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků nebránících v užívání budou kryty bankovní zárukou podle čl. XVI. této smlouvy, kterou Zhotovitel k tomu účelu Objednateli poskytne, a poslední fakturu uvolnit k proplacení. 
5.7. 	SCHVALOVÁNÍ PLATEB 
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis skutečně provedených prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu skutečně provedených prací a dodávek a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a v souladu s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis skutečně provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem skutečně provedených prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem s uvedením data podpisu.  
5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený TDS, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  
	5.7.3. 	Schvalování pozastávky:  
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele a podle čl. IX. odst. 9.8. této smlouvy, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 
Platba pozastávky může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. této smlouvy. 
Článek VI. Staveniště  
6.1. 	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ  
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, jakmile mu to umožní provozní podmínky, nejpozději však v termínu do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta (AD), TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 
6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště. 
6.2.  	VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ / STAVBY 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
	6.2.1. 	správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. 	zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   
6.3.  	ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  
6.4.  	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 
6.5. 	OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ 
6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 
	6.5.1.2. 	přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z čl. VI. odst. 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení Zhotovitel sám odpovědný. 
6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 
6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 
6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  
6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště. 
Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  
7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděného díla stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota, počasí (například déšť), klimatické podmínky. Zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku denně, a to všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 
7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, AD, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy. 
7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, AD, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 
7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem TDS nebo AD ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pravidelných kontrolních dnů za účasti TDS, Objednatele, AD a Zhotovitele za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací na díle. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  
7.7. 	Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
?	předmět kontrolního dne; 
?	kontrola harmonogramu díla; 
?	vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
?	soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
?	sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
?	soupis změn 
?	podpisy zúčastněných osob. 
7.8.	Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 
7.9.	Kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, AD, koordinátorem BOZP, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
7.10.	Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP 
8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 
8.2. Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb. 
8.3.  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost. 
8.4. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 
8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění, aby je koordinátor BOZP mohl zapracovat do plánu BOZP, resp. do jeho aktualizace. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.  
8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.  
•	doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali o všech skutečnostech, které mají vliv na rizika vyplývající z realizace stavby  
•	poskytovat součinnost  
•	předávat potřebné informace a podklady (např. o změnách pracovních a technologických postupů, které pro realizaci stavby zvolili / v průběhu realizace stavby změnili a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých odstranění takových rizik) 
•	zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP, vyjadřovat se k nim, případně potřeby (změny okolností) vyvolávat potřebu aktualizací plánu BOZP 
Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 
8.7.	Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi. 
8.8.	Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce. 
8.9.	Zhotovitel je povinen 
8.9.1.	Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  
8.9.2.	Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 
8.9.3.	Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 
8.9.4.	Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 
8.9.5.	V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 
Článek IX. Provádění díla 
9.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.  
9.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých metod a technologických postupů.  
9.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 
9.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dílo, za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 
9.5. Zhotovitel se před zahájením práce na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 
9.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla sjednaných touto smlouvou nebo v průběhu realizace díla dohodnutých na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění díla.  
9.7.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních PROJEKTU, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známé, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávané za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 
9.8. 	VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 
?	Soupis vad a nedodělků. 
?	Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM. 
TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 
9.9. 	DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
9.9.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu, uvedené v čl. IX. odst. 9.9.2. této smlouvy. Zhotovitel pověřil výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí - vedoucí stavby a stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle stavebního zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet odborně způsobilých spolupracovníků.  
Stavbyvedoucí bude osobou stále přítomnou na stavbě odpovídající za vedení stavby, za prováděné stavební práce, za jejich koordinaci, za plnění harmonogramu a řešení technických problémů při realizaci stavby. Koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet. 
9.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.3. a 1.8.2. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 
................ ve funkci stavbyvedoucí - vedoucí stavby 
................ ve funkci stavbyvedoucí 
............. ve funkci specialista elektro 
................ ve funkci statik 
.................. ve funkci geotechnik 
......................... ve funkci manažer BOZP  
9.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 
9.10. 	Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  
9.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a po jejich provedení seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.  
9.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do PROJEKTU (do elektronické verze nebo do jednoho paré papírové verze) veškeré změny oproti PROJEKTU vzniklé při provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS a AD. 
9.13. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  
Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 
10.1. 	Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 
10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 
 	 	......................
 	Objednatel dále pověřuje výkonem dozoru projektanta (AD) tuto osobu: 
..................................
 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:....................
10.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo realizace díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 
10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených PROJEKTEM a plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
10.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 
10.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  
10.7.   	PRÁVA A POVINNOSTI TDS  
10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s kontrolou provádění díla ve fázi přípravy díla, vlastní realizace díla a při dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy Zhotoviteli. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy TDS akceptovat. 
	10.7.2. 	TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení díla a provedení všech úprav 
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to až do doby podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla a do doby vydání potvrzení o odstranění veškerých vad a nedodělků díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 
10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za to, zda Zhotovitel dodržuje bezpečnost práce v rozsahu požadovaném pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  
10.7.4. Nároky Zhotovitele a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení. TDS po projednání s Objednatelem a AD vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 
10.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, dát Zhotoviteli pokyn k zastavení prací a dodávek prováděných v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou zápisem ve stavebním deníku, za současného upozornění Zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  
	10.7.6.  	Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.  
10.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.  
10.7.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  
10.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 
10.7.10. 	TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla. 
10.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 
10.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 
10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
10.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.  
Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 
11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD projektanta a koordinátora BOZP.  
11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 
11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 
11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 
11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
11.6. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat Objednateli v jednom datovém a v jednom tištěném vyhotovení. 
11.7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.9. této smlouvy. 
11.8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla. 
11.9. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 
Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
12.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 
12.2. 	POJIŠTĚNÍ 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu: 
Pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění ve výši 51.900.000Kč . Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s. , člen holdingu ČSOB, číslo pojistné smlouvy.............Zhotovitel předložil Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy k ověření, že Zhotovitel udržuje pojistnou smlouvu v platnosti. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli. 
12.3.  	NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  
Článek XIII. Předání díla 
13.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  
13.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  
13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li v této smlouvě uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
?	Bankovní záruku podle čl. XVI. této smlouvy (pokud bude pozastávka podle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy nahrazena bankovní zárukou) 
?	doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
?	zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
?	zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
?	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
?	záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
?	doklady o provedení dalších zkoušek v průběhu realizace díla (pokud se uskutečnily), 
?	atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
?	stavební deník; 
?	předpisy k jednotlivým technickým a technologickým zařízením  
?	doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
?	geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán podle přílohy č. VI. této smlouvy; 
?	výrobní projektová dokumentace, pokud byla pořízena; 
?	dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek oproti ověřené DSP ve stavebním řízení; dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) podle přílohy č. IV. této smlouvy; 
?	doklady o individuálním vyzkoušení; 
?	doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
?	Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla. 
Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 
?	označení díla 
?	označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
?	zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
?	prohlášení Objednatele o převzetí díla 
?	datum a místo sepsání protokolu 
?	jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
?	seznam předané dokumentace 
?	soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
?	termín vyklizení staveniště 
?	datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
?	soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 
13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy.     
Článek XIV. Odpovědnost za vady  
14.1. 	Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců (záruční doba). 
14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou, dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 
14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé Zhotoviteli vyúčtovat.  
14.4.     	Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
14.5.     	Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
14.6.    	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 
•	použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval; 
•	dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;  
•	nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;   
•	vyšší mocí. 
14.7.	Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   
14.8.	Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  
14.9.	Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
14.10.	Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 
14.11. 	ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  
14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 14.11.2. této smlouvy a na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy datovou schránkou. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušné kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 14.11.2. této smlouvy.  V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
	14.11.2. 	Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
.........	.	........................................	.....................	.	.............................	........
	14.11.3. 	Objednatel je oprávněn požadovat:  
?	odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
?	odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
?	poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 
14.11.4. 	Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.  
14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  
14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
14.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 
14.12. 	PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
14.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  
	14.12.2. 	Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
14.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.   
14.12.4.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy.  
14.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran 
učiněné elektronicky.  
14.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy.  
14.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  
14.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 
14.13. 	LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
14.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  
14.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace Objednatelem.  
14.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy.  
14.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  
14.14. 	POSKYTNUTÍ SLEVY  
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.  
14.15. 	   V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2635 občanského zákoníku. 
Článek XV. Smluvní pokuty 
15.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
15.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. 
15.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení. 
15.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ a kalendářní den (v případě havárie hodinu) prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den (v případě havárie hodinu) prodlení.  
15.5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
15.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 
15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.5. této smlouvy (zákaz poddodávek), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000.000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 
15.9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení. 
15.10. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
15.12. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem. 
15.13 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  
15.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 
15.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
15.16. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit. 
Článek XVI. Bankovní záruka 
16.1.  Objednatel může rozhodnout, že pozastávka podle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy bude nahrazena bankovní zárukou na částku ve výši pozastávky. V takovém případě bude bankovní záruka respektovat tyto podmínky: 
16.1.1. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Bankovní záruka bude předložena písemnou formou (listinný nebo elektronický originál) zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
16.1.2.  Bankovní záruka bude platná ještě alespoň 30 kalendářních dnů po předpokládaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po odstranění všech vad a nedodělků. 
16.2. 	Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. 
XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 
Článek XVII. Odstoupení od smlouvy  
17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž opakované porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 
17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 
17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 
17.5. 	Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 
17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 
17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 
16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
Článek XVIII. Ochrana informací 
18.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1. a 1.7.2. této smlouvy). 
18.2.   	OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým pod dodavatelům. 
18.3.   	ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR 
1.	Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů - zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
2.	V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů. 
3.	Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
4.	Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.  
5.	Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.  
6.	Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy. 
7.	Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 
8.	Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.  
9.	Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 
10.	Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.  
11.	Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 
12.	Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele. 
13.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 
14.	Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 
Článek XIX. Systém řízení kvality 
19.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.  
19.2.      Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.  
19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001.  
19.4. Doklad o provedené výstupní kontrole podle čl. IX. odst. 9.8. této smlouvy je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy.  
Článek XX. Následná nemožnost plnění 
20.1. 	Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 
20.2. 	Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 
Článek XXI. Vyšší moc 
21.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty. 
21.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    
21.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 
21.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 
Článek XXII. Změny smlouvy 
22.3. 	VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY 
 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle čl. XXII. odst. 22.3. této smlouvy je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat. 
Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí: 
•	„zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva  
•	„novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ. 
•	„zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle ZZVZ, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.  
•	„NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí. 
•	„Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí. 
•	„společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů). 
	22.3.1. 	Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. 
	22.3.2. 	Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem 
Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z následujících důvodů: 
1)	dohodou smluvních stran, 
2)	výpovědí, 
3)	odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ, 
4)	z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
5)	zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce, 
6)	v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
7)	v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu, 
8)	v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 
9)	v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZZVZ. 
Nastane-li některý z důvodů ukončení smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. 
22.3.3. Změna zhotovitele v případě, že původní zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy  
Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení splnit před zahájením plnění smlouvy, a původní zhotovitel tyto podmínky nesplnil, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. 
	22.3.4. 	Postup při změně zhotovitele  
22.3.4.1. V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení (nebo pokud dodavatel druhý v pořadí odmítne smlouvu uzavřít), může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.  
22.3.4.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle čl. XXII. odst. 22.3.4.1. této smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:   
1)	Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, která byla předložena v Nabídce. 
2)	Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel (pokud takové jsou) budou v textu smlouvy zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem: 
a)	dokončeny a předány, nebo 
b)	rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo 
c)	nebyly provedeny.  
Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat. 
3)	Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního zhotovitele. 
4)	Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele. Ve lhůtě plnění lze zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele. 
5)	Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele. 
Článek XXIII. Závěrečná ustanovení 
23.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě na vhodném datovém nosiči.  
23.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
23.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 
23.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Smlouvu lze uzavřít v elektronické podobě. 
23.5. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 
2.1.2. této smlouvy. 
23.6. 	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I.   	ROZPOČET; příloha číslo II.  	HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 
příloha číslo III. 	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST příloha číslo IV. 	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY příloha číslo V. 	VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMETENTACE STAVBY příloha číslo VI. 	GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ A GEOMETRICKÝ PLÁN STAVBY 
23.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 
23.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
23.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
V Brně, dne …………...………..…… 	 V Brně, dne viz el. podpis 

 
_________________________                    __________________________                  za Objednatele 	                           za Zhotovitele 
 plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA 	 	       ...................             ředitel VN Brno 	 	               jednatel 

 

 

 

 

 
 
PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  
ROZPOČET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb	
 Stavba: Z0402024 VN Brno - rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu	
 Zadavatel Vojenská nemocnice Brno IČO: 60555530  Zábrdovická 3/3 DIČ: CZ60555530  61500 Brno - Zábrdovice	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.	IČO: DIČ:	269 61 474		
	Nováčkova 18		CZ26961474		
	 614 00  Brno				
Vypracoval:  Rozpis ceny Celkem	
HSV			29 732 449,28	
PSV			17 132 973,44	
MON			3 807 530,00	
Vedlejší náklady			792 047,28	
Ostatní náklady			435 000,00	
Celkem			51 900 000,00	
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	 12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH 	 12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	 21 %	51 900 000,00 CZK	
Základní DPH 	 21 %	10 899 000,00 CZK	
 Zaokrouhlení 0,00 CZK	
 Cena celkem s DPH 62 799 000,00 CZK	
 v dne 
 Za zhotovitele	Za objednatele	
Rekapitulace dílčích částí
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní  DPH	DPH celkem	Cena celkem	%	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	835 000,00	175 350,00	1 010 350,00	2	
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	835 000,00	175 350,00	1 010 350,00	2	
	Stavební objekt			0,00			
SO 01	Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu	0,00	51 065 000,00	10 723 650,00	61 788 650,00	98	
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	34 154 049,67	7 172 350,43	41 326 400,10	66	
D.1.4.a	Vytápění	0,00	2 885 474,00	605 949,54	3 491 423,54	6	
D.1.4.c	Vzduchotechnika	0,00	3 383 150,88	710 461,68	4 093 612,56	7	
D.1.4.e	Zdravotechnika	0,00	2 712 278,45	569 578,47	3 281 856,92	5	
D.1.4.g	Silnoproud	0,00	2 415 352,00	507 223,92	2 922 575,92	5	
D.1.4.h	Slaboproud	0,00	4 064 909,00	853 630,89	4 918 539,89	8	
D.1.4.ch	Lokální detekce požáru	0,00	1 449 786,00	304 455,06	1 754 241,06	3	
Celkem za stavbu	0,00	51 900 000,00	10 899 000,00	62 799 000,00	100	
Popis stavby: Z0402024 - VN Brno - rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu
Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady stavby
Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.4.a - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.e - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.g - Silnoproud
Popis rozpočtu: D.1.4.h - Slaboproud
Popis rozpočtu: D.1.4.ch - Lokální detekce požáru
Rekapitulace dílů
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
_1	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			350 442,18	0,7	
_1	Kabeláž :	HSV			966 268,00	1,9	
_1	Přístupový systém :	HSV			1 082 415,00	2,1	
_1	Zařízení kotelny	HSV			648 833,00	1,3	
_2	722 - Vnitřní vodovod	HSV			526 047,94	1,0	
_2	Armatury	HSV			147 482,00	0,3	
_2	Rozváděče RH obsahuje :	HSV			304 808,00	0,6	
_2	Systém sestra-pacient :	HSV			1 332 340,00	2,6	
_3	724 - Strojní zařízení	HSV			104 010,51	0,2	
_3	Datové rozvody + WI-FI + zvonkový tablo :	HSV			1 392 594,00	2,7	
_3	Potrubí, izolace, nátěry	HSV			911 879,00	1,8	
_3	Rozváděč RPO obsahuje :	HSV			300 862,00	0,6	
_4	713 - Izolace tepelné	HSV			125 992,36	0,2	
_4	Cirkulační čerpadla	HSV			88 962,00	0,2	
_4	Ostatní náklady :	HSV			257 560,00	0,5	
_4	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :	HSV			250 334,00	0,5	
_5	767 - Konstrukce zámečnícké	HSV			36 470,64	0,1	
_5	Otopné plochy a konvektory	HSV			366 934,00	0,7	
_5	Svítidla, stropní vývody, apod… společných prostor :	HSV			468 080,00	0,9	

_6	725 - Zařizovací předměty	HSV			1 569 314,82	3,0	
_6	Ostatní náklady	HSV			721 384,00	1,4	
_6	Ostatní náklady :	HSV			125 000,00	0,2	
1	Zemní práce	HSV			413 739,09	0,8	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			574 425,13	1,1	
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			20 764,50	0,0	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 435 723,28	2,8	
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 918 593,99	3,7	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			906 201,39	1,7	
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			110 783,97	0,2	
46	Zpevněné plochy	HSV			84 673,70	0,2	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 161 213,17	2,2	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 599 059,81	5,0	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			880 629,38	1,7	
64	Výplně otvorů	HSV			334 721,00	0,6	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			519 933,84	1,0	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			373 519,91	0,7	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 787 115,49	5,4	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 194 272,29	2,3	
EF 1	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			24 562,00	0,0	
EF 2	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			35 305,00	0,1	

EF 3ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍHSV49 245,250,1							
EF 4	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			44 906,00	0,1	
EF 5	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			49 245,25	0,1	
EF 6	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			31 557,00	0,1	
EF 7	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			32 902,00	0,1	
EF 8	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			17 125,00	0,0	
EF 9	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	HSV			17 125,00	0,0	
711	Izolace proti vodě	PSV			946 697,16	1,8	
712	Povlakové krytiny	PSV			200 613,47	0,4	
713	Izolace tepelné	PSV			1 159 732,82	2,2	
725	Zařizovací předměty	PSV			50 499,00	0,1	
736	Podlahové vytápění	PSV			81 379,81	0,2	
7421	Lokální detekce požáru (LDP)	PSV			1 449 786,00	2,8	
762	Konstrukce tesařské	PSV			79 581,99	0,2	
764	Konstrukce klempířské	PSV			226 266,32	0,4	
765	Krytiny tvrdé	PSV			62 529,36	0,1	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 951 421,57	3,8	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 312 130,22	6,4	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 234 335,90	2,4	
770	Ostatní výrobky	PSV			2 615 672,85	5,0	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			244 566,96	0,5	

776Podlahy a stěny povlakovéPSV1 269 741,112,4							
781	Obklady keramické	PSV			783 098,88	1,5	
783	Nátěry	PSV			168 058,20	0,3	
784	Malby	PSV			267 126,72	0,5	
786	Zastiňující technika	PSV			597 877,00	1,2	
EF 10	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			36 803,80	0,1	
EF 11	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			36 345,80	0,1	
EF 12	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			18 831,00	0,0	
EF 13	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			19 438,00	0,0	
EF 14	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			20 374,00	0,0	
EF 15	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			62 738,00	0,1	
EF 16	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			17 125,00	0,0	
EF 17	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			17 125,00	0,0	
EF 18	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			17 125,00	0,0	
EF 19	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			31 498,00	0,1	
EF 20	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			17 125,00	0,0	
EF 21	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	PSV			17 125,00	0,0	
EF 24	ODVĚTRÁNÍ KUŘÁRNY	PSV			53 327,00	0,1	
EF 25	ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOTI -  BIOLOGICKÉHO ODPADU	PSV			66 877,50	0,1	
1.	Větrání výtahové šachty	MON			17 064,00	0,0	
ACC 1.	CHLAZENÍ BUDOVY VN	MON			1 667 269,00	3,2	

ACC 2.	CHLAZENÍ ROZVODNY ELE	MON			105 726,00	0,2	
AHU 1.	VĚTRÁNÍ 1.PP	MON			243 935,00	0,5	
M23	Montáže potrubí	MON			39 599,00	0,1	
M33	Montáže dopravních zařízení a vahvýtahy	MON			1 510 658,00	2,9	
SF 1.	VĚTRÁNÍ CHÚC	MON			158 088,00	0,3	
SF 2.	VĚTRÁNÍ KOTELNY	MON			65 191,00	0,1	
999	Poplatky za skládky	PSU			663 489,83	1,3	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 373 603,56	2,6	
999.	Ostatní náklady	VN			392 047,28	0,8	
VN	Vedlejší náklady	VN			400 000,00	0,8	
ON	Ostatní náklady	ON			435 000,00	0,8	
Cena celkem					51 900 000,00	100,0	
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S:	Z0402024	VN Brno - rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu	
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady stavby	
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN	Vedlejší náklady			400 000,00		
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor					RTS 25/ I	
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor					RTS 25/ I	
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.			
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor					RTS 25/ I	
	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.			
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor					RTS 25/ I	
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.			
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště 	Soubor					RTS 25/ I	
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.			
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor					RTS 25/ I	
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.			
7	005122010R	Provoz objednatele 	Soubor					RTS 25/ I	
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nichž se stavební práce provádí.	nebo v případech nepřerušeného provo	zu v objektech v 			
8	005124010R	Koordinační činnost 			RTS 25/ I			
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
Díl: ON	Ostatní náklady					
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor					RTS 25/ I	
	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor					RTS 25/ I	
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S:	Z0402024	VN Brno - rekonstrukce lůžkové části externího pavilonu	
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady stavby	
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.		
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 	Soubor					RTS 25/ I	
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).		
12	00523  R				RTS 25/ I		
	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provede nezbytné.	ní díla 			
13	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor						RTS 25/ I	
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor						RTS 25/ I	
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení  	Soubor						RTS 25/ I	
	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor						RTS 25/ I	
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.				
17	005261R1	Fotodokumentace	Soubor						Vlastní	
Celkem						

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1	Zemní práce					
1	100001500R00	Dočištění stěny pro jakoukoliv třídu horniny	m2				800-1	RTS 25/ I	
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3				800-1	RTS 25/ I	
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3				800-1	RTS 25/ I	
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3				800-1	RTS 25/ I	
5	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3				800-1	RTS 25/ I	
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3				800-1	RTS 25/ I	
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3				800-1	RTS 25/ I	
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3				800-1	RTS 25/ I	
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem	m3				800-1	RTS 25/ I	
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4	m3				800-1	RTS 25/ I	
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3				800-1	RTS 25/ I	
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3				800-1	RTS 25/ I	
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2				800-1	RTS 25/ I	
14	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do  1:5	m2				823-1	RTS 25/ I	
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3				800-1	RTS 25/ I	
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
16	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí 	m3				801-1	RTS 25/ I	
17	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3				800-2	RTS 25/ I	
18	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  	m3				800-2	RTS 25/ I	
19	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3				801-1	RTS 25/ I	
20	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3				801-1	RTS 25/ I	
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2				801-1	RTS 25/ I	
23	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
24	274272160RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 25/30	m2				801-1	RTS 25/ I	
25	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3				801-1	RTS 25/ I	
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2				801-1	RTS 25/ I	
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2				801-1	RTS 25/ I	
28	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  	t				821-1	RTS 25/ I	
29	274361022R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
30	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3				801-1	RTS 25/ I	
31	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3				801-1	RTS 25/ I	
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2				801-1	RTS 25/ I	
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2				801-1	RTS 25/ I	
34	275361214R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, B500B, průměr do 12 mm,  ,  	t				821-1	RTS 25/ I	
35	380931114R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus				801-4	RTS 25/ I	
36	624602111R00	Tmelení spár šířky 10 mm, hloubky 7 mm, tmelem polymerovým spárovacím	m				801-4	RTS 25/ I	
37	271961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm, STYRODUR	m2					Vlastní	
38	27427295R01	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 100 mm, výplň tvárnic betonem C 25/30	m2					Vlastní	
39	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh				STROJ	RTS 25/ I	
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
40	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3				800-2	RTS 25/ I	
41	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3				800-2	RTS 25/ I	
42	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m				827-1	RTS 25/ I	
43	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  	m2				800-2	RTS 25/ I	
44	2101	D+M vyústění odvodnění trativodu	kompl					Vlastní	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
45	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m				SPCM	RTS 25/ I	
46	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2				SPCM	RTS 25/ I	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
47	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3				801-4	RTS 25/ I	
48	311112330RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30	m2				801-1	RTS 25/ I	
49	311271174R00	2 W/m2.K	m2				801-1	RTS 25/ I	
50	311271175R00	2 W/m2.K	m2				801-1	RTS 25/ I	
51	311271177R00	1 W/m2.K	m2				801-1	RTS 25/ I	
52	311271182R00	9 W/m2.K	m2				801-1	RTS 25/ I	
53	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t				801-1	RTS 25/ I	
54	311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva	m				801-1	RTS 25/ I	
55	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm	kus				801-4	RTS 25/ I	
56	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3				801-1	RTS 25/ I	
57	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
58	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
59	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
60	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
61	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
62	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
63	624602111R00	Tmelení spár šířky 10 mm, hloubky 7 mm, tmelem polymerovým spárovacím	m				801-4	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
64	321961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm, STYRODUR	m2					Vlastní	
65	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm	m2				AP-HSV	RTS 25/ I	
66	13383315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
67	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
68	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
69	13482710R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; s = 5,3 mm; t = 8,0 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
70	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
71	13482725R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6,2 mm; t = 9,8 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
72	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh				STROJ	RTS 25/ I	
Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					
73	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 100 mm, desky diamant, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI  60	m2				801-1	RTS 25/ I	
74	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2				801-1	RTS 25/ I	
75	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky diamant, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI  60	m2				801-1	RTS 25/ I	
76	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2				801-1	RTS 25/ I	
77	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky diamant, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
78	342090212R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus				801-1	RTS 25/ I	
79	342090712R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus				801-1	RTS 25/ I	
80	342263991RW4	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, protipožární impregnovanou, na obou stranách příčky dvojitě	m2				801-1	RTS 25/ I	
81	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m				801-4	RTS 25/ I	
82	342941112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m				801-1	RTS 25/ I	
83	347016113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny  65 mm, požární odolnost EI 15	m2				801-1	RTS 25/ I	
84	347016211R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky diamant, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45	m2				801-1	RTS 25/ I	
85	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky diamant, dvojité opláštění, bez izolace	m2				801-1	RTS 25/ I	
86	3470812444R	Předstěny SDK tl. 150 - 285 mm	m2					Vlastní	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
87	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus				801-4	RTS 25/ I	
88	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3				801-1	RTS 25/ I	
89	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2				801-1	RTS 25/ I	
90	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
91	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
92	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2				801-1	RTS 25/ I	
93	411387531R00	 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových 	kus				801-4	RTS 25/ I	
94	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus				801-4	RTS 25/ I	
95	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
96	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
97	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh				STROJ	RTS 25/ I	
Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					
98	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2				801-1	RTS 25/ I	
99	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2				801-1	RTS 25/ I	
100	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2				801-1	RTS 25/ I	
Díl: 46	Zpevněné plochy					
101	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2				800-1	RTS 25/ I	
102	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2				822-1	RTS 25/ I	
103	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2				822-1	RTS 25/ I	
104	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m				822-1	RTS 25/ I	
105	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3				822-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
106	460001R	Vyspravení stávaj. asfaltové plochy a zhotovení nového asfaltu pod schodištěm vč. skladby	kompl					Vlastní	
107	5648611195R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 16-32 mm	m2					Vlastní	
108	59246154R	 mm; dl = 600,0 mm; š = 600,0 mm; povrch: reliéfní, přírodní, impregnace; zátěž: pochozí	m2				SPCM	RTS 24/ II	
109	693650463R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 600 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 315,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 50,0 kN/m	m2				SPCM	RTS 25/ I	
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
110	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový	m2				801-1	RTS 25/ I	
111	602011134R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
112	602013111RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
113	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková penetrace stěn akrylátová	m2				801-1	RTS 25/ I	
114	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2				801-1	RTS 25/ I	
115	610991111R00	-0,2 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
116	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2				801-1	RTS 25/ I	
117	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad	m2				801-1	RTS 25/ I	
118	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2				801-1	RTS 25/ I	
119	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2				801-1	RTS 25/ I	
120	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2				801-4	RTS 25/ I	
121	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2				801-4	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
122	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  	m2				801-4	RTS 25/ I	
123	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2				801-4	RTS 25/ I	
124	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2				801-1	RTS 25/ I	
125	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m				801-1	RTS 25/ I	
126	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2				801-1	RTS 25/ I	
127	912      R00	Hzs - Zedník tř.7	h				Prav.M	RTS 25/ I	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
128	602011180RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a algicidními přísadami, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, bílá	m2				801-1	RTS 25/ I	
129	602011188RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2				801-1	RTS 25/ I	
130	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2				801-1	RTS 25/ I	
131	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační nátěr stěn akrylátový	m2				801-1	RTS 25/ I	
132	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2				801-1	RTS 25/ I	
133	622325522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2				801-1	RTS 25/ I	
134	622325730RV1	Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
135	622325735RV1	Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
136	622325737RZ1	Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
137	622325553RV1	Zateplení ostění  , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2				801-1	RTS 25/ I	
138	622325853RV1	Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2				801-1	RTS 25/ I	
139	622325563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
140	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2				801-1	RTS 25/ I	
141	622391423R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 200 mm, s dodávkou injektážních kotev pro izolant z minerálních desek	m2				801-1	RTS 25/ I	
142	622325017R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 200 mm	m				801-1	RTS 25/ I	
143	622319031RT5	Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x8 mm, pro spáru šířky 7-12 mm	m				801-1	RTS 25/ I	
144	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2				801-4	RTS 25/ I	
145	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2				801-1	RTS 25/ I	
146	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m				801-1	RTS 25/ I	
147	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2				801-1	RTS 25/ I	
148	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
149	60000221	Oprava stávaj. soklové omítky v případě manipulace / poškození	kompl					Vlastní	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
150	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m				801-1	RTS 25/ I	
151	631312711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  	m3				801-1	RTS 25/ I	
152	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
153	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
154	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3				801-4	RTS 25/ I	
155	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3				801-1	RTS 25/ I	
156	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3				801-1	RTS 25/ I	
157	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2				801-1	RTS 25/ I	
158	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2				801-1	RTS 25/ I	
159	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t				801-1	RTS 25/ I	
160	631571009R00	Násyp  pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah  z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
161	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  	m2				801-1	RTS 25/ I	
162	632421130RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2				801-1	RTS 25/ I	
163	632421490R00	Provedení potěru ve spádu tloušťky 80 mm, bez penetrace podkladu	m2				801-1	RTS 25/ I	
164	632441015RT2	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
165	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů 	m2				801-1	RTS 25/ I	
166	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm	m2				801-1	RTS 25/ I	
167	58556678763R	 mm; pro spádovou vrstvu; tl. vrstvy 15,0 až 80,0 mm	t				SPCM	RTS 25/ I	
Díl: 64	Výplně otvorů					
168	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 700/1970 mm	kus				801-1	RTS 25/ I	
169	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 800/1970 mm	kus				801-1	RTS 25/ I	
170	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha do 2,5 m2	kus				801-1	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
171	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus				801-1	RTS 25/ I	
172	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus				801-1	RTS 25/ I	
173	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 125 mm  šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus				801-1	RTS 25/ I	
174	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus				801-1	RTS 25/ I	
175	55330449R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
176	553308110R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
177	55330812R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 1300 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus					Vlastní	
178	55330813R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 1400 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus					Vlastní	
179	553308210R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
180	553308220R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
181	553308230R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
182	553308320R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
183	553308330R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus				SPCM	RTS 25/ I	
184	5533301125R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus				SPCM	RTS 25/ I	
185	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus				SPCM	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
186	55333011R11	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1300 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus					Vlastní	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
187	941941031R00	 m, výšky do 10 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
188	941941191R00	 m a výšky do 10 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
189	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
190	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
191	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
192	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2				800-3	RTS 25/ I	
193	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,  	m2				800-3	RTS 25/ I	
194	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,  	m2				800-3	RTS 25/ I	
195	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2				800-3	RTS 25/ I	
196	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z umělých vláken	m2				800-3	RTS 25/ I	
197	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2				800-3	RTS 25/ I	
198	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m				800-3	RTS 25/ I	
199	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  šířky do 2 m	m				800-3	RTS 25/ I	
200	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m				800-3	RTS 25/ I	
201	94005R	Přípatek za uchycení lešení na sousedních objektech, OSB+geotextílie	kompl					Vlastní	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
202	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2				801-1	RTS 25/ I	
203	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2				801-1	RTS 25/ I	
204	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2				801-4	RTS 25/ I	
205	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2				801-4	RTS 25/ I	
206	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus				801-1	RTS 25/ I	
207	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus				801-1	RTS 25/ I	
208	95001	Výměna stávaj. protipožárního okna 1500x1500 mm (dmtž stávaj., mntž nové okno vč.  zapravení)	kus					Vlastní	
209	909      R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h				Prav.M	RTS 25/ I	
210	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus				SPCM	RTS 24/ II	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
211	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2				800-1	RTS 25/ I	
212	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2				822-1	RTS 25/ I	
213	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2				822-1	RTS 25/ I	
214	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2				822-1	RTS 25/ I	
215	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m				822-1	RTS 25/ I	
216	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2				800-1	RTS 25/ I	
217	919732111R00	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm	m2				822-1	RTS 25/ I	
218	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3				801-3	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
219	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2				801-3	RTS 25/ I	
220	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2				801-3	RTS 25/ I	
221	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2				801-3	RTS 25/ I	
222	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3				801-3	RTS 25/ I	
223	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2				801-3	RTS 25/ I	
224	963051213R00	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3				801-3	RTS 25/ I	
225	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
226	964052111R00	 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
227	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
228	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
229	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
230	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2				801-3	RTS 25/ I	
231	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
232	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
233	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
234	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
235	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
236	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus				801-3	RTS 25/ I	
237	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus				801-3	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
238	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
239	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
240	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
241	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
242	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
243	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
244	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  	m				801-3	RTS 25/ I	
245	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
246	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
247	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
248	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
249	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m				801-3	RTS 25/ I	
250	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3				801-3	RTS 25/ I	
251	972054691R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm	m3				801-3	RTS 25/ I	
252	973031151R00	 m2	m3				801-3	RTS 25/ I	
253	973031334R00	 m2, hloubky do 150 mm	kus				801-3	RTS 25/ I	
254	973031335R00	 m2, hloubky do 300 mm	kus				801-3	RTS 25/ I	
255	975022241R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m  při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m	m				801-3	RTS 25/ I	
256	975022341R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m  při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m	m				801-3	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
257	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m  při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m				801-3	RTS 25/ I	
258	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2				801-3	RTS 25/ I	
259	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2				801-3	RTS 25/ I	
260	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2				801-3	RTS 25/ I	
261	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2				801-3	RTS 25/ I	
262	978041103R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou	m2				801-3	RTS 25/ I	
263	978041116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou	m2				801-3	RTS 25/ I	
264	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2				801-3	RTS 25/ I	
265	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2				800-762	RTS 25/ I	
266	96003R	Bourání stávaj. předstěn, vč. likvidace	kompl					Vlastní	
267	964354042R01	Vytvoření kruhových prostupů stropem, vč. všech skladeb	kus					Vlastní	
268	964354042R02	Vytvoření prostupů stropem, vč. vyřezání a vybourání všech skladeb	kus					Vlastní	
269	974031195R	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m					Vlastní	
270	909      R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h				Prav.M	RTS 25/ I	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
271	999281108R00	 vnějších plášťů  výšky do 12 m,  		801-4	RTS 25/ I	
Díl: 711	Izolace proti vodě			
272	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2				800-711	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
273	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2				800-711	RTS 25/ I	
274	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
275	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
276	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
277	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
278	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2				800-711	RTS 25/ I	
279	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti	m2				800-711	RTS 25/ I	
280	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m				800-711	RTS 25/ I	
281	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus				800-711	RTS 25/ I	
282	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m				800-711	RTS 25/ I	
283	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2				800-711	RTS 25/ I	
284	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty	m				800-711	RTS 25/ I	
285	R-711-01	D+M Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) - antivibrační izolace	m2					Vlastní	
286	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2				SPCM	RTS 25/ I	
287	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka:  skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2				SPCM	RTS 25/ I	
288 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%			 800-711	RTS 25/ I	
Díl: 712	Povlakové krytiny					
289	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2				800-711	RTS 25/ I	
290	711777588R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm	kus				800-711	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
291	711777788R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D přes 500 do 1000 mm	kus				800-711	RTS 25/ I	
292	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  dvouvrstvé,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
293	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2				800-711	RTS 25/ I	
294	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2				800-711	RTS 25/ I	
295	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2				800-711	RTS 25/ I	
296	712373121RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,  	m2				800-711	RTS 25/ I	
297	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  PVC	m				800-711	RTS 25/ I	
298	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  PVC	m				800-711	RTS 25/ I	
299	712378101RT4	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus				800-711	RTS 25/ I	
300	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2				800-711	RTS 25/ I	
301	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2				800-711	RTS 25/ I	
302	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2				800-711	RTS 25/ I	
303	712861703RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci	m2				800-711	RTS 25/ I	
304	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2				800-711	RTS 25/ I	
305	712964703R00	Zesílení spár pryžemi  , zesílení koutů, rohů a hran fólií	m				800-711	RTS 25/ I	
306	712997001R00	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m				800-711	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
307	712001R	D+M Opracování prostupů u světlíků vč. vytažení izolací	kus					Vlastní	
308	712002R	Dopojení nové povlakové krytiny ke stávaj. + lokální opravy stávaj. pláště, včetně všech úprav	kompl					Vlastní	
309	712003R	Demontáž stávaj. odvětrání kanalizace na ploché střeše	kus					Vlastní	
310	712731155R	Zesílení povlakové krytiny střech, asfaltový pás samolepící, š. 330 mm	m					Vlastní	
311	1592440461	náběhový klín z EPS 100/100	m					Vlastní	
312	283220013R	 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2				SPCM	RTS 25/ I	
313	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka:  skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2				SPCM	RTS 25/ I	
314	62852269R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka:  skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie	m2				SPCM	RTS 25/ I	
315	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2				SPCM	RTS 25/ I	
316 998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	%			 800-711	RTS 25/ I	
Díl: 713	Izolace tepelné					
317	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  	m2				800-713	RTS 25/ I	
318	713111221RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2				800-713	RTS 25/ I	
319	713111231RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2				800-713	RTS 25/ I	
320	713103211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do  100 mm	m2				800-713	RTS 25/ I	
321	713104113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2				800-713	RTS 25/ I	
322	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2				800-713	RTS 25/ I	
323	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2				800-713	RTS 25/ I	
324	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2				800-713	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
325	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2				800-713	RTS 25/ I	
326	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2				800-713	RTS 25/ I	
327	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2				800-713	RTS 25/ I	
328	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2				800-713	RTS 25/ I	
329	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2				800-713	RTS 25/ I	
330	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m				800-713	RTS 25/ I	
331	713190812R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 50 do 100 mm	m2				800-713	RTS 25/ I	
332	713311221R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou   ploch tvarových, jednovrstvá	m2				800-713	RTS 25/ I	
333	28325002R	 mm; funkce: separační; materiál: PE-LD	m2				SPCM	RTS 25/ I	
334	28375448R	5 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m3				SPCM	RTS 25/ I	
335	283754621R	3 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2				SPCM	RTS 25/ I	
336	28375464R	6 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2				SPCM	RTS 25/ I	
337	28375705R	5 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3				SPCM	RTS 24/ II	
338	28375768.AR	5 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3				SPCM	RTS 24/ II	
339	28375950R	7 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2				SPCM	RTS 25/ I	
340	28375972R	5 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3				SPCM	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
341	28376285R	4 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 33 dB	m2				SPCM	RTS 25/ I	
342	631508592R	3 W/(m.K)	m2				SPCM	RTS 25/ I	
343	631513705R01	Deska z minerální plsti požární, tl. 20 mm	m2					Vlastní	
344 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%			 800-713	RTS 25/ I	
Díl: 725	Zařizovací předměty					
345	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor				800-721	RTS 25/ I	
346	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor				800-721	RTS 25/ I	
347	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor				800-721	RTS 25/ I	
348	7250001R	Demontáž dalších a drobných prvků zařizováků	kompl					Vlastní	
349	7250002R	Demontáž stávajících rozvodů	kompl					Vlastní	
Díl: 736	Podlahové vytápění					
350	7360001R	Elektrické podlahové topení uloženo do lepidla	m2					Vlastní	
351	7360002R	Ovládací čidlo na termostat, D+M	kus					Vlastní	
352 998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%			 800-731	RTS 25/ I	
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
353	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m				800-762	RTS 25/ I	
354	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2				800-762	RTS 25/ I	
355	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2				800-762	RTS 25/ I	
356	762341911R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny  v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2	m2				800-762	RTS 25/ I	
357	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2				800-762	RTS 25/ I	
358	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2				800-762	RTS 25/ I	
359	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m				800-762	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
360	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2				800-762	RTS 25/ I	
361	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2				SPCM	RTS 25/ I	
362 998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%			 800-762	RTS 25/ I	
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
363	764928305R00	Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, výroba (zhotovení) a montáž 	m				800-764	RTS 25/ I	
364	764928306R00	Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž 	m				800-764	RTS 25/ I	
365	764918338R00	Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 1000 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m				800-764	RTS 25/ I	
366	764718303R00	Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 320 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek	m				800-764	RTS 25/ I	
367	764361811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°	kus				800-764	RTS 25/ I	
368	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m				800-764	RTS 25/ I	
369	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m				800-764	RTS 25/ I	
370	764001R	Šetrné rozebrání stávaj. střešních svodů, provizorní uložení a následná zpětná montáž svodů, skrze zvětšení tloušťky KZS	kompl					Vlastní	
371	764002R	Oprava oplechování na fasádě	kompl					Vlastní	
372	5566764	Žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC tl. 0,6 mm, dodávka	m2					Vlastní	
373 998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%			 800-764	RTS 25/ I	
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
374	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2				800-765	RTS 25/ I	
375	765311511RT1	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, segmentový řez tašek	m2				800-765	RTS 25/ I	
376	765313184R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava režná	kus				800-765	RTS 25/ I	
377	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2				800-765	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
378	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů	m2				800-765	RTS 25/ I	
379	76501R	Oplechování kolem nových prvků na střeše vč. dořezání a doplnění krytiny a utěsnění prostupů	kus					Vlastní	
380	7650R	Očištění stávaj. krytiny taškové	kompl					Vlastní	
381 998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%			 800-765	RTS 25/ I	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					
382	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2				800-766	RTS 25/ I	
383	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				800-766	RTS 25/ I	
384	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus				800-766	RTS 25/ I	
385	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus				800-766	RTS 25/ I	
386	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,  	kus				800-766	RTS 25/ I	
387	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel  vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus				800-766	RTS 25/ I	
388	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž 	kus				800-766	RTS 25/ I	
389	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus				800-766	RTS 25/ I	
390	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus				800-766	RTS 25/ I	
391	76601R	D+M Kryty otopných těles, rozměr 1750x400-500x900 mm, laminát	kus					Vlastní	
392	76602R	D+M Kryty otopných těles, rozměr 1000x500x900 mm, laminát	kus					Vlastní	
393	76603R	D+M Kryty otopných těles, rozměr 1750x400x700 mm, laminát	kus					Vlastní	
394	76604R	D+M Kryty otopných těles, rozměr 1750x400-500x950 mm, laminát	kus					Vlastní	
395	76698	D+M Paniková klika ke dveřím	kus					Vlastní	
396	76699.3	Doplnění připravenosti pro interiér (výdřevy pro uchycení nábytku)	m					Vlastní	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
397	76699.4	Konzultace připravenosti pro interiér	hod					Vlastní	
398	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus				SPCM	RTS 25/ I	
399	549146695R	Kování dveřní pro posuvné dveře	kus					Vlastní	
400	60775432R1	 m	m					Vlastní	
401	60775436R1	 m	m					Vlastní	
402	61165002R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus				SPCM	RTS 25/ I	
403	61165003R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus				SPCM	RTS 25/ I	
404	61165004R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus				SPCM	RTS 25/ I	
405	61165012R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus				SPCM	RTS 25/ I	
406	61165013R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus				SPCM	RTS 25/ I	
407	61165095R1	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1300 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož. odolnost EI 30 DP3 - C2	kus					Vlastní	
408	61165095V0	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3, pož.odolnost EW 30 DP3 - C2	kus					Vlastní	
409	61165095V1	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus					Vlastní	
410	61165095V2	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož.odolnost EW 30 DP3	kus					Vlastní	
411	61165095V3	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož.odolnost EI 30 DP3 - C2	kus					Vlastní	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
412	61165095V4	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož.odolnost EI 30 DP3 - C2	kus					Vlastní	
413	61165096R1	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1490 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2	kus					Vlastní	
414	61165096R2	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, sklo, povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, EW 30 DP3 - C2	kus					Vlastní	
415	61165097R1	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1490 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2 se sklem, povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož. odolnost EW 30 DP3 - C2 + koord.	kus					Vlastní	
416	61165097R22	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1490 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2 se sklem, povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká, pož. odolnost EI 30 DP3 C2 + koord.	kus					Vlastní	
417	61165098V0	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1, povrchová úprava:CPL;struktura povrchu: oboustranně hladká; plné křídlo, horní a dolní větrací mříž.	kus					Vlastní	
418	61169702R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus				SPCM	RTS 25/ I	
419	61169703R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus				SPCM	RTS 25/ I	
420 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%			 800-766	RTS 25/ I	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
421	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus				801-4	RTS 25/ I	
422	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu	kus				801-4	RTS 25/ I	
423	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,  	m2				800-767	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
424	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2				800-767	RTS 25/ I	
425	767951114R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 100 do 300 kg	kg				800-767	RTS 25/ I	
426	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg				800-767	RTS 25/ I	
427	7670	Nátěr ocelového schodiště barva šedá	kg					Vlastní	
428	767001R	D+M Kompletní záchytný systém na stávaj. střeše	kompl					Vlastní	
429	7671	Dílenská dokumentace schodiště	kompl					Vlastní	
430	R-7670	D+M Ukončovací přechodový profil Al k výtahové šachtě	kus					Vlastní	
431	R-7671	D+M Hliníkové okno, rozměr 900x2050 mm, izolační trojsklo 3-komorový Al systém, pož.odolnost EI 30 DP1	kus					Vlastní	
432	R-7672	D+M  Interiérová ocelová tyč do stění pr. 50 mm, dl. 1750 mm, barva RAL 9010	kus					Vlastní	
433	R-7673	D+M Hliníkové okno, rozměr 560x1750 mm, izolační trojsklo 3-komorový Al systém, pož.odolnost EI 30 DP1	kus					Vlastní	
434	R-7674	D+M Hliníkové okno, rozměr 850x1750 mm, izolační trojsklo 3-komorový Al systém, pož.odolnost EI 30 DP1	kus					Vlastní	
435	R-7675	D+M Hliníkové výdejní okno výsuvné, fixní, rozměr 1200x1120 mm, bezp. sklo, barva RAL 9010	kus					Vlastní	
436	R-7676	D+M Hliníkové okno, rozměr 1050x500 mm, izolační trojsklo 3-komorový Al systém, pož.odolnost EI 30 DP1	kus					Vlastní	
437	R-7677	D+M Hliníkové okno, rozměr 1750x2050 mm, izolační trojsklo 3-komorový Al systém, pož.odolnost EI 30 DP1	kus					Vlastní	
438	R-7678	D+M Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlé s fixním nadsvětlíkem, rozměr 1500x2950 mm, pož.  odolnost EI 15 DP3 - C2	kus					Vlastní	
439	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg				SPCM	RTS 25/ I	
440 998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%			 800-767	RTS 25/ I	
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
441	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  	m				800-766	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
442	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m				800-766	RTS 25/ I	
443	766629301R00	 m2	kus				800-766	RTS 25/ I	
444	766629302R00	 m2	kus				800-766	RTS 25/ I	
445	766629303R00	 m2	kus				800-766	RTS 25/ I	
446	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  	m				800-766	RTS 25/ I	
447	766711021RT2	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m				800-766	RTS 25/ I	
448	7660001.PL 	Okno plastové jednokřídlé, 6-komorový plastový systém, rozměr 1050x500 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
449	7660002.PL 	Okno plastové otevíravé, sklopné, fixní, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x2050 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
450	7660003.PL 	Okno plastové otevíravé, sklopné, fixní, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x2050 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
451	7660004.PL 	Okno plastové jednokřídlé, 6-komorový plastový systém, rozměr 1000x2050 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
452	7660005.PL 	Okno plastové fixníi, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x1750 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
453	7660006.PL 	Okno plastové otevíravé, sklopné, fixní, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x1750 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
454	7660007.PL 	Okno plastové otevíravé, sklopné, fixní, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x1750 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
455	7660008.PL 	Plastové dveře s fixním oknem, otevíraní dveří: otevíravé levé, otevírání okna: výsuvné, 6komorový, plast. systém, izolační trojsklo, odstín RAL 9010	kus					Vlastní	
456	7660009.PL 	Okno plastové jednokřídlé, 6-komorový plastový systém, rozměr 1750x700 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
457	7660010.PL 	Okno plastové jednokřídlé, 6-komorový plastový systém, rozměr 900x1750 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	
458	7660011.PL 	Okno plastové jednokřídlé, 6-komorový plastový systém, rozměr 900x1750 mm, izolační trojsklo, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010	kus					Vlastní	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
459	7660013.PL 	Vchodové dveře plastové dvoukřídlé s fixem, s PUR výplní, rozměr 1400x2100 mm, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010, včetně zárubně	kus					Vlastní	
460	7660015.PL 	Vchodové dveře plastové dvoukřídlé fixní s nadsvětlíkem, s PUR výplní, rozměr 1500x2700 mm, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010, včetně zárubně	kus					Vlastní	
461	7660016.PL 	Vchodové dveře plastové jednokřídlé fixní s nadsvětlíkem, s PUR výplní, rozměr 1000x2750 mm, odstín vnější RAL 7035, odstín vnitřní RAL 9010, včetně zárubně	kus					Vlastní	
462 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%			 800-766	RTS 25/ I	
Díl: 770	Ostatní výrobky					
463	77001	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlé s fixem a světlíkem, rozměr 2070x3000 mm, RAL 9010, pož.  odolnost	kus					Vlastní	
464	77002	D+M Světlovod referenční standart pr. 530 mm	kus					Vlastní	
465	77003	D+M Světlovod referenční standart pr. 350 mm	kus					Vlastní	
466	77004	D+M Zařízení pro odvod kouře a tepla pro ploché střechy s kopulí, rozměr 800x1500 mm, izolační dvojsklo, kování, odstín bílý	kus					Vlastní	
467	77005	D+M Plastový světlík s kopulí, rozměr 1200x800 mm, izolační dvojsklo, kování, odstín bílý	kus					Vlastní	
468	77006	D+M Protipožární půdní schody se zateplením, pož. odolnost EI45	kus					Vlastní	
469	77007	D+M Požární roleta, pož. odolnost EW 30	kus					Vlastní	
470	77007.1	D+M Purenit k požární roletě	kus					Vlastní	
471 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%			 800-766	RTS 25/ I	
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
472	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 	m2				800-771	RTS 25/ I	
473	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2				800-771	RTS 25/ I	
474	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m				800-771	RTS 25/ I	
475	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m				800-771	RTS 25/ I	
476	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2				800-771	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
477	771577111R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 6 mm,  	m				800-771	RTS 25/ I	
478	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m				800-771	RTS 25/ I	
479	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2				800-771	RTS 25/ I	
480	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2				800-771	RTS 25/ I	
481	597642070R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá	m2				SPCM	RTS 24/ II	
482 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%			 800-771	RTS 25/ I	
Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové					
483	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2				800-775	RTS 25/ I	
484	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2				800-775	RTS 25/ I	
485	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2				800-775	RTS 25/ I	
486	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m				800-775	RTS 25/ I	
487	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m				800-775	RTS 25/ I	
488	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2				800-775	RTS 25/ I	
489	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2				800-775	RTS 25/ I	
490	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců	m				800-775	RTS 25/ I	
491	776520030RAA	Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná elektrostaticky vodivá, 608 x 608 x 1,7 mm, z čtverců, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová	m2				AP-PSV	RTS 25/ I	
492	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg				SPCM	RTS 25/ I	
493	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo:  voda (disperzní)	kg				SPCM	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
494	28342459R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; samolepicí; ořech, buk, světlý buk	m				SPCM	RTS 25/ I	
495	28412303R	 %; RtF: Bfl; - s1	m2				SPCM	RTS 25/ I	
496 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%			 800-775	RTS 25/ I	
Díl: 781	Obklady keramické					
497	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2				800-771	RTS 25/ I	
498	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2				800-771	RTS 25/ I	
499	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2				800-771	RTS 25/ I	
500	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele	m2				800-771	RTS 25/ I	
501	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  	m				800-771	RTS 25/ I	
502	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  	m				800-771	RTS 25/ I	
503	597813746R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch:  hladký, matný; barva: šedá	m2				SPCM	RTS 24/ II	
504 998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			 800-771	RTS 25/ I	
Díl: 783	Nátěry					
505	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2				822-1	RTS 25/ I	
506	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2				800-783	RTS 25/ I	
507	783222120RT2	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva	m2				800-783	RTS 25/ I	
508	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  	m2				800-783	RTS 25/ I	
509	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  	m2				800-783	RTS 25/ I	
510	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2				800-783	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
511	783881260R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový	m2				800-783	RTS 25/ I	
512	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2				800-783	RTS 25/ I	
Díl: 784	Malby					
513	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2				800-784	RTS 25/ I	
514	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2				800-784	RTS 25/ I	
515	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2				800-784	RTS 25/ I	
516	784115212R00	Malby z malířských směsí  ,  , bělost 82 %, dvojnásobné	m2				800-784	RTS 25/ I	
517	784115512R00	Malby z malířských směsí protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné	m2				800-784	RTS 25/ I	
518	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné	m2				800-784	RTS 25/ I	
Díl: 786	Zastiňující technika					
519	R-78601	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 900x2050 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
520	R-78602	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 560x1750 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
521	R-78603	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 850x1750 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
522	R-78604	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 1750x2050 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
523	R-78605	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 1750x1750 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
524	R-78606	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 900x1750 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
525	R-78607	D+M Venkovní žaluzie Z-70 (motorické), rozměr 1000x2050 cm, RAL 9006, vč. doplňků a dopravy	kus					Vlastní	
Díl: M23	Montáže potrubí					
526	M231	Demontáž plynového potrubí	m					Vlastní	
527	M332	Revizní zpráva plynovodu	kompl					Vlastní	
528	M333	Projekt DSPS plynovodu	kompl					Vlastní	
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
529	R-M33-0001	D + M Výtah LTV 1600	Soubor					Vlastní	
Díl: 999	Poplatky za skládky					
530	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
531	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
532	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
533	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
534	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
535	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
536	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
537	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
538	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
539	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
540	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
541	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
542	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
543	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 25/ I	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
544	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t				801-3	RTS 25/ I	
545	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				801-3	RTS 25/ I	
546	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t				801-3	RTS 25/ I	
547	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				801-3	RTS 25/ I	
548	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				801-3	RTS 25/ I	

R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
549	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t				800-6	RTS 25/ I	
Celkem					

			
R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: _1	Zařízení kotelny					
1	Pol__0001	Nástěnný kondenzační kotel - plynový spotřebič typu C (přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin do, venkovního prostředí). Kaskádová regulace, s výměníkem tepla ALU+SI plus s ušlechtilou kondenzační	ks					Vlastní	
2	Pol__0002	Plynový kohout s integrovaným protipožárním ventilem R1/2"	ks					Vlastní	
3	Pol__0003	Kaskádová regulace až pro 4 kotle, včetně čidla pro termohydraulický rozdělovač	ks					Vlastní	
4	Pol__0004	Kaskádová regulace pro otopný okruh včetně čidla a pro ohřev teplé vody, včetně čidla teplé vody,, připojovací konektory a montážní materiál do jímky, kabeláž.	ks					Vlastní	
5	Pol__0005	Expanzní nádoba - tlakově uzavřená membránová expanzní nádoba	ks					Vlastní	
6	Pol__0006	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. - dimenze napojení DN 32	ks					Vlastní	
7	Pol__0007	Rozdělovač/sběrač.	ks					Vlastní	
8	Pol__0008	Zásobník teplé vody - s topným hadem	ks					Vlastní	
9	Pol__0009	Dopouštěcí stanice - vstupní a výstupní kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr,, manometr	ks					Vlastní	
10	Pol__0010	Demineralizační sada - patrona s kapacitou 8000 1x°dH, náhadní náplň, připojovací sada s měřičem, vodivosti, elektronický vodoměr a konzole na stěnu	ks					Vlastní	
11	Pol__0011	m; DN80 /125	ks					Vlastní	
12	Pol__0012	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL reviz. T-kus s měř. otv. reduk.; DN110/160naDN80/125	ks					Vlastní	
13	Pol__0013	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 - 1m; DN110/160	ks					Vlastní	
14	Pol__0014	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL revizní T-kus s odtokem; DN110/160	ks					Vlastní	
15	Pol__0015	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - Sifon  (pro přetlak) vývod 40mm	ks					Vlastní	
16	Pol__0016	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce ZUB Hadice pro odvod kondenzátu 1bm	ks					Vlastní	
17	Pol__0017	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL trubka s hrdlem; 1m; DN110/160	ks					Vlastní	
18	Pol__0018	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160	ks					Vlastní	
19	Pol__0019	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL revizní koleno 87°; DN110/160	ks					Vlastní	
20	Pol__0020	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce -LIL koleno 87°; DN110/160	ks					Vlastní	
21	Pol__0021	Kouřovod - koncentrický, trubka v trubce - LIL revizní T-kus; DN110/160	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
22	Pol__0022	Kouřovod - Silikonové mazivo 50g	ks					Vlastní	
23	Pol__0023	Kouřovod - Objímka M8/10; DN160	ks					Vlastní	
24	Pol__0024	Komín - Konzola 300mm 27/18	ks					Vlastní	
25	Pol__0025	Komín - LIL pateční koleno 87°; DN110/160	ks					Vlastní	
26	Pol__0026	Komín - LIL trubka s hrdlem; 1m; DN110/160	ks					Vlastní	
27	Pol__0027	Komín - Distanční objímka universální 1 bal-6 ks	ks					Vlastní	
28	Pol__0028	Komín - Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN110	ks					Vlastní	
Díl: _2	Armatury					
29	Pol__0029	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, , s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
30	Pol__0030	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, , s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
31	Pol__0031	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
32	Pol__0032	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
33	Pol__0033	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, ATEST na pitnou vodu, PN10, tmax., 80°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
34	Pol__0034	Filtr - Závitový, z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
35	Pol__0035	Filtr - Závitový, z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
36	Pol__0036	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, ATEST na pitnou vodu, PN16, tmax.  80°C, , tmin -10°C	ks					Vlastní	
37	Pol__0037	Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE,, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks					Vlastní	
38	Pol__0038	Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE,, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
39	Pol__0039	Trojcestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové oceli, s, těsněním EPDM. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C.	ks					Vlastní	
40	Pol__0040	Servopohon pro trojcestný ventil	ks					Vlastní	
41	Pol__0041	Ultrazvukový kompaktní měřič chladu - s rádiovým odečtem, l=110 mm,  tlaková ztráta max  10kPa, PN16,, 230V, vč. montážní sady, jímek pro snímače teploty, šroubení, síťové napájení.	ks					Vlastní	
42	Pol__0042	Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
43	Pol__0043	Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C	ks					Vlastní	
44	Pol__0044	Teploměr	ks					Vlastní	
45	Pol__0045	Tlakoměr	ks					Vlastní	
Díl: _3	Potrubí, izolace, nátěry					
46	Pol__0046	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované  - včetně prořezu a všech, přídavků pro svářecí a těsnící materiály.	bm					Vlastní	
47	Pol__0047	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované  - včetně prořezu a všech, přídavků pro svářecí a těsnící materiály.	bm					Vlastní	
48	Pol__0048	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované  - včetně prořezu a všech, přídavků pro svářecí a těsnící materiály.	bm					Vlastní	
49	Pol__0049	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované  - včetně prořezu a všech, přídavků pro svářecí a těsnící materiály.	bm					Vlastní	
50	Pol__0050	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro, provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel	bm					Vlastní	
51	Pol__0051	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro, provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel	bm					Vlastní	
52	Pol__0052	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro, provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel	bm					Vlastní	

R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
53	Pol__0053	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro, provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel	bm					Vlastní	
54	Pol__0054	Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta, (standardně červeno-hnědá)	bm					Vlastní	
55	Pol__0055	Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta, (standardně červeno-hnědá)	bm					Vlastní	
56	Pol__0056	Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta, (standardně červeno-hnědá)	bm					Vlastní	
57	Pol__0057	Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta, (standardně červeno-hnědá)	bm					Vlastní	
58	Pol__0058	Proplach potrubí - vodou.	bm					Vlastní	
Díl: _4	Cirkulační čerpadla					
59	Pol__0059	Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí z lítiny,, PN10, závitové připojení G6/4 , s elektronickou regulací, včetně čidla dif. tlaku.Pro větev	ks					Vlastní	
60	Pol__0060	Pryžový kompenzátor pro napojení cirkulačního čerpadla.	ks					Vlastní	
61	Pol__0061	Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí z lítiny,, PN10, závitové připojení G1, s elektronickou regulací, včetně čidla dif. tlaku.Pro větev ohřevu	ks					Vlastní	
62	Pol__0062	Pryžový kompenzátor pro napojení cirkulačního čerpadla.	ks					Vlastní	
Díl: _5	Otopné plochy a konvektory					
63	Pol__0063	Elektrické otopné těleso - deskové, včetně elektrického topidla, síťová napájení, včetně termostatu	ks					Vlastní	
64	Pol__0064	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
65	Pol__0065	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
66	Pol__0066	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
67	Pol__0067	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
68	Pol__0068	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
69	Pol__0069	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
70	Pol__0070	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
71	Pol__0071	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
72	Pol__0072	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
73	Pol__0073	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
74	Pol__0074	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
75	Pol__0075	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
76	Pol__0076	Deskové otopné těleso - s vestavěným termostatickým ventilem, umožňující levé nebo pravé spodní, připojení na rozvod otopné soustavy.	ks					Vlastní	
77	Pol__0077	Přímé H šroubení - pro napojení otopného tělesa na potrubní rozvod.	ks					Vlastní	
78	Pol__0078	Proplach otopných těles vodou.	ks					Vlastní	
79	Pol__0079	Termostatická hlavice.	ks					Vlastní	
Díl: _6	Ostatní náklady					
80	Pol__0080	Náklady na dopravu	ks					Vlastní	
81	Pol__0081	Vnitrostaveništní doprava	ks					Vlastní	
82	Pol__0082	Montážní mechanismy, plošiny, lešení	ks					Vlastní	
83	Pol__0083	Předávací dokumentace	ks					Vlastní	
84	Pol__0084	Revize a nastavení průtoku čerpadel	ks					Vlastní	
85	Pol__0085	Vyregulování systému vytápění	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.a	Vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
86	Pol__0086	Nastavení termostatických ventilů na tělesech.	ks					Vlastní	
87	Pol__0087	Stavební přípomocy - drážky.	hod					Vlastní	
88	Pol__0088	Montážní materiál včetně výpočtu kluzných a pevných bodů v závislosti na typu montážního materiálu	ks					Vlastní	
89	Pol__0089	Spojovací materiál	ks					Vlastní	
90	Pol__0090	Těsnící materiál	ks					Vlastní	
91	Pol__0091	Dilatační zkouška	ks					Vlastní	
92	Pol__0092	Tlaková zkouška	ks					Vlastní	
93	Pol__0093	Stavební výpomoc	hod					Vlastní	
94	Pol__0094	El. revize všech zařízení a komunikační kabeláže	ks					Vlastní	
95	Pol__0095	Topná zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod.	ks					Vlastní	
96	Pol__0096	Napuštění a odvzdušnění systému	hod					Vlastní	
97	Pol__0097	Projektová dokumentace pro provedení stavby.	ks					Vlastní	
98	Pol__0098	Výrobní dokumentace.	ks					Vlastní	
99	Pol__0099	Dokumentace skutečného provedení stavby.	ks					Vlastní	
100	Pol__0100	Zaměření před objednáním.	ks					Vlastní	
101	Pol__0101	Rezerva na koordinace.	ks					Vlastní	
102	Pol__0102	Zprovoznění čerpadel - dodavatelem.	ks					Vlastní	
103	Pol__0103	Nastavení vyvažovacích ventilů.	ks					Vlastní	
104	Pol__0104	Nastavení 3 cestných regulačních ventilů.	ks					Vlastní	
105	Pol__0105	Demontáž otopných těles.	ks					Vlastní	
106	Pol__0106	Demontáž rozvodů.	bm					Vlastní	
107	Pol__0107	Demontáž zdroje tepla a komínového tělesa.	ks					Vlastní	
Celkem						

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: EF 1	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
1	EF 1.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
2	EF 1.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
3	EF 1.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
4	EF 1.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
5	EF 1.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
6	EF 1.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
7	EF 1.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 2	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
8	EF 2.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
9	EF 2.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
10	EF 2.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
11	EF 2.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
12	EF 2.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
13	EF 2.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
14	EF 2.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
15	EF 2.602	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
16	EF 2.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
17	EF 2.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 3	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
18	EF 3.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
19	EF 3.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
20	EF 3.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
21	EF 3.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
22	EF 3.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
23	EF 3.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
24	EF 3.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
25	EF 3.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
26	EF 3.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
27	EF 3.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
28	EF 3.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
29	EF 3.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
30	EF 3.801	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  ROVNÉ	bm					Vlastní	
31	EF 3.802	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  TVAROVKY	bm					Vlastní	
Díl: EF 4	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
32	EF 4.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
33	EF 4.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
34	EF 4.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
35	EF 4.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
36	EF 4.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
37	EF 4.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
38	EF 4.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
39	EF 4.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
40	EF 4.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
41	EF 4.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 5	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
42	EF 5.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
43	EF 5.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
44	EF 5.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
45	EF 5.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
46	EF 5.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
47	EF 5.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
48	EF 5.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
49	EF 5.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
50	EF 5.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
51	EF 5.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
52	EF 5.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
53	EF 5.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
54	EF 5.801	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  ROVNÉ	bm					Vlastní	
55	EF 5.802	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  TVAROVKY	bm					Vlastní	
Díl: EF 6	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
56	EF 6.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
57	EF 6.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
58	EF 6.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
59	EF 6.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
60	EF 6.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
61	EF 6.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
62	EF 6.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
63	EF 6.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 7	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
64	EF 7.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
65	EF 7.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
66	EF 7.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
67	EF 7.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
68	EF 7.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
69	EF 7.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
70	EF 7.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
71	EF 7.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 8	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
72	EF 8.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
73	EF 8.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
74	EF 8.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
75	EF 8.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
76	EF 8.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 9	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
77	EF 9.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
78	EF 9.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
79	EF 9.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
80	EF 9.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
81	EF 9.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 10	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
82	EF 10.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
83	EF 10.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
84	EF 10.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
85	EF 10.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
86	EF 10.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
87	EF 10.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
88	EF 10.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
89	EF 10.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
90	EF 10.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
91	EF 10.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
92	EF 10.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
93	EF 10.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
94	EF 10.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 11	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
95	EF 11.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
96	EF 11.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
97	EF 11.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
98	EF 11.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
99	EF 11.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
100	EF 11.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
101	EF 11.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
102	EF 11.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
103	EF 11.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
104	EF 11.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
105	EF 11.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
106	EF 11.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
107	EF 11.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 12	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
108	EF 12.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
109	EF 12.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
110	EF 12.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
111	EF 12.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
112	EF 12.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
113	EF 12.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
114	EF 12.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
115	EF 12.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 13	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
116	EF 13.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
117	EF 13.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
118	EF 13.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
119	EF 13.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
120	EF 13.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
121	EF 13.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
122	EF 13.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 14	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
123	EF 14.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
124	EF 14.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
125	EF 14.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
126	EF 14.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
127	EF 14.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
128	EF 14.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
129	EF 14.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 15	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
130	EF 15.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
131	EF 15.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
132	EF 15.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
133	EF 15.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
134	EF 15.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
135	EF 15.252	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
136	EF 15.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
137	EF 15.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
138	EF 15.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
139	EF 15.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
140	EF 15.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
141	EF 15.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
142	EF 15.703	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
143	EF 15.901	Požární izolace odolnost 45minut - oboustranná - tl. 60mm.	m2					Vlastní	
Díl: EF 16	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
144	EF 16.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
145	EF 16.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
146	EF 16.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
147	EF 16.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
148	EF 16.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 17	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
149	EF 17.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
150	EF 17.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
151	EF 17.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
152	EF 17.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
153	EF 17.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 18	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
154	EF 18.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
155	EF 18.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
156	EF 18.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
157	EF 18.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
158	EF 18.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 19	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
159	EF 19.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
160	EF 19.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
161	EF 19.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
162	EF 19.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
163	EF 19.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
164	EF 19.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
165	EF 19.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
166	EF 19.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: EF 20	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
167	EF 20.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
168	EF 20.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
169	EF 20.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
170	EF 20.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
171	EF 20.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 21	ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
172	EF 21.001	Radiální ventilátor - do podhledu.	ks					Vlastní	
173	EF 21.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
174	EF 21.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
175	EF 21.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
176	EF 21.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: EF 24	ODVĚTRÁNÍ KUŘÁRNY					
177	EF 24.001	Potrubní ventilátor - DN 160 s EC motorem.	ks					Vlastní	
178	EF 24.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
179	EF 24.051	Kruhový tlumič hluku pevný.	ks					Vlastní	
180	EF 24.101	Zpětná klapka.	ks					Vlastní	
181	EF 24.102	Uzavírací klapka těsná se - servopohonem s bezpečnostní funkcí.	ks					Vlastní	
182	EF 24.201	Krycí mřížka přívodní - tahokov - kruhová.Prpustnost 75%.	ks					Vlastní	
183	EF 24.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	
184	EF 24.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
185	EF 24.501	Sací kus 45°, se sýtem proti hmyzu ve straně s úkosem.	ks					Vlastní	
186	EF 24.601	Ohebná hluk-tlumící hadice.	ks					Vlastní	
187	EF 24.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
188	EF 24.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
189	EF 24.901	Tepelně akustická izloace z vaty s oplechováním.	m2					Vlastní	
Díl: EF 25	ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOTI - BIOLOGICKÉHO ODPADU					
190	EF 25.001	Potrubní ventilátor - DN 125 s EC motorem.	ks					Vlastní	
191	EF 25.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
192	EF 25.051	Kruhový tlumič hluku pevný - hygienické provedení.	ks					Vlastní	
193	EF 25.101	Zpětná klapka - těsná - hygienické provedení.	ks					Vlastní	
194	EF 25.251	Talířový ventil odvodní kovový.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
195	EF 25.501	Výfuková hlavice.	ks					Vlastní	
196	EF 25.601	Ohebná hluk-tlumící hadice - metalová.	ks					Vlastní	
197	EF 25.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO - lakované - vnitřní hygienické lakování -, stříbro.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
198	EF 25.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO - lakované - vnitřní hygienické lakování -, stříbro.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
199	EF 25.901	Požární izolace odolnost 45minut - oboustranná - tl. 60mm.	m2					Vlastní	
Díl: ACC 1.	CHLAZENÍ BUDOVY VN					
200	ACC 1.001	VENKOVNÍ CHLADÍCÍ VRV JEDNOTKA - VĚŽOVÁ.	ks					Vlastní	
201	ACE 1.001	Vnitřní nástěnná jednotka.	ks					Vlastní	
202	ACE 1.002	Vnitřní nástěnná jednotka.	ks					Vlastní	
203	ACE 1.004	Vnitřní nástěnná jednotka.	ks					Vlastní	
204	ACE 1.005	Vnitřní kazetová jednotka.	ks					Vlastní	
205	ACE 1.006	Vnitřní kazetová jednotka.	ks					Vlastní	
206	ACE 1.007	Vnitřní kazetová jednotka.	ks					Vlastní	
207	ACE 1.008	Vnitřní kazetová jednotka.	ks					Vlastní	
208	ACE 1.009	CU rozbočka Multi V HP - do výkonu 95,2 kW.	ks					Vlastní	
209	ACE 1.010	CU rozbočka Multi V HP - do výkonu 44,8 kW.	ks					Vlastní	
210	ACE 1.011	CU rozbočka Multi V HP - do výkonu 22,4 kW.	ks					Vlastní	
211	ACE 1.012	Čelní panel pro 4 cestné kazety 620x620.	ks					Vlastní	
212	ACE 1.013	Kabelový ovladač pro vnitřní chladící jednotky.	ks					Vlastní	
213	ACE 1.014	Ocelová modulární konstrukce pro venkovní jednotku.	ks					Vlastní	
214	ACE 1.015	Ochrana CU potrubí proti slunci - exteriér - střecha.	bm					Vlastní	
215	ACE 1.016	Izolovaný prostup střechou.	ks					Vlastní	
216	ACE 1.017	Doplnění chladiva R410a.	kg					Vlastní	
217	ACE 1.018	Spuštění autorizovaným technikem.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
218	ACE 1.019	Kniha chladiva.	ks					Vlastní	
219	ACE 1.020	CU potrubí včetně izolace.	bm					Vlastní	
Díl: ACC 2.	CHLAZENÍ ROZVODNY ELE					
220	ACC 1.001	VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA SPLIT.	ks					Vlastní	
221	ACE 2.001	Vnitřní nástěnná jednotka.	ks					Vlastní	
222	ACE 2.002	Kabelový ovladač pro vnitřní chladící jednotky.	ks					Vlastní	
223	ACE 2.003	Ocelová modulární konstrukce pro venkovní jednotku.	ks					Vlastní	
224	ACE 2.004	Ochrana CU potrubí proti slunci - exteriér - střecha.	bm					Vlastní	
225	ACE 2.006	Doplnění chladiva R32.	kg					Vlastní	
226	ACE 2.007	Spuštění autorizovaným technikem.	ks					Vlastní	
227	ACE 2.008	Kniha chladiva.	ks					Vlastní	
228	ACE 2.009	CU potrubí včetně izolace.	bm					Vlastní	
Díl: SF 1.	VĚTRÁNÍ CHÚC					
229	SF 1.001	Potrubní AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - STŘEDOTLAKÝ.DN 355	ks					Vlastní	
230	SF 1.002	Pružná manžeta	ks					Vlastní	
231	SF 1.002	Frekvenční měnič.	ks					Vlastní	
232	SF 1.101	Čtyřhranná uzavírací klapka se servopohonem.	ks					Vlastní	
233	SF 1.101	Regulační klapka kruhová jednolistá.	ks					Vlastní	
234	SF 1.201	Přívodní vyústka do stěny - čtyřhranná - dvouřadá s regulací R1.	ks					Vlastní	
235	SF 1.501	Sací protidešťová žaluzie - propustnost 75%.	ks					Vlastní	
236	SF 1.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
237	SF 1.702	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
238	SF 1.801	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  ROVNÉ	bm					Vlastní	
239	SF 1.802	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  TVAROVKY	bm					Vlastní	
Díl: SF 2.	VĚTRÁNÍ KOTELNY					
240	SF 2.001	Přívodní potrubní ventilátor s ec motorem DN 125.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
241	SF 2.002	Elektrický ohřívač vzduchu - potrubní.Včetně vestavěné regualce.	ks					Vlastní	
242	SF 2.003	Pružná manžeta kruhová.	ks					Vlastní	
243	SF 2.051	Kruhový tlumič hluku - pevný.	ks					Vlastní	
244	SF 2.101	Čtyřhranná uzavírací klapka se servopohonem.	ks					Vlastní	
245	SF 2.101	Zpětná klapka kruhová.	ks					Vlastní	
246	SF 2.201	Přívodní krycí mřížka kruhová.	ks					Vlastní	
247	SF 2.251	Odvodní krycí mřížka čtyřhranná.	ks					Vlastní	
248	SF 2.501	Sací protidešťová žaluzie - propustnost 75%.	ks					Vlastní	
249	SF 2.502	Sací protidešťová žaluzie - propustnost 75%.	ks					Vlastní	
250	SF 2.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
251	SF 2.801	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  ROVNÉ	bm					Vlastní	
252	SF 2.802	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C -  TVAROVKY	bm					Vlastní	
Díl: AHU 1.	VĚTRÁNÍ 1.PP					
253	AHU 1.001	VZT jednotka - vnitřní provedení - rezidenční - velikost 250 - s rotačním rekuperátorem.•, Splňující směrnici Ecodesign 2018• vč. autonomní MaR.• vč. Sady pro regulaci.- kontinulání chod	ks					Vlastní	
254	AHU 1.050	Ohebný tlumič hluku.	ks					Vlastní	
255	AHU 1.101	Kruhová regulační  klapka jednolistá - mechanická.	ks					Vlastní	
256	AHU 1.201	Krycí mřížka, kruhová, pozinkovaná	ks					Vlastní	
257	AHU 1.251	Krycí mřížka, kruhová, pozinkovaná	ks					Vlastní	
258	AHU 1.501	Protidešťová žaluzie, vč pletiva, 75% propustnost - sací	ks					Vlastní	
259	AHU 1.502	Protidešťová žaluzie, vč pletiva, 75% propustnost - výfuková	ks					Vlastní	
260	AHU 1.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
261	AHU 1.901	Kaučuková izolace.	m2					Vlastní	
Díl: 1.	Větrání výtahové šachty					
262	1.251	Odvodní krycí mřížka kruhová.	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
263	1.301	Stěnová mřížka.	ks					Vlastní	
264	1.501	Výfuková hlavce.	ks					Vlastní	
265	1.701	Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek.	bm					Vlastní	
Díl: 999.	Ostatní náklady					
266	999.001	Náklady na dopravu.	ks					Vlastní	
267	999.002	Zařízení staveniště.	ks					Vlastní	
268	999.003	Montážní materiál	kg					Vlastní	
269	999.004	Těsnící materiál.	m2					Vlastní	
270	999.005	Spojovací materiál.	kg					Vlastní	
271	999.006	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN.	ks					Vlastní	
272	999.007	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.	h					Vlastní	
273	999.008	Předávací dokumentace.	ks					Vlastní	
274	999.009	Výrobní dokumentace.	ks					Vlastní	
275	999.010	Dokumentace skutečného stavu.	ks					Vlastní	
276	999.011	Požární ucpávka.	ks					Vlastní	
277	999.012	Zkouška CHUC.	ks					Vlastní	
278	999.013	Nastavení ventilátorů.	ks					Vlastní	
279	999.014	Dokumentace provedení stavby.	ks					Vlastní	
280	999.015	Akustické měření.	ks					Vlastní	
Celkem						

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: _1	721 - Vnitřní kanalizace					
1	Pol__0001	Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí	kpl					Vlastní	
2	Pol__0002	POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB  Z PVC KG  SN  8 -  DN 110	m					Vlastní	
3	Pol__0003	POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB  Z PVC KG  SN  8 -  DN 125	m					Vlastní	
4	Pol__0004	KG koleno 45° DN110	ks					Vlastní	
5	Pol__0005	KG odbočka 45° DN125x110	ks					Vlastní	
6	Pol__0006	KG koleno 45° DN125	ks					Vlastní	
7	Pol__0007	KG redukce DN125x110	ks					Vlastní	
8	Pol__0008	KG odbočka 45° DN125x125	ks					Vlastní	
9	Pol__0009	KG redukce DN160x125	ks					Vlastní	
10	Pol__0010	KG odbočka 45° DN160x125	ks					Vlastní	
11	Pol__0011	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) ODHLUČNĚNÉ (např.MASTER 3, GEBERIT SILENT PP...)ODPADNÍ , PŘIPOJOVACÍ A, ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ DN 32	m					Vlastní	
12	Pol__0012	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) ODHLUČNĚNÉ (např.MASTER 3, GEBERIT SILENT PP...)ODPADNÍ , PŘIPOJOVACÍ A, ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ DN 40	m					Vlastní	
13	Pol__0013	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) ODHLUČNĚNÉ (např.MASTER 3, GEBERIT SILENT PP...)ODPADNÍ , PŘIPOJOVACÍ A, ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ DN 50	m					Vlastní	
14	Pol__0014	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) ODHLUČNĚNÉ (např.MASTER 3, GEBERIT SILENT PP...)ODPADNÍ , PŘIPOJOVACÍ A, ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ DN 70	m					Vlastní	
15	Pol__0015	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) ODHLUČNĚNÉ (např.MASTER 3, GEBERIT SILENT PP...)ODPADNÍ , PŘIPOJOVACÍ A, ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ DN 100	m					Vlastní	
16	Pol__0016	ČISTÍCÍ KUSY / ODHLUČNĚNÉ/ DN 100	ks					Vlastní	
17	Pol__0017	ČISTÍCÍ KUSY / ODHLUČNĚNÉ/ DN 150	ks					Vlastní	
18	Pol__0018	Odbočka 32x32x45°	ks					Vlastní	
19	Pol__0019	Odbočka 50x50x45°	ks					Vlastní	
20	Pol__0020	Odbočka 75x50x45°	ks					Vlastní	
21	Pol__0021	Odbočka 75x50x87°	ks					Vlastní	
22	Pol__0022	Odbočka 75x75x87°	ks					Vlastní	
23	Pol__0023	Odbočka 110x110x45°	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
24	Pol__0024	Odbočka 110x110x87°	ks					Vlastní	
25	Pol__0025	Odbočka 110x75x87°	ks					Vlastní	
26	Pol__0026	Odbočka 110x50x87°	ks					Vlastní	
27	Pol__0027	Odbočka 110x50x45°	ks					Vlastní	
28	Pol__0028	Odbočka 110x75x45°	ks					Vlastní	
29	Pol__0029	Redukce 75x50	ks					Vlastní	
30	Pol__0031	Redukce 50x32	ks					Vlastní	
31	Pol__0032	Koleno DN 32	ks					Vlastní	
32	Pol__0033	Odbočka  32/32  45°	ks					Vlastní	
33	Pol__0034	Redukce 110x75	ks					Vlastní	
34	Pol__0035	Koleno  DN 75 45°	ks					Vlastní	
35	Pol__0036	Redukce 110x75	ks					Vlastní	
36	Pol__0037	Odbočka 110/75 45°	ks					Vlastní	
37	Pol__0038	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50	ks					Vlastní	
38	Pol__0039	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍODPADNÍCH VÝPUSTEK  D 110x2.3	ks					Vlastní	
39	Pol__0040	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL4000.2 sada pro 2 spotřebiče	ks					Vlastní	
40	Pol__0041	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL138 pro odvod kondenzátu	ks					Vlastní	
41	Pol__0042	Montáž zápachových uzávěrek	ks					Vlastní	
42	Pol__0043	KANALIZAČNÍ PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ks					Vlastní	
43	Pol__0044	Větrací  komínek pro šikmé  střechy  DN 110 D+M	ks					Vlastní	
44	Pol__0045	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU DO DN 125	m					Vlastní	
45	Pol__0046	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m	%					Vlastní	
Díl: _2	722 - Vnitřní vodovod					
46	Pol__0047	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x  3,4	m					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
47	Pol__0048	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x  4,2	m					Vlastní	
48	Pol__0049	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x  5,4	m					Vlastní	
49	Pol__0050	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x  5,4	m					Vlastní	
50	Pol__0051	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x  8,3	m					Vlastní	
51	Pol__0052	Potrubí pozinkované  pozink DN 25	m					Vlastní	
52	Pol__0053	Potrubí pozinkované  pozink DN 40	m					Vlastní	
53	Pol__0054	PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK do DN 25	ks					Vlastní	
54	Pol__0055	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR   1/2"	ks					Vlastní	
55	Pol__0056	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR   3/4"	ks					Vlastní	
56	Pol__0057	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR   1"	ks					Vlastní	
57	Pol__0058	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR   5/4"	ks					Vlastní	
58	Pol__0059	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR   6/4"	ks					Vlastní	
59	Pol__0060	ARMATURY ZÁVITOVÉ S JEDNÍM ZÁVITEM NÁSTĚNKY pro výtokový ventil G 1/2"	ks					Vlastní	
60	Pol__0061	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU 1/2"	ks					Vlastní	
61	Pol__0062	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 1/2"	ks					Vlastní	
62	Pol__0063	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 3/4"	ks					Vlastní	
63	Pol__0064	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 1"	ks					Vlastní	
64	Pol__0065	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 5/4"	ks					Vlastní	
65	Pol__0066	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 6/4"	ks					Vlastní	
66	Pol__0067	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT  max. 120°C, PN 25 s vypouštěním 6/4"	ks					Vlastní	
67	Pol__0068	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 3/4"	ks					Vlastní	
68	Pol__0069	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 6/4"	ks					Vlastní	
69	Pol__0070	FILTR ZÁVITOVÝ 3/4"	ks					Vlastní	
70	Pol__0071	FILTR ZÁVITOVÝ 6/4"	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
71	Pol__0072	VENTIL POJISTNÝ PRUŽINOVÝ  6 bar 1"	ks					Vlastní	
72	Pol__0073	Regulační ventil pro cirkulace  DN 15 provozní tlak max.1MPa(PN10) max. provozní teplota 90°C	ks					Vlastní	
73	Pol__0074	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	ks					Vlastní	
74	Pol__0075	Kondenzační smyčka zahnutá	ks					Vlastní	
75	Pol__0076	Pozinkovaný podpůrný žlab pro plastová potrubí (PPR) D 20 délka  2 m	m					Vlastní	
76	Pol__0077	Pozinkovaný podpůrný žlab pro plastová potrubí (PPR) D 25 délka  2 m	m					Vlastní	
77	Pol__0078	Pozinkovaný podpůrný žlab pro plastová potrubí (PPR) D 32 délka  2 m	m					Vlastní	
78	Pol__0079	Pozinkovaný podpůrný žlab pro plastová potrubí (PPR) D 40 délka  2 m	m					Vlastní	
79	Pol__0080	Pozinkovaný podpůrný žlab pro plastová potrubí (PPR) D 50 délka  2 m	m					Vlastní	
80	Pol__0081	Montáž podpůrného žlabu	m					Vlastní	
81	Pol__0082	Hydranty celonerezové DN 25 - 30 m - prosklená, proudnice 10	sbr					Vlastní	
82	Pol__0083	Montáž hyhrantové skříně , tlaková zkouška	kpl					Vlastní	
83	Pol__0084	Revize hydrantové skříně	kpl					Vlastní	
84	Pol__0085	Tlakové zkoušky do DN 50	m					Vlastní	
85	Pol__0086	Proplach desinfekce potrubí do DN 50	m					Vlastní	
86	Pol__0087	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m	%					Vlastní	
Díl: _3	724 - Strojní zařízení					
87	Pol__0088	Refi x DD  33/10  pro rozvody  a ohřev pitné vody	ks					Vlastní	
88	Pol__0089	Flowjet 3/4“	ks					Vlastní	
89	Pol__0090	Konzola s páskou pro Refl ex/Refi x 8_x0015_35 litrů	ks					Vlastní	
90	Pol__0091	Výchozí revize	kpl					Vlastní	
91	Pol__0092	ČERPADLO CIRKULACE TV Wilo Stratos PICO Z 20/1-6 ,3,5 m3/h , 150 mm	ks					Vlastní	
92	Pol__0093	Montáž čerpadla závitového do DN 25	ks					Vlastní	
93	Pol__0094	Přečerpávací stanice pro kondenzát z kotllů 2652	ks					Vlastní	
94	Pol__0095	OHŘÍVAČ ZÁSOBNÍKOVÝ  OKC 500 NTR/BP ohřívač vody nepřímotopný stacionární	ks					Vlastní	
95	Pol__0096	Montáž ohřívače	kpl					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
96	Pol__0097	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY přes 12 do 24 m	%					Vlastní	
Díl: _4	713 - Izolace tepelné					
97	Pol__0098	MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PENĚN. PE, ČEDIČOVÉ VLNY, vč. doplňkového, materiálu , průměr potrubí do DN 50 mm	m					Vlastní	
98	Pol__0099	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  13 mmvnitřní průměr 22 mm	m					Vlastní	
99	Pol__0100	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  13 mmvnitřní průměr 28 mm	m					Vlastní	
100	Pol__0101	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  13 mmvnitřní průměr 35 mm	m					Vlastní	
101	Pol__0102	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  13 mmvnitřní průměr 40 mm	m					Vlastní	
102	Pol__0103	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  13 mmvnitřní průměr 50 mm	m					Vlastní	
103	Pol__0104	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  25 mmvnitřní průměr 22 mm	m					Vlastní	
104	Pol__0105	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  25 mmvnitřní průměr 28 mm	m					Vlastní	
105	Pol__0106	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  25 mmvnitřní průměr 35 mm	m					Vlastní	
106	Pol__0107	TERMOIZOALČNÍ TRUBICE  Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny  25 mmvnitřní průměr 50 mm	m					Vlastní	
107	Pol__0108	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m	%					Vlastní	
Díl: _5	767 - Konstrukce zámečnícké					
108	Pol__0109	MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI do 5 kg	kg					Vlastní	
109	Pol__0110	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 12 do 24 m	%					Vlastní	
Díl: _6	725 - Zařizovací předměty					
110	Pol__0111	Závěsný klozet pro  350 x 530 mm	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
111	Pol__0112	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks					Vlastní	
112	Pol__0113	Ovládácí tlačítko se dvěmi možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva	ks					Vlastní	
113	Pol__0114	Zvukově izolační vložka	ks					Vlastní	
114	Pol__0115	WC modul ALCA,AM121/1120	ks					Vlastní	
115	Pol__0116	CONCEPT 300 držák toaletního papíru, nástěnný, chrom	ks					Vlastní	
116	Pol__0117	CONCEPT 200 WC štětka, nástěnná, sklo, chrom	ks					Vlastní	
117	Pol__0118	Montáž klozetových mís závěsných,sedátka ,tlačítka	kpl					Vlastní	
118	Pol__0119	Montáž WC modulu	kpl					Vlastní	
119	Pol__0120	Montáž dopňků na WC	kpl					Vlastní	
120	Pol__0121	Závěsný klozet 360x700 mm	ks					Vlastní	
121	Pol__0122	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks					Vlastní	
122	Pol__0123	Ovládácí tlačítko se dvěmi možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva	ks					Vlastní	
123	Pol__0124	Zvukově izolační vložka	ks					Vlastní	
124	Pol__0125	WC modul ALCA,AM116/1300H	ks					Vlastní	
125	Pol__0126	Oddálené tlačítko	ks					Vlastní	
126	Pol__0127	CONCEPT 300 držák toaletního papíru, nástěnný, chrom	ks					Vlastní	
127	Pol__0128	CONCEPT 200 WC štětka, nástěnná, sklo, chrom	ks					Vlastní	
128	Pol__0129	Montáž klozetových mís závěsných,sedátka ,tlačítka	kpl					Vlastní	
129	Pol__0130	Montáž WC modulu	kpl					Vlastní	
130	Pol__0131	Montáž dopňků na WC	kpl					Vlastní	
131	Pol__0132	Umyvadlo 550x420  mm, s přepadem, s otvorem pro baterii, bílá	ks					Vlastní	
132	Pol__0133	Umyvadlový sifon bez výpusti  mosaz / chrom	ks					Vlastní	
133	Pol__0134	Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack	ks					Vlastní	
134	Pol__0135	Směšovací baterie páková	ks					Vlastní	
135	Pol__0136	Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru)	ks					Vlastní	
136	Pol__0137	Zrcadlo na stěnu 500/700 mm	ks					Vlastní	
137	Pol__0138	Montáž umyvadla	kpl					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
138	Pol__0139	Montáž sifonu a výpusti	kpl					Vlastní	
139	Pol__0140	Montáž  baterie	kpl					Vlastní	
140	Pol__0141	Montáž zrcadla na stěnu	kpl					Vlastní	
141	Pol__0142	640x550 mm bílá keramika	ks					Vlastní	
142	Pol__0143	Umyvadlový sifon bez výpusti plastový	ks					Vlastní	
143	Pol__0144	Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack	ks					Vlastní	
144	Pol__0145	Směšovací baterie páková s prodlouženou pákou	ks					Vlastní	
145	Pol__0146	Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru)	ks					Vlastní	
146	Pol__0147	Zrcadlo na stěnu 500/700 mm sklápěcí  bemeta	ks					Vlastní	
147	Pol__0148	Montáž umyvadla	kpl					Vlastní	
148	Pol__0149	Montáž sifonu a výpusti	kpl					Vlastní	
149	Pol__0150	Montáž  baterie	kpl					Vlastní	
150	Pol__0151	Montáž zrcadla na stěnu	kpl					Vlastní	
151	Pol__0152	Gratinový dřez o rozměrech 620 x 496 mm s odkladací plochou, s otvorem pro stojánkovou baterii, průměr 35 mm ,včetně baterie v barvě dřezu ,výpusti	kpl					Vlastní	
152	Pol__0153	Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru)	ks					Vlastní	
153	Pol__0154	Montáž umyvadla /dřezu	kpl					Vlastní	
154	Pol__0155	Gratinový dřez o rozměrech 620 x 496 mm s odkladací plochou, s otvorem pro stojánkovou baterii, průměr 35 mm ,včetně baterie v barvě dřezu ,výpusti	kpl					Vlastní	
155	Pol__0156	Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru)	ks					Vlastní	
156	Pol__0157	Montáž umyvadla /dřezu	kpl					Vlastní	
157	Pol__0158	Výlevka závěsná	ks					Vlastní	
158	Pol__0159	Montážní rám snádržkou pro výlevku sodpadem DN90/110 abaterii ,A108F/1100	ks					Vlastní	
159	Pol__0160	Nástěnná baterie, chromová s roztečí 150 mm vč raménka 300 mm	ks					Vlastní	
160	Pol__0161	Montáž výlevky	kpl					Vlastní	
161	Pol__0162	Montáž sifonu a výpusti	kpl					Vlastní	
162	Pol__0163	Montáž  baterie	kpl					Vlastní	
163	Pol__0164	Montáž instalačního modulu	kpl					Vlastní	

R:	D.1.4.e	Zdravotechnika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
164	Pol__0165	Pisoár antivandal s elektronikou	ks					Vlastní	
165	Pol__0166	Zvukově izolační vložka	ks					Vlastní	
166	Pol__0167	Montážní rám pro pisoár asenzor A107S/1120	ks					Vlastní	
167	Pol__0168	Montáž pisoáru ,sifonu	kpl					Vlastní	
168	Pol__0169	Montáž instalačního modulu	kpl					Vlastní	
169	Pol__0170	Sprchová vanička čtvercová SAT Project 90x90 cm litý mramor SATSVPRO90Q	ks					Vlastní	
170	Pol__0171	Vaničkový sifon	ks					Vlastní	
171	Pol__0172	Sprchový kout 90x90 cm, vstup zepředu, křídlové dveře, levý, chrom/sklo transparent	ks					Vlastní	
172	Pol__0173	Termostatická směšovací baterie s vývodem na ruční sprchu a déšť, nástěnná s roztěčí 150 mm	ks					Vlastní	
173	Pol__0174	Sprchová hadice včetně držáku a sprchové hlavice a	ks					Vlastní	
174	Pol__0175	Montáž vaničky sprchové	ks					Vlastní	
175	Pol__0176	Montáž sprchového koutu	ks					Vlastní	
176	Pol__0177	Montáž sifonu	ks					Vlastní	
177	Pol__0178	Montáž  baterie ,sprchové hadice	kpl					Vlastní	
178	Pol__0179	Sprchový žlab šířky  650 mm	ks					Vlastní	
179	Pol__0180	Podlahový rošt  650 mm	ks					Vlastní	
180	Pol__0181	Termostatická směšovací baterie s vývodem na ruční sprchu a déšť, nástěnná s roztěčí 150 mm	ks					Vlastní	
181	Pol__0182	Sprchová hadice včetně držáku a sprchové hlavice	ks					Vlastní	
182	Pol__0183	Montáž  žlabu  vč.roštu	ks					Vlastní	
183	Pol__0184	Montáž  baterie ,sprchové hadice	kpl					Vlastní	
184	Pol__0185	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m	%					Vlastní	
Celkem						

R:	D.1.4.g	Silnoproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: _1	Kabeláž :					
1	1	Kabel CYKY-J 5x10mm2	m					Vlastní	
2	2	Kabel 1-CXKH-V-J 4x16mm2	m					Vlastní	
3	3	Kabel 1-CXKH-V-J 5x2,5mm2	m					Vlastní	
4	4	Kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5mm2	m					Vlastní	
5	5	Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5mm2	m					Vlastní	
6	6	Kabel 1-CXKH-V-J 2x1,5mm2	m					Vlastní	
7	7	Kabel 1-CXKH-R 5x2,5mm2	m					Vlastní	
8	8	Kabel 1-CXKH-R 5x1,5mm2	m					Vlastní	
9	9.1	Kabel 1-CXKH-R 3x2,5mm2	h					Vlastní	
10	10	Kabel 1-CXKH-R 3x1,5mm2	m					Vlastní	
11	11	Kabel JYTY 2x1,5mm2	m					Vlastní	
12	12	Kabel CY 10 zž	m					Vlastní	
13	13	Kabel CY 6 zž	m					Vlastní	
14	14	Kabel CY 4 zž	m					Vlastní	
15	15	Žlab pro SIL s požární odolností (300x60;šxv)	m					Vlastní	
16	16	Stoupací žebřík s požární odolností (400x60;šxv)	m					Vlastní	
17	17	Skříň hlavního pospojení (HOP)	ks					Vlastní	
Díl: _2	Rozváděče RH obsahuje :					
18	1	Rozvodnice, 1026x2159x250 (šxvxh)	kpl					Vlastní	
19	2	Třífázový jistič 80B/3, 3x80A	ks					Vlastní	
20	3	Přepěťová ochrana třídy B+C - 4xFLP-B+C	ks					Vlastní	
21	4	A, Typ A	ks					Vlastní	
22	5	A, Typ A	ks					Vlastní	
23	6	Třífázový jistič 32B/3, 32A	ks					Vlastní	
24	7	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks					Vlastní	
25	8	Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.g	Silnoproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
26	9.11	Drobný materiál (svorky, atd…)	kpl					Vlastní	
Díl: _3	Rozváděč RPO obsahuje :					
27	1	Rozvodnice, 586x1055x250 (šxvxh)	kpl					Vlastní	
28	2	Přepěťová ochrana třídy B+C - 4xFLP-B+C	ks					Vlastní	
29	3	Třífázový jistič 50B/3, 50A	ks					Vlastní	
30	4	UPS - 30kVA/3F/10M	ks					Vlastní	
31	5	Třífázový jistič PL7-B40/3, 40A	ks					Vlastní	
32	6	Třífázový jistič PL7-B20/3, 20A	ks					Vlastní	
33	7	Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A	ks					Vlastní	
34	8	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks					Vlastní	
35	9.111	Instalační stykač KM Z-SCH, 230/25-22	ks					Vlastní	
36	10	Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A	ks					Vlastní	
37	11	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…)	kpl					Vlastní	
Díl: _4	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :					
38	1	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks					Vlastní	
39	2	Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5	ks					Vlastní	
40	3	Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet	ks					Vlastní	
41	4	Pohybové čidlo na spínání osvětlení, 180°	ks					Vlastní	
42	5	Pohybové čidlo na spínání osvětlení, 360°	ks					Vlastní	
43	6	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP20	ks					Vlastní	
44	7	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, dvojbodová	ks					Vlastní	
45	8	Tlačítko CENTRAL STOP	ks					Vlastní	
46	9.1111	Tlačítko TOTAL STOP	ks					Vlastní	
47	10	Spínací tlačítko, IP20, řaz.1/0 pro spouštění CHÚC	ks					Vlastní	
48	11	Spínací tlačítko	ks					Vlastní	
49	12	Ventilátor	ks					Vlastní	
50	13	Žaluziový spínač pod omítku, IP20	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.g	Silnoproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
51	14	LCD displej - info panel	ks					Vlastní	
52	15	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl					Vlastní	
Díl: _5	Svítidla, stropní vývody, apod… společných prostor :					
53	1	A1 Narro RV SOP 1150-2250 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white	ks					Vlastní	
54	2	A2 Narro RV SOP 910-1800 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 930 IP44 white/white	ks					Vlastní	
55	3	A3 Narro RV SOP 1150-2250 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white	ks					Vlastní	
56	4	B2 106 MC DPR 3300 lm 31 W 930 FO 595x595 mm IP43 white	ks					Vlastní	
57	5	C Camay 65 WDI SOP 1700+1750 lm 31 W 840 L1445 mm FO IP40 white	ks					Vlastní	
58	6	T1 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66	ks					Vlastní	
59	7	T2 5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	ks					Vlastní	
60	8	N1 svítidlo nouzové, svislý praporek, montáž přisazená, světelný zdroj LED, dohledová vzdálenost 26m, , AUTOTEST, 280x210x49mm, IP44. výdrž baterie 3h.	ks					Vlastní	
61	9.111111	N2 svítidlo nouzové, typ koridor, stropní, přisazené / vestavné, těleso svítidla PC, světelný zdroj, LED, AUTOTEST, 195x195x64mm, IP42, výdrž baterie	ks					Vlastní	
62	10	N4 svítidlo nouzové, typ pro hydranty, stropní, přisazené / vestavné, těleso svítidla PC, světelný, zdroj LED, AUTOTEST, 130x130X30mm, IP42, výdrž baterie 3h.	ks					Vlastní	
Díl: _6	Ostatní náklady :					
63	1	Doprava (silnoproud)	kpl					Vlastní	
64	2	Stavební přípomoce	kpl					Vlastní	
65	3	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl					Vlastní	
66	4	Zkoušky, revize	kpl					Vlastní	
67	5	Dokumentace skutečného stavu	kpl					Vlastní	
Celkem						

R:	D.1.4.h	Slaboproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: _1	Přístupový systém :					
1	1	MHz bez klávesnice  Plus, DESFire EV1, S/N nebo S/B), NFC ready, interface, RS485	ks					Vlastní	
2	2	Dveřní modul - pro 2 čtečky v krytu	ks					Vlastní	
3	3	Centrální řídící jednotka	ks					Vlastní	
4	4	Napájecí zdroj 13, 1V/10A, zdroj v ocelovém krytu, Prostor pro baterii až 12V/28Ah	ks					Vlastní	
5	5	Napájecí zdroj 24V/10A, zdroj v ocelovém krytu, Prostor pro baterii až 12V/12Ah	ks					Vlastní	
6	6	Bezúdržbový akumulátor 12V/26 Ah	ks					Vlastní	
7	7	Bezúdržbový akumulátor 12V/12 Ah	ks					Vlastní	
8	8	SW licence	kpl					Vlastní	
Díl: _2	Systém sestra-pacient :					
9	1	Terminál personálu	ks					Vlastní	
10	2	Zásuvka enthernet	ks					Vlastní	
11	3	Systémový server	ks					Vlastní	
12	4	Napáječ 350W 24V IP	ks					Vlastní	
13	5	Lůžková jednotka IP	ks					Vlastní	
14	6	Závěs s konektorem	ks					Vlastní	
15	7	Signal. Jednotka	ks					Vlastní	
16	8	Signal. Jednotka bezdrátová	ks					Vlastní	
17	9.2	Komunikační jednotka	ks					Vlastní	
18	10	Komunikační jednotka s displejem	ks					Vlastní	
19	11	Komunikační jednotka s displejem a RFID	ks					Vlastní	
20	12	Bezdrátové tlačítko účasníka	ks					Vlastní	
21	13	Táhlo nouzového volání	ks					Vlastní	
22	14	Táhlo nouzového volání s tlačítkem	ks					Vlastní	
23	15	Svítidlo IP	ks					Vlastní	
24	16	Registrační karta	ks					Vlastní	
25	17	Interface info monitoru IP	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.h	Slaboproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
26	18	Informační monitor	ks					Vlastní	
27	19	Switch modul	ks					Vlastní	
28	20	Switch 8 portů	ks					Vlastní	
29	21	Držák informačního monitoru	ks					Vlastní	
30	22	Kabel CHKE-R 2x2,5	m					Vlastní	
31	23	Kabel UTP 5E	m					Vlastní	
32	24	Konektor RJ45	ks					Vlastní	
33	25	Kontrola a test rozvodného vedení	kpl					Vlastní	
34	26	Kontrola provozu a zaškolení	kpl					Vlastní	
35	27	Krabice KO97 pod omítku	ks					Vlastní	
36	28	Krabice KT250	ks					Vlastní	
37	29	Krabice KU68	ks					Vlastní	
38	30	Naprogramování a konfigurace systému	kpl					Vlastní	
39	31	SW aktivace sdruženého provozu	ks					Vlastní	
40	32	SW historie volání	ks					Vlastní	
41	33	SW licence Audio programu	ks					Vlastní	
42	34	SW licenceúčasníka	ks					Vlastní	
43	35	Trubka průměr 25mm	m					Vlastní	
44	36	Další materiální drobnosti	kpl					Vlastní	
Díl: _3	Datové rozvody + WI-FI + zvonkový tablo :					
45	1	Rozvodnice, 42U 1000x1200	kpl					Vlastní	
46	2	Ventilační jednotka v racku	ks					Vlastní	
47	3	Vyvazovací panel	ks					Vlastní	
48	4	Patch panel cat6a	ks					Vlastní	
49	5	Poe switch 48 portů	ks					Vlastní	
50	6	NVR server	ks					Vlastní	
51	7	Switch	ks					Vlastní	

R:	D.1.4.h	Slaboproud	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
52	8	Police 1U	ks					Vlastní	
53	9.21	Zásuvková lišta PDU s LCD displejem	kus					Vlastní	
54	10	UPS 3kVA	ks					Vlastní	
55	11	Optická vana s optickým adaptérem LC/APC	ks					Vlastní	
56	12	IP kamera - výkonná IP kamera splňující požadavky projektu	ks					Vlastní	
57	13	IP kamera - licence kamerového systému	kpl					Vlastní	
58	14	Žlab pro SLA s požární odolností (200x60;šxv)	m					Vlastní	
59	15	Stoupací žebřík s požární odolností (300x60;šxv)	m					Vlastní	
60	16	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (2xRJ45), IP20, komplet	ks					Vlastní	
61	17	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (1xRJ45), IP20, komplet	ks					Vlastní	
62	18	Domácí telefon	kpl					Vlastní	
63	19	Zvonkové tablo u vstupů	kpl					Vlastní	
64	20	Kabel UTP cat.6a	m					Vlastní	
65	21	PVC trubka O23	ks					Vlastní	
66	22	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl					Vlastní	
Díl: _4	Ostatní náklady :					
67	1	Žlab pro SLB s požární odolností (200x60;šxv)	m					Vlastní	
68	2	Doprava (slaboproud)	kpl					Vlastní	
69	3	Stavební přípomoce (slaboproud)	kpl					Vlastní	
70	4	Drobný materiál (slaboproud)	kpl					Vlastní	
71	5	Přesun stávajícího systému EZS do zrekonstruovaných prostor (EZS ústředna sklávesnicí vč., bezdrátových tlačítek pro lékaře	kpl					Vlastní	
72	6	Zkoušky, revizní zprávy (slaboproud)	kpl					Vlastní	
73	7	Dokumentace skutečného stavu (slaboproud)	kpl					Vlastní	
Celkem						
			
R:	D.1.4.ch	Lokální detekce požáru	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 7421	Lokální detekce požáru (LDP)					
1	01R	Montáž ústředny LDP dvoukruhové	kus					Vlastní	
2	02R	Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku, linkovou 128 adres, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku	kus					Vlastní	
12V/12Ah.
3	03R	Akumulátor 12V/12Ah	kus					Vlastní	
4	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus					Vlastní	
5	04R	Deska linková - 128 adres	kus					Vlastní	
6	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus					Vlastní	
7	05R	Hlásič kouře optický interaktivní	kus					Vlastní	
8	06R	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	kus					Vlastní	
9	07R	Hlásič teplotní interaktivní	kus					Vlastní	
10	08R	Hlásič multisenzorový interaktivní	kus					Vlastní	
11	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus					Vlastní	
12	09R	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	kus					Vlastní	
13	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus					Vlastní	
14	10R	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)	kus					Vlastní	
15	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus					Vlastní	
16	11R	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice	kus					Vlastní	
17	17R	Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40	kus					Vlastní	
18	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus					Vlastní	
19	13R	Prvek vstupně/výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici	kus					Vlastní	
20	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus					Vlastní	
21	15R	Montáž požárně odolné skříně	kus					Vlastní	
22	16R	Protipožární nástěnná skříň, vnitřní rozměr 600x500x200mm, vnější rozměr 778x678x275mm, EW30, P30-R,, EI30, DP1S, zachování funkce v případě požáru 30 min, splňuje ČSN 73 0895, včetně kotvícího	kus					Vlastní	
			
R:	D.1.4.ch	Lokální detekce požáru	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
materiálu
23	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m					Vlastní	
24	18R	Kabel SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca,s1,d1,a1	m					Vlastní	
25	19R	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil, požárně odolná montáž	m					Vlastní	
26	20R	SSKFH-V180 2x2x0,8 P15-R, B2ca,s1,d1,a1	m					Vlastní	
27	60R	Montáž kabelové příchytky	kus					Vlastní	
28	61R	Upevňovací kabelová příchytka, 10mm, ocel, galvanicky zinkováno	kus					Vlastní	
29	21R	Montáž kabelové příchytky požárně odolné, rozteč 30 cm	kus					Vlastní	
30	22R	Kabelová příchytka, 10mm, požárně odolná P15-R	kus					Vlastní	
31	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m					Vlastní	
32	25R	Tuhá elektroinstalační trubka PVC průměr 25mm, světle šedá	m					Vlastní	
33	23R	Příchytka trubky průměr 25mm	m					Vlastní	
34	24R	Spojka trubky průměr 25mm	kus					Vlastní	
35	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m					Vlastní	
36	26R	Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 25mm, světle šedá	m					Vlastní	
37	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m					Vlastní	
38	27R	Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 250 mm, D20 mm	kus					Vlastní	
39	28R	Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 500 mm, D20 mm	kus					Vlastní	
40	29R	D+M Štítek pro označení adresy hlásiče	kus					Vlastní	
41	34R	D+M Podružný elektroinstalační materiál	kpl					Vlastní	
42	35R	Montáž protipožárního prostupu	kus					Vlastní	
43	36R	Protipožární ucpávka - tmel, jednotlivý kabel, kabelový svazek, vč. zapravení	kus					Vlastní	
44	37R	D+M štítek k protipožární ucpávce	kus					Vlastní	
45	38R	Mobilní lešení, výška podlahy 1,2m (montáž, demontáž, nájem)	kpl					Vlastní	
46	30R	Programování ústředny LDP	kpl					Vlastní	
47	31R	Oživení systému LDP	kpl					Vlastní	
48	32R	Výchozí revize systému LDP	kpl					Vlastní	

R:	D.1.4.ch	Lokální detekce požáru	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
49	33R	Provedení koordinační funkční zkoušky	kpl					Vlastní	
50	39R	Dokumentace skutečného provedení stavby - lokální detekce požáru, tisk 3 paré+elektronicky	kpl					Vlastní	
51	40R	Zaškolení obsluhy	kpl					Vlastní	
52	41R	Průběžný úklid	kpl					Vlastní	
53	42R	Koordinační práce a podružné pracovní výkony	kpl					Vlastní	
54	43R	Ekologická likvidace odpadu	kpl					Vlastní	
55	44R	Doprava	kpl					Vlastní	
56	45R	Přesun materiálu a hmot	kpl					Vlastní	
Celkem						
HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST 

Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  
 
Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.  
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.  
 
Článek I. 
Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem: 
a)	zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 
b)	zápisem z kontrolního dne stavby 
c)	zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). 
Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 
 
Článek II. 
Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 - 7 ZZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 - 7 ZZVZ: 
1)	Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 ZZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.   
2)	Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 
3)	Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 
Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZZVZ, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ.  
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   
 
Článek III. 
K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 
za Objednatele:   	......................TDS , manažer investičních projektů .................... za Zhotovitele:   	................ stavbyvedoucí - vedoucí stavby za Projektanta:   	......................   AD Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:  
•	Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 
•	Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 
•	Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
•	Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
•	Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
•	Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 
Projektant při projednání změny prověřuje:  
•	Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 
•	Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;  
•	Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;  
•	Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 
•	Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant. 
TDS při projednání změny prověřuje:  
•	Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY; 
•	Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.  
Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 
Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 
za Objednatele:    ..........................................................
....................................................
	za Zhotovitele:   	.................	  
Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 
•	Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat; 
•	Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;  
•	Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY. 
Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
•	Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu. 
 
Článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  
 
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 	Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 

 

 
 
PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO  DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

Podle vyhlášky DS není obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) určen. Podle § 232 stavebního zákona k žádosti o kolaudační rozhodnutí se přikládá dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené DSP. 
 
Povinnost Zhotovitele zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) podle této smlouvy požaduje Objednatel pro účely dalšího provozování stavby, a proto touto smlouvou sjednává povinnost Zhotovitele DSPS zpracovat a předat Objednateli jako součást díla. 
 
DSPS vychází z dokumentace pro realizaci stavby (DPS), tedy z PROJEKTU podle této smlouvy a musí být zpracována ve stejném rozsahu jako PROJEKT s tím, že na rozdíl od PROJEKTU bude obsahovat skutečný stav provedení díla, zejména konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě tak, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 
 
ROZSAH DSPS: 
A.	Průvodní zpráva 
B.	Souhrnná technická zpráva 
C.	Situační výkresy 
D.	Výkresová dokumentace 
E: Provozní dokumentace stavby 
 
A.	Průvodní zpráva 
 
A.1	Identifikační údaje 
A.1.1	Údaje o stavbě 
a)	název stavby, 
b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
 
A.1.2	Údaje o vlastníkovi 
a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c)	obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace DSP  
a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b)	jméno a příjmení (fyzická osoba). 
 
A.1.4	Údaje o zpracovateli dokumentace DPSP  
a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b)	jméno a příjmení (fyzická osoba). 
 
A.1.5	Údaje o zhotoviteli stavby  
a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b)	jméno a příjmení (fyzická osoba). 
 
A.2	Seznam vstupních podkladů 
a)	základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby, 
b)	základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala, 
c)	další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena. 
 
B.	Souhrnná technická zpráva 
 
a)  popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499><https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499>,  <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499>zvláště chráněné území, záplavové území apod. b)  popis stavby 
-	účel užívání stavby, 
-	ochrana stavby  
-	parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
-	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 
c)	technický popis stavby a jejího technického zařízení, 
d)	zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, 
e)	napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
f)	ochranná a bezpečnostní pásma, 
g)	vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. 
 
C.	Situační výkresy 
 
C.1	Katastrální situační výkres 
a)	měřítko podle použité katastrální mapy, 
b)	vyznačení stavby, 
c)	vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
 
C.2	Koordinační situační výkres 
a)	měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200, 
b)	hranice pozemků, parcelní čísla, 
c)	stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury, 
d)	stávající výškopis a polohopis, 
e)	stanovení nadmořské výšky; výška objektů, 
f)	okótované odstupy staveb, 
g)	stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, h)  stávající vzrostlá vegetace, 
i)	ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
j)	zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
k)	odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
 
D.	Výkresová dokumentace 
 
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. 
Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou.  
 
E.	Provozní dokumentace stavby 
 
E.1	Technická zpráva 
a)	zásadní informace o stavbě a její stavební historii, 
b)	stanovení návrhové životnosti stavby a jejích rozhodujících konstrukcí, 
c)	požadavky na kontroly a údržbu stavby prováděné vlastníkem / uživatelem, 
d)	popis požadavků na prohlídky stavby po dobu užívání stavby, 
-	výchozí prohlídka (výchozí stav po dokončení stavby), prováděná vlastníkem / uživatelem za přítomnosti Zhotovitele stavby 
-	mimořádná prohlídka před koncem uplynutí záruční doby na stavbu, prováděná Zhotovitelem stavby za přítomnosti vlastníka / uživatele 
-	periodické prohlídky a stanovení periody (hodnocení všech částí a prvků stavby, stavebně technický stav, stabilita, odolnost, spolehlivost, použitelnost, bezpečnost, potřeba oprav), prováděné vlastníkem / uživatelem, 
-	mimořádná prohlídka následující po jakékoliv mimořádné události (havárie, porucha, přívalový déšť, záplava, povodeň, zemětřesení, vichřice, úder blesku apod., prováděná vlastníkem / uživatelem 
e)	plán kontrol prohlídek a údržby stavby v průběhu její životnosti prováděné vlastníkem / uživatelem, 
f)	informace o požadavcích na vlastníka / správce stavby k aktualizaci plánu prohlídek a údržby stavby v průběhu životnosti stavby. 
 
E.2	Návod na provoz a údržbu díla podle čl. I. odst. 1.4. této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO V.  SMLOUVY O DÍLO  VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) 

1.	Zhotovitel dopracuje RDS pouze pokud to bude povaha díla požadovat. RDS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a bude ověřena osobou s autorizací pro obor pozemní stavby. RDS bude předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.  
2.	U těch částí díla, které vyžadují zpracování RDS, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat Objednateli. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu předání RDS pro ty částí díla, které vyžadují zpracování RDS platí, že Zhotovitel je povinen příslušnou RDS předat k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem realizace příslušné části díla. 
3.	Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se Zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či její část, u které stanovil Objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS Objednatelem odsouhlasený. Součástí podkladu pro realizaci díla se stává RDS, ke které Objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS Objednatelem nemá vliv na termíny plnění Zhotovitele podle této smlouvy.  
4.	Všechna vyhotovení čistopisu RDS předá Zhotovitel Objednateli do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se Zhotovitelem o výhradách k RDS. 
5.	Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení díla, případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO VI.  SMLOUVY O DÍLO  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN (GP) 

1.	Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 
2.	Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.dwg nebo *.dgn. 
3.	Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku (je-li) je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem. 
4.	Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na vhodném nosiči dat. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 
5.	Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
 
	Protokol o změně díla	Změnový list 	č.
Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:		
Odůvodnění změny:		
Změnu vyvolal:				
	Jedná se o změnu:  (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla			
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla			
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla			
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:  (zatrhnout)	§ 222 odst. 4			
		§ 222 odst. 5			
		§ 222 odst. 6			
		§ 222 odst. 7			
	Způsob projekčního řešení změny:  (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
		dodatek k PD			
		dokumentace skut.provedení			
		jiné			
hodnota přípočtů (víceprací)				
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
ocenění změny předložil:				
	náklady na změnu v Kč bez DPH			
	Výše DPH sazba:				
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v t			
		abulce evidence změn č.			
Termín realizace změny:				
	Vliv změny na terním dokončení díla:			
Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
Přílohy: