„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 

 Obchodní podmínky strana 1 

 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 
………………………………. OP-25-1349 
SMLOUVA O DÍLO 
„VN Brno - rekonstrukce očního oddělení na budově B - realizace“ 
SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL: 
Vojenská nemocnice Brno p. o. 
Sídlo: Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno 
Zastoupený: plk. gšt. MUDr. Petrem Králem, MBA, ředitelem 
IČO: 60555530 
DIČ: CZ60555530 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: .............
(dále jen „Objednatel") 
a 
ZHOTOVITEL: 
PFM-service s.r.o. 
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
Zastoupený: ................- jednatel a ................... - jednatel 
IČ: 26981629 
DIČ: CZ26981629 
Bankovní spojení: ...............
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 49685 
(dále jen „Zhotovitel“) 
uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění: 
PREAMBULE 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího postupu na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou v sytému NEN pod ev. č. N006/25/V00031735 pod názvem „VN Brno - rekonstrukce očního oddělení na budově B - realizace“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 
Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení “ podle: 
Projektové dokumentace s názvem „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“, zpracovaná projektantem MAZOK s.r.o., IČO 11920360, v 04/2024 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění 
„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 2 

pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 
pravomocného stavebního povolení záměru č.j. 723727/2025-1322 ze dne 11. srpna 2025 v právní moci 12. 8. 2025 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ). 
Právních předpisů: 
Zákon č. č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“. 
Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS“ 
Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“ 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“ 
Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality. 
Právní předpisy v oblasti památkové péče, hygieny, bezpečnosti práce, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ. 
Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v čl. I. odst. 1.1.2. této smlouvy. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, právními předpisy, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. Dodavatelskou projektovou dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové (editovatelné) podobě. 
Výrobní projektové dokumentace (RDS) pro dílčí části díla, které takovou dokumentaci vyžadují, a to v rozsahu přílohy č. V. této smlouvy. 
Dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek oproti ověřené DSP ve stavebním řízení podle § 232 stavebního zákona, a to pro účely podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. 
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohou č. IV. této smlouvy. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 
Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních komunikací před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 
Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví pří práci na staveništi. 
Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného statika po celou dobu realizace stavby. 
Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla. 
Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků. 
Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem 
„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 3 

prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 
Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 

Návod na provoz a údržbu díla bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno. 
Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví dílo podle požárně bezpečnostního řešení z PROJEKTU. 
Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 
Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla. 
Zhotovitel v průběhu provádění díla 
umožní postupem prací na stavbě dokončování jednotlivých místností tak, aby mohlo být zahájeno jejich vybavování interiérovým vybavením a zdravotnickou technologií; 
umožní před ukončením realizace stavby zaměření pro účely výroby interiérového vybavení a montáž interiérového vybavení v dokončených prostorách stavby; 
je povinen koordinovat práce na stavbě s činností dodavatele interiérového vybavení, jehož identifikační údaje oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně; 
Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím díla provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla. 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno. 
Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel 
zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, 
poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního rozhodnutí 

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
PROJEKTU; 
ROZPOČTU; 
podmínek POVOLENÍ; 
„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 4 

NABÍDKY 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VZMR 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 
1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle čl. I. odst. 1.1.3. této smlouvy, jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje: 
Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. OZ, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 
1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v této smlouvě a v dále uvedených dokumentech a podkladech, které předal Objednatel Zhotoviteli, nebo které vznikly / vzniknou při realizaci díla: 
vlastní text této smlouvy o dílo; 
POVOLENÍ; 
PROJEKT; 
ROZPOČET; 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
NABÍDKA; 
protokol o předání a převzetí staveniště; 
protokol o předání a převzetí díla. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. 
1.2. ZMĚNY DÍLA 
1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, pokud by provedení změny celková hodnota závazku podle této smlouvy po jeho změně překročila limit podle § 27 ZZVZ. 
1.2.2. Změnou díla je: 
a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 
b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 
c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 
d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 
Dohodnuté změny díla, které po jejich provedení navyšují celkovou hodnotu závazku podle této smlouvy nad limit podle § 27 ZZVZ, musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4-7 ZZVZ. 
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 
1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 5 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. 
1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 
1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ). 
1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 
1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 
1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 
1.3.3. V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla. 
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy. 
1.3.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 
1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných kontrolních dnech min. 1x za 14 dnů, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené. 
1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 
1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 
seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění; 
předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 
1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 
1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 
Smluvní strany jsou povinny označovat dílo takto: 
Název díla: „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
reg. č.: 107V752002511 
1.6. REALIZAČNÍ TÝM 
1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 
1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 6 

III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 
1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. X. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 
1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 
1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZZVZ, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 
1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky. 
1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 
1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů. 
1.7.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR). 
1.7.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu. 
1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 
1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 7 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 
1.8.3. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnosti zajišťované stavbyvedoucím plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.7. této smlouvy. 
1.8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. 
Článek II. Doba plnění 
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 
2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. 
2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy. 
2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 
2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 
2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 
nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 
2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, 
nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 
2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 
2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů podle čl. II. odst. 2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU. 
2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (čl. II. odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 
2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou. 
2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 
Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě Zábrdovická 3, Brno. 
Článek IV. Cena 
4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 8 

která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 
8 348 119,68 Kč bez DPH 
(slovy: osm milionů tři sta čtyřicet osm tisíc jedno sto devatenáct Kč a šedesát osm haléřů) 
4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání dokončeného díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady Zhotovitele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že díla může být změněna pouze v těchto případech: 
4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 
4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených. 
4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 
4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu. 
4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. IV. odst. 4.4.2. této smlouvy. 
Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis provedených prací a dodávek TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 
5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací a dodávek bude obsahovat: 
počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky); 
počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 9 

počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky. 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I. této smlouvy. 
5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje: 
celková cena díla v Kč bez DPH; 
do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 
v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 
zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 
5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
označení díla; 
číslo smlouvy; 
číslo faktury; 
den uskutečnění zdanitelného plnění; 
den splatnosti faktury; 
označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí dále v příloze obsahovat: 
souhrnný zjišťovací protokol; 
soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5.5. této smlouvy. Pokud zjistí Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5.5. této smlouvy. 
5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě faktury odpadne. 
5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky, pokud si to Objednatel vyhradí a sdělí Zhotoviteli elektronickou adresu pro doučování faktur. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum schválení soupisu skutečně provedených prací a dodávek ze strany TDS podle čl. V. odst. 5.7.1. této smlouvy. 
5.6. POZASTÁVKA 
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.2. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.2. této smlouvy slouží jako pozastávka. 
5.6.2. Fakturu za pozastávku vystaví Zhotovitel po předání a převzetí celého díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost faktury. Objednatel může rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků nebránících v užívání budou kryty bankovní zárukou podle čl. XVI. této smlouvy, kterou Zhotovitel k tomu účelu Objednateli poskytne, a poslední fakturu uvolnit k proplacení. 
5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis skutečně provedených prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu skutečně provedených prací a dodávek a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a v souladu s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis skutečně provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 10 

souhlas se soupisem skutečně provedených prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem s uvedením data podpisu. 
5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený TDS, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 
5.7.3. Schvalování pozastávky: 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele a podle čl. IX. odst. 9.8. této smlouvy, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Platba pozastávky může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. této smlouvy. 
Článek VI. Staveniště 
6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, jakmile mu to umožní provozní podmínky, nejpozději však v termínu do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta (DP), TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 
6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště. 
6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ / STAVBY 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 
6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 
6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 11 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 
6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z čl. VI. odst. 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení Zhotovitel sám odpovědný. 
6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 
6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 
6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 
6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště. 
Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 
7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděného díla stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota, počasí (například déšť), klimatické podmínky. Zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku denně, a to všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 
7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, DP, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy. 
7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, DP, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 
7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 12 

předmět kontrolního dne; 
kontrola harmonogramu díla; 
vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
soupis změn 
podpisy zúčastněných osob. 

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem TDS nebo DP ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pravidelných kontrolních dnů za účasti TDS, Objednatele, DP a Zhotovitele za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací na díle. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 
7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 
7.9. Kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, DP, koordinátorem BOZP, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP 
8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 
8.2. Objednatel určil pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. 
8.3. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby právních. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost. 
8.4. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro koordinátorem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 
8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění, aby je koordinátor BOZP mohl zapracovat do plánu BOZP, resp. do jeho aktualizace. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP. 
8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj. 
doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali o všech skutečnostech, které mají vliv na rizika vyplývající z realizace stavby 
poskytovat součinnost 
předávat potřebné informace a podklady (např. o změnách pracovních a technologických postupů, které pro realizaci stavby zvolili / v průběhu realizace stavby změnili a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých odstranění takových rizik) 
zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP, vyjadřovat se k nim, případně potřeby (změny okolností) vyvolávat potřebu aktualizací plánu BOZP 

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 13 

k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 
8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi. 
8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce. 
8.9. Zhotovitel je povinen 
8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 
8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 
8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 
8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 
8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 
Článek IX. Provádění díla 
9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. 
9.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých metod a technologických postupů. 
9.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 
9.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dílo, za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 
9.5. Zhotovitel se před zahájením práce na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 
9.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla sjednaných touto smlouvou nebo v průběhu realizace díla dohodnutých na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění díla. 
9.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních PROJEKTU, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známé, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávané za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 
9.8. VÝSTUPNÍ KONTROLA „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 14 

Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 
Soupis vad a nedodělků. 
Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 
9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
9.9.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu, uvedené v čl. IX. odst. 9.9.2. této smlouvy. Zhotovitel pověřil výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle stavebního zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet odborně způsobilých spolupracovníků. 
Stavbyvedoucí bude osobou stále přítomnou na stavbě odpovídající za vedení stavby, za prováděné stavební práce, za jejich koordinaci, za plnění harmonogramu a řešení technických problémů při realizaci stavby. Koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet. 
9.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.3. a 1.8.2. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 
.................... ve funkci stavbyvedoucí 
................. ve funkci specialista elektro 
9.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 
9.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 
9.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a po jejich provedení seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
9.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do PROJEKTU (do elektronické verze nebo do jednoho paré papírové verze) veškeré změny oproti PROJEKTU vzniklé při provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS a DP. 
9.13. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 
Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 
10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 
10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 
............
Objednatel dále pověřuje výkonem dozoru projektanta (DP) společnost: „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 15 

MAZOK, s.r.o. 
Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu: 
...................
10.3. Objednatel, TDS, DP a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo realizace díla, budou mít Objednatel, TDS, DP a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 
10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených PROJEKTEM a plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
10.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 
10.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 
10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s kontrolou provádění díla ve fázi přípravy díla, vlastní realizace díla a při dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy Zhotoviteli. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy TDS akceptovat. 
10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení díla a provedení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to až do doby podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla a do doby vydání potvrzení o odstranění veškerých vad a nedodělků díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 
10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za to, zda Zhotovitel dodržuje bezpečnost práce v rozsahu požadovaném pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 
10.7.4. Nároky Zhotovitele a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení. TDS po projednání s Objednatelem a DP vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 
10.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, dát Zhotoviteli pokyn k zastavení prací a dodávek prováděných v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou zápisem ve stavebním deníku, za současného upozornění Zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 
10.7.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou. 
10.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 16 

na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování. 
10.7.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 
10.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 
10.7.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla. 
10.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 
10.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 
10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
10.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit. 
Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 
11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon DP a koordinátora BOZP. 
11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 
11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 
11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 
11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
11.6. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a DP a odsouhlasenou dokumentaci předat Objednateli v jednom datovém a v jednom tištěném vyhotovení. 
11.7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.9. této smlouvy. 
11.8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla. 
11.9. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 
Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
12.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 17 

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 
12.2. POJIŠTĚNÍ 
12.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše Celkové ceny bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Doklad o pojištění (např. kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění) předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen tyto doklady předložit na požádání kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 
12.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 20 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této Smlouvy doklady o pojištění a je dále povinen tyto doklady předložit Objednateli pojistnou Smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 
12.2.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
12.2.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 
12.3. NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 
Článek XIII. Předání díla 
13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
13.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 
13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li v této smlouvě uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
Bankovní záruku podle čl. XVI. této smlouvy (pokud bude pozastávka podle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy nahrazena bankovní zárukou) 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
doklady o provedení dalších zkoušek v průběhu realizace díla (pokud se uskutečnily), 
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
stavební deník; 
předpisy k jednotlivým technickým a technologickým zařízením 
doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán podle přílohy č. VI. této smlouvy; 
výrobní projektová dokumentace, pokud byla pořízena; 
dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek oproti ověřené DSP ve stavebním řízení; dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) podle přílohy č. IV. této smlouvy; 
doklady o individuálním vyzkoušení; 
doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby); 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla. 
Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 18 

označení díla 
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
prohlášení Objednatele o převzetí díla 
datum a místo sepsání protokolu 
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
seznam předané dokumentace 
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
termín vyklizení staveniště 
datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. 
Článek XIV. Odpovědnost za vady 
14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců (záruční doba). 
14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou, dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 
14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé Zhotoviteli vyúčtovat. 
14.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
14.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval; 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit; 
nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele; 
vyšší mocí. 

14.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat. 
14.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
14.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
14.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 
14.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 14.11.2. této smlouvy a na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy datovou schránkou. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušné kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 14.11.2. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 19 

14.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
e-mail:.....................
mobilní telefon: ............
telefon: ............
datová schránka: ........
14.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

14.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 
14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 
14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
14.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 
14.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
14.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 
14.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 
14.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 
14.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. 
14.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 
14.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. 
14.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
14.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 20 

14.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
14.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 
14.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace Objednatelem. 
14.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. 
14.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
14.14. POSKYTNUTÍ SLEVY 
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 
14.15. V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2635 občanského zákoníku. 
Článek XV. Smluvní pokuty 
15.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
15.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. 
15.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a den prodlení. 
15.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ a kalendářní den (v případě havárie hodinu) prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den (v případě havárie hodinu) prodlení. 
15.5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
15.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 
15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy (zákaz poddodávek), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 21 

15.9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení. 
15.10. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
15.12. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem. 
15.13 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 
15.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 
15.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
15.16. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit. 
Článek XVI. Bankovní záruka 
16.1. Objednatel může rozhodnout, že pozastávka podle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy bude nahrazena bankovní zárukou na částku ve výši pozastávky. V takovém případě bude bankovní záruka respektovat tyto podmínky: 
16.1.1. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Bankovní záruka bude předložena písemnou formou (listinný nebo elektronický originál) zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
16.1.2. Bankovní záruka bude platná ještě alespoň 30 kalendářních dnů po předpokládaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po odstranění všech vad a nedodělků. 
16.2. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 
Článek XVII. Odstoupení od smlouvy 
17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž opakované porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 
17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 
17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 
17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 22 

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů - zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů. 
Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 
Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména 

17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 
17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 
17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
Článek XVIII. Ochrana informací 
18.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1. a 1.7.2. této smlouvy). 
18.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým pod 
dodavatelům. 
18.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 23 

pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování. 
11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 
12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele. 
13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 
14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 

Článek XIX. Systém řízení kvality 
19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 
19.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele. 
19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001. 
19.4. Doklad o provedené výstupní kontrole podle čl. IX. odst. 9.8. této smlouvy je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. 
Článek XX. Následná nemožnost plnění 
20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 
20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 
Článek XXI. Vyšší moc 
21.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty. 
21.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 24 

Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit. 
21.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 
21.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 
Článek XXII. Změny smlouvy 
22.3. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY 
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle čl. XXII. odst. 22.3. této smlouvy je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat. 
Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí: 
„zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva 
„novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ. 
„zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle ZZVZ, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem. 
„NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí. 
„Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí. 
„společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů). 

22.3.1. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. 
22.3.2. Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem 
Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z následujících důvodů: 
dohodou smluvních stran, 
výpovědí, 
odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ, 
z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce, 
v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu, 
v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 
v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZZVZ. 

Nastane-li některý z důvodů ukončení smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 25 

22.3.3. Změna zhotovitele v případě, že původní zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy 
Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení splnit před zahájením plnění smlouvy, a původní zhotovitel tyto podmínky nesplnil, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí postupem podle čl. XXII. odst. 22.3.4. této smlouvy. 
22.3.4. Postup při změně zhotovitele 
22.3.4.1. V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení (nebo pokud dodavatel druhý v pořadí odmítne smlouvu uzavřít), může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. 
22.3.4.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle čl. XXII. odst. 22.3.4.1. této smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem: 
1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, která byla předložena v Nabídce. 
2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel (pokud takové jsou) budou v textu smlouvy zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem: 
a) dokončeny a předány, nebo 
b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo 
c) nebyly provedeny. 

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat. 
3) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního zhotovitele. 
4) Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele. Ve lhůtě plnění lze zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele. 
5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele. 

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení 
23.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě na vhodném datovém nosiči. 
23.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
23.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 
23.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Smlouvu lze uzavřít v elektronické podobě. 
23.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy. 
23.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I. ROZPOČET; 
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 
příloha číslo IV. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
příloha číslo V. VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMETENTACE STAVBY 
23.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 
23.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 26 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
23.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
V Brně, dne …………...………..…… V Brně dne dle el. podpisu 
_________________________ __________________________ 
za Objednatele za Zhotovitele 
plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA Bc. Pavel Prokš 
ředitel VN Brno jednatel 
__________________________ 
za Zhotovitele 
....................
jednatel 
PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 
ROZPOČET Stavba: 
Z0162025 
Zadavatel 
IČO: 
60555530 
DIČ: 
CZ60555530 
61500 
Zhotovitel: 
IČO: 
26981629 
DIČ: 
CZ26981629 
61200 
Vypracoval: 
Rozpis ceny 
HSV 
PSV 
MON 
Vedlejší náklady 
Ostatní náklady 
Celkem 
Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 
12 
% 
CZK 
Snížená DPH 
12 
% 
CZK 
Základ pro základní DPH 
21 
% 
CZK 
Základní DPH 
21 
% 
CZK 
Zaokrouhlení 
CZK 
Cena celkem s DPH 
CZK 
v 
dne 
Za objednatele 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
1 753 105,13 
0,00 
3 038 990,41 
1 794 646,82 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
PFM-service s.r.o. 
Celkem 
2 316 131,27 
Purkyňova 71/99 
Brno 
Vojenská nemocnice Brno 
Zábrdovická 3/3 
Brno - Zábrdovice 
Za zhotovitele 
0,00 
0,00 
0,00 
8 348 119,68 
10 101 224,81 
8 348 119,68 
1 198 351,18 
Zpracováno programem 
BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 2 z 36 Rekapitulace dílčích částí 
Číslo 
Název 
Základ pro 
sníženou DPH 
Základ pro základní 
DPH 
DPH celkem 
Cena celkem 
% 
0,00 
SO 01 
0,00 
8 348 119,68 
1 753 105,13 
10 101 224,81 
100 
D.1.1 
0,00 
3 437 593,06 
721 894,54 
4 159 487,60 
41 
D.1.4.c 
0,00 
418 854,72 
87 959,49 
506 814,21 
5 
D.1.4.e 
0,00 
594 082,43 
124 757,31 
718 839,74 
7 
D.1.4.g 
0,00 
1 794 646,82 
376 875,83 
2 171 522,65 
21 
D.1.4.ch 
0,00 
2 102 942,65 
441 617,96 
2 544 560,61 
25 
0,00 
8 348 119,68 
1 753 105,13 
10 101 224,81 
100 
Popis stavby: Z0162025 - VN Brno - rekonstrukce očního oddělení Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce očního oddělení Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika Popis rozpočtu: D.1.4.e - Zdravotechnika Popis rozpočtu: D.1.4.g - Silnoproud Popis rozpočtu: D.1.4.ch - Slaboproud 
Stavební objekt 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
Vzduchotechnika 
Zdravotechnika 
Silnoproud 
Slaboproud 
Celkem za stavbu 
Zpracováno programem 
BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 3 z 36Rekapitulace dílů 
Číslo 
Název 
Typ dílu 
Celkem 
% 
_1 HSV 89 456,69 1,1 _2 HSV 78 691,25 0,9 _3 HSV 12 384,90 0,1 _4 HSV 3 740,08 0,0 _5 HSV 409 809,51 4,9 3 HSV 10 597,13 0,1 342 HSV 312 761,44 3,7 416 HSV 194 916,90 2,3 61 HSV 321 560,96 3,9 63 HSV 6 191,63 0,1 64 HSV 34 004,00 0,4 94 HSV 45 772,60 0,5 95 HSV 82 292,28 1,0 96 HSV 270 565,93 3,2 99 HSV 28 688,00 0,3 EF 1 HSV 90 740,06 1,1 EF 2. HSV 89 191,75 1,1 EF 3. HSV 90 105,56 1,1 711 PSV 63 438,77 0,8 
721 - Vnitřní kanalizace 
722 - Vnitřní vodovod 
713 - Izolace tepelné 
767 - Konstrukce zámečnícké 
725 - Zařizovací předměty 
Svislé a kompletní konstrukce 
Stěny a příčky montované lehké 
Podhledy a mezistropy montované lehké 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Výplně otvorů 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Větrání - WC muži 
Větrání - WC bezbariérové 
Větrání - WC ženy 
Izolace proti vodě 
Zpracováno programem 
BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 4 z 367421 PSV 856 079,52 10,3 7422 PSV 239 335,78 2,9 7423 PSV 256 562,00 3,1 7424 PSV 71 727,33 0,9 7425 PSV 40 638,96 0,5 74261 PSV 199 262,42 2,4 74262 PSV 45 907,00 0,5 74263 PSV 65 626,89 0,8 7427 PSV 144 179,75 1,7 7428 PSV 183 623,00 2,2 766 PSV 261 768,43 3,1 767 PSV 18 623,81 0,2 771 PSV 119 250,94 1,4 776 PSV 175 741,58 2,1 781 PSV 242 749,96 2,9 783 PSV 5 762,68 0,1 784 PSV 48 711,59 0,6 M21 MON 1 794 646,82 21,5 D96 PSU 144 660,60 1,7 999. VN 148 817,35 1,8 VN VN 1 049 533,83 12,6 Cena celkem 8 348 119,68 100,0 
Strukturovaná kabeláž 
Elektrická požární signalizace 
Evakuační rozhlas 
Přístupový systém 
Kamerový systém 
Sestra-pacient - dodávka a montáž technologie 
Sestra-pacient - oživení, konfigurace a ostatní náklady 
Sestra-pacient - elektroinstalační materiál 
Společné trasy 
Ostatní 
Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
Konstrukce zámečnické 
Elektromontáže 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Ostatní náklady 
Vedlejší náklady 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Podlahy a stěny povlakové 
Obklady keramické 
Nátěry 
Malby 
Zpracováno programem 
BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 5 z 36S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Díl: 
3 
Svislé a kompletní konstrukce 
10 597,13 
1 
317314125R00 
Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm 
kus 
6,00000 
112,00 
672,00 
801-4 
RTS 25/ I 
2 
317941121RT3 
Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm 
t 
0,04373 
55 600,00 
2 431,39 
801-1 
RTS 25/ I 
3 
342255028RT1 
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm 
m2 
3,52150 
1 298,00 
4 570,91 
801-1 
RTS 25/ I 
4 
342948111R00 
Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky 
m 
8,45000 
186,00 
1 571,70 
801-1 
RTS 25/ I 
5 
346244381R00 
Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm 
m2 
1,12500 
1 201,00 
1 351,13 
801-1 
RTS 25/ I 
Díl: 
342 
Stěny a příčky montované lehké 
312 761,44 
6 
342013121R00 
Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
60 
m2 
43,17050 
1 996,00 
86 168,32 
801-1 
RTS 25/ I 
7 
342013321R00 
Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60 
m2 
51,40575 
1 885,00 
96 899,84 
801-1 
RTS 25/ I 
8 
342013322R00 
Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost 
EI 90 
m2 
7,53750 
2 085,00 
15 715,69 
801-1 
RTS 25/ I 
9 
342090212R00 
Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti 
jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné 
kus 
8,00000 
2 055,00 
16 440,00 
801-1 
RTS 25/ I 
10 
342263990RD2 
Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 
desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě 
m2 
102,11375 
382,50 
39 058,51 
801-1 
RTS 25/ I 
11 
342668111R00 
Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 
m 
30,80500 
144,50 
4 451,32 
801-4 
RTS 25/ I 
12 
342941112R00 
Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami 
m 
55,20000 
124,50 
6 872,40 
801-1 
RTS 25/ I 
13 
347081241R00 
Bezpečnostní předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami BT 3 předstěny spřažené, ocelová 
konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm tloušťka desky 12,5 mm, standard, tl. izolace 40 mm, 
požární odolnost EI 30 
m2 
7,82775 
3 515,00 
27 514,54 
801-1 
RTS 25/ I 
14 
3420001 
Předstěna SDK tl. 150 mm 
m2 
8,52000 
2 305,26 
19 640,82 
Vlastní 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
Stránka 6 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
Díl: 
416 
Podhledy a mezistropy montované lehké 
194 916,90 
15 
342264051RT2 
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace 
m2 
111,05000 
1 258,00 
139 700,90 
801-1 
RTS 25/ I 
16 
342264101R00 
Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , 
kus 
17,00000 
963,00 
16 371,00 
801-1 
RTS 25/ I 
17 
553476656R 
Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; 
materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 45 
kus 
17,00000 
2 285,00 
38 845,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
Díl: 
61 
Úpravy povrchů vnitřní 
321 560,96 
18 
602013111RT3 
Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, 
m2 
105,42568 
445,50 
46 967,14 
801-1 
RTS 25/ I 
19 
602016193R00 
Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová 
m2 
6,07250 
76,00 
461,51 
801-1 
RTS 25/ I 
20 
610991111R00 
Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm 
m2 
8,28000 
66,40 
549,79 
801-1 
RTS 25/ I 
21 
612401291RT2 
Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou 
kus 
8,00000 
345,00 
2 760,00 
801-4 
RTS 25/ I 
22 
612421321R00 
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých 
m2 
384,44440 
244,00 
93 804,43 
801-4 
RTS 25/ I 
23 
612423521R00 
Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, 
m2 
6,75000 
1 320,00 
8 910,00 
801-4 
RTS 25/ I 
24 
612471411RT2 
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná 
m2 
390,51690 
344,20 
134 415,92 
801-1 
RTS 25/ I 
25 
612481211RT8 
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 
m2 
6,07250 
361,00 
2 192,17 
801-1 
RTS 25/ I 
26 
912 R00 
Hzs - Zedník tř.7 
h 
60,00000 
525,00 
31 500,00 
Prav.M 
RTS 25/ I 
Díl: 
63 
Podlahy a podlahové konstrukce 
6 191,63 
27 
631312141R00 
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách 
m3 
1,04500 
5 925,00 
6 191,63 
801-4 
RTS 25/ I 
Díl: 
64 
Výplně otvorů 
34 004,00 
28 
642941211RT4 
Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 
vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 900/1970 mm 
kus 1,00000 13 350,00 13 350,00 801-1 RTS 25/ I 
Stránka 7 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
29 
642942212R00 
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně 
kus 
2,00000 
654,00 
1 308,00 
801-1 
RTS 25/ I 
30 
642942214R00 
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně 
kus 
5,00000 
807,00 
4 035,00 
801-1 
RTS 25/ I 
31 
55330479R 
Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 1100 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 
mm 
kus 
4,00000 
2 320,00 
9 280,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
32 
553308110R 
Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 
mm 
kus 
2,00000 
1 858,00 
3 716,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
33 
553308330R 
Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 
mm 
kus 
1,00000 
2 315,00 
2 315,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
Díl: 
94 
Lešení a stavební výtahy 
45 772,60 
34 
941955002R00 
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 
m2 
231,76000 
197,50 
45 772,60 
800-3 
RTS 25/ I 
Díl: 
95 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
82 292,28 
35 
952901111R00 
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
m2 
355,27000 
196,00 
69 632,92 
801-1 
RTS 25/ I 
36 
95001 
Provizorní zakrytí podlah geotextílie+páska 
kompl 
1,00000 
12 659,36 
12 659,36 
Vlastní 
Díl: 
96 
Bourání konstrukcí 
270 565,93 
37 
962031116R00 
Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm 
m2 
17,21650 
233,00 
4 011,44 
801-3 
RTS 25/ I 
38 
962031124R00 
Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm 
m2 
55,87750 
175,50 
9 806,50 
801-3 
RTS 25/ I 
39 
974031164R00 
Bourání příček v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm 
m 
3,75000 
359,00 
1 346,25 
801-3 
RTS 25/ I 
40 
965048515R00 
Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 
m2 
125,93000 
428,50 
53 961,01 
801-3 
RTS 25/ I 
41 
965081713RT1 
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 
m2 
34,11000 
127,50 
4 349,03 
801-3 
RTS 25/ I 
42 
968061125R00 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 
kus 
5,00000 
25,40 
127,00 
801-3 
RTS 25/ I 
43 
968072455R00 
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 
m2 
6,30400 
561,00 
3 536,54 
801-3 
RTS 25/ I 
44 
970231150R00 
Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm 
m 
2,02000 
1 030,00 
2 080,60 
801-3 
RTS 25/ I 
Stránka 8 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
45 
973031334R00 
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm 
kus 
6,00000 
361,50 
2 169,00 
801-3 
RTS 25/ I 
46 
975032341R00 
Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva přes 150 do 
300 mm, při délce podchycení do 3 m 
m 
3,00000 
2 355,00 
7 065,00 
801-3 
RTS 25/ I 
47 
978013141R00 
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 % 
m2 
384,44440 
40,70 
15 646,89 
801-3 
RTS 25/ I 
48 
978059531R00 
Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2 
m2 
145,17000 
166,50 
24 170,81 
801-3 
RTS 25/ I 
49 
725110811R00 
Demontáž klozetů splachovacích 
soubor 
4,00000 
327,00 
1 308,00 
800-721 
RTS 25/ I 
50 
725122813R00 
Demontáž pisoárů a nádrže 
soubor 
2,00000 
223,50 
447,00 
800-721 
RTS 25/ I 
51 
725210821R00 
Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur 
soubor 
5,00000 
211,50 
1 057,50 
800-721 
RTS 25/ I 
52 
725330840R00 
Demontáž výlevek ocelových nebo litinových 
soubor 
1,00000 
321,00 
321,00 
800-721 
RTS 25/ I 
53 
767581801R00 
Demontáž podhledů kazet 
m2 
158,50000 
428,00 
67 838,00 
800-767 
RTS 25/ I 
54 
96003R 
Bourání stávaj. předstěn, vč. likvidace 
kompl 
7,82775 
3 758,25 
29 418,64 
Vlastní 
55 
960101R 
Demontáž sprch vč. likvidace 
kpl 
2,00000 
1 265,36 
2 530,72 
Vlastní 
56 
909 R00 
Hzs-nezmeritelne stavebni prace 
h 
75,00000 
525,00 
39 375,00 
Prav.M 
RTS 25/ I 
Díl: 
99 
Staveništní přesun hmot 
28 688,00 
57 
999281145R00 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením 
t 
23,22915 
1 235,00 
28 688,00 
801-4 
RTS 25/ I 
Díl: 
711 
Izolace proti vodě 
63 438,77 
58 
711212000R00 
Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 
m2 
42,23510 
86,70 
3 661,78 
800-711 
RTS 25/ I 
59 
711212002R00 
Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti 
m2 
42,23510 
774,00 
32 689,97 
800-711 
RTS 25/ I 
60 
711212601R00 
Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 
m 
49,23400 
219,50 
10 806,86 
800-711 
RTS 25/ I 
61 
711212602R00 
Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna 
kus 
37,00000 
276,50 
10 230,50 
800-711 
RTS 25/ I 
62 
711212611R00 
Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů 
m 
5,55000 
240,50 
1 334,78 
800-711 
RTS 25/ I 
63 
998711202R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 
% 
857,25000 
5,50 
4 714,88 
800-711 
RTS 25/ I 
Díl: 
766 
Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
261 768,43 
64 
766661112R00 
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm 
kus 2,00000 932,00 1 864,00 800-766 RTS 25/ I 
Stránka 9 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
65 
766661122R00 
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm 
kus 
5,00000 
964,00 
4 820,00 
800-766 
RTS 25/ I 
66 
766666112R00 
Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových, 
kus 
1,00000 
1 763,00 
1 763,00 
800-766 
RTS 25/ I 
67 
766670021R00 
Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku 
kus 
8,00000 
545,00 
4 360,00 
800-766 
RTS 25/ I 
68 
766012R 
D+M podstropní světlík v. 500 mm 
kus 
1,00000 
8 563,25 
8 563,25 
Vlastní 
69 
76601R 
T-5 Konstrukce sanitárních příček, dřevotřískové desky oboustranně potažené laminátem, tl. 28 
mm,, antracit RAL 7016 
kpl 
1,00000 
34 258,00 
34 258,00 
Vlastní 
70 
76602R 
T-6 Konstrukce sanitárních příček, dřevotřískové desky oboustranně potažené laminátem, tl. 28 
mm,, antracit RAL 7016 
kpl 
1,00000 
38 526,35 
38 526,35 
Vlastní 
71 
76603R 
Elektronický vrátný a čtečka karet 
kus 
2,00000 
9 526,35 
19 052,70 
Vlastní 
72 
76699.1 
D+M Šatní skříň 600x600x2500 mm 
kus 
5,00000 
14 985,00 
74 925,00 
Vlastní 
73 
54914624R 
kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty 
leštěná nerez 
kus 
7,00000 
1 254,25 
8 779,75 
SPCM 
RTS 25/ I 
74 
549146695R 
Kování dveřní pro posuvné dveře 
kus 
1,00000 
2 125,36 
2 125,36 
Vlastní 
75 
61165002R 
Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; 
povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo 
kus 
2,00000 
3 370,00 
6 740,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
76 
61165004R 
Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; 
povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo 
kus 
1,00000 
3 370,00 
3 370,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
77 
61165005R 
Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; 
povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo 
kus 
2,00000 
4 200,00 
8 400,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
78 
611650067R 
Dveře dřevěné interiérové protipožární hladké 1100 x 1970 mm L, pož.odolnost EW 30 DP3 - 
C2,, bílá 9010 
kus 
2,00000 
14 985,36 
29 970,72 
Vlastní 
79 
61169704R 
Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová 
úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo 
kus 
1,00000 
10 050,00 
10 050,00 
SPCM 
RTS 25/ I 
80 
998766202R00 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 
% 
2 154,00000 
1,95 
4 200,30 
800-766 
RTS 25/ I 
Stránka 10 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
Díl: 
767 
Konstrukce zámečnické 
18 623,81 
81 
767587111R00 
Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v 
úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, 
m2 
12,63240 
533,00 
6 733,07 
800-767 
RTS 25/ I 
82 
767587211R00 
Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně 
dodávky kazet 
m2 
12,63240 
911,00 
11 508,12 
800-767 
RTS 25/ I 
83 
998767202R00 
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 
% 
0,42000 
911,00 
382,62 
800-767 
RTS 25/ I 
Díl: 
771 
Podlahy z dlaždic a obklady 
119 250,94 
84 
771101116R00 
Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 
do 30 mm 
m2 
34,85000 
239,00 
8 329,15 
800-771 
RTS 25/ I 
85 
771101210R00 
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 
m2 
34,85000 
60,80 
2 118,88 
800-771 
RTS 25/ I 
86 
771475014R00 
Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele 
m 
52,54000 
182,00 
9 562,28 
800-771 
RTS 25/ I 
87 
771479001R00 
Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky 
m 
52,54000 
128,00 
6 725,12 
800-771 
RTS 25/ I 
88 
771575118R00 
Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele 
m2 
34,85000 
1 154,00 
40 216,90 
800-771 
RTS 25/ I 
89 
771578011R00 
Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 
m 
52,54000 
88,60 
4 655,04 
800-771 
RTS 25/ I 
90 
771579791R00 
Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě 
m2 
8,77000 
21,10 
185,05 
800-771 
RTS 25/ I 
91 
771579793RT3 
Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně 
m2 
34,58000 
19,50 
674,31 
800-771 
RTS 25/ I 
92 
58581721.AR 
vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 
MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm 
kg 
118,49000 
21,25 
2 517,91 
SPCM 
RTS 25/ I 
93 
59761005R 
Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku 
m2 
44,11440 
847,00 
37 364,90 
SPCM 
RTS 25/ I 
94 
998771202R00 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 
% 
784,25000 
8,80 
6 901,40 
800-771 
RTS 25/ I 
Díl: 
776 
Podlahy a stěny povlakové 
175 741,58 
95 
776101101R00 
Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem 
m2 
90,11000 
9,90 
892,09 
800-775 
RTS 25/ I 
96 
776101115R00 
Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 
m2 
90,11000 
103,50 
9 326,39 
800-775 
RTS 25/ I 
97 
776101121R00 
Přípravné práce penetrace podkladu 
m2 
90,11000 
32,40 
2 919,56 
800-775 
RTS 25/ I 
98 
776421100RU1 
Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku 
m 78,35000 135,00 10 577,25 800-775 RTS 25/ I 
Stránka 11 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
99 
776511810R00 
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 
m2 
91,82000 
58,20 
5 343,92 
800-775 
RTS 25/ I 
100 
776521200RT1 
Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž 
m2 
90,11000 
376,00 
33 881,36 
800-775 
RTS 25/ I 
101 
776994111R00 
Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 
m 
45,05500 
70,90 
3 194,40 
800-775 
RTS 25/ I 
102 
23521594.AR 
vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá 
kg 
432,52800 
35,26 
15 250,94 
SPCM 
RTS 25/ I 
103 
24696906.AR 
Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: 
voda (disperzní) 
kg 
13,51650 
122,50 
1 655,77 
SPCM 
RTS 25/ I 
104 
28412001R 
Podlahovina PVC antistatická 
m2 
19,78900 
744,25 
14 727,96 
Vlastní 
105 
28412303R 
Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 
43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1 
m2 
79,33200 
886,00 
70 288,15 
SPCM 
RTS 25/ I 
106 
998776202R00 
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m 
% 
6 985,26000 
1,10 
7 683,79 
800-775 
RTS 25/ I 
Díl: 
781 
Obklady keramické 
242 749,96 
107 
781101210RT1 
Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 
m2 
105,42568 
54,40 
5 735,16 
800-771 
RTS 25/ I 
108 
781419706R00 
Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 
m2 
105,42568 
51,00 
5 376,71 
800-771 
RTS 25/ I 
109 
781419711R00 
Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 
m2 
7,81650 
70,30 
549,50 
800-771 
RTS 25/ I 
110 
781475120R00 
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených 
do flexibilního tmele 
m2 
105,42568 
1 103,00 
116 284,53 
800-771 
RTS 25/ I 
111 
781497111R00 
Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 
m 
58,06900 
294,50 
17 101,32 
800-771 
RTS 25/ I 
112 
781497121R00 
Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 
m 
29,25000 
294,50 
8 614,13 
800-771 
RTS 25/ I 
113 
59761001R 
Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku 
m2 
115,96825 
658,00 
76 307,11 
SPCM 
RTS 25/ I 
114 
998781202R00 
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m 
% 
2 635,36000 
4,85 
12 781,50 
800-771 
RTS 25/ I 
Stránka 12 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
Díl: 
783 
Nátěry 
5 762,68 
115 
783225600R00 
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, 
m2 
13,19900 
250,00 
3 299,75 
800-783 
RTS 25/ I 
116 
783226100R00 
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, 
m2 
13,19900 
98,80 
1 304,06 
800-783 
RTS 25/ I 
117 
783903811R00 
Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly 
m2 
13,19900 
87,80 
1 158,87 
800-783 
RTS 25/ I 
Díl: 
784 
Malby 
48 711,59 
118 
784161401R00 
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 
m2 
405,59190 
29,80 
12 086,64 
800-784 
RTS 25/ I 
119 
784165512R00 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné 
m2 
405,59190 
90,30 
36 624,95 
800-784 
RTS 25/ I 
Díl: 
D96 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
144 660,60 
120 
979990107R00 
Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 
t 
6,13809 
3 080,00 
18 905,32 
801-3 
RTS 25/ I 
121 
979990110R00 
Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů 
t 
0,79250 
6 485,00 
5 139,36 
801-3 
RTS 25/ I 
122 
979990181R00 
Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů 
t 
0,32137 
6 485,00 
2 084,08 
801-3 
RTS 25/ I 
123 
979999997R00 
Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 
t 
26,44077 
460,00 
12 162,75 
801-3 
RTS 25/ I 
124 
979011111R00 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 
t 
33,69266 
520,00 
17 520,18 
801-3 
RTS 25/ I 
125 
979086213R00 
Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu, 
t 
33,69266 
1 292,00 
43 530,92 
831-2 
RTS 25/ I 
126 
979081111RT2 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
t 
33,69266 
329,50 
11 101,73 
801-3 
RTS 25/ I 
127 
979081121RT2 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 
t 
303,23393 
24,56 
7 447,43 
801-3 
RTS 25/ I 
128 
979087311R00 
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 
t 
33,69266 
398,50 
13 426,53 
800-2 
RTS 25/ I 
129 
979087391R00 
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti, 
t 
67,38532 
191,00 
12 870,60 
800-2 
RTS 25/ I 
130 
979093111R00 
Uložení suti na skládku bez zhutnění 
t 
33,69266 
14,00 
471,70 
800-6 
RTS 25/ I 
Díl: 
VN 
Vedlejší náklady 
1 049 533,83 
131 
005121 R 
Zařízení staveniště 
Soubor 
1,00000 
42 152,00 
42 152,00 
RTS 25/ I 
132 
005122010R 
Provoz objednatele 
Soubor 
1,00000 
414 589,00 
414 589,00 
RTS 25/ I 
133 
005124010R 
Koordinační činnost 
Soubor 
1,00000 
421 563,00 
421 563,00 
RTS 25/ I 
134 
005211010R 
Předání a převzetí staveniště 
Soubor 
1,00000 
28 975,00 
28 975,00 
RTS 25/ I 
Stránka 13 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.1 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Architektonicko-stavební řešení 
135 
005211080R 
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
Soubor 
1,00000 
38 546,00 
38 546,00 
RTS 25/ I 
136 
00523 R 
Zkoušky a revize 
Soubor 
1,00000 
41 256,00 
41 256,00 
RTS 25/ I 
137 
00524 R 
Předání a převzetí díla 
Soubor 
1,00000 
19 883,83 
19 883,83 
RTS 25/ I 
138 
005241010R 
Dokumentace skutečného provedení 
Soubor 
1,00000 
42 569,00 
42 569,00 
RTS 25/ I 
Celkem 
3 437 593,06 
Stránka 14 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.c 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Díl: 
EF 1 
Větrání - WC muži 
90 740,06 
1 
EF 1.001 
Potrubní ventilátor - DN 125 - L - AC motor. 
ks 
1,00000 
7 288,50 
7 288,50 
Vlastní 
2 
EF 1.002 
Pružná manžeta 
ks 
2,00000 
937,50 
1 875,00 
Vlastní 
3 
EF 1.051 
Kruhový tlumič hluku 
ks 
1,00000 
4 313,04 
4 313,04 
Vlastní 
4 
EF 1.101 
Zpětná klapka. 
ks 
1,00000 
1 267,89 
1 267,89 
Vlastní 
5 
EF 1.251 
Talířový ventil odvodní kovový. 
ks 
1,00000 
468,00 
468,00 
Vlastní 
6 
EF 1.501 
Výfuková hlavice DN 125. 
ks 
1,00000 
1 817,34 
1 817,34 
Vlastní 
7 
EF 1.601 
Ohebná hluk-tlumící hadice. 
ks 
1,00000 
1 178,04 
1 178,04 
Vlastní 
8 
EF 1.701 
Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v 
třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. 
bm 
32,00000 
1 480,88 
47 388,00 
Vlastní 
9 
EF 1.901 
Kaučuková izolace. 
m2 
21,00000 
1 197,35 
25 144,25 
Vlastní 
Díl: 
EF 2. 
Větrání - WC bezbariérové 
89 191,75 
10 
EF 2.001 
Potrubní ventilátor - DN 125 - L - AC motor. 
ks 
1,00000 
7 288,50 
7 288,50 
Vlastní 
P př. = 100 Pa, 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Vzduchotechnika 
V od. = 60 m3/h, 
P př. = 100 Pa, 
---------------------------------------------------- 
Příkon = 0,08 kW 
Napětí 230 V. 
DN 125 
DN 125/900 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
tl. 20mm 
V od. = 80 m3/h, 
---------------------------------------------------- 
Stránka 15 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.c 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Vzduchotechnika 
11 
EF 2.002 
Pružná manžeta 
ks 
2,00000 
937,50 
1 875,00 
Vlastní 
12 
EF 1.051 
Kruhový tlumič hluku 
ks 
1,00000 
3 678,54 
3 678,54 
Vlastní 
13 
EF 2.101 
Zpětná klapka - instalace ve svislé části potrubí. 
ks 
1,00000 
1 267,89 
1 267,89 
Vlastní 
14 
EF 2.251 
Talířový ventil odvodní kovový. 
ks 
1,00000 
468,00 
468,00 
Vlastní 
15 
EF 2.501 
Výfuková hlavice DN 125. 
ks 
1,00000 
1 817,34 
1 817,34 
Vlastní 
16 
EF 2.601 
Ohebná hluk-tlumící hadice. 
ks 
1,00000 
1 178,04 
1 178,04 
Vlastní 
17 
EF 2.701 
Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v 
třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. 
bm 
33,00000 
1 480,88 
48 868,88 
Vlastní 
18 
EF 2.901 
Kaučuková izolace. 
m2 
19,00000 
1 197,35 
22 749,56 
Vlastní 
Díl: 
EF 3. 
Větrání - WC ženy 
90 105,56 
19 
EF 3.001 
Potrubní ventilátor - DN 125 - L - AC motor. 
ks 
1,00000 
7 288,50 
7 288,50 
Vlastní 
20 
EF 3.002 
Pružná manžeta 
ks 
2,00000 
937,50 
1 875,00 
Vlastní 
21 
EF 3.051 
Kruhový tlumič hluku 
ks 
1,00000 
3 678,54 
3 678,54 
Vlastní 
P př. = 100 Pa, 
Příkon = 0,08 kW 
Napětí 230 V. 
DN 125 
DN 125/600 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
tl. 20mm 
V od. = 60 m3/h, 
---------------------------------------------------- 
Příkon = 0,08 kW 
Napětí 230 V. 
DN 125 
Stránka 16 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.c 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Vzduchotechnika 
22 
EF 3.101 
Zpětná klapka. 
ks 
1,00000 
1 267,89 
1 267,89 
Vlastní 
23 
EF 3.251 
6 
ks 
1,00000 
468,00 
468,00 
Vlastní 
24 
EF 3.501 
Výfuková hlavice DN 125. 
ks 
1,00000 
1 817,34 
1 817,34 
Vlastní 
25 
EF 3.601 
Ohebná hluk-tlumící hadice. 
ks 
1,00000 
1 178,04 
1 178,04 
Vlastní 
26 
EF 3.701 
Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v 
třídě, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. 
bm 
32,00000 
1 480,88 
47 388,00 
Vlastní 
27 
EF 3.901 
Kaučuková izolace. 
m2 
21,00000 
1 197,35 
25 144,25 
Vlastní 
Díl: 
999. 
Ostatní náklady 
148 817,35 
28 
999.001 
Náklady na dopravu. 
ks 
1,00000 
10 275,00 
10 275,00 
Vlastní 
29 
999.002 
Zařízení staveniště. 
ks 
1,00000 
11 775,00 
11 775,00 
Vlastní 
30 
999.003 
Montážní materiál 
kg 
103,00000 
132,38 
13 634,63 
Vlastní 
31 
999.004 
Těsnící materiál. 
m2 
37,00000 
881,34 
32 609,58 
Vlastní 
32 
999.005 
Spojovací materiál. 
kg 
9,60000 
106,89 
1 026,14 
Vlastní 
33 
999.006 
Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. 
ks 
12,00000 
487,88 
5 854,50 
Vlastní 
34 
999.007 
Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. 
h 
6,00000 
787,50 
4 725,00 
Vlastní 
35 
999.008 
Předávací dokumentace. 
ks 
1,00000 
10 110,00 
10 110,00 
Vlastní 
36 
999.009 
Výrobní dokumentace. 
ks 
1,00000 
18 900,00 
18 900,00 
Vlastní 
37 
999.010 
Dokumentace skutečného stavu. 
ks 
1,00000 
5 850,00 
5 850,00 
Vlastní 
38 
999.011 
Požární ucpávka. 
bm 
9,00000 
3 217,50 
28 957,50 
Vlastní 
39 
999.012 
Nastavení ventilátorů. 
ks 
3,00000 
975,00 
2 925,00 
Vlastní 
40 
999.013 
Akustické měření. 
ks 
1,00000 
2 175,00 
2 175,00 
Vlastní 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
tl. 20mm 
DN 125/600 
DN 125 
Stránka 17 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.c 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Vzduchotechnika 
Celkem 
418 854,72 
Stránka 18 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.e 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Díl: 
_1 
721 - Vnitřní kanalizace 
89 456,69 
1 
Pol__0001 
Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí 
kpl 
6,00000 
3 231,00 
19 386,00 
Vlastní 
2 
Pol__0002 
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ PP HT DN 32 
m 
5,00000 
730,50 
3 652,50 
Vlastní 
3 
Pol__0003 
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ PP HT DN 50 
m 
24,00000 
786,00 
18 864,00 
Vlastní 
4 
Pol__0004 
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ PP HT DN 70 
m 
9,00000 
961,50 
8 653,50 
Vlastní 
5 
Pol__0005 
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ PP HT DN 100 
m 
12,00000 
1 218,00 
14 616,00 
Vlastní 
6 
Pol__0006 
ČISTÍCÍ KUSY DN 100 
ks 
1,00000 
1 867,50 
1 867,50 
Vlastní 
7 
Pol__0007 
Odbočka 50x50x45° 
ks 
5,00000 
168,00 
840,00 
Vlastní 
8 
Pol__0008 
Odbočka 50x50x87° 
ks 
1,00000 
181,50 
181,50 
Vlastní 
9 
Pol__0009 
Odbočka 75x50x45° 
ks 
1,00000 
196,50 
196,50 
Vlastní 
10 
Pol__0010 
Odbočka 75x50x87° 
ks 
1,00000 
186,00 
186,00 
Vlastní 
11 
Pol__0011 
Odbočka 75x75x87° 
ks 
1,00000 
226,50 
226,50 
Vlastní 
12 
Pol__0012 
Odbočka 110x110x87° 
ks 
5,00000 
318,00 
1 590,00 
Vlastní 
13 
Pol__0013 
Odbočka 110x50x87° 
ks 
2,00000 
457,50 
915,00 
Vlastní 
14 
Pol__0014 
Odbočka 125x110x87° 
ks 
2,00000 
618,00 
1 236,00 
Vlastní 
15 
Pol__0015 
Redukce 50x32 
ks 
1,00000 
147,00 
147,00 
Vlastní 
16 
Pol__0016 
Redukce 75x50 
ks 
1,00000 
181,50 
181,50 
Vlastní 
17 
Pol__0017 
Redukce 110x50 
ks 
1,00000 
336,00 
336,00 
Vlastní 
18 
Pol__0018 
Redukce 110x75 
ks 
1,00000 
400,50 
400,50 
Vlastní 
19 
Pol__0019 
Redukce 125x110 
ks 
1,00000 
550,50 
550,50 
Vlastní 
20 
Pol__0020 
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50 
ks 
9,00000 
337,50 
3 037,50 
Vlastní 
21 
Pol__0021 
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D 
110x2.3 
ks 
8,00000 
582,00 
4 656,00 
Vlastní 
22 
Pol__0022 
PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 138 
ks 
1,00000 
1 183,89 
1 183,89 
Vlastní 
23 
Pol__0023 
Montáž zápachových uzávěrek 
ks 
1,00000 
354,38 
354,38 
Vlastní 
24 
Pol__0024 
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU DO DN 
125 
m 
50,00000 
46,20 
2 310,00 
Vlastní 
25 
Pol__0025 
PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m 
% 
5,66000 
687,00 
3 888,42 
Vlastní 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Zdravotechnika 
Stránka 19 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.e 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Zdravotechnika 
Díl: 
_2 
722 - Vnitřní vodovod 
78 691,25 
26 
Pol__0026 
Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí 
kpl 
6,00000 
1 966,88 
11 801,25 
Vlastní 
27 
Pol__0027 
Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 
3,4 
m 
60,00000 
580,88 
34 852,50 
Vlastní 
28 
Pol__0028 
Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 
4,2 
m 
4,00000 
636,00 
2 544,00 
Vlastní 
29 
Pol__0029 
PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK do DN 25 
ks 
26,00000 
430,50 
11 193,00 
Vlastní 
30 
Pol__0030 
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR 1/2" 
ks 
12,00000 
130,88 
1 570,50 
Vlastní 
31 
Pol__0031 
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU 1/2" 
ks 
12,00000 
431,94 
5 183,28 
Vlastní 
32 
Pol__0032 
KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 1/2" 
ks 
12,00000 
366,84 
4 402,08 
Vlastní 
33 
Pol__0033 
Tlakové zkoušky do DN 50 
m 
64,00000 
40,88 
2 616,00 
Vlastní 
34 
Pol__0034 
Proplach desinfekce potrubí do DN 50 
m 
64,00000 
45,53 
2 913,60 
Vlastní 
35 
Pol__0035 
PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m 
% 
1,23000 
1 313,04 
1 615,04 
Vlastní 
Díl: 
_3 
713 - Izolace tepelné 
12 384,90 
36 
Pol__0036 
MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PENĚN. PE, ČEDIČOVÉ 
VLNY, vč. doplňkového, materiálu , průměr potrubí do DN 50 mm 
m 
64,00000 
128,54 
8 226,24 
Vlastní 
37 
Pol__0037 
TERMOIZOALČNÍ TRUBICE Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm 
m 
32,00000 
31,88 
1 020,00 
Vlastní 
38 
Pol__0038 
TERMOIZOALČNÍ TRUBICE Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm 
m 
4,00000 
36,54 
146,16 
Vlastní 
39 
Pol__0039 
TERMOIZOALČNÍ TRUBICE Mirelon PRO v základním provedení tloušťka stěny 25 mm vnitřní 
průměr 22 mm 
m 
28,00000 
87,38 
2 446,50 
Vlastní 
40 
Pol__0040 
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m 
% 
1,12000 
487,50 
546,00 
Vlastní 
Díl: 
_4 
767 - Konstrukce zámečnícké 
3 740,08 
41 
Pol__0041 
MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH 
KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI do 5 kg 
kg 
15,00000 
136,88 
2 053,13 
Vlastní 
42 
Pol__0042 
PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 12 do 24 m 
% 
5,33000 
316,50 
1 686,95 
Vlastní 
Díl: 
_5 
725 - Zařizovací předměty 
409 809,51 
Stránka 20 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.e 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Zdravotechnika 
43 
Pol__0043 
Závěsný klozet bílý hluboké splachování - zadní odpad 
ks 
4,00000 
5 781,00 
23 124,00 
Vlastní 
44 
Pol__0044 
Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose 
ks 
4,00000 
2 517,68 
10 070,70 
Vlastní 
45 
Pol__0045 
Ovládácí tlačítko se dvěmi možnostmi pro splachování (velké/malé), hranatý typ 
ks 
4,00000 
1 981,86 
7 927,44 
Vlastní 
46 
Pol__0046 
Zvukově izolační vložka 
ks 
4,00000 
315,38 
1 261,50 
Vlastní 
47 
Pol__0047 
Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu 
ks 
4,00000 
12 813,00 
51 252,00 
Vlastní 
48 
Pol__0048 
Montáž klozetových mís závěsných,sedátka ,tlačítka 
kpl 
4,00000 
1 518,00 
6 072,00 
Vlastní 
49 
Pol__0049 
Montáž WC modulu 
kpl 
4,00000 
2 037,00 
8 148,00 
Vlastní 
50 
Pol__0050 
Závěsný klozet bílý hluboké splachování invalidní - zadní odpad 
ks 
1,00000 
7 311,00 
7 311,00 
Vlastní 
51 
Pol__0051 
Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose 
ks 
1,00000 
2 517,68 
2 517,68 
Vlastní 
52 
Pol__0052 
Ovládácí tlačítko se dvěmi možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva 
ks 
1,00000 
1 981,86 
1 981,86 
Vlastní 
53 
Pol__0053 
Zvukově izolační vložka 
ks 
1,00000 
315,38 
315,38 
Vlastní 
54 
Pol__0054 
Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu 
ks 
1,00000 
12 813,00 
12 813,00 
Vlastní 
55 
Pol__0055 
Oddálené tlačítko 
ks 
1,00000 
2 319,00 
2 319,00 
Vlastní 
56 
Pol__0056 
Montáž klozetových mís závěsných,sedátka ,tlačítka 
kpl 
3,00000 
1 518,00 
4 554,00 
Vlastní 
57 
Pol__0057 
Montáž WC modulu 
kpl 
1,00000 
2 037,00 
2 037,00 
Vlastní 
58 
Pol__0058 
Umyvadlo 550x420 mm oblé , s přepadem, s otvorem pro baterii, bílá 
ks 
7,00000 
4 881,00 
34 167,00 
Vlastní 
59 
Pol__0059 
Umyvadlový sifon bez výpusti mosaz / chrom 
ks 
7,00000 
1 981,50 
13 870,50 
Vlastní 
60 
Pol__0060 
Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack 
ks 
7,00000 
880,50 
6 163,50 
Vlastní 
61 
Pol__0061 
Směšovací baterie páková umyvadlová 
ks 
7,00000 
2 178,54 
15 249,78 
Vlastní 
62 
Pol__0062 
Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) 
ks 
14,00000 
331,88 
4 646,25 
Vlastní 
63 
Pol__0063 
Jednoduché zrcadlo na stěnu 
ks 
7,00000 
2 812,88 
19 690,13 
Vlastní 
64 
Pol__0064 
Montážní modulový prvek do SDK pro umyvadlo 
ks 
7,00000 
4 687,50 
32 812,50 
Vlastní 
65 
Pol__0065 
Montáž umyvadla 
kpl 
7,00000 
580,50 
4 063,50 
Vlastní 
66 
Pol__0066 
Montáž sifonu a výpusti 
kpl 
7,00000 
280,50 
1 963,50 
Vlastní 
67 
Pol__0067 
Montáž baterie 
kpl 
7,00000 
481,50 
3 370,50 
Vlastní 
68 
Pol__0068 
Montáž zrcadla na stěnu 
kpl 
7,00000 
430,50 
3 013,50 
Vlastní 
69 
Pol__0069 
640x550 mm bílá keramika 
ks 
1,00000 
2 812,89 
2 812,89 
Vlastní 
Stránka 21 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.e 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Zdravotechnika 
70 
Pol__0070 
Umyvadlový sifon bez výpusti plastový 
ks 
1,00000 
316,50 
316,50 
Vlastní 
71 
Pol__0071 
Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack 
ks 
1,00000 
816,38 
816,38 
Vlastní 
72 
Pol__0072 
Směšovací baterie páková s prodlouženou pákou 
ks 
1,00000 
2 866,88 
2 866,88 
Vlastní 
73 
Pol__0073 
Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) 
ks 
2,00000 
351,38 
702,75 
Vlastní 
74 
Pol__0074 
Zrcadlo na stěnu 500/700 mm sklápěcí 
ks 
1,00000 
4 823,34 
4 823,34 
Vlastní 
75 
Pol__0075 
Montáž umyvadla 
kpl 
1,00000 
580,50 
580,50 
Vlastní 
76 
Pol__0076 
Montáž sifonu a výpusti 
kpl 
1,00000 
280,50 
280,50 
Vlastní 
77 
Pol__0077 
Montáž baterie 
kpl 
1,00000 
481,50 
481,50 
Vlastní 
78 
Pol__0078 
Montáž zrcadla na stěnu 
kpl 
1,00000 
466,50 
466,50 
Vlastní 
79 
Pol__0079 
Gratinový dřez o rozměrech 620 x 496 mm s odkladací plochou, s otvorem pro stojánkovou 
baterii, průměr 35 mm ,včetně baterie v barvě dřezu ,výpusti 
kpl 
4,00000 
7 117,89 
28 471,56 
Vlastní 
80 
Pol__0080 
Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) 
ks 
8,00000 
537,39 
4 299,12 
Vlastní 
81 
Pol__0081 
Montáž umyvadla /dřezu 
kpl 
4,00000 
730,50 
2 922,00 
Vlastní 
82 
Pol__0082 
Výlevka závěsná 
ks 
1,00000 
4 688,54 
4 688,54 
Vlastní 
83 
Pol__0083 
Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi 
ks 
1,00000 
2 383,89 
2 383,89 
Vlastní 
84 
Pol__0084 
Nástěnná baterie, chromová s roztečí 150 mm vč raménka 300 mm 
ks 
1,00000 
2 034,53 
2 034,53 
Vlastní 
85 
Pol__0085 
Modul pro závěsnou výlevku 
ks 
1,00000 
6 323,04 
6 323,04 
Vlastní 
86 
Pol__0086 
Montáž výlevky 
kpl 
1,00000 
1 817,34 
1 817,34 
Vlastní 
87 
Pol__0087 
Montáž baterie 
kpl 
1,00000 
481,50 
481,50 
Vlastní 
88 
Pol__0088 
Montáž instalačního modulu 
kpl 
1,00000 
2 403,00 
2 403,00 
Vlastní 
89 
Pol__0089 
Pisoár antivandal s elektronikou 
ks 
2,00000 
17 784,38 
35 568,75 
Vlastní 
90 
Pol__0090 
Zvukově izolační vložka 
ks 
2,00000 
315,38 
630,75 
Vlastní 
91 
Pol__0091 
Montážní rám pro pisoár asenzor 
ks 
2,00000 
4 311,38 
8 622,75 
Vlastní 
92 
Pol__0092 
Montáž pisoáru ,sifonu 
kpl 
2,00000 
1 431,00 
2 862,00 
Vlastní 
93 
Pol__0093 
Montáž instalačního modulu 
kpl 
2,00000 
1 687,50 
3 375,00 
Vlastní 
94 
Pol__0094 
PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY do 24 m 
% 
3,69000 
2 185,04 
8 062,78 
Vlastní 
Celkem 
594 082,43 
Stránka 22 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.e 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Zdravotechnika 
Stránka 23 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.g 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Díl: 
M21 
Elektromontáže 
1 794 646,82 
1 
Silové vedení 
CXKH-R 5x16 
m 
70,00000 
529,00 
37 030,18 
Vlastní 
2 
Druhmontáže 
CXKH-R 5x16, montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
70,00000 
43,88 
3 071,25 
Vlastní 
3 
Silové vedení 
CYKY-J 5x25 
m 
70,00000 
846,63 
59 263,75 
Vlastní 
4 
Druhmontáže 
CXKH-R 5x25, montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
70,00000 
56,88 
3 981,25 
Vlastní 
5 
Silové vedení 
CYKY 5x1,5 
m 
115,00000 
38,03 
4 372,88 
Vlastní 
6 
Druhmontáže 
CYKY 5x1,5 montáž pevná pod omítku 
m 
115,00000 
32,50 
3 737,50 
Vlastní 
7 
Silové vedení 
CYKY 3x1,5 (Obsahuje souhrnně CYKY-J a CYKY-O), obsahuje rezervu na možné náhrady 
původní kabeláže,, pokud dojde k poškození. 
m 
2 000,00000 
22,93 
45 857,50 
Vlastní 
8 
Druhmontáže 
CYKY 3x1,5 montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
1 000,00000 
32,50 
32 500,00 
Vlastní 
9 
Druhmontáže 
CYKY 3x1,5 montáž pevná pod omítku 
m 
1 000,00000 
40,63 
40 625,00 
Vlastní 
10 
Silové vedení 
CYKY-J 3x2,5 (obsahuje rezervu na možné náhrady původní kabeláže, pokud dojde k 
poškození). 
m 
3 015,00000 
37,94 
114 400,41 
Vlastní 
11 
Druhmontáže 
CYKY 3x2,5 montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
600,00000 
32,50 
19 500,00 
Vlastní 
12 
Druhmontáže 
CYKY 3x2,5 montáž pevná pod omítku 
m 
2 415,00000 
40,63 
98 109,38 
Vlastní 
13 
PE 
H07V-K 16zž 
m 
90,00000 
83,96 
7 556,74 
Vlastní 
14 
Druhmontáže 
H07V-K 16zž montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
70,00000 
32,50 
2 275,00 
Vlastní 
15 
Druhmontáže 
H07V-K 16zž montáž pevná pod omítku 
m 
20,00000 
40,63 
812,50 
Vlastní 
16 
PE 
H07V-U 6zž 
m 
50,00000 
32,71 
1 635,56 
Vlastní 
17 
Druhmontáže 
H07V-U 6zž montáž volná (kabelový žlab a příchytky) 
m 
20,00000 
32,50 
650,00 
Vlastní 
18 
Druhmontáže 
H07V-U 6zž montáž pevná pod omítku 
m 
30,00000 
40,63 
1 218,75 
Vlastní 
19 
PE 
Ekvipotenciální svorkovnice, krabice 100x100, včetně víčka, pod omítku 
ks 
2,00000 
758,88 
1 517,75 
Vlastní 
20 
Rozbočení vedení 
Krabice 100x100, včetně víčka, pod omítku 
ks 
1,00000 
136,91 
136,91 
Vlastní 
21 
Svorkovnice 
Svorkovnice, distribuční blok, min 4 svorky, min průřez přípoj. vodičů CY16/AY16 (do montážní, 
krabice 100x100, na DIN) 
ks 
4,00000 
1 116,38 
4 465,50 
Vlastní 
22 
Nosnýsystém 
Příchytky (1/m) 
ks 
100,00000 
29,90 
2 990,00 
Vlastní 
23 
Nosnýsystém 
Kabelový plechový žlab, perforovaný 400/50, včetně příslušenství 
m 
50,00000 
983,13 
49 156,25 
Vlastní 
24 
Rozvodnice 
Rozvodnice IP30, min. 165M, zapuštěná 
ks 
1,00000 
40 711,25 
40 711,25 
Vlastní 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Silnoproud 
Stránka 24 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.g 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Silnoproud 
25 
Rozvodnice 
Rozvodnice IP30, min. 96M, zapuštěná 
ks 
1,00000 
30 657,50 
30 657,50 
Vlastní 
26 
Jištění 
Pojistky 100A Gg 
ks 
6,00000 
152,50 
915,00 
Vlastní 
27 
Jištění 
Jistič 3f B63, 10kA 
ks 
1,00000 
1 983,75 
1 983,75 
Vlastní 
28 
Jištění 
Jistič 3f B40, 10kA 
ks 
1,00000 
1 056,25 
1 056,25 
Vlastní 
29 
Jištění 
Jistič 3f B10, 6kA 
ks 
1,00000 
484,06 
484,06 
Vlastní 
30 
Jištění 
Jistič 3f B16, 6kA 
ks 
3,00000 
608,75 
1 826,25 
Vlastní 
31 
Jištění 
Jistič 1f B10, 6kA 
ks 
11,00000 
192,50 
2 117,50 
Vlastní 
32 
Jištění 
Jistič 1f B16, 6kA 
ks 
66,00000 
233,75 
15 427,50 
Vlastní 
33 
Jištění 
Jistič 3f B20, 6kA 
ks 
1,00000 
705,00 
705,00 
Vlastní 
34 
Jištění 
Proudový chránič RCD, 6kA, 63A, 4p 
ks 
7,00000 
1 158,75 
8 111,25 
Vlastní 
35 
Jištění 
Proudový chránič RCD, 6kA, 40A, 4p 
ks 
5,00000 
860,00 
4 300,00 
Vlastní 
36 
Jištění 
Kombinovaný jistič RCD+MCB 1f+N B16, 30mA, A, 6kA 
ks 
7,00000 
1 793,75 
12 556,25 
Vlastní 
37 
Jištění 
Kombinovaný jistič RCD+MCB 1f+N B10, 30mA, A, 6kA 
ks 
24,00000 
1 517,50 
36 420,00 
Vlastní 
38 
SPD 
SPD T2, 12,5kA, 1p 
ks 
8,00000 
2 342,50 
18 740,00 
Vlastní 
39 
SPD 
SPD T3, osazeny budou zásuvky dle výběru investora 
ks 
14,00000 
2 105,00 
29 470,00 
Vlastní 
40 
Zásuvky 
Zásuvka jednonásobná 230V s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá do zdravotnictví. (montáž 
do zděné, zdi) 
ks 
243,00000 
417,50 
101 452,50 
Vlastní 
41 
Zásuvky 
Zásuvka jednonásobná 230V s ochranným kolíkem, s clonkami, Zelená do zdravotnictví. 
(montáž do zděné, zdi) 
ks 
55,00000 
496,50 
27 307,50 
Vlastní 
42 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Rámeček 1, bíly, zdravotnictví 
ks 
77,00000 
47,81 
3 681,56 
Vlastní 
43 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Vícerámeček 2, bíly, zdravotnictví 
ks 
46,00000 
61,56 
2 831,88 
Vlastní 
44 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Vícerámeček 3, bíly, zdravotnictví 
ks 
16,00000 
80,31 
1 285,00 
Vlastní 
45 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Vícerámeček 4, bíly, zdravotnictví 
ks 
5,00000 
109,06 
545,31 
Vlastní 
46 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Vícerámeček 5, bíly, zdravotnictví 
ks 
1,00000 
142,81 
142,81 
Vlastní 
47 
Příslušenství k zás. a vypínač 
Přístrojové krabice, pod omítku/do zděné zdi 
ks 
44,00000 
123,38 
5 428,50 
Vlastní 
48 
Vypínač 
Vypínač 1, Bílý, zdravotnictví 
ks 
48,00000 
421,25 
20 220,00 
Vlastní 
49 
Vypínač 
Vypínač 5, Bílý, zdravotnictví 
ks 
3,00000 
447,50 
1 342,50 
Vlastní 
50 
Vypínač 
Vypínač 6, Bílý, zdravotnictví 
ks 
20,00000 
435,00 
8 700,00 
Vlastní 
Stránka 25 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.g 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Silnoproud 
51 
Vypínač 
Vypínač 7, Bílý, zdravotnictví 
ks 
1,00000 
446,25 
446,25 
Vlastní 
52 
Vypínač, tlačítko 
Tlačítko 1/0, Bílý, zdravotnictví 
ks 
3,00000 
408,75 
1 226,25 
Vlastní 
53 
Vypínač, tlačítko 
Spínač žaluziový kolébkový, dělený, s potiskem, bíly, lekařský prostor, 1/0+1/0 s blokováním, 
ks 
12,00000 
496,56 
5 958,75 
Vlastní 
54 
Přístrojová krabice 
Nástěnná krabice, pro zás 230V, lékařský prostor. 
ks 
2,00000 
1 567,50 
3 135,00 
Vlastní 
55 
NO 
Nouzové osvětlení, přisazené, min. IP44, min. Jmenovitá doba provozu min. 1hod. 
ks 
42,00000 
2 369,08 
99 501,15 
Vlastní 
56 
Osvětlení 
Kulaté nástěnné svítidlo min. IP44 nad umyvadlo, žárovkové 
ks 
8,00000 
3 070,31 
24 562,50 
Vlastní 
57 
Osvětlení 
STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO - Průměr 252 mm (A) 
ks 
7,00000 
2 956,70 
20 696,90 
Vlastní 
58 
Osvětlení 
STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO - 297x1197 mm (B2) 
ks 
53,00000 
3 322,83 
176 109,73 
Vlastní 
59 
Osvětlení 
STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO - 597x597 mm (B3) 
ks 
51,00000 
2 945,31 
150 210,94 
Vlastní 
60 
Osvětlení 
STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO - Průměr 215 mm (C) 
ks 
28,00000 
2 695,70 
75 479,60 
Vlastní 
61 
Práce 
Odstranění stávajícího přívodního vedení AYKY 4x35 
m 
60,00000 
180,00 
10 800,00 
Vlastní 
62 
Práce 
Zapojení nového vedení do stávajících hl. rozvodnicích objektu 
kpl 
2,00000 
9 315,31 
18 630,63 
Vlastní 
63 
Práce 
Odstranění stávajících okruhů v chodbách a místnostech, včetně původních kabelových nosných 
systémů 
kpl 
1,00000 
42 820,00 
42 820,00 
Vlastní 
64 
Práce 
Identifikace a odpojení rušených okruhů v rozvodnici 
kpl 
3,00000 
6 094,06 
18 282,19 
Vlastní 
65 
Práce 
Rozpočtová rezerva na manipulaci s původním vedením 
kpl 
1,00000 
23 717,50 
23 717,50 
Vlastní 
66 
Práce 
Zednícké práce - Prostupy, opravy 
kpl 
1,00000 
51 567,50 
51 567,50 
Vlastní 
67 
Práce.1 
Protipožární prostup 15mm stěna 3 kabely 
kus 
1,00000 
608,75 
608,75 
Vlastní 
68 
Spojovací a drob. Materiál 
Propojovací vodiče v rozvaděčích, včetně propoj hřebenů, svorek dle potřeby výrobce 
kpl 
3,00000 
6 093,75 
18 281,25 
Vlastní 
69 
Spojovací a drob. Materiál 
Drobný materiál, značení 
kpl 
3,00000 
4 070,00 
12 210,00 
Vlastní 
70 
Dokumentace 
Kusová zkouška a CE k rozvodnici po úpravě 
ks 
1,00000 
4 750,00 
4 750,00 
Vlastní 
71 
Dokumentace 
Kusová zkouška a CE k nové rozvodnici 
ks 
2,00000 
4 750,00 
9 500,00 
Vlastní 
72 
Dokumentace 
Vytvoření PD na úrovni DSPS 
ks 
1,00000 
31 118,75 
31 118,75 
Vlastní 
73 
Dokumentace 
Výchozí revize el. 
ks 
1,00000 
7 250,00 
7 250,00 
Vlastní 
74 
Dokumentace 
Osvědčení TIČR 
ks 
1,00000 
14 250,00 
14 250,00 
Vlastní 
75 
Koordinace 
Autorský dozor PD elektro 
hod 
40,00000 
850,00 
34 000,00 
Vlastní 
76 
Koordinace 
Koordinace profesí 
hod 
40,00000 
656,25 
26 250,00 
Vlastní 
Stránka 26 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.g 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Silnoproud 
Celkem 
1 794 646,82 
Stránka 27 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Díl: 
7421 
Strukturovaná kabeláž 
856 079,52 
1 
742330034 
Montáž patch panelu 24 portů neosazeného 
kus 
7,00000 
155,00 
1 085,00 
Vlastní 
2 
01R 
Modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý 
kus 
7,00000 
1 254,00 
8 778,00 
Vlastní 
3 
742330023 
Montáž vyvazovacího panelu 1U 
kus 
7,00000 
158,00 
1 106,00 
Vlastní 
4 
02R 
Vyvazovací panel 19“, 5 x kovový háček s hloubkou 80 mm 
kus 
7,00000 
698,25 
4 887,75 
Vlastní 
5 
05R 
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu keystonem 
kus 
312,00000 
38,50 
12 012,00 
Vlastní 
6 
06R 
10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový 
kus 
312,00000 
157,25 
49 062,00 
Vlastní 
7 
742124003 
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně 
m 
10 620,00000 
31,10 
330 282,00 
Vlastní 
8 
08R 
Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 
m 
10 620,00000 
21,71 
230 560,20 
Vlastní 
9 
742330044 
Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic 
kus 
79,00000 
129,00 
10 191,00 
Vlastní 
10 
03R 
Zásuvka 2xRJ45, zapuštěná montáž, včetně rámečku, neosazená 
kus 
77,00000 
391,00 
30 107,00 
Vlastní 
11 
00303R 
Zásuvka 1xRJ45, zapuštěná montáž, včetně rámečku, neosazená 
kus 
2,00000 
298,00 
596,00 
Vlastní 
12 
977132112 
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm 
kus 
79,00000 
44,70 
3 531,30 
Vlastní 
13 
741112061 
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 
kus 
79,00000 
45,80 
3 618,20 
Vlastní 
14 
09R 
Krabice přístrojová rozvodná, průměr 73mm, hloubka 66mm, PVC 
kus 
79,00000 
14,56 
1 150,24 
Vlastní 
15 
741110062 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku 
m 
475,00000 
45,80 
21 755,00 
Vlastní 
16 
22R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 25mm 
m 
325,00000 
14,24 
4 628,81 
Vlastní 
17 
23R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 32mm 
m 
150,00000 
20,79 
3 118,50 
Vlastní 
18 
741110512 
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem 
m 
2,00000 
113,00 
226,00 
Vlastní 
19 
31R 
Parapetní kanál 110x65, bílý 
m 
2,00000 
358,97 
717,94 
Vlastní 
20 
977332111 
Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm 
m 
260,00000 
57,40 
14 924,00 
Vlastní 
21 
977332112 
Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm 
m 
120,00000 
99,10 
11 892,00 
Vlastní 
22 
20R 
Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 250mm, D20mm 
kus 
32,00000 
481,00 
15 392,00 
Vlastní 
23 
742330051 
Popis portu datové zásuvky 
kus 
156,00000 
18,60 
2 901,60 
Vlastní 
24 
742330052 
Popis portů patchpanelu 
kus 
7,00000 
175,00 
1 225,00 
Vlastní 
25 
30R 
10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 1,5m 
kus 
156,00000 
88,25 
13 767,00 
Vlastní 
26 
742330101 
Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu 
kus 
156,00000 
382,00 
59 592,00 
Vlastní 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
Stránka 28 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
27 
80R 
Demontáž stávajícího datového kabelu 
m 
1 300,00000 
12,64 
16 432,00 
Vlastní 
28 
81R 
Odpojení stávajícího datového portu v rozvaděči 
kus 
26,00000 
68,25 
1 774,50 
Vlastní 
29 
82R 
Demontáž stávající datové zásuvky 
kus 
13,00000 
58,96 
766,48 
Vlastní 
Díl: 
7422 
Elektrická požární signalizace 
239 335,78 
30 
742210006 
Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS 
kus 
2,00000 
1 090,00 
2 180,00 
Vlastní 
31 
101R 
Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly 
kus 
1,00000 
10 852,25 
10 852,25 
Vlastní 
32 
106R 
Mikromodul jednoho analogového kruhového vedení, pro max.127 hlásičů 
kus 
1,00000 
9 256,00 
9 256,00 
Vlastní 
33 
742210121 
Montáž hlásiče automatického bodového 
kus 
34,00000 
100,00 
3 400,00 
Vlastní 
34 
102R 
Hlásič EPS opticko-kouřový 
kus 
22,00000 
1 587,26 
34 919,72 
Vlastní 
35 
103R 
Hlásič EPS multisenzorový (teplota+kouř) 
kus 
12,00000 
1 722,25 
20 667,00 
Vlastní 
36 
742210131 
Montáž soklu hlásiče nebo patice 
kus 
34,00000 
568,00 
19 312,00 
Vlastní 
37 
104R 
Patice pro bodové hlásiče 
kus 
34,00000 
187,00 
6 358,00 
Vlastní 
38 
742210261 
Montáž sirény, majáku nebo signalizace 
kus 
7,00000 
764,00 
5 348,00 
Vlastní 
39 
105R 
Paralelní optická signalizace 
kus 
7,00000 
7 895,00 
55 265,00 
Vlastní 
40 
742121001 
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 
m 
300,00000 
24,90 
7 470,00 
Vlastní 
41 
107R 
SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca s1,d1,a1 
m 
300,00000 
27,11 
8 133,00 
Vlastní 
42 
110R 
Montáž kabelové příchytky 
kus 
260,00000 
11,70 
3 042,00 
Vlastní 
43 
111R 
Upevňovací kabelová příchytka, 10mm, galvanicky zinkováno 
kus 
260,00000 
12,45 
3 237,00 
Vlastní 
44 
741110062 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku 
m 
125,00000 
45,80 
5 725,00 
Vlastní 
45 
108R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 25mm 
m 
125,00000 
14,24 
1 780,31 
Vlastní 
46 
977332111 
Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm 
m 
90,00000 
77,40 
6 966,00 
Vlastní 
47 
109R 
Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 250mm, D20mm 
kus 
30,00000 
341,00 
10 230,00 
Vlastní 
48 
112R 
Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 500mm, D20mm 
kus 
2,00000 
744,00 
1 488,00 
Vlastní 
49 
113R 
D+M štítek pro označení adresy hlásiče 
kus 
34,00000 
31,25 
1 062,50 
Vlastní 
50 
116R 
Programování ústředny EPS 
kpl 
1,00000 
5 895,00 
5 895,00 
Vlastní 
51 
117R 
Oživení systému EPS 
kpl 
1,00000 
4 975,00 
4 975,00 
Vlastní 
52 
118R 
Výchozí revize systému EPS 
kpl 
1,00000 
6 800,00 
6 800,00 
Vlastní 
Stránka 29 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
53 
119R 
Provedení koordinační funkční zkoušky 
kpl 
1,00000 
4 974,00 
4 974,00 
Vlastní 
Díl: 
7423 
Evakuační rozhlas 
256 562,00 
54 
231R 
Montáž systémové jednotky evakuačního rozhlasu 
kus 
1,00000 
2 125,00 
2 125,00 
Vlastní 
55 
230R 
Síťová systémová jednotka EN54-16, 8 zón, 2 audio kanály 
kus 
1,00000 
16 587,00 
16 587,00 
Vlastní 
56 
742410001 
Montáž systémového zesilovače rozhlasu 
kus 
1,00000 
1 520,00 
1 520,00 
Vlastní 
57 
232R 
Modul výkonového zesilovače 150W, 100V, EN54-16 
kus 
1,00000 
8 596,00 
8 596,00 
Vlastní 
58 
742410021 
Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů rozhlasu 
kus 
1,00000 
1 544,00 
1 544,00 
Vlastní 
59 
233R 
Systémový napájecí zdroj a manager napájení, max. 1150W, EN54-4 
kus 
1,00000 
35 462,00 
35 462,00 
Vlastní 
60 
237R 
Montáž akumulátoru 
kus 
2,00000 
189,00 
378,00 
Vlastní 
61 
238R 
Akumulátor 12V/40Ah 
kus 
2,00000 
1 685,25 
3 370,50 
Vlastní 
62 
742410063 
Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu 
kus 
33,00000 
227,00 
7 491,00 
Vlastní 
63 
202R 
Evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s keramickou svorkovnicí a tepelnou 
pojistkou,, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, barva bílá 
kus 
33,00000 
1 341,00 
44 253,00 
Vlastní 
64 
742410031 
Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu 
kus 
5,00000 
227,00 
1 135,00 
Vlastní 
65 
203R 
Koncový člen reproduktorové linky (EOL) 
kus 
5,00000 
1 631,25 
8 156,25 
Vlastní 
66 
204R 
Montáž kabelu sdělovacích 2x1,5, požárně odolná montáž 
m 
475,00000 
28,60 
13 585,00 
Vlastní 
67 
205R 
1-CSKH-V 2x1,5 P45-R B2ca,s1,d1,a1 
m 
475,00000 
21,01 
9 979,75 
Vlastní 
68 
206R 
Montáž požárně odolné příchytky po 30 cm 
kus 
1 050,00000 
12,00 
12 600,00 
Vlastní 
69 
207R 
Příchytka kabelová požárně odolná P45-R 
kus 
1 050,00000 
9,20 
9 660,00 
Vlastní 
70 
220R 
Montáž svazkového držáku, požárně odolná montáž 
kus 
110,00000 
45,40 
4 994,00 
Vlastní 
71 
221R 
Svazkový držák Grip 15, P45-R, pásově zinkováno, DIN EN 10346, Ocel, St 
kus 
110,00000 
27,25 
2 997,50 
Vlastní 
72 
977332111 
Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm 
m 
60,00000 
77,40 
4 644,00 
Vlastní 
73 
212R 
Vrtaný průraz cihelného zdiva do tl. 250mm, D20mm 
kus 
36,00000 
341,00 
12 276,00 
Vlastní 
74 
210R 
Oživení a konfigurace evakuačního rozhlasu 
kpl 
1,00000 
12 154,00 
12 154,00 
Vlastní 
75 
211R 
Výchozí revize a funkční zkouška evakuačního rozhlasu 
kpl 
1,00000 
6 254,00 
6 254,00 
Vlastní 
76 
742410302 
Měření srozumitelnosti systému rozhlasu 
kus 
1,00000 
36 800,00 
36 800,00 
Vlastní 
Díl: 
7424 
Přístupový systém 
71 727,33 
77 
742240005 
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu 
kus 
1,00000 
5 470,00 
5 470,00 
Vlastní 
Stránka 30 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
78 
300R 
Interface pro 2 čtečky v krytu, vstup pro 2 čtečky RS485 nebo 2 čtečky Wiegand, 2x kontakt, 2x, 
tlačítko, tamper, 2x NC/NO relé, napájení 24 VDC, pom. výstup 12V/1A 
kus 
1,00000 
29 854,00 
29 854,00 
Vlastní 
79 
742240001 
Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu 
kus 
2,00000 
1 380,00 
2 760,00 
Vlastní 
80 
301R 
Čtečka 13,56MHz bez klávesnice Mifare karty (Classic, Plus, DESFire EV1, S/N nebo S/B), NFC 
ready,, interface RS485 
kus 
2,00000 
6 985,00 
13 970,00 
Vlastní 
81 
742121001 
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 
m 
40,00000 
24,90 
996,00 
Vlastní 
82 
304R 
SHKFH-R 4x2x0,8 B2ca,s1,d1,a1 
m 
20,00000 
39,20 
784,00 
Vlastní 
83 
305R 
SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca,s1,d1,a1 
m 
20,00000 
24,68 
493,60 
Vlastní 
84 
741122601 
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) 
m 
65,00000 
53,80 
3 497,00 
Vlastní 
85 
308R 
1-CXKH-R 2x1,5 B2ca s1,d1,a1 
m 
65,00000 
21,01 
1 365,65 
Vlastní 
86 
742124003 
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně 
m 
65,00000 
31,10 
2 021,50 
Vlastní 
87 
3322R 
Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 
m 
65,00000 
21,71 
1 411,15 
Vlastní 
88 
741110062 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku 
m 
10,00000 
45,80 
458,00 
Vlastní 
89 
108R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 25mm 
m 
10,00000 
14,24 
142,43 
Vlastní 
90 
977332111 
Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm 
m 
8,00000 
104,00 
832,00 
Vlastní 
91 
302R 
Připojení kabelu na automatiku posuvných dveří 
kus 
2,00000 
325,00 
650,00 
Vlastní 
92 
333R 
Připojení kabelu na stávající řídící jednotku ACS 
kus 
1,00000 
428,00 
428,00 
Vlastní 
93 
303R 
Oživení a konfigurace přístupového systému 
kpl 
1,00000 
6 594,00 
6 594,00 
Vlastní 
Díl: 
7425 
Kamerový systém 
40 638,96 
94 
742230004 
Montáž vnitřní kamery 
kus 
2,00000 
1 245,00 
2 490,00 
Vlastní 
95 
402R 
IP dome kamera vnitřní, 4 MP (2304 × 1728), CMOS 1/2.7", motorický varifokální objektiv 3-6 
mm,, optický zoom 2x, zorné pole 100°-45° (horizontálně), 72°-34° (vertikálně), F/1.9-2.7, min. 
osvětlení 
kus 
2,00000 
8 715,00 
17 430,00 
Vlastní 
96 
4411R 
10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 0,25m 
kus 
2,00000 
112,25 
224,50 
Vlastní 
97 
404R 
D+M Licence pro připojení jedné kamery k SW 
kus 
2,00000 
1 458,23 
2 916,46 
Vlastní 
Poznámka k položce: 
0,18 lux (barevně), 0 lux s IR, IR přísvit do 20 m 
SW Ateas, případně rovnocenné řešení 
Stránka 31 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
98 
410R 
Montáž držáku a TV na zeď 
kus 
1,00000 
1 254,00 
1 254,00 
Vlastní 
99 
411R 
Televize 32", Full HD, 50/60 Hz, DVB-T2/S2/C, Android TV, 2x HDMI, 1x USB, CI+, LAN 
kus 
1,00000 
9 854,00 
9 854,00 
Vlastní 
100 
412R 
Kloubový držák TV na zeď 
kus 
1,00000 
2 415,00 
2 415,00 
Vlastní 
101 
742230103 
Nastavení záběru podle přání uživatele 
kus 
2,00000 
857,00 
1 714,00 
Vlastní 
102 
401R 
Oživení a konfigurace kamerového systému 
kpl 
1,00000 
2 341,00 
2 341,00 
Vlastní 
Díl: 
74261 
Sestra-pacient - dodávka a montáž technologie 
199 262,42 
103 
510R 
D+M Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 
kus 
1,00000 
38 963,25 
38 963,25 
Vlastní 
104 
511R 
Montáž zásuvky terminálu 
kus 
1,00000 
158,00 
158,00 
Vlastní 
105 
512R 
Zásuvka terminálu 
kus 
1,00000 
345,00 
345,00 
Vlastní 
106 
513R 
Montáž napájecího zdroje a lokálního serveru 
kus 
1,00000 
1 485,00 
1 485,00 
Vlastní 
107 
514R 
Napájecí zdroj + lokální server 
kus 
1,00000 
15 748,00 
15 748,00 
Vlastní 
108 
515R 
Montáž rozvodného panelu 
kus 
1,00000 
187,00 
187,00 
Vlastní 
109 
516R 
Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U 
kus 
1,00000 
812,00 
812,00 
Vlastní 
110 
517R 
D+M SW - licence pro Hlavní terminál 
kus 
1,00000 
6 854,00 
6 854,00 
Vlastní 
111 
518R 
D+M SW - licence provozu účastníka 
kus 
3,00000 
1 458,00 
4 374,00 
Vlastní 
112 
519R 
D+M SW - databáze historie volání 
kus 
1,00000 
3 254,00 
3 254,00 
Vlastní 
113 
520R 
Montáž police 
kus 
1,00000 
174,00 
174,00 
Vlastní 
114 
521R 
Montážní police 19"/1U 
kus 
1,00000 
784,00 
784,00 
Vlastní 
115 
522R 
Montáž switche 
kus 
1,00000 
1 054,00 
1 054,00 
Vlastní 
116 
523R 
Datový switch 24 portů/19" (CZ) 
kus 
1,00000 
2 415,00 
2 415,00 
Vlastní 
117 
524R 
Montáž injektoru 
kus 
1,00000 
841,00 
841,00 
Vlastní 
118 
525R 
Napájecí injektor 24 portů/19" 
kus 
1,00000 
3 542,00 
3 542,00 
Vlastní 
119 
526R 
Montáž LCD panelu 
kus 
2,00000 
321,00 
642,00 
Vlastní 
Poznámka k položce: 
Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) 
Stránka 32 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
120 
527R 
24" LCD panel jednostranný na zeď s příslušenstvím 
kus 
2,00000 
8 215,26 
16 430,52 
Vlastní 
121 
528R 
Montáž signalizačního svítidla 
kus 
4,00000 
424,00 
1 696,00 
Vlastní 
122 
529R 
Svítidlo signalizační LED 
kus 
4,00000 
1 012,00 
4 048,00 
Vlastní 
123 
530R 
Montáž pokojového terminálu 
kus 
5,00000 
471,00 
2 355,00 
Vlastní 
124 
531R 
Pokojový terminál se čtečkou, displejem a hovorem 
kus 
5,00000 
3 452,00 
17 260,00 
Vlastní 
125 
532R 
Montáž zásuvky pacienta 
kus 
4,00000 
311,00 
1 244,00 
Vlastní 
126 
533R 
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem 
kus 
4,00000 
1 652,00 
6 608,00 
Vlastní 
127 
535R 
D+M Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky 
kus 
4,00000 
3 895,26 
15 581,04 
Vlastní 
128 
536R 
D+M Kabel vytrhávací - částečně kroucený pro terminál pacienta (PT) 
kus 
4,00000 
854,00 
3 416,00 
Vlastní 
129 
537R 
D+M Držák kabelu na hrazdu 
kus 
4,00000 
187,00 
748,00 
Vlastní 
130 
538R 
Montáž táhla nouzového volání 
kus 
9,00000 
158,00 
1 422,00 
Vlastní 
131 
539R 
Táhlo nouzového volání 
kus 
9,00000 
689,25 
6 203,25 
Vlastní 
132 
540R 
Montáž služebního terminálu 
kus 
1,00000 
655,00 
655,00 
Vlastní 
133 
541R 
Služební terminál (vchod) 
kus 
1,00000 
4 125,36 
4 125,36 
Vlastní 
134 
542R 
Montáž routeru 
kus 
1,00000 
287,00 
287,00 
Vlastní 
135 
543R 
Router 
kus 
1,00000 
1 985,00 
1 985,00 
Vlastní 
136 
544R 
Montáž SQL serveru 
kus 
1,00000 
1 245,00 
1 245,00 
Vlastní 
přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)Ve spojení s Terminálem pacienta umožňuje diskrétní a hlasitý hovor 
Poznámka k položce: 
tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítko pro přivolání pomocného personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, bezpečnostní konektor proti vytržení). Vestvavěný gyroskop při změně polohy sluchatka se automaticky přepíná na hlasity hovor 
Poznámka k položce: 
minimálně 3 programovatelná tlačítka, registrace a rušení volání pomocí čipu/karty, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech 
Poznámka k položce: 
Stránka 33 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
137 
545R 
SQL server (do 30-ti oddělení) 
kus 
1,00000 
16 525,00 
16 525,00 
Vlastní 
138 
546R 
Montáž patch kabelu 
kus 
16,00000 
24,50 
392,00 
Vlastní 
139 
547R 
Patch kabel 0,3m 
kus 
16,00000 
14,25 
228,00 
Vlastní 
140 
548R 
Montáž konektoru RJ45 včetně ochrany a proměření 
kus 
32,00000 
387,00 
12 384,00 
Vlastní 
141 
549R 
Konektor RJ45 UTP CAT6 
kus 
32,00000 
87,25 
2 792,00 
Vlastní 
Díl: 
74262 
Sestra-pacient - oživení, konfigurace a ostatní náklady 
45 907,00 
142 
550R 
Instalace a konfigurace systému 
ks 
1,00000 
24 856,00 
24 856,00 
Vlastní 
143 
551R 
Koordinovaná funkční zkouška, zaškolení, vedlejší výdaje 
ks 
1,00000 
14 526,00 
14 526,00 
Vlastní 
144 
552R 
Výchozí funkční zkouška dorozumívacího zařízení 
ks 
1,00000 
6 525,00 
6 525,00 
Vlastní 
Díl: 
74263 
Sestra-pacient - elektroinstalační materiál 
65 626,89 
145 
742124003 
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně 
m 
680,00000 
31,10 
21 148,00 
Vlastní 
146 
559R 
Instalační kabel UTP Cat.6 LSOHFR B2ca s1,d1,a1 
m 
680,00000 
13,48 
9 166,40 
Vlastní 
147 
742121001 
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 
m 
30,00000 
24,90 
747,00 
Vlastní 
148 
560R 
1-CXKH-R 2x2,5 B2ca s1,d1,a1 
m 
30,00000 
30,85 
925,50 
Vlastní 
149 
977132112 
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm 
kus 
24,00000 
44,70 
1 072,80 
Vlastní 
150 
741112061 
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 
kus 
24,00000 
45,80 
1 099,20 
Vlastní 
151 
561R 
Instalační krabice pod omítku KU 68-45 KA 
kus 
14,00000 
7,11 
99,54 
Vlastní 
152 
562R 
Instalační krabice pod omítku KP 64/2KA 
kus 
5,00000 
56,79 
283,95 
Vlastní 
153 
563R 
Instalační krabice pod omítku KP 64/3KA 
kus 
5,00000 
84,29 
421,45 
Vlastní 
154 
741110061 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku 
m 
65,00000 
40,30 
2 619,50 
Vlastní 
155 
564R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 20mm 
m 
65,00000 
14,24 
925,60 
Vlastní 
156 
741110062 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku 
m 
50,00000 
45,80 
2 290,00 
Vlastní 
157 
565R 
Ohebná elektroinstalační trubka PVC průměr 32mm 
m 
50,00000 
20,79 
1 039,50 
Vlastní 
158 
567R 
D+M sádra štukatérská 
kg 
6,00000 
54,20 
325,20 
Vlastní 
159 
568R 
D+M štukovací směs 
kg 
5,00000 
68,25 
341,25 
Vlastní 
160 
569R 
Rýhy do zdi 
m 
58,00000 
74,00 
4 292,00 
Vlastní 
161 
570R 
Prostupy zdivem do 0,5m 
kus 
13,00000 
580,00 
7 540,00 
Vlastní 
Stránka 34 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
162 
571R 
Prostupy betonem nad 0,5m 
kus 
1,00000 
790,00 
790,00 
Vlastní 
163 
572R 
Pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, 
propoj s, tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) 
HZS 
10,00000 
525,00 
5 250,00 
Vlastní 
164 
573R 
Oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení 
nové, instalační krabice) 
HZS 
10,00000 
525,00 
5 250,00 
Vlastní 
Díl: 
7427 
Společné trasy 
144 179,75 
165 
741910415 
Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka 
m 
60,00000 
302,00 
18 120,00 
Vlastní 
166 
601R 
Žlab kabelový neperforovaný s integrovanou spojkou 300x100 mm, délka 3 m, sendzimir 
m 
60,00000 
268,31 
16 098,60 
Vlastní 
167 
741910421 
Montáž žlab kovový - uzavření víkem 
m 
60,00000 
76,50 
4 590,00 
Vlastní 
168 
602R 
Víko univerzální pro kabelové žlaby, šířka 300mm 
m 
60,00000 
380,78 
22 846,80 
Vlastní 
169 
606R 
Montáž spony víka 
kus 
120,00000 
54,00 
6 480,00 
Vlastní 
170 
607R 
Spona víka samodržná pro žlaby výšky 100mm 
kus 
120,00000 
121,00 
14 520,00 
Vlastní 
171 
604R 
Montáž koncovky žlabu 
kus 
2,00000 
144,00 
288,00 
Vlastní 
172 
603R 
Koncovka kabelového žlabu 300x100mm 
kus 
2,00000 
345,00 
690,00 
Vlastní 
173 
699R 
D+M Šroub metrický vratový M6 a matice šestihranná s límcem 
kus 
200,00000 
7,85 
1 570,00 
Vlastní 
174 
610R 
D+M Nosný profil 41x41x3000mm 
kus 
9,00000 
744,25 
6 698,25 
Vlastní 
175 
611R 
D+M Závitová tyč M8/1000mm 
kus 
80,00000 
48,25 
3 860,00 
Vlastní 
176 
612R 
D+M Kotva narážecí M8 
kus 
80,00000 
13,52 
1 081,60 
Vlastní 
177 
613R 
D+M Matice šestihranná M8 
kus 
200,00000 
4,25 
850,00 
Vlastní 
178 
620R 
Montáž protipožárního prostupu 
kus 
17,00000 
1 450,00 
24 650,00 
Vlastní 
179 
621R 
Protipožární ucpávka - tmel, jednotlivý kabel, kabelový svazek, vč. zapravení 
kus 
17,00000 
1 250,00 
21 250,00 
Vlastní 
180 
622R 
D+M štítek k protipožární ucpávce 
kus 
17,00000 
34,50 
586,50 
Vlastní 
Díl: 
7428 
Ostatní 
183 623,00 
181 
710R 
D+M Podružný elektroinstalační a spojovací materiál 
kpl 
1,00000 
37 986,00 
37 986,00 
Vlastní 
182 
708R 
Mobilní lešení, výška podlahy 1,2m (montáž, demontáž, nájem) 
kpl 
1,00000 
58 563,00 
58 563,00 
Vlastní 
183 
701R 
Dokumentace skutečného provedení - slaboproud, tisk 3 paré + elektronicky 
kpl 
1,00000 
26 548,00 
26 548,00 
Vlastní 
184 
702R 
Zaškolení obsluhy 
kpl 
1,00000 
6 987,00 
6 987,00 
Vlastní 
Stránka 35 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.S: 
Z0162025 
O: 
SO 01 
R: 
D.1.4.ch 
P.č. 
Číslo položky 
Název položky 
MJ 
Množství 
Cena / MJ 
Celkem 
Ceník 
Cen. 
soustava / 
platnost 
Položkový soupis prací a dodávek 
VN Brno - rekonstrukce očního oddělení 
Rekonstrukce očního oddělení 
Slaboproud 
185 
703R 
Průběžný úklid 
kpl 
1,00000 
6 200,00 
6 200,00 
Vlastní 
186 
704R 
Koordinační práce, kontrolní dny a podružné pracovní výkony 
kpl 
1,00000 
12 548,00 
12 548,00 
Vlastní 
187 
705R 
Ekologická likvidace odpadu 
kpl 
1,00000 
6 548,00 
6 548,00 
Vlastní 
188 
706R 
Doprava 
kpl 
1,00000 
16 987,00 
16 987,00 
Vlastní 
189 
707R 
Přesun hmot 
kpl 
1,00000 
11 256,00 
11 256,00 
Vlastní 
Celkem 
2 102 942,65 
Stránka 36 z 36 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.„VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 27 

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
HARMONOGRAM VÝSTAVBY rok měsíc XI.25 XII.25 I.26 II.26 III.26 IV.26 Převzetí staveniště milník Přípravné a přídružné práce 1 Bourací práce 1 Podlahové konstrukce a hydroizolace 1 Svislé konstrukce - stěny a příčky 2 Stropní konstrukce - podhledy 2 konstrukce suché výstavby 2 vnitřní podlahové konstrukce krytiny 3 Dokončovací práce - vnitřní dveře, obklady, malby, nátěry 3 Zdravotechnika 4 Vzduchotechnika 4 Elektro - silnoproud 4 Elektro - slaboproud 4 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 Předání díla milník 2026 VN Brno - rekonstrukce očního oddělení Délka činnosti měsíce „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 28 

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST 
Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 
Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a změny na které se vztahuje výjimka podle § 27 ZZVZ. 
Článek I. 
Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem: 
zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 
zápisem z kontrolního dne stavby 
zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). 

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 
Článek II. 
Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 - 7 ZZVZ (pouze v případě pokud by provedení změny celková hodnota závazku podle této smlouvy po jeho změně překročila limit podle § 27 ZZVZ). Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 - 7 ZZVZ: 
1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 ZZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn. 
2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 
3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 ZZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZZVZ, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan. 
Článek III. 
K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 
za Objednatele: ................, manažer investičních projektů .....................
za Zhotovitele: .................... stavbyvedoucí - vedoucí stavby „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 29 

za Projektanta: Ing. arch. Tomáš Zálešák, Ing. Martin Kovář AD 
Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 
Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 
Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 
Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje: 
Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 
Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 
Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 
Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 
Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje: 
Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY; 
Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 
Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 
za Objednatele: ........................, náměstek ředitele pro logistiku 
......................manažer investičních projektů 
za Zhotovitele: ......................
Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 
Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat; 
Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY; 
Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu. 

Článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU Protokol o změně díla 
Změnový list 
č. 
Změnu vyvolal: 
sazba: 
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 
dodatek k PD 
zápis do SD (deníku změn) 
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 
hodnota odpočtů (méněprací) 
celkem v Kč bez DPH 
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla 
Výše DPH 
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 
dokumentace skut.provedení 
jiné 
náklady na změnu v Kč bez DPH 
náklady na změnu vč. DPH 
celkem v Kč bez DPH 
termíny 
Změnu odsouhlasil: 
datum 
odsouhlasení změny 
Termín realizace změny: 
Vliv změny na terním dokončení díla: 
podpis 
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
Zhotovitel (statutární zástupce): 
TDI: 
Projektant: 
Objednatel (statutární zástupce): 
Odůvodnění změny: 
Přílohy: 
údaje o složení ceny změny 
ocenění změny předložil: 
hodnota přípočtů (víceprací) 
přílohy 
Předmět díla: 
Popis změny: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
TDI: 
Projektant: 
Objekt: 
údaje o ceně změny 
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) 
§ 222 odst. 4 
§ 222 odst. 5 
§ 222 odst. 6 
§ 222 odst. 7 
Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout při překročení limitu podle § 27) 
Jedná se o změnu: (zatrhnout) 
údaje o změně „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 30 

PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
Podle vyhlášky DS není obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) určen. Podle § 232 stavebního zákona k žádosti o kolaudační rozhodnutí se přikládá dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené DSP. 
Povinnost Zhotovitele zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) podle této smlouvy požaduje Objednatel pro účely dalšího provozování stavby, a proto touto smlouvou sjednává povinnost Zhotovitele DSPS zpracovat a předat Objednateli jako součást díla. 
DSPS vychází z dokumentace pro realizaci stavby (DPS), tedy z PROJEKTU podle této smlouvy a musí být zpracována ve stejném rozsahu jako PROJEKT s tím, že na rozdíl od PROJEKTU bude obsahovat skutečný stav provedení díla, zejména konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě tak, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 
ROZSAH DSPS: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Výkresová dokumentace 
E: Provozní dokumentace stavby 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace DSP 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 
A.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace DPSP 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 
A.1.5 Údaje o zhotoviteli stavby 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby, 
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala, „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 31 

c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena. 
B. Souhrnná technická zpráva 
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
b) popis stavby 
- účel užívání stavby, 
- ochrana stavby 
- parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 
c) technický popis stavby a jejího technického zařízení, 
d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, 
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
f) ochranná a bezpečnostní pásma, 
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. 
C. Situační výkresy 
C.1 Katastrální situační výkres 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
b) vyznačení stavby, 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
C.2 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200, 
b) hranice pozemků, parcelní čísla, 
c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury, 
d) stávající výškopis a polohopis, 
e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů, 
f) okótované odstupy staveb, 
g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
h) stávající vzrostlá vegetace, 
i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
j) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
D. Výkresová dokumentace 
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. 
Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou. 
E. Provozní dokumentace stavby 
E.1 Technická zpráva 
a) zásadní informace o stavbě a její stavební historii, 
b) stanovení návrhové životnosti stavby a jejích rozhodujících konstrukcí, 
c) požadavky na kontroly a údržbu stavby prováděné vlastníkem / uživatelem, 
d) popis požadavků na prohlídky stavby po dobu užívání stavby, 
- výchozí prohlídka (výchozí stav po dokončení stavby), prováděná vlastníkem / uživatelem za přítomnosti Zhotovitele stavby 
- mimořádná prohlídka před koncem uplynutí záruční doby na stavbu, prováděná Zhotovitelem stavby za přítomnosti vlastníka / uživatele 
- periodické prohlídky a stanovení periody (hodnocení všech částí a prvků stavby, stavebně technický stav, stabilita, odolnost, spolehlivost, použitelnost, bezpečnost, potřeba oprav), prováděné vlastníkem / uživatelem, „VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení“ 
Obchodní podmínky strana 32 

Zhotovitel dopracuje RDS pouze pokud to bude povaha díla požadovat. RDS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a bude ověřena osobou s autorizací pro obor pozemní stavby. RDS bude předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
U těch částí díla, které vyžadují zpracování RDS, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a DP a odsouhlasenou dokumentaci předat Objednateli. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu předání RDS pro ty částí díla, které vyžadují zpracování RDS platí, že Zhotovitel je povinen příslušnou RDS předat k odsouhlasení Objednateli, TDS a DP nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem realizace příslušné části díla. 
Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se Zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či její část, u které stanovil Objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS Objednatelem odsouhlasený. Součástí podkladu pro realizaci díla se stává RDS, ke které Objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS Objednatelem nemá vliv na termíny plnění Zhotovitele podle této smlouvy. 
Všechna vyhotovení čistopisu RDS předá Zhotovitel Objednateli do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se Zhotovitelem o výhradách k RDS. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení díla, případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

- mimořádná prohlídka následující po jakékoliv mimořádné události (havárie, porucha, přívalový déšť, záplava, povodeň, zemětřesení, vichřice, úder blesku apod., prováděná vlastníkem / uživatelem 
e) plán kontrol prohlídek a údržby stavby v průběhu její životnosti prováděné vlastníkem / uživatelem, 
f) informace o požadavcích na vlastníka / správce stavby k aktualizaci plánu prohlídek a údržby stavby v průběhu životnosti stavby. 
E.2 Návod na provoz a údržbu díla podle čl. I. odst. 1.4. této smlouvy. 
PŘÍLOHA ČÍSLO V. SMLOUVY O DÍLO 
VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)