číslo smlouvy objednatele S/0677/2025/ODaSH				číslo smlouvy zhotovitele 050/600/2025
  Dodatek č.2  SMLOUVY O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:	00296643
DIČ:	CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.:	558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz tel: 558 609 350

-	dále jen objednatel 

a

TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: 
Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva
IČ:	60793716
DIČ:	CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300
Tel: 558 443 211 
E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Radomír Pecka, vedoucí provozu Veřejné osvětlení
email: radomir.pecka@tsfm.cz tel: 558 443 233

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dodatek č. 2 této  Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem „PS 453 SSZ Revoluční x Hálkova“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek č.2). 

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
Strany uzavírají tento dodatek č.2 s vědomím následujících skutečností:
1.	Při realizaci díla bylo dohodnuto, že budou použity původní prostupy pod komunikací ul. Pionýrů, ul. Opletala a část původní chráničky. Tyto změny jsou zaznamenány ve změnovém listě č.1.
2.	Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy upravené níže v čl. 2 tohoto dodatku.  

ČLÁNEK 2
Předmět smlouvy
1.	Ćlánek 5 „Cena díla“, jeho odstavec 1 se mění takto:
1.	Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena bez DPH 	DPH	Cena vč. DPH	
               6 071 063,61	1 274 923,36	7 345 986,97	

ČLÁNEK 3
závěrečné ustanovení
1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2.	Tento dodatek č.2 je uzavřen na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 02.12.2025
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č.2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
Příloha č.1 : Změnový list č.1

a objednatele:			                                          Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 			                              Ve Frýdku-Místku, dne 

 		                   	
Petr Korč, 		Ing. Vladimír Macura,
primátor		předseda představenstva