*POSPX0083DHS*
                                                                   POSPX0083DHS

	
	Lojkásek Bohumír Doc. RNDr. CSc.
Ostravice 257
73914 Ostravice 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:		

Naše č.j.:	POD/19713/2025/5878
Spis. zn.:	951_2
Vyřizuje:	xxx
Tel.:    		xxx
E-mail:    	xxx
Datum:   	08.12.2025  

Dodatek č. 1 k Objednávce č. OVs2924/0232 na provádění biologického dozoru na stavbě „Odra, Jistebník, Košatka n.O. – zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby provádění biologického dozoru na stavbě „Odra, Jistebník, Košatka n.O. – zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“ z důvodu prodloužení doby realizace této stavby.
Průběžné zprávy za rok 2025 a za rok 2026 budou objednateli předány nejpozději 20.12. příslušného roku.

Doba provádění biologického dozoru:	do 03/2027

Předpokládaný počet kontrol v průběhu stavby:	30
Cena za provedenou kontrolu                 	3 000,- Kč bez DPH
Vyhotovení průběžné / závěrečné zprávy:	3 000,-  Kč bez DPH
Další jednání a konzultace - rozsah 14 hodin:    500,- Kč/hod. bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1: 	             max. 109 000,- Kč bez DPH

Dodatkem č. 1 se dále mění identifikační údaje objednatele, resp. zástupci objednatele:
Povodí Odry, státní podnik
Statutární zástupce:                 Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní:      xxx, investiční ředitelka
Zástupce pro věci technické:   xxx, vedoucí investičního odboru
                                                   	 xxx, investiční referent
                        Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny.

xxx

xxx
investiční ředitelka

Co: OOK – xxx, zde

Potvrzení převzetí objednávky 
Datum a podpis:
Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!
   2.2.2026                        xxx