DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.05.2017
Smluvní strany
1.	Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh s.r.o.
se sídlem náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, Ostrava - Zábřeh IČO: 47973145
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C5281 Jednající jednatelkou paní Mgr. Darinou Daňkovou
dále jen objednatel
2.	INGTRADE group s.r.o.
Se sídlem: Kostelní 837/17, 735 42 Těrlicko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54838
Zastoupené: Bc. Tomáš Tomečka, jednatel IČO: 29456304 DIČ: CZ 29456304 Bankovní spojení: KB a s.
Číslo účtu: xxxxxxxxx
dále jen zhotovitel
I.
Smluvní strany konstatují, že dne 24.05.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"), ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů a předsálí".
Smluvní strany se dohodly, že článek V. odstavec 1 Smlouvy o dílo se z důvodu ménéprací a dodatečných stavebních prací mění a nově zní takto:
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.
	Cena bez DPH	
	v Kč	
Původní cena	dle SoD	2 791 961	
Dodatečné stavební práce	dle ZL č. 1	43 603,75	
Dodatečné stavební práce	dle ZL č. 2	80 568,50	
Méněpráce	dle ZL č. 2	-	124 486,74	

Dodatečné stavební práce	dle ZL č. 3	191 994,27	
Dodatečné stavební práce	dle ZL č. 4	63 702,72	
Cena díla	dle Dodatku č. 1	3 047 343,50	
Slovy: třimilionyčtyřicetsedmtisíctřistačtyřicettři koruny padesát haléřů bez DPH.
Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací díla jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odstavec 1 písm. b) Smlouvy o dílo se z důvodu nutnosti provést dodatečné stavební práce, které měly vliv na posun lhůty pro dokončení stavebních prací mění a nově zní takto:
lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 10.09.2017
IV.
1.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2.	Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
V Ostravě dne: 26.09.2017	V Ostravě dne: 26.09.2017
Za Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.:	Za INGTRADE group s.r.o.:

Soupis více a méně prací
	255 382,50	255 382,50	
777Rp550001	Hloubková penetrace podkladu pro perlinku_vč. dodávky penetrace	m2	625,00	35,00	21 875,00	625,00	21 875,00	
622142001	2x Potažení vnějších stěn skíovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty- 5.02,5.07,5.10 a stěny 5,02,5.07,5.1,5.9	m2	625,50	215,00	134 482,50	625,50	134 482,50	
612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky + APU lišty	m	127,50	135,00	17 212,77	127,50	17 212,77	
941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro stropy 5.02,5.07,5.10 a 1/3 stěny 5.02,5.07,5.1,5.9	m2	329,00	56,00	18 424,00	329,00	18 424,00	
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro práce na odstranění malby	m2	135,00	75,00	10 125,00	135,00	10 125,00	
	Demontáž dřevěných a ocelových konstrukcí,roštu, zrcadel v
Dloše m.č. 5.10.5.07.5 09	hod	105,00	280,00	29 400,00	105,00	29 400,00	
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,75	749,00	2 808,75	3,75	2 808,75	
979Rp999022	Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001sb.	t	5,30	2 150,00	11 395,00	5,30	11 395,00	
	Položení hobry ve dvou vrstvách lepených viz. skladba Sp1	m2	32,09	170,00	5 455,30	32,09	5 455,30	
63141440	Pásek okrajový podlahový 10x100x1000 mm skladba Sp1, viz. det. na v.č. D.1.1_04 - kotvení ke stěně jednostranně PUR D+M	m2	11,50	45,00	517,42	11,50	517,42	
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	kpl	1,00	9 850,00	9 850,00	1,00	9 850,00	
63150914.A	Desky podlahové TDPT 50 - 50x1200x600 mm skladba Sp1, viz. det. na v.č. D.1.1_04	m2	105,00	456,00	47 880,00	456,00	47 880,00	
	Úprava sloupů - broušeni, tmelení,3xnátěr vodoodolná barva	ks	6,00	2 150,00	12 900,00	2 150,00	12 900,00	
460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech a stěnách hloubky hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,00	56,00	560,00	10,00	560,00	
460710005	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech a stěnách hloubky do 10cm a šířky do 15 cm	m	40,00	95,00	3 800,00	60,00	3 800,00	
460710006	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech a stěnách hloubky hloubky do 15 cm a šířky do 35 cm + zapravení 3x RS	m	90,00	101,50	9 135,00	90,00	9 135,00	
	Slaboproud(Drážkování a sekání 50x50) vyplnění a omítnutí + stropní průraz pro kabeláže	m	200,00	135,00	27 000,00	200,00	27 000,00	
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,10	985,00	9 948,50	1,50	9 948,50	
	Protipožární ucpávka kabelových vodičů	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	1,00	3 500,00	
210201001ROO	Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	3,00	1 200,00	3 600,00	3,00	3 600,00	
777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. stěrka tl.4 mm viz. skladba Sp1	m2	285,00	258,00	-73 530,00	285,00	-73 530,00	
777Rp550001	Penetrace podkladu_vč. dodávky penetrace viz skladba Sp1, Sp2	m2	285,00	35,00	-9 975,00	285,00	-9 975,00	

611421131R00	Renovace omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	181,00	65,00	-11 765,00	181	-11 765,00	
612421231R00	Renovace omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	444,50	62,00	-27 559,00	444,50	-27 559,00	
784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x dle malby	m2	30,14	13,00	-391,82	30,14	-391,82	
784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x vhodná i na sádrokarton	m2	30,14	42,00	-1 265,88	30,14	-1 265,88	
nové položky
SoD VCP MP CELKEM
2	791 961,00 255 382,50
3	047 343,50