SMLOUVA 0 OiLO 
cislo objednatele: 08/2017 
	cislo dodavatele: 	. 
"Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady" 
Smluvni strany 
Objednatel 
Detske centrum Strancice 
	Sidlo: 	Hrdinu 175,251 63 Strancice 
Zastoupeny; MUDr. Pavlem Biskupem, reditelem pi'ispevkove organizace 
	Ie: 	43750672 
DIG: 

Telefon: 

+420323640031 

	E-mail: 	dcstrancice@dcstrancice.cz
Bankovni spojeni: Komercn! banka, a.s., cislo LlctU: 30229201/0100 
dale jen .objednater' 
a 
Dodavatel 
TREPART s.r.o. 
se sidlem Pistekova 782/3, 149 00 Praha 4 
zapsany v obchodnim rejstriku vedeny Mestskym soudem v Praze v oddlle C, vlozka 206689 
jednajici Jirim Krememikem, jednatelem spolecnosti 
	IG: 25917S38 	DIG: CZ25917838 
Bankovni spojenf: Raiffeisenbank a.s., cislo Llctu 1056024620/5500 
Kornerent banka a.s., cislo Llctu 27-0805230217/0100 
dale jen .Dodavatel" 
uzaviraji pod Ie prislusnych ustanoveni cbcanskeho zakonlku 
tuto smlouvu 0 dllo: 
Clanek I. 
Pfedmit smlouvy 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni dila - stavby "Rekonstrukce Detskeho centra 
Chocerady" podle provadecl projektove dokumentace vt: vykazu vymer, kterou 
vypracovala firma Novak a Partner inzenyrska projektova kancelaf, Perucka 5, 120 00 
Praha 2, IG: 48585955, v rozsahu specifikovanem v ocenenem vykazu vymer 
1 

(polozkovern rozpoctu), kter-y tvof pfflohu tete smlouvy a byl soucastl nabidky Dodavatele 
podane v rarnci zadavaclhc rizeni na vyber Dodavatele predrnetu dlla. Soucasti 
provedeni dlla je i vypracovanl nezbytne vyrobni a dUenske dokumentace. 
Mistem plnemi predmetu plneni dUa je objekt Detskeho centra Chocerady, c.p. 124 a 189, 
25724 Chocerady, v rozsahu projektove dokumentace a podle uvedeneho vykazu vymer 
a pozadovaneho soupisu praci. 
1.2. Dodavatel se zavazuje, ze provede dflo v rozsahu, zpusobern, v jakosti a za podminek 
dohodnutych v teto smlouve, svym jmenern a na vlastni odpovednost, v souladu 
s pravnlrnt pFedpisy a technickymi normami GR a podminkami vyrobcu materialu 
a dodanych zaFizeni (viz clanek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni olta uvedeneho v clfmku I. smlouvy zaplatit 
Dodavateli cenu za dilo uvedenou v clanku III. smlouvy, a to za podminek uvedenych 
v tete smlouve. 
1.4. PFedmetem dlla jsou rovnez vsechny dale uvedene cmnosti: 
prubezna aktualizace harmonogramu provadenl praci (v dusledku zrnen neprodlene, 
v ost. prlpadech kazde 3 meslce): 
vypracovanl kontrolne zkusebniho planu stavby, kter-y bude predan investorovi 
k odsouhlaseni do 7 kalendamlch dnu od pfedanl staveniste: 
naklady na prlpadnou likvidaci havarie; 
opatFeni pro zajistenf BOZP na stavenlstl; 
naklady na protipozarnl ochranu; 
pflprava staveniste vcetne pFistupu na staveniste; 
dodant materialu a dllcu v pozadovane kvalite, vcetne jejich certifikatu a atestu: 
zhotoveni prace podle technoloqickeho predpisu: 
veskere nutne prostredky ochrany prace: 
zabezpeceru pruchodu pro pesi po celou dobu vystavby; 
letnf opatFeni 
zimni opatFeni 
zhotoveni potrebnych provizornich prachodu ci pi'ejezdu k objektum, vcetne 
prlpadneho nutneho osvetlenl: 
zajisteni, aby prace byly provadeny tak, aby nedoslo k narusenl nocnlho klidu; 
zajisteni pracoviste proti vsem vllvum znemozriultclm nebo zneenadruqlclm praci 
(eerpanl vody, zajisteni svahu, pristresky, zazirnovanl stavby, apod.); 
soustavne vytycovani zretelneho oznaeenl obvodu staveniste; 
odvoz a poplatek za ulozenl vybouranych hmot a nsvhodnych zemin; 
dodrzovan! bezpecnosti a hygieny na pracovisti, 
v pripade, ze pred zahaientrn pracl nebo v jejich prubehu bude zjisten vyskyt netopyru 
nebo roryse obecneho, musi Dodavatel neprodlene pozastavit prace a tuto skutecnost 
ohlasit a projednat s prislusnym orqanern ochrany pfirody a krajiny. 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpecit provadenl dila tak, aby pfi realizaci dfla nedoslo 
k omezeni soucasneho provozu sousednich objektu nad rarnec provadenych praci. Musf 
byt zachovana prujezdnost stavsjtclch komunikaci nebo jinak zajistena pFistupnost vsech 
Stranka 2 z 21 

objektu, zejrnena pro inteqrovany zachranny system a zajisteni dopravni obsluznosf 
vsech vystavbou doteenyeh obcl. Dodavatel je povinen odstranit na vlastni naklady 
znecistemi komunikaei zpusobene provadenou stavbou, ktere by mohlo byt zpusobile 
vytvoflt zavadu ve sjfzdnosti komunikaee, jeste pred vznikem tete zavady. Dodavatel 
prohlasuie, ze si je vedom tete odpovednosti. 
1.6. Dodavatel bere na vedomi, ze realizaee dila je financovana ze strany objednatele 
prostrednietvim verejnyeh prosttedku, kterymi jsou financn' prostredky rozpoctu 
Stredoceskeho kraje. 
1.7. Dodavatel je povinen poflzovat fotodokumentaei pred zapocetlm dila, v jeho prubehu a po 
dokoncenl dila v potrebnem rozsahu die predmetu dila, podle pozadavku objednatele, 
s diqltalnlrn vyznaeenlrn data porlzenl. Tato fotodokumentaee bude soucastl predmetu 
dlla a jeho ceny (viz clanek I. odst. 1.4. smlouvy). Pi'i vyuctovanf kazde casti ceny dila 
Dodavatel pi'ilozi k pfislusne faktui'e jen pi'imei'eny pocet fotografif postihujicich prubeh 
zhotoveni dane casti dila. V pi'ipade dllclch faktur tedy bude prilozena Dodavatelem jen 
fotodokumentace, ktera postihuje fakturovane polozky, V pripade tech casU a dodavek 
dfla, ktere budou v dalslrn postupu zakryte, nebo se stanou nepristupnym], je Dodavatel 
povinen vest podrobnou fotodokumentaci (popi'. vldeozaznam, nebo digitalni zaznam) 
postihujici detailne vsechny tyto casti. Fotodokumentaei je povinen Dodavatel poi'idit 
rovnez pri pripadnem odstranenl vad a nedodetku dila. V pi'ipade, ze Dodavatel takovou 
dokumentaei nepovede nebo ji povede v nedostatecne podrobnosti, budou strany 
v pi'fpade sporu 0 kvalitu dlla nebo jeho konkretnl casti vychazet z dokumentace, kterou si 
poridi objednatel a jejf obsah bude pro takovy pflpad stranami povazovan za nesporny. 
1.8. Poi'izenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen: 
predat objednateli v jednom vytistenem vyhotoveni a jednou v digitalni pcdobe pi'i 
predani dlla a pri pflpadnern odstranenl vad a nedodelku dila, 
arehivovat v jed nom vytistenem vyhotoveni a v digitalnf podobe po dobu zaruky 
za jakost dlla pro pflpad kontroly a i'eseni pripadnych rozporu nebo reklamaci. 
1.9. Zavaznost dokumentace: 
V pripade eventualnlho rozporu v platnosti smluvnich dokurnentu, jsou dokumenty platne 
v tomto poradl: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace text ova a tabulkova cast, 3) 
projektova dokumentace vykresova cast, 4) nabidka Dodavatele na verejnou zakazku 
5 nazvem "Rekonstrukce Detskeho centra Choceradyu (dale jen "Verejna zakazka") - 
vykaz vymer, 5) nabidka Dodavatele ostatni, 6) zadavacl dokumentaee Verejne zakazky. 
1.10. Dodavatel prohlasuje, ze vypraeoval nabfdku na dllo uplne a beze zbytku. Jeho 
nabidka obsahuje vsechny rnaterialy, prace a postupy a teehnologie, ktere jsou potrebne 
k dohotoveni dila. Vznikne-li v prubehu provaden! dfla potteba doplnit smlouvu 0 dtto 
o dalsi materiaty, prace postupy a teehnologie nese toto navyseni Dodavatel. Pouze 
v pi'ipade, ze jejieh potreba vznikla v dusledku okolnosti, ktere objednatel jednajiei 
5 nalezitou peei nemohl pfedvfdat, a tyto dodatecne stavebni prace jsou nezbytne pro 
provedeni puvodnfch stavebnieh praci, muze objednatel postupem podle zakona 
c. 134/2016 Sb., 0 zadavanl vei'ejnych zakazek, v platnem zneni, (dale jen "ZZVZU) 
uzavi'it smlouvu na tyto vlceprace. Existenci techto okolnosti prokazuje Dodavatel. 
Stranka 3 z 21 

Climek II. 
Doba zhotoveni dila 
2.1. Dodavatel provede (tj. dokone! a preda) dllo specifikovane v clanku I. odst. 1.1. a 1.4. 
smlouvy v terminu do 40 kalendarnlch tydnu ode dne dorucenl vyzvy die bodu 2.2 
a v souladu s Pfilohou c. 1 - Harmonogram plnenl, pri dodrzenl naeleduilclch uzlovych bodu: 
1.	dokoncenl sttesnlch krytin 
2.	dokoncenl hrubych rozvodu vnitinlch instalaci 
3.	rnonolitlcke konstrukce lodzie a vYtahu 
4.	dokoncent podlahovych konstrukci 
5.	vymena vyplni otvoru vnejsich oken a dvef 
2.2. K zapocetl plneni predrnetu dila bude Dodavatel objednatelem vyzvan vzdy plsernne, 
e-mailem nebo faxem, a to nejmene 7 kalendarnlch dnu pi'ed pozadovanym zapocetlm 
praci, pricemz Dodavatel je povinen potvrdit pi'evzeti teto vyzvy, plsernne, e-mailem nebo 
faxem, s uvedenim pfesneho data zapocetl predmetu plnenl die clanku I. smlouvy. 
Dodavatel je povinen zahajit provadenl dlla nejpozdejl do 1 tydne ode dne obdrzenl vyzvy 
die tohoto odstavce. V pripade, ze tak neucinl, je objednatel opravnen od tete smlouvy 
odstoupit. 
2.3. V pflpade, ze Dodavatel zaene provadet dllo bez ptsemne vyzvy popsane v clc~nku II. odst 
2. 2. smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedene sam a objednatel neni 
povinen jejich cenu ani naklady takto vynalozene hradit. 
2.4. Dodavatel muze provest dllo pi'ed sjednanou dobou. 
2.5. Objednatel pfipoustl moznosti dohody 0 pi'imerenem prodlouzenl doby plnenl, pouze 
v techto pripadech: 
	- 	dojde-li behern vystavby ke zmene rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto 
budou mtt vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 
nebude-li moci Dodavatel plynule pokracovat v pracich z [akehokoltv duvodu na strane 
objednatele; za okolnosti na strane objednatele se povazui! i pflpadna opatrenl, 
stanoviska ci rozhodnuti organu statnl spravy nebo spravcu sltl, v dusledku kterych se 
navysi objem praci a dodavek oproti predpokladu stanovenemu v projektove 
dokumentaci a vykazu vymer (viz clanek I. odst. 1.1. smlouvy), to vse za pi'edpokladu, 
ze takova rozhodnuti, opatrenl ci stanoviska nebudou vyvolana cinnostl ci necinnostl 
Dodavatele. 
- zasahu tzv. vyssi moci. 
2.6. Dohoda 0 vyse uvedenych zmenach musi bYt vzdy provedena plsemne formou dodatku 
ke srnlouve, a to na zaklade obsahu formulare, kterY je oznacen jako pfiloha c. 2 a tvoi'i 
nedilnou soueast tete smlouvy 0 dilo. Oznamenl 0 nutnosti prodlouzenl terminu 
dokoncenl dila musi byt provedeno neprodlene, do tri pracavnich dnu ad zjisteni potfeby 
Stranka 4 z 21 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21492,0);(0,0);(0,21486);(21492,21486)posrelh0posrelv0pib
prodlouzenl terminu, a to plsemne nebo elektronicky. Pokud Dodavatel nesplni povinnost 
plsemneho oznamenl die pFedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni 
pokutu, ktera tini castku 5 % z celkove ceny dila, minimalne vsak 300 000,- Kt. 
Clanek III. 
Cena za dilo 
3.1. Cena za dilo die cl~mku I. smlouvy je sjednana dohodou na zaklade nabldkove ceny 
Dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem c. 526/1990 Sb., 0 cenach, 
ve znenl pozdejsich pFedpisu, v celkove vysi 48776396,69 Kc bez DPH, a to jako cena 
nejvyse pFipustna. 
K teto cene za dilo bude Oodavatelem uctovana v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., 
o dani z pFidane hodnoty, v platnem znenl, DPH ve vysi 7 316459 Kc. 
Celkova cena za dilo vcetne DPH cini 56 092 856 Kc. 
Nedilnou soucast! smlouvy je oceneny vykaz vymer uvedeny v pfiloze c. 3. Celkove ceny 
polozek (a jejich kalkulaci s ocenenym mnozstvlm ci rozsahem dane polozky stanovene 
jednotkove ceny danych polozek) uvedene v ocenenem vykazu vymer jsou pevne a 
platne po celou dobu realizace dila. Jednotlive polozky oceneneho vykazu vymer v sobe 
zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovne nepojmenovane, jejichz provedeni ci dodanl je 
pro Fadnou realizaci a dokoncenl dane polozky oceneneho vykazu vymer pri odborne peci 
Dodavatele nutno predvidat a v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji soucast. 
3.2. Oodavatel je opravnen zmenit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem c. 235/2004 
Sb., 0 dani z pfidane hodnoty, jestlize po uzavrent teto smlouvy 0 dllo nabude ucinnosti 
zakon, kterYm bude vyse DPH v uvedenem zakone zmenena. 
3.3. Cena za dllo je konecna, ani [edna strana neni opravnena pozadovat zmenu ceny dila 
proto, ze si dilo vyzadalo jine usili nebo jine naklady, nez bylo predpokhadano. Oodavatel 
je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedene prace. V pFipade, ze se jedna 0 
dodatecne stavebni prace, puvodnlrn vykazem vymer nepfedpokladane, postupuje se 
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, kterY stanovi podminky, za kterych se 
dodatecne prace nepovazuil za zmenu zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 
dodatecnych stavebnich praci byl vyssi, nez limity uvedene v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provest nove zadavacl rizeni a po dobu jeho 
prubehu nepFipustit zrnenu rozsahu zavazku z teto smlouvy. 
3.4. Cena dna bude snlzena 0 prace, ktere oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany 
(rnene-prace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto srneru vyhrazuje pravo 
omezit rozsah provadeneho dna die vlastni uvahy. 0 takovem omezeni musi byt 
Dodavatel predem (tj. pred provedenim a dokoncenlm dane casti dila) plsernne 
lnformovan. 
3.5. Dflo Ize provest odlisne oproti provadecl projektove dokumentaci pouze s pfedchozlm 
plsemnym souhlasem objednatele. PFed provedenim zmeny dila oproti provadecl 
prolektove dokumentaci musi byt 0 rozsahu teto zmeny (vecnem i financnlm) plsemne 
Stranka 5 z 21 

inforrnovan zastupce objednatele ve vecech smluvnich. K tete informaci bude prilozeno 
stanovisko TDS a zastupce objednatele ve vecech techntckych. Zrnena dila oproti 
provadecl projektove dokumentaci i v pfipade, ze nebude zvysovat cenu dila, musi byt 
schvalena rovnez poskytovatelem dotace, a postupem pod Ie ZZVZ. 
3.6. Smluvni strany se dohodly, ze pri urcenl zmemy ceny v souladu s touto smlouvou se bude 
vychazet z ceny stanovene ve vykazu vymer, jsou-ll dana einnost, prace ci material ve 
vykazu vymer zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymer zahrnuty, bude se vychazet z cenove 
soustavy URS. Nelze-Ii zmenu ceny ureit ani timto zpusobern, zrnen! se cena dila 0 
eastku odpovidajici cene praci a materialu v miste a case obvykle. 
Clanek IV. 
Platebni podminky 
4.1. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli dila zalohy. 
4.2. Realizovane prace a dodavky budou Dodavatelem uetovany objednateli na zaklade 
skutecne radne provedenych praci a dodavek plsemne odsouhlasenych opravnenym 
zastupcern objednatele, a to fakturami, ktere budou splriovat nalezltosf darioveho 
dokladu die platnych obecne zavaznych pravnlch predpisu, tj. die zakona e. 235/2004 
Sb., 0 dani z pridane hodnoty, v platnern znen! a bude v nich uveden nazev 
"Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady", cislo stavby a cislo smlouvy 
objednatele. Nedilnou eoucasf kazde faktury musi byt soupis provedenych pracl 
a dodavek za kalendarnl mesic, kterY plsemne odsouhlasi zrnocneny zastupce 
objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace die ustanoveni elanku I. 
odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. 
4.3. Dodavatel je opravnen vystavit fakturu 1x mesicne za kalendafnl mesic po uplynuti 
tohoto kalendarnlho meslce, pricemz datem zdanltelneho plnen! je posledni den tohoto 
kalendarniho meslce: nedilnou soucastl faktury musl byt soupis provedenych pracl 
a dodavek v tomto kalendai'ni meslci, plsemne odsouhlaseny opravnenym zastupcem 
objednatele ve vecech technickych vykonavajlclm technicky dozor, a fotodokumentace 
die ustanoveni clanku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. Takto je Dodavatel opravnen 
vyuetovat cenu dlla az do vyse 90 % celkove ceny dila die teto smlouvy bez DPH. 
Zbylych 10 % celkove ceny dila je Dodavatel opravnen vyuetovat objednateli po i'adnem 
a uplnern dokoncenl dila bez vad a nedodelku a jeho pi'evzeti objednatelem, a to na 
zaklade vzajemne plsernne odsouhlaseneho predavaciho protokolu, pflpadne 
doplneneho 0 vzaiemne odscuhtaseny protokol a ptedanl odstranenych vad 
a nedodelku. V pFipade, ze k pfislusne faktui'e nenl prilozena odpovidajici 
fotodokumentace (pripadne z takove dokumentace provedeni uctovanych pracl nebo 
dodavek nevyplyva) a objednatel rna pochybnosti 0 kvalite ei rozsahu takto uctovanych 
praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, nez se 
strany dohodnou na tom, zda a v jakern rozsahu a kvalite byly takto sporne prace nebo 
dodavky provedeny. 
	4.4. 	Faktura je splatna ve Ihute 30 kalendamlch dnu (v pi'ipade, ze v prubehu plneni dila to 
nebude vzhledem k flnancovanl z prostredku EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak) 
Stranka 6 z 21 

od jejiho dorucenl objednateli za pfedpokladu, ze bude vystavena v souladu s 
platebnimi podminkami a bude splnovat vseehny uvedene nalezitosti, tykajici se 
vystavene faktury. Odchylne od predchozi vety smluvni strany sjednaly, ze faktura na 
zaplaceni zbylych 10% celkove ceny dna die clanku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatna do 
15 kalendafnlch dnu. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi 
podminkami nebo nebude splnovat pozadovane nalezitosti, je objednatel opravnen 
fakturu Dodavatel i dna vratit; vracenlm pozbyva faktura splatnosti. 
	4.5. 	Pro ucel dodrzenl terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospech uetu Dodavatele. 
V pripade, ze by se ueet oznaceny v zahlavl smlouvy ukazal v prubehu realizace dna 
jako neregistrovany (ve smyslu zakona 0 dani z pridane hodnoty), bude Dodavatel do 10 
dnu povinen oznactt jiny registrovany ueet, na ktera bude objednatel uetovanou cenu 
dna povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni 
reqlstrovany ve smyslu vyse popsanern. 
4.6. Objednatel je opravnen pozastavit uhradu kterekoliv platby v prubehu zhotovovanl dila, 
jestlize je Dodavatel v prodleni s dokoncenlm dila nebo jeho casti oproti terrnlnarn, 
uvedenym v clanku " odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnenl tvorlclrnu Prilohu c. 1 
tete smlouvy, poprlpade pokud je Dodavatel v prodleni s edstranenlm zjistemych vad 
a nedodelku dila nebo jestlize je Dodavatel v prodleni s plnenlrn peneziteho zavazku 
vuei nekterernu z objednatelu podle teto smlouvy 
4.7. Veskere platby budou provadeny v eeskych korunach. 
4.8. Dodavatel souhlasi die ust. § 2 pismo e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 finaneni kontrole, 
s vykonem kontroly na pfedmet zakazky. Dodavatel souhlasi se vstupem kontrolnich 
organu strukturalnlch fondu Evropske unie do svych objektu, ve kterych se predrnet 
smlouvy realizuje. Dale se zavazuje pfedlozit ke kontrole vyse uvedenym kontrolnim 
organum veskerou provoznf a ucetnf evidenci, ktera se tyka predmetu smlouvy. Tato 
evidence musi by! arcbivovana v souladu s pozadavky zakona 0 ucetnictvi a zakona 
o danfch z pffjmu. Dodavatel se zavazuje poskytovat prislusnym organum ve 
stanovenych terminech uplne, pravdive informace a dokumentaci souvisejici se 
smlouvou a projektem (zakazkou, predmetern smlouvy), dokladovat svoji einnost 
a urnoznlt vstup kontrolou poverenym osobam - zamestnancum objednavatele, SFZP, 
Ministerstva zivotnlho prostredi, Ministerstva financi CR, Evropske komise, Evropskeho 
ueetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, finanenlho uradu, a dalslch opravnenych 
organu statnf spravy do svych objektu a na pozemky k overovanf plnenl podminek 
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakazky, predrnetu smlouvy) za ueelem 
kontroly plnenl smlouvy a tuto kontrolu, die pozadavku poverenych osob v jimi 
pczadovanem rozsahu, neprodlene umoznit. V pflpade, ze cast dna bude Dodavatel plnit 
prostrednictvim jinych subiektu je povinen zajistit, aby tyto subjekty podlehali 
povinnostem uvedenym v tomto bode smlouvy. Tuto povinnost ma Dodavatel i v pripade 
dcdavatelskych subjektu. Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci 
souvisejicf se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode dne predani a prevzetl 
dila, avsak rninirnalne do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvne zajistit, aby 
soueinnost pri plnenl jeho zavazku die tohoto bodu smlouvy v plnem rozsahu poskytli 
i jeho subdodavatels. Pokud tak neucinl, bude odpovidat objednateli za jejich 

Stranka 7 z 21 

nesoucinnost sam. 
4.9. Smluvni strany se dale dohodly, ze v prlpade, ze se Dodavatel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zakona a dani z pridane hodnoty nespolehllvym platcem dane a po dobu, kdy za 
nej ve smyslu uvedeneho zakonneho ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy 
bude rozhodnuto, ze neni nespclehllvym platcem dane), bude objednatel opravnen 
hradit uctovane easti ceny dUa co do eastky, odpovidajici dani z pfidane hodnoty, pi'imo 
na (leet spravce dane. Poukazanlrn pi'islusne castky na ueet spravce dane se v dane 
casti bude povazovat uctovana castka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 
nespolehlivost Objednatele upozornit po pravnl moci rozhodnuti. Nesplnenl teto 
povinnosti je hrubym porusenlrn povinnosti Dodavatele. 
4.10. Dodavatel pfedlozl objednateli planovany financni a casovy harmonoqram stavby (FHS), 
kterj urcf objem cerpan! financnfch prostredku na jednotlive meslce, rozlozeny po 
meslclch. Tento financni a casovy harmonogram tvoi'i nedilnou soucast smlouvy a dUo 
jako PrUoha c. 1 teto smlouvy. Objem financnlch prosttedku ve FHS neprekrocl celkovou 
smluvni cenu dlla. 
Pokud by prekrocenl provedenych casU dfla a souvisejiciho objemu rocnlho cerpanl 
financnlch prostredku znamenalo drivejsi termin ukoncenl realizace dila, mohou se 
smluvni strany plsemne dohodnout na odpovidajiei zmene FHS. 
4.11. Stfedoeesky kraj je reqistrovanym platcem dane z pridane hodnoty, avsak na pi'ijata 
plneni vyplyvajici z tete smlouvy a dUo nemuze uplatnit rezim pfenesene danove 
povinnosti die § 92e zakona c. 235/2004 Sb. ve znenl pozdejslch pi'edpisu, nebot' tato 
plnenl nejsou vyuzlvana pro ekonomickou clnnost Stredoeeskeho kraje, resp. nejsou 
vyuzlvana pro uskutecnenl zdanitelnych plnenl. Z tohoto vyplyva, ze z predmetnvch 
plnenl bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., ze Sti'edoeeskemu kraji budou 
predrnetna plnenl fakturovana vcetne DPH. 
Climek V. 
Vlastnicke pravo k dilu 
5.1. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby ad pocatku jejiho zhotovovanl s tim, ze 
Dodavatel je vlastnikem vecl, ktere si opati'il k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy 
se zpracovanlm stanou soucastl vlastni stavby. 
5.2. Dodavatel neni bez pi'edehoziho plsernneho souhlasu objednatele opravnen postoupit 
prava a povinnosti z teto smlouvy na treti osobu. 
Clanek VI. 
Stavenisti 
6.1. Prostor staveniste je vymezen zadanlrn stavby. Pokud bude Dodavatel potrebovat pro 
realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady, 
Stranka 8 z 21 

6.2. Objednatel preda Dodavateli staveniste do 3 dnu po odeslanl vyzvy die clanku II. odst. 
2.2.smlouvy, a to na zaklade zevrubns prohlidky prostoru staveniste a oboustranne 
podepsanaho plsemneho protokolu opravnenyrni zastupcl obou smluvnlch stran. 
6.3. Nejpozdeji pri predan! staveniste budou objednatelem pfedana Dodavateli pravomocna 
rozhodnutf organu statnl spravy. Bez vyse uvedenych dokladu nenl Dodavatel povinen 
stavenlste ptevzlt. Nejpozdeji pri ptedanl staveniste preda objednatel Dodavateli tez 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. 
6.4. Dodavatel zabezpecl na vlastni naklad staveniste a zajistl vjezd na stavenlste, jeho 
provoz, udrZbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. c. 
268/2009 Sb., 0 obecnych technlckych pozadavclch na vystavbu, ve znenl pozdejsich 
predpisu. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna sarnostatne s jejich spravci, 
pfipadne s organy statnl spravy. Totez ucinf i v pripade skladek materialu, povolenf 
vybudovanl objektu ZS apod. 
6.5. Dodavatel je odpovedny za vsechny skody zpesobene na stavenlsti do doby predanl 
a pi'evzetl dfla a vyklizeni stavenlste, a to pod Ie obecnych ustanoveni 0 nahrade skody. 
6.6. Dodavatel je povinen pred zapocetlm vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni vsech stavajicich sft! a zaflzenl a splnit veskere podminky stanovene ve 
vyjadi'enl jednotlivych spravcu techto zarlzenl. Za veskere Dodavatelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradne a v plnern rozsahu 
odpovednost Dodavatel. Dodavatel je pred zahaienlm provaden! dila rovnez povinen 
ohledat s odbornou peel odpovidajici jeho pfedmetu podnikanl a zavazkum die tete 
smlouvy misto provadenl dfla z hlediska zjistenf rnoznych prekazek v naslednem 
provacenl dlla, neuvedenych v projektove dokumentaci ci dalslch podkladech pro 
realizaci dila. 
6.7. Dodavatel v pine mire zodpovlda za bezpeenost a ochranu zdravi vsech pracovnlku 
v prostoru staveniste a zabezpeel jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckaml. 
Dale se zavazuje dodrZovat hygienicke pi'edpisy a podminky zivotniho prostredl. 
Dodavatel je dale povinen dodrZovat veskere platne technicke a pravn! predpisy, tykajici 
se zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravl pri pracl a bezpecnostl technickych zaflzenl, 
pozarn! ochrany apod. 
6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniste do 14 kalendatnlch dnu od 
protokolamlho predanl a pi'evzetl dna, pfipadne jednotlive casti staveniste. Pri 
nedodrZeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu, viz clanek XIII. 
odst. 13.2. teto smlouvy a dale je povinen uhradit objednateli veskere naklady a skody, 
ktere mu tim vznikly. 
6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rarnci zai'izeni staveniste podminky pro vykon funkce 
autorskeho dozoru projektanta a technickeho dozoru stavebnlka, pi'lpadne cinnost 
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, a to v pi'imei'enem 
rozsahu. 
Stranka 9 z 21 

Clanek VII. 
Opravneni zastupcl smluvnich stran 
	7.1. 	Opravnenymi zastupei objednatele pri provadenl a pfevzetl dlla a ve vecech technickych 
(dale jen .opravnen! zastupci objednatele") jsou: 
Bc. Jaroslav Postl, til: 257 280833 12I: postl@kr-s.cz_KrajskY urad Stredoeeskeho 
kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 
Ing. Adolf Beranek, 603825420, beranek@dcstrancice.cz, Detske Centrum stranclce, 
Hrdlnu 175 
Opravnen! zastupci objednatele jsou opravneni jed nat za objednatele ve vecech 
technlckych a ve vecech, ktere tate smlouva vyslovne stanovi. Neni - Ii touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou opravnenl zastupci objednatele opravnenl cinit jmenem Zcldneho 
z objednatelu pravn! ukony. 
Ve vecech smluvnich zastupuje objednatele MUDr. Pavel Biskup, reditel pflspevkove 
organizace, til: +420 323640031, 12I: dcstrancice@dcstrancice.cz. 
	7.2. 	Opravnenymi zastupci Dodavatele jsou: 
Stavbyvedouci: Ing. Jaroslav Dolejsl; 272653 106; info@trepart.cz 
Zastupce stavbyvedouciho: Ing. JiFi Pernica, 272 653 106; info@trepart.cz 
Osoba poskytujici sluzby v oboru tvorby a kontroly rozpoetu: Ing. David Havranek, 
272 653 106; info@trepart.cz 
Osoba zodpovedneho technika v oboru technika prostFedi staveb: Ing. Josef Bartak, 
272 653 106; info@trepart.cz 
Osoba koordmatora BOZP a PO: Zbynek Bosek, 272 653 106; info@trepart.cz 
Clanek VIII. 
Realizace dila, nebezpec] skody na dile, 
prava a povinnosti smluvnich stran 
8.1. Dodavatel je povinen provest dilo na svu] naklad a na sve nebezpecl. 
8.2. Pri provadenl dlla postupuje Dodavatel sarnostatne a dflo provadl v souladu projektovou 
dokumentaci a dalslml podklady, uvedenymi v clanku I., obecne zavaznyrni pravnlrni 
pFedpisya eeskymi technickymi normami. V pfipade, ze vyrobce (nebo dovozce) uziteho 
materialu nebo zaflzenl stanovi postup pro montaz, instalaci ei aplikaci takoveho 
materialu ci zailzenl, je Dodavatel, nedohodnou - Ii se strany jinak, povinen provest 
rnontaz, instalaci ci aplikaci takoveho materialu ci zaflzenl v souladu s takovyrni pokyny 
vyrobce (nebo dovozce). V pripade, ze Dodavatel dilo provadl v rozporu s pfedchozlrni 
vetarni, rna se za to, ze dllo obsahuje vady a nedostatky. 
8.3. Dodavatel pronlasu]e, ze rna k dispozici jedno vyhotoveni projektove dokumentace pro 
provadenl stavby ve. vykazu vymer od objednatele uvedene v clanku I. odst. 1.1. 
smlouvy. 
8.4. Pri provaden! dila prostrednictvim zamestnancu Dodavatele nebo pri provadenl casti dila 
Stranka 10 z 21 

jinou osobou rna Dodavatel odpovednost, jako by dno provadel sam. 
8.5. Pri zhotovovanl vlastn! stavby je Dodavatel povinen vest stavebni denik v souladu 
se zakonern c. 183/2006 Sb., 0 uzemnlrn planovanl a stavebnim radu (stavebnf zakon), 
ve znenl pozdejsfch pFedpisu (dale jen .stavebnl zakon"). 
8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvysit cenu za dllo uvedenou v clanku 
III. odst. 3.1. teto smlouvy. 
8.7. Opravneny zastupce objednatele a TDS je opravnen kontrolovat provadenl dila a ma 
pflstup na staveniste kdykoli v prubehu provadenl dlla. Dodavatel je povinen objednateli 
die jeho pozadavku tuto kontrolu v plnem rozsahu umoinit a poskytnout mu za timto 
ucelem potrebnou soueinnost. 0 vysledku kontroly bude sepsan protokol, v nemi budou 
uvedeny zjistene nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranent. Tento odstavec 
plati obdobne i ve vztahu k osobe vykonavajicl funkci autorskeho dozoru projektanta a 
k osobe vykonavsjlcl koordlnatora BOZP. Identifikacni udaje osob vykonavejlc! funkci 
autorskeho dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdell objednatel Dodavateli bez 
zbytecneho odkladu po jejlm urcenl, 
8.8. V souladu se stavebnim zakonern bude objednatel provadet pf zhotovovanl vlastni 
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostrednictvlm osoby (dale jen .osoba 
vykonavajlel technicky dozer"), jejii jrneno a prijmenl bude objednatelem sdeleno pri 
predanl staveniste a bude uvedeno v plsemnem protokolu 0 predanl staveniste 
a soucasne zapsano ve stavebnlm denlku 
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobe vykonavajlcl technicky dozor pflstup ke 
stavebnimu denlku v prubshu zhotovovanl vlastn! stavby. Na pozadanl je Dodavatel 
povinen predloiit objednateli a osobe vykomlvajiei technicky dozor veskere plsemne 
doklady 0 provadenl dlla. Tento odstavee platl obdobne i ve vztahu k osobe vykonavailcl 
funkei autorskeho dozoru projektanta a k osobe vykonavajici koordinatora BOZP. 
8.10. Dodavatel je povinen pri provadenl vlastni stavby organizovat na stavenistl nejrnene 1 x 
tydne (jinak vidy die poffeby) kontrolnl dny prubehu zhotovovanl vlastnl stavby za ucasti 
opravneneno zastupce objednatele a osoby vykonavajlcl technlcky dozor objednatele. 
Z kontrolniho dne bude poflzen plsemny zaznarn, podepsany zucastnenymi zasfupci 
smluvnieh stran. Zjistene nedostatky a vady pri provadenl vlastni stavby je Dodavatel 
povinen odstranit v termlnu uvedenern v plsemnern zaznarnu z kontrolniho dne. Datum 
konant prvniho kontrolnlho dne bude dohodnuto pri predani staveniste a uvedeno 
v pfedavaclrn protokolu 0 predanl staveniste a soueasne bude zaznamenano ve 
stavebnlm deniku. Datum dalslho nasleduilclho kontrolnlho dne bude vidy urceno 
v plsernnern zapise z probehnuvslho kontrolnlho dne. 
8.11. Jestliie majl byt nektere casti dlla zakryty nebo majl byt provedeny zkousky nekterjeh 
casU dUa podle obecne zavaznych pravnlch predpisu nebo pod Ie ceskych technickych 
norem, je povinen Dodavatel nejrnene 5 pracovnlch dnu pted jejich uskuteenenlm 
oznamit plsernne tuto skuteenost opravnenemu zastupci objednatele a soueasne ucinit 
o teto skutecnosti plsernne zaznam ve stavebnim deniku. 
Nesplnf-Ii Dodavatel tuto povinnost, je Dodavatel povinen na zaklade plsernne zaoosn 

Stranka 11 z 21 

objednatele na naklady Dodavatele zakryte casti dfla za ueasti opravneneho zastupce 
objednatele odkrYt a na zaklade plsernne zadost: objednatele na naklady Dodavatele 
provest znovu za ucastl opravneneho zastupce objednatele zkousky prislusnych casU 
dila podle obecne zavaznych pravnlch predpisu nebo podle ceskych technickych norem. 
Nedostavi-li se opravneny zastupce objednatele k zakryti casti dila nebo k provedeni 
zkousek nekterych casU dila podle obecne zavaznych pravnlch predplsu nebo podle 
ceskych techruckych norem, ackollv mu bylo jejich uskutecnen! pisemne oznameno 
Dodavatelem nejmene 5 pracovnich dnLl pred jejich uskutecnentm a Dodavatel 
soucasne ucinil 0 teto skuteenosti plsemne zaznarn ve stavebnim deniku, nema 
objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly na naklady Dodavatele zakryte easti dila 
odkryty a na naklady Dodavatele znovu provedeny zkousky prislusnych casti dila podle 
obecne platnych pravnlch pfsdpisu nebo podle ceskych technlckych norem. 
8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajlcl technlcky dozor, ze Dodavatel provadl dilo 
v rozporu se svyrnl povinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho, aby 
Dodavatel odstranil vady vznikle vadnym provadenlm a dilo provadel radnym zpusobern. 
Jestlize Dodavatel dfla tak neueinl ani v primerene Ihute k tomu poskytnute, je objednatel 
opravnen odstoupit od smlouvy. 
8.13. Za spravnost a uplnost predane dokumentace odpovlda objednatel. Dodavatel je 
povinen plsernne upozornit objednatele bez zbytecneho odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neuplnost a chyby projektove dokumentace ve. vykazu vymer uvedenych 
v bode 1.1. a dalslch plsemnych podkladu a pokynu, ktere dal objednatel dodavateli a 
dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby zjistit pri vynalozenl 
odborne pece. 
Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedene dokumentace pro zadanl 
stavby vc. vykazu vymer a dalsich plsemnych podkladu predanych objednatelem a 
pokynu objednatele prekazeji v radnem provadenl dlla, je dodavatel povinen provadenl 
dlla v nezbytnem rozsahu okamzite pterusit. 0 teto skutecnosti je povinen ihned 
plsernne ve Ihute 3 pracovnich dnu informovat jak TDS, tak samotneho objednatele 
(vecne pFislusny odbor). V tomto zapisu (formulai'i) budou podrobne popsany problemy, 
brantcl v pokracovanl praci. Do doby plsemneho pokynu, jak bude pokracovano v 
odstranenl nevhodnosti, nedostatku, neuplnostl a chyb v uvedene zadavacl dokumentaci 
a v dalsich plsemnycr, podkladech predanych objednatelem nebo do doby zmeny 
pokynu objednatele nebo plsernneho sdelenl objednatele, ze objednatel trva na 
provadenl dila podle uvedene zadavacl dokumentace, v pracich pokracovat nebude. 0 
dobu, po kterou bylo nutno provadeni dila prerusit, se prodluzuje Ihuty stanovena pro 
jeho dokoncenl. Dodavatel rna rovnez narok na uhradu nakladu spojenych s pferusenlm 
provadent dlla, 
V pi'ipade, ze takove vady projektove dokumentace ei dalslch podkladu pro provadenl 
dila mohl pri vynalozenl odborne peee dodavatel zjistit pi'ed uzavi'enim tete smlouvy 0 
dllo, nese naklady na prerusenl provadenl dlla, zmenu projektove dokumentace a 
prlpadne vlcenaklady na realizaci dna v dusledku takove zrneny dodavatel, pi'icemz 0 
dobu pi'eruseni provadenl dlla se v takovern prlpade termin dokoncenl dila neposune. 
8.14. Jestlize dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v elanku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak 
nema narok na uhradu nakladu spojenych s prerusenlm dlla. 
Stranka 12 z 21 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21479,0);(0,0);(0,21492);(21479,21492)posrelh0posrelv0pib
8.15. Zjisti-li Dodavatel pri provaden! dila skryte prekazky, tykajici se mista, kde rna bYt dilo 
provedeno, a tyto prekazky znemozriuji provedeni dila dohodnutym zpusobern, je 
Dodavatel povinen provadenl dlla v nezbytnem rozsahu okamzite prerusit. 0 teto 
skutecnosti je povinen ihned plsemne ve Ihute 3 pracovnich dnu informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovednou ve vecech technickych die clanku VII. smlouvy. V tomto 
zaplsu (formulati) budou podrobne popsany problemy branlcl v pokracovanl praci. Do 
doby plsemneho pokynu, jak bude pokracovano v pracich, budou tyto zastaveny. 
Oznarnenl 0 zastaveni praci musi bYt provedeno plsemns na formulari, a to za 
podminek uvedenych v clanku II. odst. 2.6. tete smlouvy. Nesplnenl teto povinnosti rna 
za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu die clanku II. odst. 2.5. smlouvy. 
8.16 .. Jestlize Dodavatel neporusil svou povinnost die clanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pred 
zapocetlrn provadenl drla prekazky uvedene v clanku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nema 
zadna ze stran narok na nahradu skody; Dodavatel rna narok na cenu za cast dlla, jez 
bylo provedeno do doby, nei: prekazky mohl odhalit pri vynalozenl odborne pece. V 
opacnern pripade odpovlda Dodavatel objednateli za skodu, ktera mu v dusledku 
nemoznosti dokoncenl dila vznikne. 
8.17. Dodavatel nese nebezpeci skody na zhotovovanem dile. Nebezpeci skody na dile 
prechazi na objednatele okarnzikem predani dila Dodavatelem objednateli a jeho 
pfevzetl objednatelem na zaklade plsemneho predsvacfho protokolu. Jestlize vsak tento 
pisemny predavacl protokol obsahuje vady a nedodelky dUa, ktere je povinen odstranit 
Dodavatel, prechazl nebezpecl na dile na objednatele az okarnzlkem odstranen' techto 
vad a nedodelku Dodavatelem. 
8.18. Dodavatel prohlasule, ze poddodavatel, jehoz prostrednictvim prokazoval splnenl 
kvalifikacnfch predpokladu, se v nabidce zavazal k poskytnutl plneni v rozsahu, kterY je 
uveden v nabidce Dodavatele, podane v rarncl zadavaclho rizeni na vyber Dodavatele 
dila die teto smlouvy. Dodavatel zajisti, ze poddodavatel, jehoz prostrednictvfm 
prokazoval splnenl kvalifikacnfch predpokladu, bude pi'i plnenl tete smlouvy poskytovat 
plnenl v rozsahu die predchozl vety. 
8.19. Zmena poddodavatelu oproti obsahu nabidky podane Dodavatelem v zadavaclrn i'izeni 
na Dodavatele tohoto dna je mozna pouze na zaklade plsemneho souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pi'ipade, ze novy 
poddodavatel bude splnovat veskere kvalifikacnf pozadavky, ktere splrioval puvodnl 
poddodavatel a z informaci, kterYmi bude objednatel v dane situaci disponovat, nebude 
vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provest jemu sverenou cast dila vadne 
nebo jinym zpusobem narusit realizaci dila die teto smlouvy. 
8.20. Dodavatel se dale zavazuje, ze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl 
dostat svym povinnostem die § 219 ZZVZ. 
8.21. Objednatel je opravnen kdykoliv behem provadenl dila pferusit jeho provadenl nebo 
jeho provadenl ukoncit, V pi'ipade, ze k prerusenl provadenl dila nedojde z duvodu na 
strane Dodavatele, prodlouz! se 0 dobu preruseni provadeni dila a dalslch 7 dnf termin 
dokoncenl dlla. Pokud bude prerusem provadenl dila trvat dele nez 2 meslce, je 
Dodavatel opravnen od tete smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnez opravnen kdykoliv 
Stranka 13 z 21 

snizit rozsah provadeneho dila 0 konkretnl polozky a casti. 
8.22. Dodavatel zajisti, ze osoby uvedene Dodavatelem v seznamu vedoucich zamestnancu 
dodavatele nebo osob v obdobnern postaveni, jez budou odpovidat za realizaci 
pi'islusnych stavebnich praci, pfedlozenem v nabidce Dodavatele na Vei'ejnou zakazku 
die zadavaci dokumentace Vei'ejne zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve 
funkcich, v jakych byly v seznamu uvedeny. Vymena takove osoby je rnozna pouze 
s plsemnyrn souhlasem objednatele. 
Clanek IX. 
Pojisteni Dodavatel 
	9.1. 	Dodavatel prohlasuje, ze ke dni uzavienl tete Smlouvy rna uzavFenou pojistnou smlouvu, 
jejimz predrnetem je pojisteni odpoveonostl za skodu zpusobenou Dodavatelem treti 
osobe v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, vcetne moznych skod zpusobenych 
pracovniky Dodavatel, ve vysi nejrnene 49 000 000,- Kc, se spoluucastl nejvyse 5 %, a 
jejiz prosta kopie nebo prosts kopie pojlstneho certiflkatu je pfilohou c . 4 teto smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje, ze po celou dobu trvanl tete smlouvy a v pi'imerenem rozsahu i 
po dobu zaruenl doby bude pojistem ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke 
snlzenl pojistneho plnen! pod castku uvedenou v predchozl vete. 
	9.2. 	Uredne overene kopie pojistne smlouvy (pojistnych smluv) Dodavatele, resp. 
akceptovane navrhy na uzavrenl pojistne smlouvy ze strany pojlstovny die tohoto clanku 
musi byt doruceny objednateli nejpozde] pri prevzetl stavenlste, pokud je jiz objednatel 
neobdrZel od Dodavatele v rarnci zadavaclho i'izeni. Na zadost objednatele je Dodavatel 
povinen kdykoliv pozde] pi'edlozit uspokojlve doklady 0 tom, ze pojistna smlouva 
(poiistne smlouvy) uzavrene Dodavatelem jsou a zustava]! v platnosti. 
9.3. Dodavatel je povinen mit uzavi'eno platne stavebne montaznl pojistenl pokr9vajici plnou 
hodnotu dila se spoluucastl nejvyse 5 %, a to do predanl a pFevzeti dokonceneho dila. 
Dodavatel je povinen pri podpisu smlouvy predlozit pojistnou smlouvu. 
9.4. Dodavatel je povinen Fadne platit pojistne tak, aby pojistna smlouva ci smlouvy sjednane 
die tete smlouvy ci v souvislosti s ni byly platne po celou dobu provadenl dila a v 
pFimerenem rozsahu i po dobu zaruky. V pi'ipade, ze dojde k zaniku pOjisteni, je 
Dodavatel povinen 0 teto skutecnosti neprodlene informovat objednatele a ve Ihute 3 
pracovnich dnu uzavi'it pojistnou smlouvu ve vyse uvedenern rozsahu. Porusenl teto 
povinnosti ze strany Dodavatele povazu]l strany tete smlouvy za podstatne porusenl 
smlouvy zakladailcl pravo objednatele od smlouvy odstoupit. 
Clanek X. 
Splneni a predani dila 
10.1. Dodavatel splni svou povinnost dokonclt dllo tak, ze i'adne a uplne zhotovi dllo podle 
clanku I. smlouvy a v souladu s clankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodelku, Nedilnou soueastl radneho splnenl dila je pfedanl vsech plsemnych dokladu 
Stranka 14z21 

potiebnych k uzivani a provozovant dna, ktere se vztahuji k tem eastem dlla, ktere 
zhotovoval nebo dodaval Dodavatel ve smyslu teto smlouvy (a to i prostrednictvim svych 
poddodavatelu), a to jejich originalu. 
10.2. Objednatel je povinen Fadne a uplne dokoneene dilo bez vad a nedodelku prevzit. 
10.3. Dokoncene dilo die clanku I. smlouvy bude predano objednateli na zaklade ptsemneho 
protokolu 0 predani a prevzetl dna podepsaneho opravnenymi zastupcl smluvnich stran 
ve vecech smluvntch.tdale jen .protokol"). V pflpade, ze se objednatel rozhodne dllo 
prevzit s vadami a nedodelky nebranlclml radnemu uzivani dila, budou v protokolu 0 
predani dila uvedeny i takto zjistene vady a nedodelky nebranlcl i'adnemu uzivani dila a 
Ihuty pro jejich odstranenl, Objednatel je opravnen odmltnout pFevzeti dila v pfipade, ze 
rna vady nebo nedodelky. Vadou se pfitom rozuml odchylka v kvalite a parametrech dila 
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecne zavaznyml predpisy ci 
pokyny vyrobcu ci dovozcu materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v clanku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovnez prlpadne odmitnuti pfevzeti dila bude zaznamenano 
v protokolu. 
10.4. Objednatel neni povinen dilo na zaklade protokolu pFevzlt, jestlize dno neni radne a 
uplne dokoneeno, ma vady nebo nedodelky nebo spolu s dilem nejsou predany vsechny 
plsemne doklady popsane v clanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestlize se objednatel 
rozhodne dilo i presto pfevzit, jsou smluvnl strany povinny v protokolu uvest tuto 
skutecnost a uvest v nern soupis vad a nedodelku se zavaznym term!nem jejich 
odstranenl Dodavatelem, pi'ipadne soupis chybej!cich plsernnych dokladu s terminem 
jejich dodanl Dodavatelem objednateli. 
10.5. Pokud Dodavatel neodstrani zavady nebo nedodelky na dlle v terminu uvedenem 
v pfedavaclm protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyii 1 000,- 
Kc za kazdou vadu a kazdy den prodlen!. 
10.6. K pi'edan! dna na zaklade protokolu vyzve Dodavatel objednatele plsemne nejpozdeji 5 
pracovnich dnu prede dnem, kdy bude dllo prlpraveno k predani, tj. bude dokoneeno. 
Objednatel zaha]! prevzeti dna do 5 pracovnich dnu od term!nu navrzeneho 
Dodavatelem. Objednatel rna vsak pravo odmitnout zahaienl pi'ejimaciho !'izen!, je-Ii 
term in navrZeny Dodavatelem 0 vice nez 30 dnu drive, nez sjednany term!n predani 
dna. 
	10.7. 	K predanl dlla pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, pripadne take 
autorskeho dozoru projektanta. 
Climek XI. 
Zaruka za jakost dila a odpovednost za vady dila 
11.1. Delka zarucnl doby za jakost dila je sjednana na dobu 60 mesicu. Zarucnf doba poclna 
bezet dnem protokolarnlho predani a pfevzetl dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a 
nedodelky, pocina zaruenl doba bezet, az ode dne jejich uplneho odstranenl. Zarucnf 
lhuta pro dodavky stroju a zaflzenl, na nez vyrobce techto zaflzenl vystavuje 

Stranka 15 z 21 

earnostamy zarucnl list, se sjednava v deice Ihuty poskytnute vyrobcem, nejrnene vsak 
v deice 24 rneslcu. 
11.2. V prubehu zaruky za jakost dfla bude mit dUo vlastnosti vyplyvajlcl z teto smlouvy, tj. 
vyplyvajici z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dale bude mit obvykle vlastnosti 
pro vyuziti dfla ke stanovenemu ucelu. 
11.3. Pokud se v prubehu zarucnl lhuty vyskytly na dlle vady, rna, objednatel pravo na jejich 
bezplatne odstraneni. Objednatel je povinen tyto vady u Dodavatele neprodlene 
plsernne reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranenl beznych vad a 
nedodelku dila do 2 kalendarnlch dnu od dorucenl pisemne reklamace objednatele 
Dodavateli a odstranit je nejpozde]! do 5 dnu ode dne dorueenl plsemne reklamace 
objednatele Dodavateli. V pflpade, ze se [edna 0 vadu, ktera bran! uzivan] dfla (havarle), 
zavazuje se Dodavatel nastoupit k jejimu odstranenl nejpozde]i do 12 hodin ode dne 
jejiho ohlasen! do 24 hodin provest alespori takova opatrenl, aby dflo bylo rnozne, byt' 5 
docasnyrn primerenym omezenim, opetovne uztvat a vadu se zavazuje odstranit 
nelpozdeji do 20 dnu ode dne dorucenl plsernne reklamace objednatele Dodavateli. 
Dodavatel je povinen bez zbytecneho odkladu, nejpozdej vsak v terminech vyse 
popsanych, reklamovane vady odstranit, i kdyz neuznava, ze za vady odpovlda; ve 
spornych prlpadech nese naklady az do pravornocneho rozhodnuti 0 reklamaci 
Dodavatel. Zaroveri je Dodavatel nejpozde]! do 10 kalendamlch dnu po obdrZeni 
plsemne reklamace objednateli oznarnit, zda reklamaci uznava, jakou lhutu k odstranenl 
vad navrhuje nebo z jakych duvodu odmlta reklamaci uznat. Po dobu ode dne dorucenl 
reklamace dodavateli do odstranenl reklarnovanych vad zarucnt doba nebezi. 
11.4. Jestlize v pripade reklamace objednatele nenastoupi Dodavatel k cdstranenl 
reklarnovanych vad a nedodelku ve Ihute stanovene v clanku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popflpade je neodstrani v tam popsane Ihute nebo v tam popsane Ihute neprovede 
opatrenl potrebna k tomu, aby mohlo byt dflo dale uzlvano (v pripade havarie branlc! 
uzlvanl dila), je objednatel opravnen nechat odstranit reklarnovane vady a nedodelky 
dlla na naklady Dodavatele jinou osobou. 
11.5. Naroky z odpovednosti ze zaruky za jakost dila se nedotyka]! naroku na nahradu skody 
nebo na smluvni pokutu. 
Clanek XII. 
Vypoved', Odstoupeni od smlouvy 
12.1. Vypoved' musi byt pisemna. Strany se dohodly na vypovedni Ihute, ktera cini jeden den 
po dni dorucenl vypovedi Dodavateli. 
12.2. Objednatel muze odstoupit od tete smlouvy v pripade, ze Dodavatel porus! nekterou 
svou smluvni povinnost die teto smlouvy presto, ze na moznost odstoupeni pro 
porusovanl povinnosti die teto smlouvy bude objednatelem predem plsemne upozornen, 
popripade pokud bude Dodavatel v upadku ci jeho majetek bude postizen exekucf ci 
vykonem rozhodnutL To neplatl v prfpade clanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze 
pFedem plsemne upozornit. Dodavateli budou v takovem prfpade uhrazeny ucelne 
Stranka 16 z 21 

vynalozene naklady prokazatelne spojene s dosud provedenyrni pracemi mimo nakladu 
spoienych s odstoupenim od smlouvy. soucasne objednateli vznika narok na uhradu 
vlcenakladu vynalozenych na dokoneenl dlla uvedeneho v cl. II. tete smlouvy a na 
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokoneenl ve stelnem rozsahu. 
12.3. Podstatnym porusenim tete smlouvy ze strany Dodavatele se rozumi zejmena nesplnenl 
smluvnich termlnu pod Ie teto smlouvy, nebo provadenl dila v rozporu s clankem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a clankem IV. odst. 4.10. smlouvy. 
12.4.0dstoupeni od smlouvy strana opravnena oznaml strane povinne plsernne. Ucinky 
odstoupeni nastanou dorueenlm takoveho oznarnenl povinne strane. Nepodarl - Ii se 
oznamenl dorucit, rna se za to, ze doslo k jeho dorueenl tretlm dnem po odeslanl na 
adresu povinne strany uvedenou v zahlavl tete smlouvy. 
12.5. Objednatel je dale opravnen od tete Smlouvy odstoupit, pokud vuci majetku Dodavatele 
probiha insolvenenl rizen!. 
12.6. Stanovl-Ii opravnena strana pro dodatecne plneni Ihutu, vznika ji pravo odstoupit od 
smlouvy po marnem uplynuti teto Ihuty. Jestlife vsak strana, ktera je v prodleni, pisemne 
prohlasl, ze svuj zavazek nesplni, muze opravnena strana odstoupit od smlouvy pred 
uplynutfm Ihuty dodatecneho plnenl, kterou stanovila, tzn. ihned pote, co prohlaseni 
povinne strany obdrZl. 
12.7. Odstoupenlm od smlouvy zanikaj! vsechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupenl od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu skody vznikle porusenlrn 
smlouvy, resen! sporu mezi smluvnimi stranami, naroku na smluvni pokuty a jinych 
naroku, ktere podle teto smlouvy nebo vzhledem ke sve povaze majl trvat i po ukoncenl 
smlouvy. 
12.8. Objednatel je dale opravnen odstoupit od smlouvy v pripade, kdy neni schopen uhradit 
sjednanou cenu dlla z duvodu nepFideleni fmancntch prostredku nebo zmeny skladby 
rozpoetu a s tim souvisejlcl nemoznosti flnancovanl realizace dila. V takovem pF!pade se 
strany dohodly, ze objednateli ve splnen! povinnosti ze smlouvy doeasne nebo trvale 
zabranila mimofadna nepredvldatelna a neprekonatelna prekazka vznikla nezavlsle na 
jeho vuli. Dodavatel rna pak pouze narok na uhradu ceny do te doby dokoncenych cast! 
dUa a dale na nahradu nakladu ucelne do te doby vynalozenych na poflzen! 
rozpracovanych casU dila. 
12.9. Objednatel je dale opravnen odstoupit od teto smlouvy, jestlize zjisti, ze Dodavatel: 
a)	nabizel, daval, pFijimal nebo zprostiedkovaval urcite hodnoty s cilem ovlivnit chovanl 
nebo [ednanl kohokoliv, at jiz uredni osoby nebo kohokoliv jineho, prlmo nebo neprimo. 
v zadavaclm Fizenl nebo pri provadenl teto smlouvy; nebo 
b)	zkresloval jakekoliv skutecnosti za ucelem ovlivneni zadavaclho Fizenl nebo provadenl 
tete smlouvy ke skode objednatele, vcetne uzitr podvodnych praktik k potlacenl a snlzenl 
vyhod volne a otevrene souteze. 
12.10. Odstoupeni (zanlk prav a povinnosti) nastane az splnenlrn povinnosti vyplyvajiclch 
Stranka 17 z 21 

z vyrovnanl smluvnich stran. 
12.11. Smlouvu Ize ukoncit dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovedl bez uvedenl 
duvodu. Smluvni strany si dohodly vypovedni Ihutu dvou tydnu ode dne dorucenl 
vypovedi smluvni strane. 
Clanek XIII. 
Smluvni pokuty a urok z prodleni 
13.1. V prtpade, ze Dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a predanlm dlla nebo jeho casti 
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude urcena jake 
nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dfta bez DPH, oznacene 
v clanku III. odst. 3.1. smlouvy. V pripade, ze Dodavatel prokaze, ze prodleni vzniklo 
z viny na strane objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatnovat. 
Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v dusledku vyssi moci. 
13.2. Smluvni pokuta za vcasne nevyklizeni staveniste je 0,05 % z ceny dlla bez DPH za 
kazdy i zapocaty den prodleni Dodavatele, nejvyse vsak 50 000,- Ke za den. 
13.3. Smluvnl pokuty die teto smlouvy hradi Dodavatel nezavisie na tom, zda a v jake vysi 
vznikne objednateli skoda, kterou je opravnen objednatel vymahat samostatne a bez 
ohledu na jejl vysi. 
13.4. Smluvni strany se dohodly, ze v pripade prodlenf objednatele s uhradou ceny dlla nebo 
jejl casti je objednatel povinen uhradit Dodavateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzne 
castky za kazdy den prodleni. 
13.5. Je-li uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzenl financnlch prosttedku z dotace 
udelene z rozpoctu Stredoceskeho kraje, statnlho rozpoctu Ceske republiky, rozpoctu 
Statnlho fondu zlvotnlho prosttedl, neni objednatel povinen hradit urok z prodleni za 
nejvyse 180 dnu prodlen!, pokud prokaze, ze tyto financnl prostredky nema k dispozici. 
Objednatel je vsak povinen nejpozdej do 10 pracovnich dnu od obdrzenl techto 
prostredku poukazat dluznou castku na bankovni ucet Dodavatele. Neucini-li tak, 
podleha povinnosti zaplatit urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzne eastky za kazdy 
zapocaty den prodlenf od uplynuti 10-ti denn! lhuty po obdrzenl flnancnlch prostredku od 
poskytovatele dotace. 
13.6. Urok z prodleni neni objednatel povinen Dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi 
platbu Dodavateli podle bodu clanku IV., bodu 4.7. tete smlouvy. 
ClanekXIV. 
Bankovni zaruka 
14.1. Dodavatel poskytne pfi podpisu Konecneho protokolu 0 predan! a prevzetl dlla 
objednateli bankovni zaruku ve vysl 2 200 000,- Kc (slovy: 
dvamilionydvestetisickorunceskych) za fadne odstranenl vad uplatnenych objednatelem 
Stranka 18 z 21 

vuei Dodavateli z titulu odpovednostl za vady dUa v zarucnl dobe. Bankovn! zaruka mus! 
byt plama rnlnlmalne po celou dobu zarucni doby. 
14.2. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnen uplatnit v pripadech, ze Dodavatel 
nebude plnit sve povinnosti vyplyvaj!cf ze zaruky za due, ke kterym je ze smlouvy 
povinen. 
14.3. Pred uplatnenlrn plnenl z bankovni zaruky oznaml objednatel plsernne Dodavateli vysi 
pozadovaneno plnent ze strany banky. Dodavatel je povinen dorucit objednateli novou 
zaruenr listinu ve znenl shodnern s pfedchozl zarucnl listinou, v puvodnl vysi nejpozdeji 
do 7 kalendafnlch dnu od jejiho uplneho vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnena 
objednatelem do 10 dnu po uplynuti zaruenl doby a vyporadani vsech zavazku mezi 
Dodavatelem a objednatelem. 
14.4. Bankovni zaruka zajisfuje radne odstranenl vad uplatnenych objednatelem vuei 
Dodavateli z titulu odpovednosti za vady dila v zaruenl dobe, prieemz plati, ze: 
a)	v pripade [akekoli zmeny zarucni Ihuty je Dodavatel povinen platnost bankovni 
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruenl Ihuty; 
b)	pravo ze zaruky je objednatel opravnen uplatnit v pripadech, ze Dodavatel 
neodstranil vadu dila zpusobern a v dobe, k nimz je podle prislusnyeh 
ustanoveni smlouvy 0 dilo k odstranovanl vad v zarucnl Ihute povinen; 
c)	nepredlozanl bankovni zaruky v pozadovanem terminu je duvodern 
k neprevzeti dokonceneho dlla a uplatnenl sankei pro nedodrZeni terminu 
dokoncenl a predani dlla, 
14.5. Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskere dalsi vydaje vznikle v souvislosti 
s plnenlrn povinnost! die tohoto clanku nese Dodavatel. 
Clanek XV. 
Zaverecna ustanoveni 
15.1. V pripade zmeny udaju uvedenych v zahlavl smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je 
povinna ta smluvnf strana, u ktere zrnena nastala, informovat 0 nl druhou smluvni 
stranu, a to prukaznym zpusobem a bez zbytecneho odkladu. V pripade, ze z duvodu 
nedodrZeni nebo porusenl teto povinnosti dojde ke skode, je strana, ktera skodu 
zpusobila, tuto v plnem rozsahu nahradit. 
15.2. Veskera textova dokumentace, kterou pri plnen! smlouvy predava ei predklc~da 
Dodavatel objednateli, musi bYt predana ei predlozena v ceskem jazyce. 
15.3. Pisemnosti mezi stranami tete smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmena nebo 
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zeirnena odstoupeni od smlouvy ci 
vypoved') se dorueuj! do vlastnieh rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do 
vlastnich rukou druhe smluvni strane je splnena pri dorueovanl postou, jakmile posta 
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruei. Ueinky dorucenl nastanou i tehdy, 
jestlize posta pisemnost smluvni strane vratr jako nedorucitelnou a adresat svym 
jednanlm dorucenl zmaril nebo prijetf pisemnosti odmit!. 
Stranka 19 z 21 

15.4. Jakakotiv ustnl uiednanl pri provadenl dila, ktera nejsou plsemne potvrzena 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravne neucinna. 

15.5. Smlouvu 0 dllo Ize rnenit pouze plsemnymt dodatky uzavrenymi v souladu se zakonem 
a postupem popsanym v cl. III odst. 3.3. a podepsanyrni statutarnimi zastupci obou 
smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, menepracl a zmeny dila vcetne 
pflpadnych zmen stavby oproti projektove dokumentaci. Tyto musf byt eoueasne predern 
odsouhlaseny technickyrn zastupcern objednatele. 

15.6. Ostatni vztahy smluvnfch stran v teto srnlouve vyslovne neupravene se ridi obcanskym 
zakonlkern. 

15.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnfmi stranami, pokud se smluvni 
strany na datu ucinnosti teto smlouvy nedohodnou jinak. 

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nlchf objednatel obdrfi 3 stejnopisy 
a Dodavatel 2 stejnopisy. 

15.9. Smluvni strany prohlasull, ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dukaz jejich 
svobodne, prave a vazne vule pripojuji sve podpisy. 

15.10. Veskera ujednani, technicke podminky a jina ustanovenf uvedena v nabidce 
Dodavatele, podane v ramci zadavaclho i'izeni na vyber Dodavatele dila die teto 
smlouvy, jsou nedilnou soucastl teto smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz 
cl. I smlouvy). 

15.11. Nedilnou soucast tete smlouvy tvoi'i nasledujici ptllohy: 
Priloha c. 1: Harmonogram plneni Itato pfiloha bude vypracovana az pFed uzavi'enim 
smlouvy 0 dllo v navaznosti na znalost konkretntho terminu uzavtenl smlouvy. Pokud 
bude tato pflloha v podobe navrhu uchazeee pfilozena k nabidee, netvof soucast 
nabidky a nebude pfedmetern posuzovanl nabidkyl 
Priloha c. 2: Formular pro ohlasen! zmen stavby Ipi'ilozeno zadavateleml 
Pfiloha C. 3: Oceneny vykaz vymer Ipi'iloha bude predlozena v nabideellpriklada 
uchazee/ 
Priloha c. 4: POjistna smlouva/pojistny eertifikat - pojistenf cdpovednoeti za skodu 
IpFiklada vybrany uchazec pri podpisu smlouvy 
	PFlioha C. 5: Seznam poddodavatelu (subdodavatelu) 	~\f. q. 20 ; ') 
	V Praze, dne 07. 08. 2017 	Ve Strancicich dne 	-;-- 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21495);(21495,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21496,0);(13221,0);(13221,3510);(904,3510);(904,17356);(0,17356);(0,21491);(21496,21491)posrelh0posrelv0pib

Stranka 20 z 21 

Objednatel 
Detske centrum Strancic 

	,:1"11' I, ,,', 	II' 
Hrdlil' I 1 r" 2 5 j (, l ',tllllciCl' 
ILiI8(106{~j6.I(O."~i7~06/2 
lvl.323lii,0031 
1\Illlfh P~\lol Ric-ln"" ~or4jt-ol 

PrUoha c. 2 
FORMULAR PRO OHLAsENi ZMEN STAVBY 
"Rekonstrukce Detskeho centra Chocerady" 
Urceno: MUDr. Pavel Biskup 
reditel prispevkove organizaee 
(v kopii veene prislusny odbor) 
Cislo SoD: 
Termin plneni: 
Celkova eena dUa: 
Dodavatel: 
ICO: 
Opravnena osoba: 
Telefonni spojeni: 
Popis predmetu informaee: 
Popis problemu: 
Ceho se Dodavatel domaha: 
Nejzazsi termin pro uzavreni dohody 0 zmene v realizaei dUa: 
Datum, pod pis opravnene osoby 
Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele: 
Stranka 21 z 21 

;(