Číslo smlouvy příkazce: VZ/2025/04
 Číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na  výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Domov pro seniory Burešov, p.o. - rekonstrukce kuchyně, TDS a BOZP“    uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 	

1.	SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

Příkazce:		Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	
Sídlo:		Burešov 4884, 760 01 Zlín	
Zastoupen:		Ing. Helena Nováková, MBA, ředitelka 	
Osoby oprávněné jednat: 			
a) ve věcech smluvních		Ing. Helena Nováková, MBA	
b) ve věcech technických		........................................	
IČO:		70851042	
DIČ:		70851042	
Bankovní spojení:		....... 	
Číslo účtu:		..................	
Telefon:		..................................	
E-mail:		..........................................	
ID DS:		tyyuq94	

Příkazník:		Trenza,s.r.o.	
Sídlo:		tř. Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín	
Zapsán v živnostenském rejstříku:		KS v Brně, odd. C, vložka 89917	
Osoby oprávněné jednat:			
a) ve věcech smluvních		...................	
b) ve věcech technických		...................	
IČO:		044 40 889	
DIČ:		CZ 04440889	
Bankovní spojení:		........	
Číslo účtu:		..............	
Telefon: 		...........	
E-mail: 		..................	

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 11. 09. 2025 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon TDS při realizaci akce „Domova pro seniory Burešov, p.o. - rekonstrukce kuchyně“, která se mění v následujících odstavcích takto:

I.	Předmět dodatku

V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily změnu:

1)	Čl. 6. TERMÍN PLNĚNÍ, Bod 6.2. Předpoklad ukončení stavby: červen 2026 je nyní prodloužen do 30. září 2026, z důvodu posunutí termínu zahájení stavby (po uzavření VZ) a na toto navazující prodloužení termínu provádění stavebních prací i následnou stavební přípravu pro dodávky a montáže vybavení zařízení - gastro na akci „Domov pro seniory Burešov, p.o. - rekonstrukce kuchyně“.

2)	Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 6. (TERMÍN PLNĚNÍ) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy.

II.	Závěrečná ustanovení 

1)	Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 11. 09. 2025 ve znění následných dodatků pro kompletní výkon TDS při realizaci akce „Domova pro seniory Burešov, p.o. - rekonstrukce kuchyně“, zůstávají nedotčená tímto Dodatkem č. 1, tj. se nemění. 

2)	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.

3)	Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

4)	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

Ve Zlíně dne ……………. 2026	Ve Zlíně dne ………….. 2026
Za objednatele:   Domov pro seniory Burešov,  příspěvková organizace       --------------------------------------------------------                                  Ing. Helena Nováková, MBA  ředitelka  	Za zhotovitele: Trenza, s.r.o.        --------------------------------------------- Ing. Radek Stejskal jednatel