SMLOUVA O DÍLO
č. j.: VS-87294/ČJ-2026-8026PS 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění  

I.
Smluvní strany
Česká republika 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j.: VS-44856-37/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1.2.2026 
Vrchní rada plk. Mgr. Karel Berthold, ředitel Věznice Oráčov
adresa pro doručování:   Vězeňská služba České republiky, Věznice Oráčov, 
                                        Oráčov 159, 270 32 Oráčov, 
IČ: 00212423
DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje
dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.
bankovní spojení: ČNB Praha
č. ú.: 916-2901881/0710
ID DS: zgxd4z3

jako objednatel na straně jedné (dále je „Objednatel“)					

a 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
sídlem/místem podnikání: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 
Zapsán/a v rejstříku vedeného: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7394
Oprávněný jednat za společnost: Kamil Urbánek, MBA – člen představenstva 
IČO: 44015542
DIČ: CZ44015542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 7231410287/0100
ID DS: c7uznbw
Předmět podnikání: ostraha majetku a osob, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, projektová činnost ve výstavbě, montáž, oprava, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ 

jako dodavatel na straně druhé (dále jen „Dodavatel“) 
(dále jen „Smluvní strany“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1.	Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

a)	Výzva Objednatele k podání nabídky ze dne 14.10.2025, pod č. j.: VS-82204-11/ČJ-2025-802651-VERZAK.
b)	Nabídka Dodavatele ze dne 24.10.2025, pod č. j.: VS-82204-14/ČJ-2025-802651-VERZAK.  
c)	Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19.12.2025, pod č. j.: VS-82204-25/ČJ-2025-802651-VERZAK.  
d)	Pověření generálního ředitele č. j. VS-44856-37/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1.2.2026.   

	III.
	Předmět Smlouvy

1.	Objednatel je investorem budoucí akce z oblasti bezpečnostních technologií s názvem „Oráčov – perimetr“, spočívající v kompletní renovaci vnějšího obvodového perimetrického systému střežení věznice, v počtu 14. střežených úseků, kolem uzavřeného areálu Věznice Oráčov (dále jen „Dílo). Nedílnou součástí akce je zhotovení Díla včetně zpracování a předložení dokumentace skutečného provedení. Akce bude realizována dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, ve spojení s čl. IV. této Smlouvy.  

2.	Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit řádně a včas Dílo specifikované v článku IV. této Smlouvy a předat jej Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek, to vše v rámci realizace akce „Oráčov – perimetr“, a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Dodavateli cenu za Dílo, za podmínek dle této Smlouvy.

3.	Rozsah předmětu Díla a jeho kvalita je v souladu a rozsahu nabídky Dodavatele a je v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel je povinen při provádění Díla řídit se pokyny Objednatele a postupovat v souladu s touto Smlouvou, a v souladu se všemi aktuálně platnými a účinnými právními předpisy – zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a v souladu s dalšími platnými právními prováděcími předpisy a technickými normami. Dojde-li k jakýmkoli změnám právních předpisů v průběhu provádění Díla, bude Dílo provedeno vždy dle předpisů aktuálně platných a účinných. 

IV.
Specifikace Díla, podmínky provádění Díla

1.	Dílem se rozumí:
a)	kompletní renovace vnějšího obvodového perimetrického systému střežení věznice, v počtu 14. střežených úseků, kolem uzavřeného areálu věznice,
b)	vypracování dokumentace skutečného provedení nově instalovaného perimetrického systému střežení věznice, 
c)	součástí Díla je taktéž odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů, vzniklých při provádění akce dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dále je součástí Díla doprava materiálu na místo realizace akce.  

2.	Podmínky pro provedení Díla, specifikovaného v čl. IV. odst.1 písm. a) Smlouvy:

a)	Realizace Díla bude spočívat v instalaci a propojení všech 14. střežících úseků novým zabezpečovacím obvodovým perimetrickým střežením se zachováním umístění jednotlivých úseků, jednotlivých rozvaděčů, světelných a zvukových zařízení. Bude provedena instalace oddělené LAN sítě (nová síť LAN bude fyzicky oddělena a bude nezávislá na LAN IT) a připojení do stávající zabezpečovací ústředny Dominus Milennium a zobrazovacího SW Eliwin při zachování grafické podoby a struktury jednotlivých úseků a PC umožňující dálkovou správu instalovaného zabezpečovacího systému. 

b)	Nově instalované plotové detekční systémy budou s vibračními detektory, s vyhodnocováním v inerciální soustavě os XYZ (3D), s nativním IP (internetový protokol), s PoE (napájení po datovém síťovém kabelu), s přímým připojením do TCP/IP (komunikační protokol pro počítačové sítě, zajišťující obousměrnou komunikaci) a inteligentní analýzou. 

c)	Po přezkoušení nového systému bude provedeno postupné odpojování stávajícího perimetrického zabezpečení a zároveň bude provedena demontáž jednotlivých stávajících odpojených prvků. Stávající perimetrický kabel bude zachován.  Po předání díla bude probíhat zkušební provoz v délce 1 měsíc.  

3.	Podmínky pro provedení Díla, specifikovaného v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy:
Dokumentace skutečného provedení nově instalovaného perimetrického systému střežení věznice bude vyhotovena 1x v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.EXCEL, *.DOC a *.PDF.   

4.	Společné podmínky pro provádění Díla dle č. IV. odst. 1:
a)	Dodavatel je povinen počínat si tak, aby při provádění Díla nevznikaly žádné škody. 
b)	Vyklizení místa realizace Díla. Místo realizace Díla, kde dodavatel Dílo v podobě provedení akce prováděl, se zavazuje uvést do původního stavu (příp. stavu dle požadavků stanovených Objednatelem), a to do 10 dnů od předání a převzetí Díla (vyklizení místa realizace Díla). Převzetí místa realizace Díla Objednatel potvrdí v protokolu o převzetí místa realizace Díla. V případě prodlení Dodavatele s vyklizením místa realizace Díla je Objednatel oprávněn vyklidit místo realizace Díla na náklady Dodavatele.  
c)	Dodavatel zajistí při provádění Díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících Dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů věznice, zejména povinností osob vstupujících do střeženého prostoru, se kterými byl seznámen. 
d)	Kontrola provádění Díla. Pokud o to Objednatel Dodavatele před zahájením zhotovování Díla požádá, Dodavatel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol, kdy Objednatel kontroluje provádění prací a Dodavatel je povinen umožnit Objednateli přístup na místo realizace Díla Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
e)	Pokud bude realizovat Dílo Dodavatel, který zaměstnává další zaměstnance, veškeré vstupy všech těchto osob do objektu Věznice Oráčov budou realizovány na základě schválení ředitele Věznice Oráčov.  

f)	Během realizace Díla je Dodavatel povinen počínat si tak, aby Dílo provedl na svůj náklad a nebezpečí v ujednané době plnění a za podmínek dle této Smlouvy.

    V.
    Čas plnění (provedení Díla), místo provádění Díla

1.	Dílo specifikované dle čl. IV. odst. 1. písm. a) této Smlouvy bude Dodavatelem provedeno nejpozději do 210 dní od podpisu Smlouvy.  
Po předání díla bude probíhat zkušební provoz v délce 1 měsíc.

2.	Dokumentace skutečného provedení nově instalovaného perimetrického systému střežení věznice (dále jen „DSP“) bude předána ve lhůtě do 1 měsíce ode dne provedení Díla specifikovaného dle čl. IV. odst. 1. písm. a) této Smlouvy (v období zkušebního provozu).   

3.	Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání (§ 2604 OZ). Dílo dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a bude připraveno k předání v okamžiku, kdy byly provedeny všechny práce související s Dílem a Objednateli dodány všechny jeho součásti uvedené v této Smlouvě i v zadávací dokumentaci, vč. dokladů potřebných k řádnému předání a užívání Díla tak, aby Dílo jako celek bylo způsobilé sloužit svému účelu, tzn. bude-li Dílo řádně provedeno zejména v souladu s touto Smlouvou, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN). Dílo se považuje za fakticky předané v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, vč. případu převzetí Díla Objednatelem s výhradami pro vady, nebránící v užití Díla jako celku. K bližším podmínkám převzetí a předání Díla platí dále také čl. X. této Smlouvy.

4.	Místem plnění výkonové fáze Díla dle čl. IV. odst. 1. písm. a) této Smlouvy je vnitřní plot obvodového střežení v uzavřeném areálu Věznice Oráčov. Pozemky parc. č. 1531/3 a 1531/16, pozemky vedené jako ostatní plocha. Nemovitost zapsaná na LV č. 287, k. ú. Oráčov, obec Oráčov, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. 

VI.
Cena Díla
1.	Cena Díla, specifikovaného v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, byla sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

Celková nabídková cena za Dílo: 

1 362 019,56 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion tři sta šedesát dva tisíc devatenáct korun českých padesát šest haléřů včetně DPH)

bez DPH: 1 125 636,00 Kč 
(slovy: jeden milion sto dvacet pět tisíc šest set třicet šest korun českých bez DPH)

sazba 21% DPH: 236 383,56 Kč
(slovy: dvě stě třicet šest tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát šest haléřů)

2.	Dodavatel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s realizací Díla jako celku. Dodavatel prohlašuje, že všechny náklady, náklady za dopravu, cestovné, ubytování, a další finanční náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení Díla dle této Smlouvy, zahrnul do kalkulace ceny za provedení Díla. 

3.	Celková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu.  Zmiňovaná změna ceny bude připuštěna jako tzv. vyhrazená změna závazku z této Smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž tato změna se nepovažuje za změnu závazku vyžadující uzavření dodatku ke Smlouvě. Výše uvedené vyhrazené změny závazku je možno uplatnit pouze v průběhu plnění předmětné Smlouvy. Poskytnutí plnění v rozsahu ujednané vyhrazené změny závazku se považuje za plnění původně sjednaného smluvního vztahu.

                 VII.
               Platební podmínky

1.	Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna Smluvní strana neposkytne druhé Smluvní straně závdavek.

2.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VII. odst. 3. Smlouvy.

3.	Úhrada ceny Díla bude provedena v české měně, na základě jedné faktury vystavené Dodavatelem, a je výslovně vázána až na podpis předávacího protokolu o předání a převzetí Díla (viz čl. X. této Smlouvy). 
Faktura musí obsahovat:
•	označení faktury a její číslo,
•	číslo Smlouvy a den jejího uzavření,
•	identifikační údaje Smluvních stran podle čl. I. Smlouvy,
•	celkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a celkovou cenu s DPH za Dílo,
•	protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnou osobou Objednatele a oprávněnou osobou Dodavatele, 
•	faktura musí být označena textem INVESTICE - „Oráčov – perimetr“.  
  
4.	Faktura vystavená Dodavatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit Dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli.

5.	Faktura bude v elektronické podobě zaslána Objednateli na e-mail: XXXXXXXXXXXXX. Po odsouhlasení správnosti vystavené faktury, bude tato Dodavatelem v elektronické podobě zaslána, vč. všech příloh v jednom souboru, na e-mail: XXXXXXXXXXXXX. Vystavena bude v českém jazyce. 

6.	Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou splatnou peněžitou pohledávku za Dodavatelem, oproti jakékoli peněžité splatné pohledávce Dodavatelem za Objednatelem.  

                VIII.
                  Další povinnosti Objednatele a Dodavatele

1.	Objednatel proškolí zástupce Dodavatele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dodavatele dozví. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.

2.	Dodavatel se zavazuje během plnění Smlouvy, po ukončení Smlouvy i po předání Díla Objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Dodavatel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí. 

3.	Dodavatel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány Objednateli, o kterých se od Objednatele dozví a uhradí případné sankce zaviněné Dodavatelem za neplnění těchto podmínek.

4.	Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. za škodu způsobenou třetím osobám), a to s výší pojistného plnění v případě pojistné události, jenž odpovídá nejméně částce ceny Díla plus DPH. Dodavatel je povinen originál Smlouvy (ověřenou kopii) o pojištění a doklad o úhradě pojistného předložit k nahlédnutí Objednateli kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to v termínu nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyžádání Objednatele. Objednatel si může pořídit kopii této Smlouvy.

5.	Ostatní všeobecné závazky objednatele
a)	Předání místa provádění Díla: Objednatel předá Dodavateli místo provádění Díla za účelem zahájení prací na Díle. Dodavatel bere na vědomí, že místo realizace Díla se nachází v areálu Objednatele, které bude muset být v průběhu provádění Díla funkční a schopné provozu ke svému účelu. Veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu Objednatele; Dodavatel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit provoz Objednatele. Strany se na přesném datu předání místa realizace Díla dohodnou. 

b)  Spolu s předáním místa provádění Díla (či jeho části) Objednatel:
i.	předá místa odběru elektrické energie a vody; 
ii.	předá prostor pro zařízení místa realizace Díla 
iii.	určí vjezd na místo realizace Díla  

6.	OSTATNÍ VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY DODAVATELE
a)	Pokyny Objednatele
Dodavatel bude postupovat při provádění Díla dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Dodavatel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 
Pokud pokyny vydané Objednatelem Dodavateli budou nevhodné pro účely včasné a řádné provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Dodavatel neprodleně, po obdržení takového pokynu, povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Dodavatele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Dodavatele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu.    
b)	Spolupráce 
Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu, a to včetně kontroly při provádění Díla (k tomuto viz čl. IV. odst. 4. písm. d) této Smlouvy).
c)	Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly
Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Dodavatel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 
	
        IX.
Oprávněné osoby

1.	Mimo osoby uvedené v čl. I této Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 

a)	ve věcech průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění Díla, k účasti na jednání při převzetí Díla a odsouhlasení faktury: 

•	XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX
•	XXXXXXXXXXXXX,  	e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel.:
XXXXXXXXXXX 
•	XXXXXXXXXXXXXX, 	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

2.	Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Dodavatele zastupovat:

a)	bez omezení rozsahu, včetně předání Díla:
•	XXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
b)	ve věcech technických, včetně vedení Stavby, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 
•	XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

3.	Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě, jenž bude uzavřen na základě písemného oznámení o takovéto změně druhé Smluvní straně. 

            X.
           Provedení Díla - dokončení, předání a převzetí Díla    
              
1.	Předání a převzetí Díla:  

a)	Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným předáním předmětu Díla Objednateli, odstraněním případných vad a nedodělků, ukončením zkušebního provozu v délce 1 měsíc a dodáním dokumentace skutečného provedení. Objednatel splní svou povinnost převzít provedené Dílo podpisem protokolu o převzetí Díla. K podepsání protokolu a k účasti na předávacím řízení jsou oprávněné za Objednatele osoby uvedené v čl. IX. Smlouvy a za Dodavatele jednatel. 

b)	Objednatel nepřevezme Dílo, které je neúplné, nebo pro vady, jenž brání v užití Díla jako celku. Převezme však Dílo, pokud vykazuje drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla jako celku za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o převzetí Díla a byl stanoven termín jejich odstranění v souladu s termínem pro odstranění vad nebránících v užití díla dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této Smlouvy.

c)	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady, které nebrání v užití Díla jako celku a pro vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Dodavatel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Dodavatel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud Dodavatel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány Objednatelem podklady.

2.	Speciální podmínky převzetí Díla:
a)	Dílo bude považováno za dokončené a převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou (viz zejména čl. V. odst. 3 k výkladu pojmu dokončeného Díla), a také bude-li dílo provedeno zejména v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN). V takovém případě Objednatel vydá protokol o převzetí Díla, a to vč. případů, kdy dojde k předání Díla s vadami, nebránícími v užití Díla jako celku (k tomuto blíže viz čl. X. odst. 1 písm. b), věta druhá této Smlouvy). 
b)	Technickými podklady pro předání Díla se rozumí:
i.	zkoušky, atesty, revize dle ČSN (technických norem), pasporty a návody v českém jazyce,
ii.	prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizaci Díla použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména Nařízením vlády č. 17 a 18/2003 Sb., a 426/2000 Sb., (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., § 13.),
iii.	prohlášení o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje.
c)	Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení Díla:
i.	účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,
ii.	účast svého zástupce.
d)	Dodavatel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení Díla zejména:
i.	účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
ii.	účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

e)	Předání budou předcházet případné technické prohlídky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených osob.  Po případně provedené prohlídce Objednatel na základě výzvy Dodavatele k převzetí Díla: 
i.	Dílo nepřevezme – odmítne vydání protokolu o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením popisu neúplnosti Díla nebo vad (obojí bránící v užití Díla jako celku), jež má Dodavatel odstranit, aby bylo možno protokol o převzetí Díla vydat. Dodavatel tyto vady před předáním Díla odstraní a Objednatele dalším oznámením podle tohoto článku vyzve k vydání protokolu o převzetí Díla; 
ii.	Dílo převezme – vydá Dodavateli protokol o převzetí Díla bez výhrad či s výhradami s uvedením soupisu vad nebránících řádnému užívání Díla jako celku a s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této Smlouvy. 
iii.	součástí protokolu o předání Díla bude:
•	popis předávaného Díla, popř. jeho části, 
•	údaje o Ceně Díla, 
•	údaje o Dodavateli Díla, 
•	údaje o projektantovi DSP,
•	lhůty provedení Díla, 
•	odchylky od DSP,  
•	zhodnocení prací, vč. jejich kvality, 
•	prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami (pro vady nebránící užití Díla jako celku),  
•	soupis vad a nedodělků, nebránících v užití Díla jako celku, které byly zjištěny v průběhu přejímacího řízení s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této Smlouvy, způsob jejich odstranění, popř. sleva z Ceny Díla. 

f)	Jestliže nedošlo k převzetí Díla (viz také čl. X první věta odst.1 písm. b) této Smlouvy), vyznačí to Objednatel v zápisu a to vč. skutečnosti, že nedojde k vydání Protokolu o převzetí Díla pro dodání neúplného Díla nebo pro vady, jenž brání v užití Díla jako celku (viz také čl. X odst. 2 písm. e) bod i. této Smlouvy), a zároveň dohodne s Dodavatelem termín dalšího přejímacího řízení.

3.	Výhradní licence k předmětu Díla – dokumentace skutečného provedení nově instalovaného perimetrického systému střežení věznice (dále jen „DSP“).
Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla dle této Smlouvy autorského dílo, v daném případě DSP, Dodavatel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva užít DSP coby autorské dílo, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, včetně svolení autorské dílo měnit, spojovat s jinými a zařazovat je do děl souborných (dále jen „výhradní licence“). Cena za udělení této výhradní licence, je již zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z výhradní licence nemohou vzniknout podmínky pro aplikaci kogentního ustanovení § 2374 OZ. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do plnění a dalších předaných materiálů, je oprávněn rozmnožovat je neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami.

                   XI.
                     Záruka za jakost, odpovědnost za vady, 
              odpovědnost Dodavatele za újmu

1.	Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Vadou je i vada právní. 

2.	Dílo specifikované dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Smlouvy v podobě   DSP má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, pokud je v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje vlastnosti pro dokumentaci tohoto typu  obvyklou. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 OZ se dohodou obou stran vylučuje. 

3.	Dílo specifikované dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této Smlouvy má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, zejména pokud Dílo nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, obecně závaznými technickými normami, není provedeno shodně s dokumentací, nebo Dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce, nebo vznikly použitím nesprávné technologie.

4.	Vady zjevné se uplatňují při předání Díla. Skryté vady lze uplatnit nejpozději v záruční lhůtě v délce 24 měsíců, která počíná běžet předáním Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (§ 2619, ve spojení s § 2113 až § 2117 OZ). Během této doby odpovídá Dodavatel za to, že Dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat skryté vady nebo nedodělky a pokud k této skutečnosti dojde, bez zbytečného odkladu bude vady a nedodělky bezplatně odstraňovat. Skryté vady lze uplatnit ve lhůtě do 5 ti let od převzetí stavby, stejně tak jako v případě dokumentace skutečného provedení (§ 2629 odst. 1 OZ). Uvedené případy se netýkají záruky za jakost, kdy u vad uplatňovaných v rámci Dodavatelovy záruky za jakost Díla se vady uplatňují v záruční lhůtě dle odstavce 5 tohoto ustanovení.

5.	Záruka za jakost. Záruční doba na DSP (tj. Dílo specifikované dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Smlouvy) byla sjednána dohodou Stran v délce trvání 60 měsíců od předání dokumentace Objednateli. 
6.	Záruka na Dílo specifikované dle čl. IV. odst.1 písm. a) - byla sjednána dohodou Stran v délce trvání 24 měsíců od předání Díla Objednateli.    
7.	Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl Objednatel. Na žádost Objednatele je však Dodavatel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

8.	Dodavatel je povinen odstranit skryté vady Díla, jestliže je Objednatel písemně reklamoval v době uvedené v odst. 4 či 5 tohoto článku Smlouvy. Zjevné vady se uplatňují při předání Díla.  Dodavatel se zavazuje případné vady (zjevné i skryté) dokumentace skutečného provedení nově instalovaného perimetrického systému střežení věznice odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uplatnění reklamace. 

9.	Lhůty pro odstranění vad u Díla specifikovaného dle čl. IV. odst.1 písm. a) jsou následující: 
a)	10 pracovních dnů v případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo jeho části,
b)	20 pracovních dnů v případě vad nebránících řádnému užívání Díla nebo jeho části. 

10.	V případě vad nebránících řádnému užití Díla, pokud ze strany Dodavatele nebude dodržena sjednaná lhůta k odstranění vady v případě vad nebránících řádnému užití Díla, bude vada považována za vadu neodstranitelnou a takováto skutečnost bude považována za podstatné porušení Smlouvy. Stejně tak bude považováno za podstatné porušení Smlouvy nedodržení lhůty k odstranění vad bránících v užívání Díla. K tomuto viz sjednané případy podstatného porušení Smlouvy, které jsou vymezeny v článku XIII. odst. 2.2. písm. b) této Smlouvy. 

       XII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta, náhrada újmy

1.	Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. a VII. Smlouvy, je povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2.	Pokud Dodavatel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.  

3.	V případě, že se Dodavatel ocitne v prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle této Smlouvy, zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu, a to:

a) ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vad anebo nedokončených prací bránících užívání Díla nebo jeho části (ve lhůtách dle čl. XI odst. 9 písm. a) této Smlouvy),  

b) ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vad anebo nedokončených prací nebránících užívání Díla nebo jeho části (ve lhůtách dle čl. XI odst. 9 písm. b) této Smlouvy),

c) ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení v případě prodlení s odstraněním jakýchkoli vad na DSP (ve lhůtách dle čl. XI odst. 8 této Smlouvy).

4.	Za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

5.	Úhradou jakékoli touto Smlouvou sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. Ujednání o smluvních pokutách bylo učiněno vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti. Obě strany považují smluvní pokuty za přiměřené, a to nejen v době sjednávání této Smlouvy, ale také pro futuro v době případného porušení povinnosti, jakož i pro okolnosti nastalé později, to vše s ohledem na zvýšený význam tohoto druhu zajišťované povinnosti pro Dodavatele, u smluvních pokut dle odst. 2 a 3 zejména v tom smyslu, aby mohlo být Dílo řádně dokončeno a užíváno, a dále, s ohledem na vlastní závazek dodavatele dle čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy. 
 
6.	Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností vypracovat DSP včetně újmy vzniklé na věcech předaných od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy DSP, a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít.  Tímto ujednáním není dotčena platnost článku zejména podle čl. XII. odst. 3 písm. c) této Smlouvy.

7.	Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VII. Smlouvy.

8.	Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

       XIII.
        Ukončení Smlouvy

1.	Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této Smlouvy: 
a)	splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b)	dohodou Smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 
c)	jednostranným odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v čl. XIII. odst. 2,
d)	výpovědí s tříměsíční dobou, kterou může dát kterákoliv ze Smluvních stran. 

Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

2.	Odstoupení od smlouvy

2.1.	Odstoupení od Smlouvy podle ust. čl. XIII. odst. 1 písm. c) této Smlouvy je možné v těchto případech:
a)	Pro podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 a § 2106 a násl. OZ některou ze Smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany. Případy podstatného porušení Smlouvy jsou demonstrativně vymezeny v článku XIII. odst. 2.2. této Smlouvy. 
b)	Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Dodavatele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Dodavatel vstoupí do likvidace.
c)	Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Je-li však Dodavatel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.
d)	Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Dodavateli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
e)	Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky – tedy pokud zjistí, že Dodavatelem je subjekt naplňující podmínky odstavce 1 čl. 5 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

2.2.	Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle dalších případů uvedených v této Smlouvě): 
a)	nedodání řádně (bez vad) provedeného Díla ve lhůtách dle této Smlouvy, 
b)	nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách dle této Smlouvy,  
c)	nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti, 
d)	prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla dle této Smlouvy delší než 30 dnů. 

2.3.	Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé Smluvní straně.

2.4.	Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

      XIV.
        Závěrečná ustanovení

1.	Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

2.	Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 1765 odst. 2 OZ.

3.	Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí. 

5.	Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě či v jejích dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace Smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.

6.	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Dodavatel. 

7.	Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Smlouvy zajistí objednatel.

9.	Nebude-li tato Smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o registru smluv.

10.	Smluvní strany jsou si při plnění Smlouvy vědomy povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

11.	Objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje vyplývající z tohoto smluvního vztahu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR.          

V Oráčově dne: ………………..                  V Brně dne: ……………………

Za Objednatele :……………………….                   	  Za Dodavatele …………………….….
vrchní rada                                                        člen představenstva 
                  	plk. Mgr. Karel Berthold                                              Kamil Urbánek, MBA         
                   	  ředitel Věznice Oráčov 	                    SECURITY TECHNOLOGIES a.s.