DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„VN Brno – rekonstrukce očního oddělení na budově B – realizace“
(dále jen „Dodatek č. 2“)
uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany
Smluvní strany:
Objednatel: Vojenská nemocnice Brno p. o.
IČO: 60555530
Sídlo: Zábrdovická 3, 615 00 Brno
Zastoupený: plk. gšt. MUDr. Petrem Králem, MBA
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ...
Číslo účtu: ............
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: PFM-service s.r.o.
IČO: 26981629
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Zastoupený: ..........................................................
..........
DIČ: CZ26981629
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 450734001/2700
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně dále také jako „Smluvní strany")
Se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
s názvem „VN Brno - rekonstrukce očního oddělení na budově B - realizace“, evidenční číslo Zhotovitele
- OP-25-1349 uzavřené dne 21. 11. 2025, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen „Smlouva“), zadané
coby veřejná zakázka malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je realizace rekonstrukce očního
oddělení objednatele, přičemž k této dílčí úpravě Smlouvy dochází z důvodu zohlednění faktických a
technických okolností týkajících se realizace díla dle Smlouvy k datu uzavření tohoto Dodatku č. 2,
v důsledku kterých je měněna Smlouva, resp. závazek z ní.
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku okolností popsaných ve Změnových listech
uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 dojde k modifikaci práv a povinností plynoucí ze
Smlouvy (týkající se rozsahu a povahy prováděných prací).
2. Předmětem Dodatku č. 2 je závazek Zhotovitele realizovat vícepráce a méněpráce, které jsou
blíže popsány v jednotlivých změnových listech včetně cen těchto víceprací a méněprací, které
tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a závazek Objednatele za realizované vícepráce či
dohodnuté vícenáklady zaplatit příslušnou cenu; uvedené vícepráce, vícenáklady a méněpráce
naplňují znaky nepodstatných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“), jak je uvedeno níže.
3. U změn, které jsou uvedeny coby nepodstatné podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nedochází ke změně
celkové povahy veřejné zakázky, když i po změně je nadále uspokojována původní potřeba
Objednatele a je sledován jeho původní záměr, přičemž nedochází ke změně podstatných částí
předmětu plnění anebo Smlouvy. Předmětem plnění je, i po uzavření tohoto Dodatku č. 2,
nadále rekonstrukce budovy, jež je součástí zdravotnického zařízení Objednatele a která má
stejné určení a nadále slouží stejnému účelu. Současně je splněna podmínka, že hodnota
změny nedosahuje zákonného limitu podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, a to ani při zohlednění
dříve učiněných změn závazku. Konkrétnější popis dotčených změnových listů:
a. ZL č. 02 – záměna původních zařizovacích předmětů za předměty novější s ohledem
na projektantem navrhované SDK příčky.
b. ZL č. 05 – doplnění stavebních úprav a úpravy stávajících soklíků.
Bližší odůvodnění včetně popisu této změny je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
4. U změn, které jsou uvedeny coby nepodstatné podle § 222 odst. 5 ZZVZ, se jedná o práce
nezbytné pro dokončení díla, tedy jedná se o práce, které odpovídají faktickému rozsahu prací
nutných k dokončení díla a současně jsou to práce dodatečné, tedy objednatel je nemohl
zahrnout do původního rozsahu plnění dle Smlouvy, protože jejich rozsah byl zjištěn až v
průběhu samotné realizace díla. U těchto dodatečných prací je rovněž s ohledem na jejich
integraci do provádění díla, technické a další návaznosti mezi dodatečnými pracemi a
původními pracemi z technických důvodů vyloučeno, aby je prováděl jiný zhotovitel, aniž by se
tím objednatel vystavil značným obtížím anebo výraznému zvýšení nákladů. Cenový nárůst
vyvolaný touto změnou nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Konkrétnější
popis dotčených změnových listů:
a. ZL č. 01 – odstranění a provedení nových stoupacích rozvodů, včetně napojovacích
armatur, izolace, dále dodávka a instalace zdravoinstalace.
b. ZL č. 03 – výroba a dodávka 7ks skříní.
c. ZL č. 04 – úprava typu kabeláží , doplnění elektromontážní položky v důsledku dodržení
PBŘS a platné legislativy v oblasti požární bezpečnosti.
Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku je popsán v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
Článek II.
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně rozsahu plnění dle
Smlouvy ve smyslu dotčených článků Smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle
jednotlivých Změnových listů č. 01, 02, 03, 04 a 05, včetně jejich příloh, které tvoří Přílohu č. 1
tohoto Dodatku č. 2. Tyto Změnové listy zároveň dle svého obsahu a ve svém rozsahu mění
Přílohu č. 1 Smlouvy (Rozpočet) a i další ustanovení Smlouvy, které obsahem změny práv a
povinností dle jednotlivých Změnových listů jsou dotčená.
2. V důsledku změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy podle Změnového listu č. 02 a č. 05 dochází
k navýšení smluvní ceny o 220 741,80 Kč bez DPH. Hodnota víceprací v důsledku těchto změn
činí 521 860,19 Kč bez DPH a hodnota méněprací činí 301 118,39 Kč bez DPH.
3. V důsledku změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ, tedy podle Změnových listů č. 01, č. 03 a č. 04 dochází
k navýšení smluvní ceny o 513 493,92 Kč bez DPH.
4. Celkové navýšení smluvní ceny dle všech shora uvedených změnových listů tak činí
734 235,72 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se tedy dohodly na následující změně textu Smlouvy:
a. Text Čl. IV. Cena, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena
Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v
rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel
vybraným dodavatelem a po dodatečných změnách rozhodných smluvních
ustanovení provedených dohodou smluvních stran. Pokud v průběhu realizace díla
smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se
Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do
součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla,
není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém
případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude
Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této
smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn
fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této
smlouvy.
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
9 082 355,40 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů osmdesát dva tisíc tři sta padesát pět korun českých čtyřicet
haléřů).
b. Text Čl. XXIII. Závěrečná ustanovení, odst. 23.6. Cena, odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se
novým textem tohoto znění:
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. ROZPOČET;
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN
A ZMĚNOVÝ LIST;
příloha číslo IV. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VÝROBNÍ /
REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY;
příloha číslo V. VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMETENTACE STAVBY;
Příloha číslo VI. ZMĚNOVĚ LISTY Č. 01, 02, 03, 04 a 05 včetně jejich příloh
Článek III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že je projevem jejich
svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V Brně dle data elektronického podpisu:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
…………………….………………………………….. …………………………………………………..
plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA ředitel ...............
…………………………………………………..
...................