D O D A T E K  č. 1
ke smlouvě o dílo č. 17053/SOD ze dne 17.07.2017 uzavřené mezi
OBJEDNATEL
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 1/144, 74101 Nový Jičín
IČ: 62330136
Zastoupený: Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka příspěvkové organizace
ZHOTOVITEL
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
IČ: 47671416
Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem
NÁZEV DODATKU
„Stavební úpravy střešní konstrukce, fasády základní školy p.č. 447 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí“
PŘEDMĚT DODATKU
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy střešní konstrukce, fasády základní školy p.č. 447 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. 17053/SOD ze dne 17.07.2017 tohoto znění:

I.
V článku III. Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
3.2.1 Jedná se o opravu části fasády, výměnu střešní krytiny včetně části krovu a provedení nového hromosvodu na objektu základní školy, nacházející se v ochranném pásmu MPR Nový Jičín.   
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou ing. Václavem Toškou, Zahradní 455, 742 42 Šenov u Nového Jičína, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 4.1.2017 pod č.j. ÚPSŘ/602/2017 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Přílohou č.2 - Úvodní změnový list včetně rekapitulace změnových listů, oceněných rozpočtů změn a podrobného popisu změn.
Stavba bude částečně probíhat za plného provozu budovy základní školy. Zhotovitel zpracuje před zahájením prací harmonogram postupu výstavby. V harmonogramu bude zohledněn provoz základní školy – přesun vybouraných hmot a zásobování stavby novým materiálem bude probíhat výhradně mimo vyučovací hodiny. Po odsouhlasení objednatelem bude harmonogram po celou dobu stavby závazný. 
Lešení bude po celou dobu stavby opatřeno zábranami z plachtoviny nebo neprůhledné síťoviny jednotného vzhledu a barvy bez děr, trhlin a reklam. Při poškození budou tyto zábrany vyměněny nejpozději do 48 hodin. Pod celou plochou lešení (na chodníku, zeleni, zpevněných plochách atd.) bude položena geotextilie. 

V dostatečném předstihu bude provedena pasportizace zeleně, chodníků, zpevněných ploch a komunikací, které budou využívány stavbou během provádění prací, bude pořízená fotodokumentace stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající zeleň, chodníky, zpevněné plochy, komunikace atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně (min. 3x týdně) odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky do původního stavu. 
Staveniště bude ohrazeno pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením. Veškeré výkopy budou zhotovitelem ohrazeny přenosným oplocením. Zhotovitel bude bezpodmínečně dodržovat plán BOZP předložený objednatelem. Rovněž bude řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO, ST, PÁ, resp. SO, NE) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory odsouhlasené objednatelem. 

II.
V článku V. Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli v termínu do 31. 10. 2017.

III.
V článku VI. Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1., který nově zní takto:
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 6 927 398,06 Kč tj. 
s DPH 8 382 151,65 Kč (sazba 21%).

IV.
V článku XVII. Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č.2 - Úvodní změnový list včetně rekapitulace změnových listů, oceněných rozpočtů změn a podrobného popisu změn.

V.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru Objednatel, a to do 5-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu  § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., udělují svolení s jejich užitím a zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

Příloha č.2 - Úvodní změnový list včetně rekapitulace změnových listů, oceněných rozpočtů změn a podrobného popisu změn.

V Novém Jičíně dne 5.10.2017	V Novém Jičíně dne 5.10.2017

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka příspěvkové organizace	Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

…………………………………….	……………………………………