DODATEK č. 2 KUPNÍ SMLOUVY
uzavřené dle ust. § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále v textu jen „OZ“), jež byla uzavřena dne ze dne 12. 12. 2016, a jež vzešla ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: ČVUT – CIIRC: Komunikační infrastruktura pro budovy CIIRC“
mezi

Kupujícím:	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
zastoupeným:	Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor
sídlem:	Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6		
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	107-7032660267/0100
IČO:		68407700
DIČ:		CZ68407700
telefon:	+420 22435 1111
fax:		+420 +420 234 353 600
fakturační adresa:	ČVUT v Praze – CIIRC, Zikova 4, 166 36 Praha 6

dále jen „kupující“, na straně jedné

a

Prodávajícím:		Simac Technik ČR a.s.
sídlem:			Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
zastoupeným:	Ing. Dušanem Bruothem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Šteflem, členem představenstva
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc. organizační složka
Číslo účtu:		8010-0616133653/0300
IČO:			63079496
DIČ:			CZ63079496
Zápis v OR:	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3190 

dále jen „prodávající“, na straně druhé;

společně dále v textu též „smluvní strany“
uzavírají na základě vážné, svobodné a omylu prosté vůle následující dodatek:

I.	Preambule 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 12. 12. 2016 kupní smlouvu na dodávku komunikační infrastruktury budov CIIRC, a téhož dne uzavřely i Dodatek č. 1 ke jmenované kupní smlouvě. Kupní smlouva i její Dodatek č. 1 byly uzavřeny na základě legitimního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem ČVUT – CIIRC: Komunikační infrastruktura pro budovy CIIRC (dále v textu také „původní kupní smlouva“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že pohnutkami, na základě kterých uzavřely tento Dodatek č. 2 k původní kupní smlouvě a Dodatku č. 1, je smírné a legitimní řešení nastalé situace spočívající v nemožnosti plnění prodávajícím v termínu 60 dnů od podpisu původní kupní smlouvy (jak stanoví čl. V. 1. původní kupní smlouvy). Kupující zároveň prohlašuje, že důvodem, pro nějž kupující souhlasí s prodloužením doby dodání prodávajícím, jsou důvody spočívajících na straně třetí strany, konkrétně zhotovitele stavby místa plnění (díla CIIRC) a jím pověřených osob. Smluvní strany svorně uvádějí, že konkrétními důvody, pro něž nebylo možno provést plnění prodávajícím, jsou důvody způsobené třetí osobou kupujícímu v místě dodání a montáže (dílo CIIRC) a to: chybějící příprava prostor, do nichž mělo být dodáno plnění a provedena jeho montáž (chybějící vyčištění místností, připravenost rozvodů, napájení v racích a funkční klimatizace). 
3. Kupující zároveň prohlašuje, že přijal a provádí všechna potřebná opatření k tomu, aby nevznikalo další prodlení a překážky v přípravě prostor pro řádné poskytnutí plnění prodávajícím. 
4. Prodávající zároveň prohlašuje, že poskytování plnění obnoví ihned, jakmile odpadnou překážky montáže a dodání plnění na straně kupujícího, byť způsobené třetí stranou.

II.	Obsah Dodatku č. 2
1.	Na základě shora uvedených skutečností se mění a doplňuje původní kupní smlouva následovně:
a.	Odstavec 1. (první) v článku V. (pátém) původní kupní smlouvy se mění na níže uvedené znění:
„Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá kupujícímu plnění specifikované dle položky č. 7 cenového rozpadu, který je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „cenový rozpad“) nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající dodá kupujícímu zbylé plnění, tj. plnění specifikované dle položky č. 1 až č. 6 a dále č. 8 až č. 10 cenového rozpadu nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. Prodávající uvědomí o datu dodávky zboží kupujícího alespoň 3 dny před jejím uskutečněním či před uskutečněním dodání její dílčí části, bude-li prodávající realizovat dodání zboží na části.“
b.	Do článku X. (desátého) původní kupní smlouvy se doplňuje odstavec 10a, který zní následovně: 
„Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, z nichž kupující hradí nebo bude hradit předmět plnění kupní smlouvy, se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem ani nárokem smluvních sankcí dle zákona nebo ustanovení této smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu.“
2.	Zbytek původní kupní smlouvy a Dodatku č. 1 zůstává nezměněn.
III.	Závěrečná ustanovení
1.	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení. 
2.	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s tímto Dodatkem č. 2 seznámili, nečiní jim interpretačních obtíží a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Kupující		Prodávající	

			
České vysoké učení technické v Praze
Jméno: Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Funkce: rektor
Místo: Praha 
Datum: 10. 2. 2017		Simac Technik ČR a.s.
Jméno: Ing. Dušan Bruoth,
Funkce: předseda představenstva 
Jméno: Ing. Jaroslav Štefl, 
Funkce: člen představenstva
Místo: Praha 
Datum: 10. 2. 2017