SMLOUVA O DÍLO
číslo: 45/2017
„Oprava části zpevněné plochy a nové venkovní schodiště u SOS
Humpolec“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v rozhodném znění
mezi následujícími smluvními stranami:
Objednatel:	Název:	Město Humpolec
Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený:             Jiří Kučera, starosta města,  Květoslav Namyslo, místostarosta města
IČ:	00248266
DIČ:		
Bankovní spojem: xxxxx
Číslo účtu:             xxxxx
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Jiří Kučera, starosta města,
Květoslav Namyslo místostarosta 
¨                                               Ve věcech technických oprávněn jednat: Václav Pavlík (dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:	Název:	SATES ČECHY s.r.o.
Se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený:	Ivo Šimek, jednatel společnosti
IČ:	25172654
DIČ:	CZ25172654
Bankovní spojení:  xxxxxx
Číslo účtu:xxxxxx
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ivo Šimek, jednatel společnosti Ve věcech technických oprávněn k jednání:
Petr Jahoda, výrobní náměstek, tel. Xxxxx (dále jen „Zhotovitel")
1. Předmět smlouvy
2.
Předmětem smlouvy jsou stavební práce na úpravě zpevněných ploch z žulové dlažby a dodávka a montáž zábradlí v Humpolci. Rozsah prací je dán cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
Akce:
„Oprava části zpevněné plochy a nové venkovní schodiště u SOS Humpolec"
Místo: Humpolec
3.	Podklady
Závaznými podklady k provedení díla jsou:
-	cenová nabídka
-	Smlouva o dílo
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.
4.	Cena díla
Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí
objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách a činí:
Cena díla bez DPH:	222.968,14 Kč
DPH 21 %:	46.823,31 Kč
Cena díla celkem vč. 21 % DPH: 269.791.45 Kč
Cena obsahuje ocenění všech známých prací a dodávek, které vyplývají z vymezení plnění předmětné zakázky.
Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
4. Termín plnění
Termín zahájení prací: říjen 2017 Termín ukončení prací: listopad 2017
Zhotovitel potvrzuje objednateli nástup na provedení prací po vzájemné dohodě a bude-li písemně vyrozuměn 5 dnů před požadovaným termínem.
Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad 5 dní před vzájemně dohodnutým termínem nástupu na provedení prací. O převzetí staveniště bude sepsán Protokol o převzetí staveniště, ve kterém bude mimo jiné popsán a zadokumentován stávající stav.
Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V opačném případě uhradí zhotoviteli náklady vzniklé prostojem strojů a pracovníků. Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.
V	případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.
V	případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek odsouhlasenou ve stavebním deníku. Při nevhodných povětrnostních podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz) bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.
5.	Předání převzetí díla"
Zhotovitel vyzve písemně min. 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla celé stavby.
Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
Objednatel je povinen dílo převzít a řádně za něj uhradit smluvenou cenu.
Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu SOD.
6.	Záruční doba
Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Výslovně se ujednává, že vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími konstrukci plochy, se záruka nevztahuje.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky. Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 
7.	Platební podmínky
Dílo bude hrazeno na základě měsíční fakturace. Faktury budou vystaveny vždy k poslednímu dni v měsíci a budou předány objednateli vždy do 3. dne měsíce následujícího ke schválení. Objednatel je povinen se k předložené fakturaci vyjádřit do 3 pracovních dnů ode dne předložení. Součástí faktur bude oboustranně potvrzený Soupis provedených prací. Konečná faktura bude vystavena na základě potvrzeného předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny s náležitostmi dle ust. §95 a zákona č. 235/2004, o DPH v platném znění. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dní ode dne doručení faktury objednateli.
2
8.	Majetkové sankce - smluvní pokuty
Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým sankcím:
-	Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,1 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli,
-	zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění,
-	tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutuje zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem,
-	smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutuje zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem,
-	smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na 1.000,— Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutuje zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.
9.	Ostatní ujednání
Vlastnické právo na předmět díla přechází na objednatele až po jeho úplném zaplacení. Do té doby je celé dílo vlastnictvím zhotovitele.
Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost zhotovitel. Objednatel je povinen zjistit si veškeré IS, které mohou být dotčeny realizací. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a potřebnou součinnost k zjištění všech dotčených IS. Objednatel zajistí vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, včetně osazení přechodného dopravního značení, pokud to předmět díla vyžaduje.
Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, e-mailem nebo telefonicky s technickým popisem vady. Nástup na odstranění závady - nejpozději do 14-ti dnů od nahlášení reklamace - pokud nedojde k jiné dohodě s objednatelem.
V případě potřeby zajistí Zhotovitel na náklad objednatele:
-	geodetické, geometrické a vytyčovací práce,
-	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
-	zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu vč. pořízení protokolů (mimo Prohlášení o vlastnostech na použité materiály),
Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis.
K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a mailem s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a mailu ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku informovat objednatele o této skutečnosti mailem a dílo zakrýt a pokračovat v práci.
Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.
Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou, v takovém případě však za provedené práce a dodávky odpovídá, jako by je provedl sám.
Zhotovitel je povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po písemné výzvě objednatele.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud má za objednavatelem pohledávku po lhůtě splatnosti delší jak 20 dnů.

10.	Závěrečná ujednání
Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek.
Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a v nichž nebude dosaženo shody mezi smluvními stranami, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR v Praze podle jeho „Řádu“ třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto „Řádu“.

Za objednatele:

V Humpolci  2.10.17

Jiří Kučera,
starosta města

Květoslav Namyslo,
místostarosta města

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a  Občanského zákoníku.
V Telči 2.10.2017

Ivo Šimek, jednatel společnosti Sates Čechy

Tel.: +420 567 223512 Fax: +420 567 223513 E-mail: satescechy@satescechy.cz Internet: www.satescechy.cz

SATES ČECHY s. r, o. Radkovská 252 588 56 Telč

cechy

V Telči dne 20.7. 2017

Město Humpolec
Horní náměstí 300 396 22 Humpolec

IČt.25172654 DIC: CZ25172654
CENOVÁ NABÍDKA č. 277/2017
Na základě poptávky zasílám cen.nabídku na akci:
Popis	MJ	Množství	J.C.	Celkem	
Odkopávy nepaž horn 3 obj -100 m3	m3	9,88	585,00	5 779,80	
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 - 5 km	m3	9,88	520,00	5 137,60	
Uložení sypaniny na skládku	m3	9,88	16,40	162,03	
Poplatek za skládku zeminy	m3	9,88	330,00	3 260,40	

Zhutnění podloží - 92 PS n ulehl - 0,8	m2	123,22	20,00	2 464,40	
Poklad stěrkodrť ŠV tl. 200 mm	m2	60,03	205,00	12 306,15	
Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl. 150 mm	m2	123,22	165,00	20 331,30	
Klad dlažby kostky kam drobné do kameniva	m2	123,22	380,00	46 823,60	
Osaz obrub kamen stoj s operou bet	m	5,8	400,00	2 320,00	
Vodor přemíst žul kostek na stavbu - 4 km	t	12,56	265,00	3 328,40	
Nakládání žul kostek na doprav prostředek	t	12,56	129,00	1 620,24	
Silnice kryt dlážd přesun hmot	t	43	250,00	10 750,00	

Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton	m2	12,12	36,10	437,53	
Rozebr dlaž - 200 m2 kostky drobné pís	m2	76,71	25,50	1 956,11	
Odstr podkl - 200 m2 živičných -10 cm	m2	29,7	155,00	4 603,50	
Odstranění pokladů kamenivo těžené	m3	16,13	385,00	6 210,05	
Vytrhání obrub chodníkových	m	22,1	85,30	1 885,13	
Výšková úprava mříže a poklopů	kus	3	1 250,00	3 750,00	
Řeznání živičného krytu hl -10 cm	m	13,95	100,00	1 395,00	
Očist dlaž kostky drobné spáry písek	m2	230,13	22,60	5 200,94	
Vodor přemíst suti na meziskládku -100 m	t	64	42,40	2 713,60	
Vodor přemíst suti na skládku 4 km	t	37,9	396,00	15 008,40	
Uložení suti na skládku bez hutnění	t	37,9	16,40	621,56	
Nakládání překádání suti a vyb hmot	t	32	129,00	4 128,00	
Poplatek za likvidaci živice	t	5,4	300,00	1 620,00	
Poplatek za skládku betonového odpadu	t	6,5	200,00	1 300,00	
Poplatek za skládku podloží ze zpevněné plochy	t	26	200,00	5 200,00	
Poplatek za skládku žulových kostek a štípaných obrubníků (budou zpětně použity)	t	32	50,00	1 600,00	

					 		
Rozebr dlaž - 200 m2 kostky drob kam	m2	2,25	18,40	41,*0	
Vytrhání obrub z krajníků	m	15,5	50,10	776,55	
Odkopávky nepař horn 3 obj -100 m3	m3	1,35	122,00	164,70	
Hloubání rýh šíř - 60 cm horn 3 -100 m3	m3	1,68	541,00	908,88	
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 - 5 km	m3	3,03	850,00	2 575,50	
Uložení sypaniny na skládku	m3	3,03	16,40	49,69	
Základ pásy beton prostý C 16/20	m3	1,68	3 850,00	6 468,00	
Beton základových zdí železový C20/25	m3	0,65	5 000,00	3 250,00	
Bednění základ zdi oboustr zřízení	m2	5,2	600,00	3 120,00	
Bednění základ zdi oboustr odstraň	m2	5,2	300,00	1 560,00	
Výztuž základových zdí ocel 10216	t	0,05	35 000,00	1 750,00	
Osazení oboustran stupňů kamen	m	6,9	1 000,00	6 900,00	
Poklad stěrkodrť ŠV tl. 200 mm	m2	1,6	205,00	328,00	
Poklad štěrkodrť ŠD zhut tl 40 mm	m2	1,6	65,00	104,00	
Klad chodník mozaiky 1 barev do kam	m2	1,6	600,00	960,00	
Osazení obrub kamen stoj s opěrou bet	m	3,5	380,00	1 330,00	
Osazování zábradlí do otvorů	kus	6	850,00	5 100,00	
Odvoz žul obrub na stavbu do 3,5 km	t	0,9	650,00	585,00	
Vodor přemíst suti na skládku - 2 km	t	2,9	201,00	582,90	
Nakládání žul obrub na dopr prostř	.	t	0,9	129,00	116,10	
Uložení suti na skládku bez hutnění	t	2,9	16,40	47,56	
Poplatek za skládku zeminy	m3	3,03	330,00	999,90	
Ocelové pozink. Zábraldí v = 100 cm pro venkotvní schodště	m	4,9	1 330,00	6 517,00	
Obje zvláštní beton přesun hmot	t	1	325,00	325,00	

Zařízení staveniště	%	3	216 473,92	6 494,22	
Celkem bez DPH:	222 968,14

V případě dotazů či nejasností mne prosím kontaktujte.

Radkovská 252 588 56 Telč

Ve výkazu výměr chybí dodávka schodišťových stupňů
mares(S)satescechv.cz
www.satescechv.cz