Title: MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDEK–MÍSTEK
Author: ValkovaM
Last saved by: Ja
Company: Město Frýdek-Místek

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
K veřejné zakázce „Stavební úpravy – MŠ Anenská“

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Mateřská škola Radost, Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
se sídlem: Frýdek-Místek, Anenská 656, PSČ 738 01
zastoupena: Mgr. Natáliou Toflovou – ředitelkou školy 
IČ:    75029774
DIČ: CZ75029774
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 86-5728400237/0100
ID datové schránky: 2rfkq6k
tel.: 603 575 273

dále jen objednatel 

VOJKOVSKÝ -STAVBY s.r.o. 
se sídlem: Ó. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Filipem Vojkovským – jednatelem 
IČ:     07041772
DIČ:   CZ07041772

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany nebo jen strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Stavební úpravy-MŠ Anenská“ z 6. 5. 2026 následujícího znění a obsahu (dále jen „dodatek“).

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě z níže uvedených důvodů:

1.	VCP1) Plastová okna: Realizace tvarově a rozměrově upravených plastových oken na objektech Pavilon A a B včetně rozšiřovacích profilů, dělení skel a parapetů.
Zdůvodnění: Zaměřením po odkrytí ostění/původních prvků byl zjištěn nesoulad projektu se skutečností. Úprava rozměrů a parametrů oken je nezbytná pro jejich řádné osazení, stabilitu a dodržení tepelně-technických vlastností.

2.	MP1) Plastová okna: Odpočet původních typových oken a souvisejícího přesunu hmot z rozpočtu: 14 ks oken 1,5 m², 20 ks oken 2,5 m².
Zdůvodnění: Původně projektované typové prvky neodpovídaly reálným rozměrům otvorů. Z důvodu jejich nahrazení přizpůsobenými okny se v plném rozsahu neprovádějí.

3.	VCP2) Vnitřní dveře: Dodávka a montáž nových vnitřních dřevěných dveří (CPL povrch, plné i prosklené mléčným sklem), ocelových zárubní včetně nátěrů, kování, uzamykacího systému FPS (kufrové/generální klíče) a souvisejících montáží.
Zdůvodnění: Zaměřením skutečného stavu stavebních otvorů a ověřením vnitřních dispozic byl zjištěn nesoulad s projektovou dokumentací. Pro zajištění funkčnosti, požadavků na vnitřní provoz a správné osazení výplní bylo nutné upravit typologii, rozměry a vybavení dveřních prvků.

4.	MP2) Vnitřní dveře: Odpočet původních plastových vchodových dveří, chytrých elektrických zámků, osazení zárubní a přesunu hmot.
Zdůvodnění: Původně projektované plastové dveře a související prvky neodpovídaly reálným dispozicím a požadavkům stavby. Z důvodu jejich nahrazení přizpůsobenými vnitřními dveřmi se původní položky v plném rozsahu vypouštějí.

5.	VCP3) Skutečné výměry: Narovnání výkazů výměr na základě skutečného rozsahu prací spojených s výměnou oken a dveří. Zahrnuje vybourání ŽB říms/parapetů, přisekání ostění, dozdívku světlíků nad dveřmi, zapravení vnitřních omítek, armování a ostění, úpravu luxferů a návazné opravy keramických obkladů vč. přesunu hmot.
Zdůvodnění: Po demontáži původních oken, dveří a zárubní se odhalil skrytý stav ostění, nadpraží a přilehlých konstrukcí. Rozsah poškození a nutných oprav byl vyšší, než předpokládal projekt. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení povrchových úprav a kompletaci otvorových výplní.

6.	MP3) Podlahy a malby: Vypuštění části povlakových podlah, dlažebních přechodových lišt, syntetických nátěrů a maleb (vč. přípravy podkladů a penetrací) z rozpočtu stavby.
Zdůvodnění: Na základě dohody objednatele a zhotovitele došlo ke snížení rozsahu prací z důvodu optimalizace nákladů. Tyto práce byly z této akce vyškrtnuty, jelikož se v daných prostorách plánuje celková koncepční výměna podlah a výmalba v rámci budoucí samostatné etapy pro celý objekt. Jejich realizace v tuto chvíli byla vyhodnocena jako ekonomicky neúčelná.

7.	VCP4) Elektroinstalace: Provedení vyvolaných úprav slaboproudých rozvodů EZS (elektronická zabezpečovací signalizace). Zahrnuje odpojení a demontáž stávajících čidel EZS, úpravu trasy vkládacími lištami, prodloužení a měření kabeláže, úpravu rozvodů, zpětnou montáž, zapojení a odzkoušení funkčnosti systému s techniky.
Zdůvodnění: Při provádění demontáží a stavebních prací spojených s výměnou oken a dveří bylo nutné zasáhnout do stávajících tras čidel zabezpečovacího systému, které byly vedeny v těsné blízkosti vyměňovaných prvků. S těmito kolizemi projektová dokumentace nepočítala. Úpravy kabeláže a přemístění čidel byly nezbytné pro zamezení poškození systému EZS a pro zachování jeho plné funkčnosti během a po dokončení stavby.

Z uvedených důvodů vznikly vícepráce ve výši 137.865,80 Kč bez DPH, které jsou obsahem položkových rozpočtů ke změnovému listu č. 1, které tvoří přílohu dodatku.  

Z důvodu výše uvedených prací dochází k prodloužení DOBY PLNĚNÍ uvedeného v ČLÁNKU 3, odstavec 1. smlouvy a to z 14. 8. 2026 na 21. 8. 2026.

Přípustnost změny

1.	Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem a nutnost zásahů do navazujících konstrukcí a rozvodů (omítky, obklady, EZS) byly zjištěny až v průběhu provádění prací po demontáži původních prvků. Změna podlah a maleb je odůvodněna provozně-ekonomickou optimalizací nákladů.
2.	Přípustnost změn je dána ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), neboť se jedná o dodatečné stavební práce/změny vyvolané nepředvídanými okolnostmi, které jsou nezbytné pro provedení původních prací a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Alternativně je přípustnost dána dle § 222 odst. 4 ZZVZ (změny de minimis), neboť celkový cenový dopad změn nepřekračuje zákonný limit a nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

ČLÁNEK 2
CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 5 smlouvy (Cena díla), odst. 1. takto:  
Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

| Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH
Cena celkem dle SoD | 1.027.250,95 Kč | 215.722,70 Kč | 1.242.973.65 Kč |
Dodatečné práce dle dodatku č. 1 | 137.865,80 Kč | 28.951,82 Kč | 166.817,62 Kč |
Cena celkem | 1.165.116,75 Kč | 244.674,52 Kč | 1.409.791,27Kč |

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 108. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10. 8. 2026.
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2	

- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy dodatečných prací s výkazem výměr ke změnovému listu č. 1 a 2

Ve Frýdku-Místku, dne 10.8.2026

Za objednatele:		                                Za zhotovitele:

Mgr. Natália Toflová-ředitelka  	                	         jednatel