Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 16083/032 „Revitalizace sídliště v
ulici Masarykova Humpolec"
L SMLUVNÍ STRANY
1.1.	Objednatel: Město Humpolec
Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:	Jiří Kučera - starosta města
Květoslav Namyslo - místostarosta města 
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266 / měsíční plátce
Peněžní ústav:    xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
1.2.	Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zápis v OR:	KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Zastoupený:	Petr Suchý - předseda představenstva
IČO:	60932171
DIČ:	CZ60932171
Peněžní ústav:    xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 16083/032 „Revitalizace sídliště v ulici Masarykova Humpolec" je dohoda o:
•	navýšení ceny o cenu provedených víceprací - z důvodu nepředvídatelných podmínek s neúnosným podložím v konstrukci komunikací - parkovišť a nutnosti řešit sanace podkladních vrstev komunikací.
•	Prodloužení termínu dokončení díla díky této změně a prodloužení dokončení díla - SO 05 Sadové úpravy ve vhodném klimatickém období.

2
Cena díla dle dodatku č. 1
Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí:
Cena dle SOD 16083/032	4184 037,00 Kč
Celkem za dodatek č. 1	770 886,00 Kč
Celkem SOD + dod č.l bez DPH	4 954 923,00 Kč
Vymezení lhůt dle dodatku č.1
1. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje do 10.9.2017 1. Lhůta pro dokončení sadových úprav se prodlužuje do 31.10.2017
Ostatní ujednání
1.	Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „Revitalizace sídliště v ulici Masarykova Humpolec”
zůstávají v nezměněné podobě.
2.	Tento dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

Jiří Kučera,starosta města Humpolec                           Petr Suchý,předseda představenstva,
                                                                                      Chládek a Tintěra,Havlíčkův Brod       

Květoslav Namyslo,místostarosta města Humpolec

V Humpolci dne: 22.9.2017

Za zhotovitele:

V Havlíčkově Brodě dne: 18.9.2017

Za objednatele:

Celkem VP a MP k dodatku č.l
Stavba
Objekt	Rekonstrukce sídliště Masarykova v Humpolci SO 01B - zpevněné plochy	

	
1	Parkoviště před čp. 78,79 VP,MP	246 912,10	
2	Parkoviště před čp. 75 - 75	523 973,90	
			
	CELKEM bez DPH	770 886,00	

Stavba:
Objekt:	Rekonstrukce sídliště Masarykova v Humpolci před čp. 78,79 SO 01B - zpevněné plochy	
	
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství cena / MJ celkem (Kč)	
	
Díl:	1	Zemní a bourací práce				281173,60	
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	141,05	162,75	22 955,89	
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	141,05	58,70	8 278,93	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	141,05	126,00	17 772,30	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	141,05	13,65	1 925,33	
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	225,68	120,00	27 081,60	
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	403,00	10,50	4 231,50	
7	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie ski. Do 1:5, š. Do 7,5 m	m2	403,00	14,70	5 924,10	
8	67352024R	Geotextilie tkaná PK-Tex PP 40	m2	403,00	24,15	9 732,45	
9	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	403,00	44,30	17 852,90	
10	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	403,00	170,0	68 510,00	
11	564831111Podklai	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	403,00	75,3	30 345,90	
12	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	403,00	144,00	58 032,00	
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	253,89	33,60	8 530,70	
Díl:	5	Známé méněpráce	-34 261,50	
14	767 92-0220/00	Vrátka oploc na sloupky ocel pl -4m2	kus	-5,00	1 575,00	-7 875	
15	767 01-1111	Ocelová dvoukřídlová 1,5x1,5m, žárově zinkovaná branka	ks	-5,00	5 277,30	-26 387	
Celkem	246 912,10	

Stavba:
Objekt:	Rekonstrukce sídliště Masarykova v Humpolci před čp. 75 - 75 SO 01B - zpevněné plochy	
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství cena / MJ celkem (Kč)	
Díl:	1	Zemní a bourací práce				523 973,90	
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	229,25	162,75	37 310,44	
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	229,25	58,70	13 455,83	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	229,25	126,00	28 885,50	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	229,25	13,65	3 129,26	
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	366,80	120,00	44 016,00	
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	655,00	10,50	6 877,50	
7	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie ski. Do 1:5, š. Do 7,5 m	m2	655,00	14,70	9 628,50	
8	67352024R	Geotextilie tkaná PK-Tex PP 40	m2	655,00	24,15	15 818,25	
9	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	655,00	44,30	29 016,50	
10	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	655,00	170,0	111 350,00	
11	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	655,00	75,3	49 321,50	
12	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	655,00	144,00	94 320,00	
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	415,65	33,60	13 965,84	
14	608128420	pražec dřevěný příčný 2A DB dl.250 cm 1	kus	3,00	2020,00	6 060,00	
15	544115311	Osazení příčných pražců dl. l,5m dřevěných	kus	5,00	256,00	1 280,00	
16	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu p	m3	0,75	2730,00	2 047,50	
17	00090N	Náklady na provizorní suchovody - Montáže PE	kpl	1,00	12499,78	12 499,78	
18	00050N	Potrubí DN 50	m	125,00	91,00	11 375,00	
19	00060N	T kus DN50	ks	7,00	240,00	1 680,00	
20	00070N	Koleno DN 50 90°	ks	13,00	180,00	2 340,00	
21	00080N	DG DN 50	ks	2,00	156,00	312,00	
271	00003R	Osazení litinových mříží s rámem hmotnosti do 150 kg	kus	5,000	525,00	2 625,00	
271	M00012	Litinový rám tř. D400	kus	5,000	892,50	4 462,50	
271	M00013	Litinové víko - mřiž tř. C250	kus	5,000	2 205,00	11 025,00	
271	895941311	Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
271	M00006	UV betonové prvky - vyrovnávací prtenec pro mříž 50/50 cm	kus	2,000	126,00	252,00	
271	M00007	UV - vtoková mříž 50/50 cm, třídy C 250	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
271	M00008	UV - kalový koš 50/50 cm, žár. zinkovaná ocel	kus	2,000	630,00	1 260,00	
Celkem	523 973,90