Smlouva o dílo
uzavřená dle §2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a
doplňků, na provedení stavby
1.	Smluvní strany
Zhotovitel:
Humpolecká stavební s.r.o., právnická osoba
Zastoupený: Miroslav Novák, jednatel firmy s místem podnikání: Na Závodí 160, 396 01 Humpolec 
1Č: 281 58 164 DIČ: CZ281 58 164 
Kontaktní osoba pro věci technické: Miroslav Novák (dále jen zhotovitel)
Objednatel:
Město Humpolec, Městský úřad v Humpolci
Zastoupený: Mgr. Jiří Kučera, starosta, ing. Květoslav Namyslo, místostarosta Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
IČ 248266
Kontaktní osoba pro věci technické: Jaroslav Vaňkát, (dále jen objednatel)
2,	Předmět díla
2.1.	Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Úprava a údržba sociálního zařízení domu č.p. 301 v Humpolci“včetně výkazu výměr a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
2.2.	Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a)	výše uvedenou projektovou dokumentací
b)	příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
c)	touto smlouvou s výkazem výměr (slepý rozpočet)
2.3.	Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,dodávky,služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení.dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl třeba. Veškeré vybourané hmoty zjhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne s investorem, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Objednatel poskytne na své náklady el.energii, vodu, zhotovitel si zařídí soc.zařízení pro pracovníky. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu smlouvat dle potřeby s investorem. Práce musí být přizpůsobeny potřebám investora. Při provádění vlastních prací budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
2.4.	Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak. aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků.Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
2.5.	Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu díla mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných RTS Brno a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.
2.6.	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných RTS Brno a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
2.7.	Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 5% celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
2.8.	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy
2.9.	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
2.10.	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami, a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5. této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.11.	Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
2.12.	Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Objednatel si vyhrazuje právo omezení subdodávek stavebních prací. Realizace stavebních prací třetí osobou (subdodávky) je možná pouze do 20% celkového finančního rozsahu předmětu díla.
3.	Termín plnění - staveniště
3.1.	Místem plnění dům č.p. 301 Horní náměstí, Humpolec.
3.2.	Práce budou zahájeny září 2016
3.3.	Předmět díla bude dokončen do 31. října 2016
3.4.	Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý z prvních deseti kalendářních dní prodlení. Z každý další započatý kalendářní den prodlení bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu nedodržením termínu dokončení stavby.
3.5.	Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3.6.	Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
3.7.	Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3.8.	Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.
3.9.	Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak. aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
3.10.	Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
4.	Cena za dílo
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
Cena bez DPH:	576.671.00	Kč
DPH 15%:	121.101,00	Kč
Cena celkem s DPH činí:	697.772,00	Kč
5.	Financování
5.1.	Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace,veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
5.2.	Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.
5.3.	Provedené práce budou fakturovány dle dohody. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na soupisu provedených prací - zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.Provedené práce bude objednatel hradit na základě dílčích faktur maximálně do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla a po odstranění případných vad, nedostatků a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla na základě konečné faktury. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla; pokud stavba bude vykazovat vady a nedodělky, pak do 14 dnů po jejich odstranění dle protokolu o předání a převzetí díla.
5.4.	Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli.
5.5.	Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Úprava a údržba sociálního zařízení domu č.p. 301 v Humpolci".
5.6.	Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,1% fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5.7.	V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
Článek 6.
Platební podmínky a fakturace
6.1.	Fakturace za provedené práce bude provedena po předání a převzetí díla nebo jeho částí dle jednotlivých ukončených dílů rozpočtu na základě zjišťovacích protokolů provedených a odsouhlasených prací oběma smluvními stranami do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z celkové ceny díla bude investorem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů.
6.2.	Splatnost faktur se stanoví na 30 dnů ode dne doručení.
Článek 7.
Odpovědnost za vady
7.1.	Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, tj. k prezentaci historie široké veřejnosti a bezpečnému pohybu návštěvníků, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.
7.2.	Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době v délce 60 měsíců, u dodaných výrobků se záruka řídí dle záruk jednotlivých výrobců. Záruční doba počíná plynout okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.
7.3.	Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý týden, o který zhotovitel nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad a to za každou vadu samostatně. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
7.4.	Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty die Cl. 8.3.. této smlouvy, podle vlastního uvážení pověřit provedením těchto prací jinou společnost nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
7.5.	V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.
7.6.	Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu provozování zařízeni objednatelem způsobem, který není v souladu s provozním předpisem výrobce.
Článek 8.
Smluvní pokuty
8.1.	Za nesplnění termínů dle čl. 4., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu. Ta činí 1.000,-Kč za každý započatý z prvních deseti kalendářních dní prodlení. Za každý další započatý kalendářní den prodlení bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč.
8.2.	V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
8.3.	Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.
Článek 9.
Náhrady škody
9.1.	Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.
Článek 10.
Podmínky splnění díla
10.1.	Zhotovitel komplexně odpovídá za provedeni díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňo\at účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení. K finálnímu převzetí budou doloženy doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby dle stavebního zákona, nezbytné pro kolaudační řízení.
10.2.	Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhoto', itel. Jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.
10.3.	Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v či. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a nedodělků a to jak faktických, tak i právních ajeho předáním objednateli v místě plnění dila dle čl. 3, bodu 3.1.
10.4.	Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Možné je předání samostatných ukončených částí díla
Článek 11.
Stavební deník
11.1.	Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat a škrtat, dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku investorovi.
11.2.	Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
Článek 12. Staveniště
12.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště. Vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel - vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních pří stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.
12.2.	Rozsah staveniště je vymezen jednotlivými plochami požadovaných stavebních úprav.
12.3.	Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
12.4.	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
12.5.	Objednatel určí místa připojení energii a vody.
12.6.	Zhotovitel je povinen zajistil svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel na své náklady.
12.7.	Zhotovitel vyklidí staveniště včetně odpadů a stavebního materiálu pocházející z jeho činnosti nejpozději do 14.11.2016, pakliže se smluvní strany předem nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel vdaném termínu nevyklidí staveniště, je objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady a odpovědnost zhotovitele, v daném případě objednatel neručí za případné škody s tímto spojené.
Článek 13.
Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody
13.1.	Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.
Článek 14.
Odstoupení od smlouvy
14.1.Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dnů.
14.2.Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele či zhotovitel vstoupil do likvidace.
14.3.	V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladu.
Článek 15.
Ostatní obchodní podmínky
15.1.	Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání, narušujícího hospodářskou soutěž.
15.2.	Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích a závazných stanoviscích, vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.
15.3.	Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku hradí ze swých prostředků.
15.4.	Výkonem technického dozoru za objednatele byl pověřen Jiří Fiala, který je oprávněn kontrolovat provádění
díla v rozsahu:
- zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, zadávací dokumentací, kvalitě odpovídající památkové obnově nemovité kulturní památky, a obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky.
15.5.	Zhotovitel souhlasí se zveřejnění této smlouvy a případných dalších informací v neanonymizované podobě v Informačním systému registru smluv, vedeným MV ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném změní, popřípadě na veřejném portálu zadavatele.

Článek 17. Vyšší moc
17.1.	Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
17.2.	Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatřeni, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
17.3.	Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
17.4.	Strana, která uplatňuje vyšší moc. je povinna bez prodlení pásemně informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Obdobně musí být sdělen okamžik ukončení události.
17.5.	Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
17.6.	Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.
17.7.	Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.
Článek 18.
Závěrečná ustanovení
18.1.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy- je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
18.2.	Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
a)	ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
b)	ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
c)	ust. § 564 věty za středníkem tykající se sjednané právní formy právního jednání,
d)	ust. § 1740 odst. 3 týkající se tzv. modifikované akceptace,
e)	ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,
f)	ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
g)	ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.
18.3.	Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
18.4.	Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
18.4.	Tato smlouva nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V Humpolci dne 2. září 2016

Jiří Kučera
starosta města

Květoslav Namyslo
místostarosta města

V Humpolci dne 2. září 2016

Miroslav Novák
Jednatel firmy