Z M Ě N O V Ý   L I S T:	1/2016	ze dne 22. 9. 2016		
STAVBA:	MUZEUM SLANÝ - REKONSTRUKCE KOTELNY		

Číslo smlouvy objednatele:	414/2016/OSM		
Oznámení změny ve SD, strana:	č.1 list č. 003960, 003961		

Název části PD ( číslo výkr.) :	---		
Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):		

Vícepráce: byly zapříčiněny skutečnostmi, které nebylo možno při projektování předpokládat (dodatečný požadavek provozovatele kotelny na oddělení vytápěcího okruhu knihovny od okruhu muzea a úprava regulace pro tři vytápěcí okruhy).

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano	-	ne		
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano	-	ne		
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano	-	ne		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	-	ne		
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:		---			
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		---			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	-	ne		
Méněpráce bez DPH:	0,00 Kč		
Vícepráce bez DPH:	106 446,16 Kč		
Rozdíl (navýšení původní ceny o částku) bez DPH:	106 446,16 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	-	ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2016		
Nový termín dokončení díla:		---			
Odsouhlasil:					
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:	Podpis:				
			
Z-therm, spol. s r.o.	Pavel Charvát		
Zástupce objednatele ve věcech technických:	Podpis:				
Město Slaný			
	Jiří Leopold		
	Podpis:				
			
	Richard Jankovič		
Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):	Jiří Leopold				
Datum: 22.09.2016	Podpis:				
					
Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):	xxx				
Datum:	Podpis:				
Přílohy změnového listu:					

rozpočet (4 A4)					

					

bez DPH			s DPH		
	%	10,73			
992 275,92	100		1 200 653,86		
		106 446,16	128 799,85	0,00	
1 098 722,08			1 329 453,72