Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13.6.2017

České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem na adrese: Zikova 4, 166 36 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Jan Gazda, Ph.D., kvestor
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
(„objednatel“)

a

BÁČA Polička s.r.o.
se sídlem na adrese, P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11430
IČ: 25268422
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Oldřich Báča, jednatel
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(„zhotovitel“)

1.	Předmětem stavebních prací je rekonstrukce střešní krytiny Betlémské kaple a předpokladem objednatele bylo provádění prací zhotovitelem v době, kdy v Betlémské kapli nebudou probíhat žádné akce objednatele. Ve skutečnosti však docházelo často k přerušování prací objednatelem právě z důvodu konání akcí v Betlémské kapli, což bylo zdokumentováno zápisy ve stavebním deníku.
2.	Z uvedeného důvodu stavební práce nemohly být provedeny podle harmonogramu, který byl součástí uzavřené smlouvy. Objednatel proto požádal zhotovitele o vypracování harmonogramu provádění prací se zohledněním uvedené skutečnosti i přerušení prací v zimním období.
3.	Tímto dodatkem se strany dohodly na nahrazení harmonogramu, který byl součástí původní smlouvy novým harmonogramem, který je součástí tohoto dodatku. Tato změna není podstatnou změnou závazku.
4.	Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v letech 2017 a 2018 se mění takto:

V roce 2017: 	investice		2 669 888 Kč bez DPH
						   560 676 Kč 21% DPH
						3 230 564 Kč vč. DPH

V roce 2018:		investice		7 045 532 Kč bez DPH
						1 479 562 Kč 21% DPH
						8 525 094 Kč vč. DPH

			neinvestice		   239 604 Kč bez DPH
						     50 317 Kč 21% DPH
						   289 921 Kč vč. DPH

5.	Žádné jiné ustanovení smlouvy se nemění.
6.	Tento dodatek je vyhoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V __________ dne __________			V _________ dne ________

________________________			_________________________