I
Dodatek č.l ke smlouvě o dílo
16081/032 „ZTV pro rodinné domy ul. Blanická,
Humpolec - I. etapa“

I.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Humpolec
Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396	22 Humpolec
Zastoupené:	Jiří Kučera - starosta města
Květoslav Namyslo – 
místostarosta města
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266 
Peněžní ústav: xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zápis v OR:	KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Zastoupený:	Petr Suchý - předseda představenstva
IČO:	60932171
DIČ:	CZ60932171
Peněžní ústav: xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 16081/032 „ZTV pro rodinné domy ul. Blanická,
Humpolec - I. etapa “ je dohoda o:
•	Dohoda o změně termínu dokončení díla.
•	Navýšení ceny o cenu provedených víceprací a odečet neprovedených prací
•	Prodloužení záruky z odpovědnosti za vady
•	Upřesnění délky záruční doby na kanalizaci

Termín plnění dle dodatku č. 1
Prodloužení termínu provedení díla (dle bodu III.2. Smlouvy o dílo) se nově stanovuje na 08.12.2017.

Cena díla dle dodatku č. 1

Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo (dle bodu IV. 1.) Smlouvy o dílo činí:
Cena dle SOD 16081/032 (bez rezervy)

Celkem za dodatek č. 

20 855 727,55 Kč
362 080,86 Kč

21 217 808,41 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH

2
FINANCOVÁNÍ
Prodloužení doby záruční listiny (dle bodu V.7. Smlouvy o dílo) se nově stanovuje na dobu 7 let. Smluvní strany se dohodly na vystavení bankovní záruky na 7 let s tím, že bude v sedmém roce bankovní záruka automaticky prolongována (prodloužena) o 1 rok za předpokladu splnění podmínek banky.
OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII..ll. Záruky:
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kanalizaci v délce 96 měsíců. V letech 2019, 2021, 2023, 2025 bude proveden kamerový monitoring kanalizační sítě vždy k 1.11. daného roku. Dodavatele monitoringu vybere objednatel, náklady spojené s monitoringem hradí zhotovitel.
Dojde-li ke zhoršení stavu kanalizační sítě oproti jejímu stavu dle kamerového monitoringu z roku 2017 vyhotovené společností Zdeněk Pečenka Čištění a monitorování kanalizace bude se jednat o novou vadu díla a objednatel bude mít všechna práva vyplývající z vadného plnění.
Bude-li kanalizační síť po provedení posledního kamerového monitoringu v roce 2025 v provozu schopném stavu, tj. odpovídajícímu alespoň stavu kanalizační sítě dle kamerového monitoringu z roku 2017 vyhotoveného společností Zdeněk Pečenka Čištění a monitorování kanalizace, nejedná se o vadu plnění.
Ostatní ujednání
1.	Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „ZTV pro rodinné domy uL Blanická, Humpolec - I.
etapa“ zůstávají v nezměněné podobě.
2.	
Za objednatele:
 V Humpolci dne: 30.10.2017

Jiří Kučera, starosta města Humpolec                                       Petr Suchý, předseda představenstva,           
                                                                                                   Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod

Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolec

Za zhotovitele:
V Havlíčkově Brodě dne: 30.10.2017

Tento dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.