DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen ,,OZ“), v platném znění,
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel,
Město Humpolec, IČ 248266, zástupci:
starosta města Jiří Kučera a místostarosta Květoslav Namyslo
sídlo: Městský úřad Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec
Bankovní spojení: xxxxx
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel,
TREBILIFT, s.r.o	IČ: 255 05 734
Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč	DIČ: CZ25505734
zástupce:
Roman Němec, jednatel
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se smlouvy a technického řešení Vlastimil Němec, vedoucí úseku realizací
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se technického řešení Bankovní spojení: xxxxx
Tel./fax: 568 820 150
Společnost zapsána v OR u KS Bmo, oddíl C, vložka 28624
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
takto:
I
Předmět dodatku smlouvy
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna článku V.

II - Popis díla - beze změny 
III - Cena - beze změny IV - Platební podmínky - beze změny
V
Doba plnění
1. Na základě dohody pro zajištění aktuálního provozu v objektu bude termín realizace:
13. II.-18.12. 2017
VI - Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví - beze změny
VTI - Závazky objednatele a zhotovitele - beze změny
VIII - Splnění závazku zhotovitele - beze změny
IX - Smluvní pokuta - beze změny
X - Změny smlouvy, odstoupení - beze změny
XI
Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2
exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
2.	Tento dodatek smlouvy o dílo je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran. Oprávnění
zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 Humpolci dne 13. 11. 2017 

Jiří Kučera, starosta města Humpolec                     Květoslav Namyslo, místostarosta Humpolec

Roman Němec, jednatel Trebilift s.r.o.