Spisový znak.podznak – 56.7, skartační znak/skart. lhůta – S/10
Spisová značka: S-SMOL/289854/2017/OZP	Č. j.: SMOL/289854/2017/OZP/PZ/Stj
SMLOUVA O DÍLO
na kácení, výsadbu a následnou údržbu dřevin 
„Zelená brána města Olomouce“
č. OZP-PZ/NVY/003390/2017/Stj

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I.	Smluvní strany

Objednatel:	  	statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
zastoupené primátorem města Olomouce doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.
IČ: 00299308 			      DIČ: CZ00299308
-   zástupce ve věcech smluvních:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora
tel.: 585 513 329, e-mail: ales.jakubec@olomouc.eu 
- zástupce ve věcech technických:
Ing. Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení péče o zeleň, odbor životního prostředí MMOl
tel.: 588 488 355, fax: 588 488 356, e-mail: jitka.stepankova@olomouc.eu
Ing. Lucie Vingrálková, odborný referent oddělení péče o zeleň, odbor životního prostředí MMOl, 
tel.: 588488359, fax: 588 488 313, e-mail: lucie.vingrálkova@olomouc.eu
Ing. Dita Labounková, odborný referent oddělení péče o zeleň, odbor životního prostředí MMOl, 
tel.: 588488359, fax: 588 488 313, e-mail: dita.labounkova@olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
č.ú. projektu:  6994042/0800

Zhotovitel:	Název společnosti	Florstyl s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání 	Panská 25, 686 04 Kunovice
IČ: 60731346		DIČ: CZ60731346
	- zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel	
tel.:	, fax:	, e-mail:	  ID schránky: ati6puk
- zástupce ve věcech technických:
Klíčový odborník č. 1: Ing. Pavel Stalčík
tel.:                  , e-mail:	
Klíčový odborník č. 2:  Ing. Helena Lavická, 
tel.:                  , e-mail: 

Klíčový odborník č. 3: Antonín Ambros
tel.:                     , e-mail:		
Klíčový odborník č. 4: Ing. Pavel Stalčík
tel. :
ID datové schránky: ati6puk	
Bankovní spojení: 
č.účtu:   

II.	Předmět  plnění

1.	Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla s názvem „Zelená brána města Olomouce“, spočívající v ošetření a kácení dřevin, výsadbě dřevin a trvalek včetně následné 3leté péče v souladu  s:
a)	touto smlouvou a jejími přílohami,
b)	projektovou dokumentací zpracovanou společností MORAVOPROJEKT s.r.o., IČ 286 22 685, sídlem Tršice 18, PSČ 78357 s názvem Zelená brána města Olomouce, z 9/2016, která obsahuje výkresovou část a technickou zprávu a soupis prací vč. výkazu výměr, 
c)	dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích a tyto budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny,
d)	s ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce,
e)	dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, zejména ČSN 839011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 46 4901 – Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin, standardy AOPK : SPPKD-02-001-2013 – Výsadba stromů, SPPKD-02-002-2015 – Řez stromů,
f)	zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 16156 s názvem „Zelená brána města Olomouce“ uveřejněnou na profilu zadavatele.
2.	Navržené dřeviny musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma, při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí, velikosti ochranných pásem jsou uvedeny: Arboristický standard SPPK 02 002:2012 Řez stromů, Arboristický standard SPPK 02 003:2014 Výsadba a řez keřů, Arboristický standard SPPK 02 001:2012 Výsadba stromů – www.standardy.nature.cz,
3.	Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin a dle přílohy č. 3 této smlouvy.
4.	Případné změny projektu v průběhu realizace budou předem konzultovány s objednatelem a odsouhlaseny AOPK ČR, RP Olomoucko.
5.	Před zahájením prací bude provedena odborná biologická kontrola se zaměřením na aktuální výskyt organismů zvláště chráněných podle zákona 114/1192 Sb. vázaných na dřeviny. V případě nálezu těchto organismů na dřevinách určených k ošetření či asanaci budou práce na těchto dřevinách přerušeny a další postup stanoví příslušný orgán ochrany přírody podle tohoto zákona. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli.
6.	Správnost realizace projektu bude garantována autorským dozorem, kterého objedná objednatel samostatně. Zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění včetně způsobu a postupu budou zapisovány do stavebního deníku. 
7.	Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné, aby zhotovitel zajistil následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standarty. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě, proto je preferovaná výsadba dřevin (především stromů) hlavně v podzimních měsících..
8.	Součástí předmětu plnění je následná tříletá povýsadbová péče (dále jen „následná péče“). Technologie následné péče bude respektovat platnou ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy) a v rámci ní bude proveden objem prací uvedený v oceněném soupise prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
9.	Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat druhu a kvalitě výpěstku dle projektové dokumentace s tím, že dosazovaný rostlinný materiál (stromy, keře, bylinné patro – trvalky) bude mít velikostní parametry odpovídající velikosti původně vysazeného rostlinného materiálu zapěstovaného na stanovišti od doby výsadby do doby, kdy dojde k náhradní dosadbě.
10.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
11.	Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací nezbytných pro řádné dokončení díla tak, jak je popsáno v projektové dokumentaci. 
12.	Členění díla je zřejmé z položkových rozpočtů, které jsou součástí projektové dokumentace, a který s technickými zprávami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).
13.	Na realizaci projektu Zelená brána města Olomouce byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat povinnosti uvedené v článku VIII. této smlouvy.

III.	Termín plnění

1.	Místa plnění jsou vymezena v projektové dokumentaci specifikované v čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy, jenž byla dána zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Místa plnění budou zhotoviteli protokolárně předána 04.01. 2018, zhotovitel se zavazuje místa plnění převzít.                                                                                  
2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo dle následujících termínů: 
Zahájení díla, přípravné práce od 04. 01. 2018,
Kácení dřevin – zahájení od 04.01. 2018, dokončení do 30.04. 2018, 
Ošetření dřevin - 12. 02. 2018 do 15.03.2018,
Výsadba stromů ve vhodných klimatických podmínkách mimo letní období - od 15.03.2018 do 31.05.2018
Výsadba kontejnerovaných keřů – zahájení od 15.03.2018, dokončení do 30.04.2018
Výsadba trvalkových záhonů s kontejnerovanými keři – zahájení od 01.09. 2018, dokončení do  15. 09. 2018.
3.	Od prvního protokolárního převzetí zcela dokončené provedené výsadby proběhne následná tříletá péče s ukončením nejpozději do 15.09. 2021.

IV.	Cena díla 
	
1.	Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši         2 664 971,- Kč bez DPH, to je 3 224 615,- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 této smlouvy. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou. 
2.	Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3.	V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel bude fakturovat cenu vč. DPH se sazbou DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.	Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
5.	Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
6.	Záloha na cenu díla se nesjednává.
7.	Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nebude zhotovitel uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

V.	Platební podmínky

1.	Platby budou prováděny jednorázově, bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
2.	Platba ceny za provedené přípravné práce a ošetření dřevin v souladu s přílohou č.1 této smlouvy, Položkový rozpočet, bude provedena na základě samostatné faktury a protokolu o provedených pracích odsouhlasených objednatelem. Faktura bude vystavena samostatně pro ulici Kosmonautů a samostatně pro ulici Lipenská s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady.
3.	Platba ceny za provedené výsadby dřevin v souladu s přílohou č.1 této smlouvy, Položkový rozpočet, bude provedena na základě samostatné faktury a protokolu o provedených pracích odsouhlasených objednatelem. Faktura bude vystavena samostatně pro ulici Kosmonautů a samostatně pro ulici Lipenská s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady.
4.	Platba ceny za výsadby trvalek na ulici Kosmonautů v souladu s přílohou č.1 této smlouvy, Položkový rozpočet, bude provedena na základě samostatné faktury a protokolu o provedených pracích odsouhlasených objednatelem.
5.	Platba ceny za realizaci a následnou péči v souladu s přílohou č.1 této smlouvy, bude provedena ve čtyřech ročních splátkách v letech, 2018, 2019, 2020 a 2021 dle skutečně provedených prací na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena, po provedení kontrol a odsouhlasení provedené údržby za každý kalendářní rok provedení následné péče, nejpozději do 1. 12. a doručena na Magistrát města Olomouce nejpozději do 5.12. daného roku (přičemž výše první a čtvrté platby se bude odvíjet od termínu zahájení díla a objemu prací provedených v roce 2018 od dokončení výsadby do konce roku 2018 a v roce 2021 od začátku roku do dne předání výsadeb vlastníkovi pozemku 2. předávacím  protokolem). Poslední faktura za provedenou následnou péči bude vystavena v posledním kalendářním roce následné péče po provedení kontrol a odsouhlasení provedené údržby vegetačních ploch. Faktury budou vystaveny samostatně pro ulici Kosmonautů a samostatně pro ulici Lipenská s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady.
6.	Lhůta splatnosti faktur je do 30 dní od jejich prokazatelného obdržení objednatelem. 
7.	Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 4 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Zelená brána města Olomouce“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000205. 
8.	Faktury musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

VI.	Práva a povinnosti smluvních stran

1.	Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli místo plnění a projektovou dokumentaci v listinné podobě v 1 vyhotovení.
2.	Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla včetně termínů plnění. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy  k objednatelem i poskytovatelem dotace odsouhlaseným změnám na realizovaném díle s tím, že zhotovitel v návrhu dodatečných prací nebo méněprací uvede stručný, ale přesný technický popis dodatečných prací nebo změn díla,   jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh  na zvýšení nebo snížení  ceny. Veškeré změny oproti projektu je zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit předem s autorským dozorem a objednatelem a zavazuje se postupovat při uvedených změnách v souladu s pokyny objednatele.
3.	Klíčoví odborníci uvedení v čl. I. této smlouvy se budou podílet na provádění díla. Výměna těchto klíčových odborníků, podléhá výslovnému souhlasu objednatele, kdy nový klíčový odborník musí splňovat stejná kvalifikační kritéria jako v rámci výběrového řízení, a to předložením min. maturitního vysvědčení v oboru zahradnictví nebo lesnictví nebo vysokoškolského diplomu absolventa vysoké školy oboru zahradnictví, lesnictví,  nebo agronomie případě ekologie a dále tato osoba musí mít min. 5letou praxi v oblasti zakládání a údržby zahradnických výsadeb (doloží profesním životopisem včetně zakázek, na kterých se spolupodílel).
4.	V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady za dodávky či práce, které zhotovitel nedodal či neprovedl v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis)  a vrátit cenu zpět nebo předmětné dodávky či práce dodat či provést dle povahy konkrétního případu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době.
5.	Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000.000,- Kč. Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k povaze díla vč. krytí škod na životním prostředí, a to zejména na zdraví, životě a majetku objednatele    a třetích osob. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
6.	Průběh díla, po celou dobu jeho realizace, bude dozorovat autorský dozor objednaný objednatelem díla.
7.	Zhotovitel je povinen vést stavební deník, jednat v součinnosti a dle pokynů autorského dozoru, řídit se projektovou dokumentací a instrukcemi autorského dozoru a objednatele, které budou zapsány ve stavebním deníku. Stavební deník bude nedílnou součástí fakturace. Stavebním deníkem se pro účely této smlouvy rozumí souhrn záznamů        o díle vedených v režimu podobném a přiměřeném stavebním předpisům.
8.	V rámci realizace výsadby a následné tříleté péče (ode dne prvního předávacího protokolu jednotlivých splněných výsadeb) nesmí dojít k mechanickému poškození samotných vysazovaných dřevin a bylin ani  stávajících dřevin v řešených lokalitách třídy Kosmonautů a ulice Lipenská. V případě poškození okolní vegetační plochy, v rámci     realizace výsadby nebo následné péče o nově vysazené dřeviny a trvalkové záhony, je zhotovitel povinen poškozené vegetační plochy uvést do řádného stavu, tzn. urovnat terén, přebytečné odkopky z výkopů výsadbových jam odvézt nebo přebytečnou ornici po dohodě s objednatelem rozprostřít v rámci okolních vegetačních ploch, veškeré tyto upravované plochy oset travním osivem a předat do správy a údržby objednateli po provedení seče plně zapojeného travního porostu bez dvouděložných a jednoděložných plevelů.
9.	Zhotovitel se v rámci přípravných prací, výsadby dřevin a štěrkových záhonů, včetně následné povýsadbové péče     o ně, zavazuje dodržet pracovní postupy a objem prací včetně použitého pomocného materiálu dle příloh č.1, č.2 a č.3  této smlouvy.
10.	Objednatel si vyhrazuje právo na účast při vlastním výběru individuálních stromů před expedicí. Původ rostlin musí být z klimatického regionu podobného podmínkám místa plnění v České republice, to jest Olomouci.

VII.	Způsob provádění díla, záruční doba

1.	Pro účely realizace předmětu plnění bude protokolárně předáno místo plnění objednatelem zhotoviteli v termínu dle této smlouvy.
2.	V průběhu realizace předmětu plnění je pověřen objednatelem ke kontrole provádění této části díla mimo jiné autorský dozor. Objednatel je oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly provádění díla (výsadby dřevin i následné péče). V případě, že objednatel zjistí na straně zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je povinen provést nápravu v souladu s pokyny a termíny stanovenými objednatelem v písemné výzvě odeslané objednatelem zhotoviteli doporučenou zásilkou, nebo elektronicky. Pokud  tuto nápravu zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn  uložit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. této smlouvy.
3.	V průběhu realizace předmětu plnění budou konány kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, autorského dozoru a zástupce zhotovitele. Z těchto kontrolních dnů pořídí zhotovitel zápis do stavebního deníku.
4.	Zhotovitel se zavazuje oznámit pracovníkům objednatele (tj. oddělení péče o zeleň odboru  životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Ing. Jitka Štěpánková, tel.: 588 488 355, Ing. Lucie Vingrálková, tel.: 588 488 359) termín  ukončení výsadbových prací z důvodu prvního protokolárního převzetí dřevin a trvalkových záhonů s bylinným patrem. Od okamžiku prvního protokolárního předání začíná běžet následná péče. Prvním protokolárním předáním vznikají zhotoviteli zejména povinnosti uvedené v článku II. odst. 9 této smlouvy, tj. starat se náležitě o realizované výsadby a po uplynutí následné péče je předat podruhé protokolárně objednateli do údržby. 
5.	Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat název projektu a registrační číslo projektu: Zelená brána města Olomouce, CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000205.
6.	Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 36 měsíců počínající běžet ode dne prvního protokolárního převzetí díla objednatelem.
7.	Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
8.	Po uplynutí záruční doby, proběhne druhé protokolární předání výsadeb (dřevin a trvalkových záhonů), kdy veškerý rostlinný materiál musí být na stanovišti zapěstovaný, kvalitní, zdravý. Veškerý rostlinný materiál musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných výsadeb včetně doby s uloženou následnou údržbou. Zálivkové mísy u stromů a záhony keřů musí být dostatečně zamlčované a v bezplevelném stavu. Štěrkové záhony trvalek musí být v bezplevelném stavu plně zapěstované s dostatečnou vrstvou štěrkového mulče.
9.	V případě, že v průběhu záruční doby rostlinný materiál uhyne z důvodu zanedbání povinností zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 9 této smlouvy, má zhotovitel povinnost náhrady novými sazenicemi (nové výsadby) na vlastní náklady. 
10.	Na rostlinný materiál prokazatelně poškozený či zničený vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady.
11.	Zhotovitel se zavazuje odstranit vady předmětu plnění do sedmi dnů od oznámení vad objednatelem, případně nahradit zničené dřeviny bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro tyto účely je zhotovitel povinen zajistit požadovanou velikost i kvalitu rostlinného materiálu v souladu s čl. II. této smlouvy.
12.	Zhotovitel je povinen v průběhu výsadby a následné péče provádět fotodokumentaci zrealizovaných výsadeb, a to minimálně 1x měsíčně. Fotodokumentace musí spolehlivě dokumentovat prováděné práce (realizaci výsadby i následné péče o realizované vegetační plochy) a hlavně aktuální stav výsadeb. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně odeslat objednateli na jeho e-mail (Ing. Štěpánkové, Ing. Vingrálkové nebo Ing. Labounkové).

VIII.	Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1.	Realizace projektu s názvem „Zelená brána města Olomouce“ je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. 
2.	Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podklady týkající se díla pro zpracování monitorovacích zpráv.
3.	Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech, nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací projektu.
4.	Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Úřad pro boj proti podvodům, popřípadě jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. 
5.	Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám, provedení kontroly účetní (daňové) evidence použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky, nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. 
6.	Zhotovitel je v případě dotovaného díla povinen archivovat veškeré doklady související s realizací akce a jejím financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení závěrečné platby, nejméně však do konce roku 2031.
7.	Zhotovitel se zavazuje umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.

IX.	Sankční ujednání 

1.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše ceny díla s DPH dle článku IV. odstavce 1.     a 3.  dle této smlouvy v případě, že nesplní  kvalitní přípravné práce, kvalitní výsadbu stromů a kvalitní následnou tříletou péčí v souladu s ČSN uvedenými v této smlouvě a podle položkového rozpočtu projektové dokumentace, v důsledku čehož dojde ke zhoršení zdravotního stavu dřevin nebo jejich úhynu. Přičemž povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká zhotoviteli teprve tehdy, pokud příslušnou povinnost nápravy díla nesplní ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě ke splnění, která mu bude objednatelem poskytnuta formou písemné výzvy odeslané zhotoviteli   doporučenou zásilkou. Pokutu je povinen zaplatit bez zbytečného odkladu do 2 týdnů ode dne jejího písemného     uložení. Objednatel může požadovat pokutu při každém zanedbání údržby.
2.	Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
3.	Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. Povinnost splnit příslušný závazek není na straně žadatele zaplacením smluvní pokuty nijak dotčena.

X.	Ostatní ujednání 

1.   Objednatel se stává vlastníkem díla, jeho jednotlivých částí, okamžikem prvního protokolárního převzetí.

XI.	Závěrečná ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
2.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3.	Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. II. této      smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné     realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
4.	Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
5.	Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít           písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6.	Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
7.	Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství a souhlasí      s jejím zveřejněním. 
8.	Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9.	Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.
10.	Rada města Olomouce výběr dodavatele schválila na svém jednání dne 31.10.2017 usnesením č. 6.
11.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
13.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technické zprávy a položkové rozpočty,
Příloha č. 2 – Požadovaný tvar zálivkových mís,
Příloha č. 3 – Kvalitativní parametry výsadbového materiálu.

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
	
V Olomouci, dne:                  	V                                  dne:  	

        
Objednatel	Zhotovitel	
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
náměstek primátora
statutární město Olomouc	Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
Florstyl s.r.o.