DODATEK č. 2
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen ,,OZ“), v platném znění,
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel,
Město Humpolec, IČ 248266, zástupci:
starosta města Jiří Kučera a místostarosta  Květoslav Namyslo
sídlo: Městský úřad Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec
Bankovní spojení: xxxxx
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel")
a
zhotovitel,
TREBILIFT, s.r.o	IČ: 255 05 734
Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč	DIČ: CZ25505734
zástupce:
Roman Němec, jednatel
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se smlouvy a technického řešení Vlastimil Němec, vedoucí úseku realizací
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se technického řešení
 Bankovní spojení: xxxxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel")
takto:
I
Předmět dodatku smlouvy
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je doplnění či změnu článků II., III. a V.
II - Popis díla
akce „Modernizace výtahu v objektu LTRN, Jihlavská 803, Humpolec"
Rozsah prací na díle bude rozšířen na základě zjištění stavu při odkrytí stávajících konstrukcí o tyto dodávky a práce:
-	projekt změny technologie výtahu ve strojovně a závaží v šachtě
-	výroba dílů - závěsy 2x ve strojovně, 2x kladka na závaží, závěs kladek závaží
-	úprava dokumentace výtahu

III - Cena
Cena díla popsaného v čl. II SoD a tohoto dodatku č.2 byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 949.000 Kč slovy devětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých bez DPH.
DPH bude řešena dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění. Rozpočet:

949.000 Kč 0 Kč 49.600 Kč

Výtah - demontáž, dodávka, montáž bez DPH:
StartStop bez DPH:
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH:
Cena celkem bez DPH:	998.600 Kč
Jedná se o stavební práce oddílu 43 CZ-CPA a bude uplatněno přenesení daňové povinnosti.
Uplatňovaná DPH 21%.
IV - Platební podmínky - beze změny
V
Doba plnění
1. Na základě úpravy rozsahu díla bude termín ukončení realizace díla do 31.12. 2017
VI - Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví - beze změny
VII - Závazky objednatele a zhotovitele - beze změny
VIII - Splnění závazku zhotovitele - beze změny
IX - Smluvní pokuta - beze změny
X - Změny smlouvy, odstoupení - beze změny
XI
Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2
exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
2.	Tento dodatek smlouvy o dílo je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran. Oprávnění
zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Humpolci dne 11. 12. 2017

Jiří Kučera, starosta města Humpolec

Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolec

Roman Němec, jednatel Trebilift