Č. objednatele: 		

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5117000284

„ČVUT - Rekonstrukce komína bývalé plynové kotelny objektu ČVUT FS“

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Zikova 4, 166 36 Praha 6
IČ: 68407700		DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 	Mgr. Jan Gazda, Ph.D., kvestor
Fakturační adresa: 		ČVUT v Praze – Rektorát, Zikova 4, 166 36, Praha 6
(dále též jen „objednatel“)

a

RESTAV spol. s r.o.,
se sídlem na adrese: 	Na Ovčíně 52, 252 68 Středokluky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka B6884
IČ: 17049831		DIČ: CZ17049831
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ondřej Kouba, jednatel
Peněžní ústav: 		xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxx
(dále též jen „zhotovitel“)

1.	Předmět dodatku
Na základě změn nutných k řádnému dokončení díla oproti zadávací dokumentaci a výše uvedené smlouvě o dílo dochází k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna ceny, termínu dokončení díla a souvisejících příloh.

2.	Změny jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo
2.1.	Článek 2. Místo a doba plnění, odst. 2.4. se mění takto: celkové dílo bude dokončeno a předáno do 15. 6. 2018.

2.2.	Článek 5. Smluvní cena, odst. 5.1. se mění takto:

cena bez DPH: 				2 691 434,02 Kč 
(slovy: dvamilionyšestsetdevadesátjednatisícčtyřistatřicetčtyři koruny a dva haléře)

sazba DPH: 21%
DPH: 						565 201,15 Kč 
(slovypětsetšedesátpěttisícdvěstějedna korun a patnáct haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 		3 256 635,17 Kč 
(slovytřimilionydvěstěpadesátšesttisícšestsettřicetpět korun a sedmnáct haléřů)

2017:		investice:		1 725 600,80 Kč 	bez DPH
   362 376,17 Kč 	21% DPH
					2 087 976,97 Kč 	vč. DPH

		neinvestice:		164 065,50 Kč 	bez DPH
  34 453,76 Kč 	21% DPH
					198 519,26 Kč 	vč. DPH
					
2018:		investice:		791 305,22 Kč 	bez DPH
166 174,10 Kč 	21% DPH 
957 479,32 Kč 	vč. DPH

		neinvestice:		10 462,50 Kč 	bez DPH
  2 197,12 Kč 	21% DPH 
12 659,62 Kč 	vč. DPH

3.	Změny jednotlivých příloh smlouvy o dílo
3.1.	V článku 26. Závěrečná ustanovení v bodě 26.8. b) Příloha 2 - Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění) se tento nahrazuje novým, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Jiné ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

Přílohy dodatku č. 1:
1.	Rekapitulace změnových listů
2.	Změnové listy č. 1 až 2
3.	Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění)

V Praze, dne						V Praze, dne 6. 12. 2017

_____________			_________________
Mgr. Jan Gazda Ph.D.				Ondřej Kouba
kvestor						jednatel společnosti