DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2016 na dílo:

„Výstavba parkoviště v ulici Lidická ve Slaném“

číslo smlouvy objednatele 556/2016/OSM

		1.	
1.1	OBJEDNATEL :		
	Obchodní jméno :	Město Slaný	
	Adresa :	Velvarská 136, 274 53 Slaný	
	IČ :	002 34 877	
	DIČ :	CZ00234877	
	Zástupce města :	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města	
	(dále jen objednatel)		
1.2	ZHOTOVITEL :		
	Obchodní jméno :	Klika & Dvořák, s.r.o.	
	Adresa :	Pavlisova 2250, 272 01 Kladno	
	IČ :	251 45 959	
	DIČ :	CZ25145959	
	Statutární orgán:	Ing. František Klika, jednatel	
	(dále jen zhotovitel)		

2.

2.1 	V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1, součástí jsou i nerealizované práce. 

3.

3.1	V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:
	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč	
Cena díla ze smlouvy o dílo	867.277.69	1.049.406.09	
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	-20.025.12	-24.230.42	
Nová cena díla	847.252,57	1.025.175.67	

4.

4.1 	Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

4.2 	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ob-jednatel tři vyhotovení. 

Příloha:

číslo 1. rozpočet prací (3A4) Ve Slaném dne 07. 10. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města	Ing. František Klika, jednatel

Stránka 1/1

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav