Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

ID	Jméno	Datum zahájení	Datum ukončení	Trvání	
1	Založení Projektu v ISKP	8.1.2018	8.1.2018	1	
2	Porada zpracovatelů	10.1.2018	10.1.2018	1	
3	Vytvoření modelů pro ISKP	11.1.2018	19.1.2018	7	
4	  Naplňování dat investičního modelu	11.1.2018	18.1.2018	6	
5	  Naplňování dat provozního modelu	15.1.2018	18.1.2018	4	
6	  Finanční analýza	17.1.2018	19.1.2018	3	
7	  Socioekonomická analýza	17.1.2018	19.1.2018	3	
8	Podklady z Fakult a součástí	10.1.2018	12.1.2018	6	
9	  doplňování podkladů	10.1.2018	12.1.2018	3	
10	  rozhodnutí o způsobu VZ, kompletnosti podkladů z fakult a součástí	15.1.2018	15.1.2018	1	
11	  specifické doplňky	15.1.2018	17.1.2018	3	
12	Tvorba Žádostí	11.1.2018	25.1.2018	11	
13	  Obecné kapitoly Žádosti	11.1.2018	18.1.2018	6	
14	  CBA	17.1.2018	20.1.2018	3	
15	  Přílohy	11.1.2018	21.1.2018	7	
16	  Konsolidace fáze I.	21.1.2018	22.1.2018	1	
17	Předání Žádostí ČVUT	22.1.2018	22.1.2018	1	
18	Konzultace na MŠMT	23.1.2018	23.1.2018	1	
19	  Připomínky a úpravy Žádostí	24.1.2018	24.1.2018	1	
20	  Konsolidace fáze II	24.1.2018	25.1.2018	1	
21	Předání Žádostí ŘO OP VVV	25.1.2018	25.1.2018	1