Ev. číslo objednatele: S02011-021-03
	Ev. číslo zhotovitele: 
	Ev. číslo VZ: 	60055182
Dodatek č. 3
Smlouvy o Dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)
1.	SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	Česká republika – 
	Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
zastoupena:	RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem SÚRAO
se sídlem: 	Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 		66000769	
Bank. spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Zmocněnec pro smluvní jednání: 	XXXXXXXXXXXXXXx
	Zmocněnec pro technická jednání: 	XXXXXXXXXXXXXXX
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2	Zhotovitel:	ČVUT v Praze
zastoupené:	prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem ČVUT v Praze
se sídlem:	Zikova 1905/4, 166 36 Praha 6
IČO:		68407700
DIČ:		CZ68407700
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., není zapsána v Obchodním rejstříku
Bank. spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zmocněnec pro smluvní jednání:   prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Zmocněnec pro technická jednání: XXXXXXXXXx
Fakulta stavební
se sídlem:	Thákurova 7, 166 29 Praha 6
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany“). 
Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 Smlouvy.
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení provozování experimentu „MOCK-UP-JOSEF“ do 12/2018. Potřeba prodloužení tohoto experimentu vznikla v důsledku neočekávaného pomalejšího saturování superkontejneru puklinovou vodou. Na čidlech jsou stále neustálené hodnoty tlaku a stupeň saturace v některých místech experimentu nedosahuje požadovaných hodnot. Pro splnění účelu projektu je proto nutné prodloužit dobu saturace tak, aby bylo možno získat všechna potřebná data pro vyhodnocení experimentu a splnit tak jeho účel. 
Přijetí změny proběhlo podle článku 10.2 Smlouvy a s využitím § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s tím, že:
-	tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro splnění účelu zakázky a
-	změna v osobě dodavatele:
a)	není možná ze stejných důvodů, pro které původní veřejná zakázka byla zadána tomuto dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění,
b)	způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,
c)	hodnota dodatečných služeb v součtu nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. 
Dodatkem č. 3 se mění následující články a přílohy Smlouvy. 
2.	Předmět dodatku
2.1	Změna Smlouvy článku 3. Doba a místo plnění
Dodatkem č. 3 se mění poslední věta článku 3.1, následujícím textem: 
„Kompletní dílo bude odevzdáno do 15. 12. 2018.“
2.2	Změna Smlouvy článku 4. Cena za dílo
Dodatkem č. 3 se navyšuje cena díla o částku 1 191 388,- Kč bez DPH, což činí celkové navýšení (včetně navýšení dodatkem č. 1 a 2 Smlouvy) 29,95% z původní ceny díla 15 000 000,-Kč (bez DPH). 
Text článku 4.2 se mění dodatkem č. 3 následovně:
„cena bez DPH činí 19 492 100,-Kč (slovy: devatenáct miliónů čtyři sta devadesát dva tisíc jedno sto korun českých)“
2.3	Změna Smlouvy článku 10.5. Přílohy
Do odstavce 10.5 se doplňuje za přílohu č. 7 text:
„h) Příloha č. 8 - Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací roku 2018 vč. ceny.
3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3.3	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha č. 8 - Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací roku 2018 vč. ceny

V Praze dne 	
V Praze dne 	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:	

........................................
RNDr. Jiří Slovák
ředitel	

........................................