Č. dod.:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5117000281
Číslo smlouvy zhotovitele:        

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem: Zikova 4, 166 36, Praha 6
zastoupené: Mgr. Jan Gazda Ph.D., kvestor
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700
Fakturační adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)
  
a

Hinton, a.s. 
Sídlo: Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 241 60 008; DIČ: CZ24160008
Zastoupena: Petr Šimon, předseda představenstva
zapsaným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, část B, vložka 17507
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

1.	Předmět dodatku
Na základě změn nutných k řádnému dokončení díla oproti zadávací dokumentaci a výše uvedené smlouvě o dílo dochází k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je: změna termínu plnění předmětu díla vč. změny harmonogramu provádění díla, změna ceny díla.

2.	Změny jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo
2.1.	Termín dokončení a předání hotového díla uvedený v bodě 2.4., Článku 2. Místo a doba plnění, se nahrazuje datem 15. 3. 2018.
2.2.	V Článku 5. smlouvy Smluvní cena se mění odst. 5.1. a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Celková cena díla 				6 973 106,62 Kč 	bez DPH.
					1 464 352,39 Kč 	21% DPH
					8 437 459,01 Kč	vč. DPH
	
V roce 2017: 	investice:			4 471 292,97 Kč	bez DPH
						   938 971,52 Kč	21% DPH
						5 410 264,49 Kč	vč. DPH

		neinvestice:		   	   153 323,00 Kč	bez DPH
						     32 197,83 Kč	21% DPH
						   185 520,83 Kč	vč. DPH

V roce 2018: 	investice:			2 258 352,61 Kč	bez DPH
						   474 254,05 Kč	21% DPH
						2 732 606,66 Kč	vč. DPH

		neinvestice:		   	     90 138,04 Kč	bez DPH
						     18 928,99 Kč	21% DPH
109 067,03 Kč	vč. DPH

2.3.	V článku 26. Závěrečná ustanovení, se do bodu 26.7., písm. b) doplňuje nová příloha 1c – Časový harmonogram realizace části díla 
2.4.	V článku 26. Závěrečná ustanovení, se v bodě 26.7., písm. b) příloha č. 1b – Plán finančního plnění nahrazuje novou přílohou 1b - Plán finančního plnění. 
2.5.	V článku 26. Závěrečná ustanovení, se v bodě 26.7., písm. d) Příloha č. 4 - Rekapitulace změnových listů nahrazuje novou přílohou č. 4 -  Rekapitulace změnových listů.
2.6.	V článku 26. Závěrečná ustanovení se v bodě 26.7., písm. e) Příloha č. 5 - Změnové listy č. 1 až 2 doplňuje o změnové listy č. 3 až 8.

3.	Závěrečná ustanovení

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. 

3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1c - Časový harmonogram realizace části díla
Příloha č. 1b - Plán finančního plnění
Příloha č. 4 - Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 5 - Změnové listy č. 3 až 8

3.3.	Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

3.4.	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne 17. 1. 2018

_______________________				_________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx