DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 06. 2016 na dílo:

„Modernizace výtahu objektu B v areálu Nemocnice Slaný“

číslo smlouvy objednatele 411/2016/OSM a zhotovitele 216-053/OP

		1.	
1.1	OBJEDNATEL :		
	Obchodní jméno :	Město Slaný	
	Adresa :	Velvarská 136, 274 53 Slaný	
	IČ :	002 34 877	
	DIČ :	CZ00234877	
	Zástupce města :	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města	
	(dále jen objednatel)		
1.2	ZHOTOVITEL :		
	Obchodní jméno :	MSV Liberec, s.r.o.	
	Adresa :	Kralická 79, 460 07 Liberec 7	
	IČ :	613 28 952	
	DIČ :	CZ61328952	
	Statutární orgán:	Jiří Kraus, jednatel společnosti	
	(dále jen zhotovitel)		

2.

2.1	V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1. 

3.

3.1	V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:
	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč	
Cena díla ze smlouvy o dílo	1.198.000.00	1.449.580.00	
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	34.071.00	41.226.00	
Nová cena díla	1.232.071.00	1.490.806.00	

4.

4.1	V souvislosti s navýšením požadovaných prací, dodávek některých komponentů výtahu a prodloužení zajištění potřebného stanoviska se prodlužuje termín řádného provedení díla v odst. 3.2 do 18.11.2016. 

4.2	Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

4.3	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ob-jednatel tři vyhotovení. 

Příloha:

číslo 1. rozpočet prací (1A4) Ve Slaném dne 11. 10. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města	Jiří Kraus, jednatel společnosti

Stránka 1/1

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav