Dodatek č.l ke smlouvě o dílo 
(zpracování projektu) 
č.3-73/2018-1470 
I. Smluvní strany 
Vojenská nemocnice Olomouc, p.o. 
Sídlo: 	Sušilovo nám.S, Olomouc 
IČO: 	60800691 
DlČ: 	CZ6080069I 
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná: 
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 
plk. MUDr. Martin Svoboda 
ČNB 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
159837881/0710 
Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář 
Č. tel.: +420 973407019 Č. mobil. tel.: +420 721744123 
email: kovarm@vnol.cz 
datová schránka: mdasj3u 
Adresa pro doručování korespondence: 
Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 771 II Olomouc 
(dále jen .objednatel") 
a 
Aqua Ecology Projection s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstriku vedeném soudem \' Ostrově oddíl C vlo ika 630./3 
Sídlo: 	Žilinská 26a. 779 00 Olomouc 
IČO: 	04287495 
DIČ: 	CZ04287495 
Zastoupená: 
Ing. Jiří l.indner- jedna/el 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Fio banka. a.s. 
2200834789/2010 
Ing. Jiří Lindner 
Č. tel.: +420 605 915 628 
email: LindnerJiri@seznam.cz 
(dále jen .zhotovitet") 
11. Účel dodatku 
2.1 Účelem dodatku Č. 	ke smlouvě o dílo pod názvem "VN Olomouc- vybudování odstavné plochy, 
Sušilovo nám.- projektová dokumentace je změna v článku: 
III. Předmět smlouvy 
g) Vzhledem ke značnému rozsahu stavebně historickému průzkumu bude projektová dokumentace 
zpracována po jednotlivých etapách a to následovně: 
I. etapa- bude obsahovat kompletní projektové zpracování části bývalé štěpnice umístěné na 
pozemku 24/3, 24/1 k.ú. Klášterní Hradisko se zapracovanými všemi požadavky jednotlivých 
objektů zhotovitele v návaznosti na soulad s požadavky všech dotčených orgánů. 

2. etapa- bude obsahovat kompletní projektové zpracování části umístěné v severní části pozemku 
37/3 a na pozemku 3/2 k.ú. Klášterní Hradisko se zapracovanými všemi požadavky jednotlivých 
objektů zhotovitele v návaznosti na soulad s požadavky všech dotčených orgánů. 
3. etapa- bude obsahovat kompletní projektové zpracování části umístěné na pozemku 37/3 k.ú. 
Klášterní Hradisko se zapracovanými všemi požadavky jednotlivých objektů zhotovitele 
v návaznosti na soulad s požadavky všech dotčených orgánů. 
v. Čas a místo plnění 
5.2 Předmět smlouvy v rozsahu odst. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.6 smlouvy zhotovitel předá v návaznosti na 
jednotlivé etapy dle bodu g) dodatku vždy do 159 dnů od ujasnění požadavků vznesených NPÚ. Termín 
zahájení projektových prací jednotlivých etap bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a proveden 
zápis o zahájení s podpisy obou smluvních stran. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo Č. 225/2017-1470 uzavřenou dne 10. 11. 2017. Je 
vyhotoven ve třech výtiscích, kde dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovite!. Ostatní ustanovení 
zůstávají beze změn. Dodatek Č. 1 nabývá účinnosti a platnosti v den podpisu obou stran. 
Příloha dodatku Č. 1 - zákres jednotlivých etap do katastrální situace 
V Olomouci dne 16.4.2018 
V Olomouci dne 16.4.2018 
ředitel, 
MUDr. Marti Svoboda 

jednatel 
Ing. Jiří Lindner 
podpis a otisk úřední o razitka ob jednatele 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,10190);(12639,10190);(12639,21472);(21495,21472)posrelh0posrelv0pib
.----- - 
	v !~E,.>ro 	11 
/'Aqua 	ológy 
Projection 5 r.o ) 
	Projekcm prace 	". 
IC 04187..t')S. mé CZ042e74~ 
~ 

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda 
ředitel 

Vojenská nemocnice 
Olomouc