Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 	Národní technické muzeum 
Sídlo:			Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající:	Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 			00023299
DIČ: 			CZ00023299

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:             KT Stavby s.r.o.  
Sídlo:                          Mostice 14, 330 35 Zahrádka
Jednající:                   	Marcelem Stojnovem, jednatelem
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:                               29124484
DIČ:                            CZ29124484
Tel:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 26951

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2018, č. objednatele 125/2018 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“).  Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací, a to dodání 22 t dlažebních kostek nutných k doplnění materiálu dodávaného objednatelem, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2), změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1) a změně čl. IV. Termín plnění, odst. 1).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1. 	
V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení stavební a expoziční akce: "Umístění dlažby do dolního dvorku Hospodářského dvora za účelem prezentace způsobu pokládky historické dlažby v exteriéru Centra stavitelského dědictví NTM Plasy" v areálu NTM, CSD Plasy, Pivovarská 5, Plasy, včetně všech souvisejících prací zhotovitelem,  který na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, (Cenové nabídce zhotovitele ze dne 27.2.2018, tj. oceněný výkaz výměr).
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací akce: "Umístění dlažby do dolního dvorku Hospodářského dvora za účelem prezentace způsobu pokládky historické dlažby v exteriéru Centra stavitelského dědictví NTM Plasy", zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve spolupráci s xxxxxxxxxxxxxxxx v 12/2017.

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení stavební a expoziční akce: "Umístění dlažby do dolního dvorku Hospodářského dvora za účelem prezentace způsobu pokládky historické dlažby v exteriéru Centra stavitelského dědictví NTM Plasy" v areálu NTM, CSD Plasy, Pivovarská 5, Plasy, včetně všech souvisejících prací zhotovitelem,  který na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, (Cenové nabídce zhotovitele ze dne 27.2.2018, tj. oceněný výkaz výměr) a dodání 22 t dlažebních kostek   nutných k doplnění materiálu dodávaného objednatelem tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 Dodatku, (Cenové nabídce zhotovitele ze dne 4.5.2018) a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem. 
Vícepráce dané přílohou č. 1 Dodatku budou dodány na základě odsouhlasení jakosti a tvaru objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací akce: "Umístění dlažby do dolního dvorku Hospodářského dvora za účelem prezentace způsobu pokládky historické dlažby v exteriéru Centra stavitelského dědictví NTM Plasy", zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxve spolupráci s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  v 12/2017.

2.2.
V čl. III. Cena díla se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí   241.153,- Kč včetně DPH (slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícstopadesáttři korun českých). Cena bez DPH činí 199.300,- Kč, DPH ve výši 21% činí 41.853,- Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat. 

Na nové závazné znění:	

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 313.027,- Kč včetně DPH (slovy: třistatřinácttisícdvacetsedm korun českých). Cena bez DPH činí 258.700,- Kč, DPH ve výši 21% činí 54.327,- Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat. 

R e k a p i t u l a c e    c e n y :	
Cena dle smlouvy bez DPH		  199.300,00 Kč
Navýšení ceny dle přílohy č. 1 Dodatku bez DPH (2.700,- Kč x 22 t)	    59.400,00 Kč
Nová cena díla cekem bez DPH		  258.700,00 Kč 
                  
2.3.	
Čl. IV. Termín plnění se mění z původního znění:
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do 30.4.2018.

Na nové závazné znění:
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do 31.5.2018.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2018, č. objednatele 125/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

3.2.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost 
končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu 
s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek č. 1 účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1:
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.5.2018 – dodávka dlažebních kostek

V Praze dne …………………………….		V Mosticích dne……………………….

_________________________________			_________________________
         objednatel						    zhotovitel
         Národní technické muzeum				   	KT Stavby s.r.o.         
	Mgr. Karel Ksandr					    	Marcel Stojnov     
                 generální ředitel					    	      jednatel