SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 686/2016/OSM na dílo:

„Výstavba chodníku mezi ulicí Vítězná a Záfortenská ve Slaném“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1  OBJEDNATEL :

Obchodní jméno :	Město Slaný

Adresa :	Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČ :	002 34 877

DIČ :	CZ00234877
Bankovní spojení :	

Číslo účtu/směrný kód :          

Zástupce města :	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické:	Richard Jankovič, pracovník odboru správy majetku

dále jen „objednatel“

1.2  ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno :	Elektromontáže Stavby s.r.o.

Adresa :	Smečenská 1009, 274 01 Slaný

IČ :	257 00 936
DIČ :	CZ25700936

Bankovní spojení :	

Číslo účtu/směrný kód :          

Statutární orgán :	Ing. Lubomír Hošinský, jednatel společnosti
Telefon :	

E-mail:	

Zástupci pro věci technické:	Ing. Lubomír Hošinský
dále jen „zhotovitel“

2.	Předmět díla 

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výstavbě chodníku mezi ulicí Vítězná a Záfortenská na pozemkové parcele číslo parcely 47/3 v k. ú. Slaný. Dílo bude provedeno v rozsahu nabídky č. 45/2016/OSM/VZMR a projektové dokumentace „Chdoník do Záfortenské ulice, Vítězná ulice, Slaný“ zpracované Ing. Kamilem Hrbkem v květnu 2016 a dále podmínek stavebního povolení. 

2.2	Původcem odpadu je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění odpadů. 

2.3	Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady aktualizaci a vytyčení inženýrských sítí pro vlastní stavbu podle všech vyjádření od správců inženýrských sítí, dále veškeré potřebné souhlasy, povolení, vyjádření apod., které jsou nutné k zahájení díla. 

2.4	Zhotovitel je povinen u zemních prací postupovat s maximální opatrností, aby neporušil podzemní inženýrské sítě včetně jejich přípojek, které si před započetím prací nechá zaměřit a vytyčit. 

2.5	Zhotovitel je povinen provádět průběžný každodenní úklid místa stavby a přístupových komunikací. 

2.6	Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení předat objednateli dvě pare projektu opraveného podle skutečného provedení, v případě nepřehlednosti při více změnách, předat objednateli tři pare projektu skutečného provedení a doklady o všech předepsaných zkouškách, revizí a kontrol potřebných ke kontrolním prohlídkám stavebním úřadem a potřebných k následnému užívání a provozu. Zhotovitel bude respektovat a zajistí splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek stavebních povolení a rozhodnutí. 

1

2.7	Zhotovitel je povinen provést veškeré ostatní práce související s předmětem díla, které jsou zřejmé z projektu stavby nebo které bylo možné zjistit při prohlídce stavby před podáním nabídky. 

3.	Lhůty plnění 

3.1	Zhotovitel zahájí opravu dnem předání staveniště (předpoklad 11/2016). 

3.2	Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): 20 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 17. 12. 2016. 

3.3	Vyklizení staveniště do 7 dnů po předání celkového dokončeného díla. 

3.4	V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné termín zahájení dodržet (např. podle skutečného postupu financování stavby a přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu), je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran. 

3.5	Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností (živelné pohromy), které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména: 

•	živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, váleč-ný stav, občanské nepokoje a archeologický průzkum. 

4.	Cena díla 

4.1	Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle		
	rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:			
	4.1.1	cena bez DPH	57 048,50 Kč		
					
	4.1.2  DPH v zákonné výši	11 980,20 Kč		
				
	4.1.3	cena včetně DPH	69 028,70 Kč		

4.2	Rozpočet ze dne 13. 10. 2016 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 1. 

4.3	Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

4.4	Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nebude platit žádné poplatky za případný zábor veřejného prostranství, pokud jsou pozemky v majetku města. 

5.	Změna ceny díla 

5.1	Dojde-li v souvislosti se změnou této smlouvy ke zvýšení ceny díla, bude tato cena vyfakturována zhotovitelem odděleně, nad rámec ceny díla. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, nebudou zhotovitelem fakturovány. Zvýšení ceny díla je přípustné do 20% ceny díla podle rozpočtu a to i v případech provádění prací nad rámec předmětu díla. Změna ceny díla bude řešena dle odst. 11.1 této smlouvy. 

6.	Platební podmínky 

6.1	Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat jednou měsíčně. Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis prací za příslušný měsíc dle rozpočtu a cena uvedená ve smlouvě o dílo. 

6.2	Faktury je objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele a budou zaplaceny formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

6.3	Faktury budou rozděleny na dvě části – faktury za investiční práce budou fakturovány do výše 55 tis. Kč včetně DPH. Zbylá část bude fakturována jako přípravné práce na pozemku p.č. 47/3. 

2

7.	Smluvní pokuty 

7.1	Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty řádného provedení díla z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7.2	V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním ústavem. 

7.3	Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady předmětu díla v souladu s ustanovením odst. 8.3 z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.4	V případě prodlení s odstraňováním případných výhrad (vad a nedodělků) vinou na straně zhotovitele specifi-kovaných v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i za-počatý den prodlení. 

8.	Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruční doba) 

8.1	Doba odpovědnosti na dokončené a předané dílo je 36 měsíců. Začíná plynout ode dne předání řádně dokončeného předmětu díla objednateli. 

8.2	V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen tuto vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na e-mail. 

8.3	Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení vady objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.	Kontrola provádění díla 

9.1	Smluvní strany se zavazují kontrolovat předmět díla na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle dohody obou smluvních stran. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny při předání staveniště. 

9.2	Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svojí přítomnost musí nahlásit vedoucímu stavby. 

9.3	Zhotovitel je povinen vést dokumentaci o provádění díla, tzn. stavební deník, který musí být pro objednatele přístupný. 

10.	Předání a převzetí předmětu díla 

10.1	O předání staveniště bude sepsán Protokol o předání staveniště. Nejpozději do této doby budou předány i všechny potřebné doklady – stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců sítí, dvě pare projektu ke stavebnímu řízení (jednostupňový projekt). 

10.2	Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z titulu jim prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady. 

10.3	Zhotovitel je povinen písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis. 

10.4	Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré doklady uvedené v předmětu díla včetně stavebního deníku, které jsou potřebné k zahájení přejímky stavby a případného kolaudačního řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky Stavebním úřadem. 

3

10.5	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání předmětu díla. 

V	případě výskytu těchto vad a nedodělků stanoví objednatel přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. 

11.	Ostatní ujednání 

11.1	Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 7 dnů od obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 

11.2	Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod. 

11.3	Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, jdou k tíži zhotovitele až do předání stavby. 

11.4	Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze budoucího staveniště a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo. 

11.5	Veškeré věci určené k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

11.6	Zhotovitel nesmí zadat stavbu ani její část jinému zhotoviteli nebo subdodavateli, než kterého uvedl v nabídce na tuto veřejnou zakázku, bez souhlasu objednatele. 

11.7	Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel. 

12.	Závěrečná ustanovení 

12.1	Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu soud příslušný místu navrhovatele. 

12.2	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

12.3	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

12.4	Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

12.5	Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

12.6	Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města dne 26. 10. 2016 pod číslem usnesení 03/77/2016/RM. 

Příloha: č. 1 Rozpočet (2A4)

Ve Slaném dne 2. 11. 2016

Za zhotovitele:	Za objednatele:

…….……………………………………	…….…………………………………………

Ing. Lubomír Hošinský	Mgr. Martin Hrabánek

Jednatel společnosti	starosta města Slaný

schváleno: RM č. 77/2016/RM dne 26. 10. 2016, usnesení č. 03/77/2016/RM zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav

4