Číslo objednatele:	
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5118000025
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/427/2018

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Zikova 4, 166 36 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Jan Gazda, Ph.D., kvestor
 (dále též jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o.
se sídlem na adrese: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 576
IČ: 00334561
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Milan Stupavský, Dr.
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále též jen „zhotovitel“)

1.	Předmět dodatku
Na základě změn nutných k řádnému dokončení díla oproti zadávací dokumentaci a výše uvedené smlouvě o dílo dochází k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna ceny a termínu dokončení díla.

2.	Změny jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo

2.1.	Článek 2 Místo a doba plnění se odst. 2.4. mění takto:
Celkové dílo bude dokončeno a předáno do 31.5.2018.

2.2.	Článek 5. Smluvní cena odst. 5.1.se mění takto:

cena bez DPH: 3 802 720 Kč (třimilionyosmsetdvatisícesedmsetdvacetkorun)
sazba DPH: 21%
DPH: 798 571,20 Kč (sedmsetdevadesátosmtisícpětsetsedmdesátjednakorunadvacethaléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 4 601 291,20 Kč (čtyřimilionyšestsetjedentisícdvěstědevadesátjednakorunadvacethaléřů)

Z toho
		Investice:			3 611 686,00 Kč		bez DPH
						   758 454,06 Kč			21% DPH
						4 370 140,06 Kč		vč. DPH

		Neinvestice:			191 034,00 Kč			bez DPH
						      40 117,14 Kč		21% DPH
						    231 151,14 Kč		vč. DPH
Změny jednotlivých příloh smlouvy o dílo
V článku 27. Závěrečná ustanovení v odst 27.7. b) Příloha 2 – Časový harmonogram realizace se nahrazuje novým, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Jiná ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

Přílohy dodatku č. 1:
1.	Rekapitulace změnového listu
2.	Změnový listy č. 1 
3.	Časový harmonogram realizace

V Praze, dne						V Praze, dne 

_______________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx