DODATEK Č. 2
SMLOUVY  NA  ZHOTOVENÍ  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE PRO  ÚZEMNÍ  ŘÍZENÍ A  ZAJIŠTĚNÍ  PODKLADŮ  PRO  VYDÁNÍ  ÚZEMNÍHO  ROZHODNUTÍ  STAVBY„PRODLOUŽENÍ  TROLEJOVÉ  TRATĚ  ul.HLAVNÍ, OPAVA-KYLEŠOVICE“ UZAVŘENÉ DNE 29.2.2016, VE ZNĚNÍ  DODATKU  ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO  DNE 24.6.2016
.
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:		Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Sídlo:			Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
IČO:			64610250
DIČ:			CZ64610250
Zapsána u:		Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
Číslo účtu:		1841501349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupení:		Adam Ludvík Kwiek, předseda představenstva společnosti
Kontaktní osoby
ve věcech technických: xx 
e-mail:  xx
ve věcech technických: xx 
e-mail: xx
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		ELEKTROLINE, a.s.			
Sídlo:			Praha 8, Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ: 184 00
IČO:			45312338
DIČ:			CZ45312338
Zapsán v:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
			oddíl B, vložka č.9880
Číslo účtu:		800156003/2700
Bankovní spojení:	UNICREDIT BANK
e-mail:			koranda@elektroline.cz
Zastoupení:		Ing.Zdeněk Mrázek, místopředseda představenstva společnosti
			Ing.Josef Švehlík, člen představenstva společnosti
Kontaktní osoby:	xx
dále jen „zhotovitel“

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1
2.1.	Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 29.2.2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.6.2016 a to v odst. 3.1. Článku III. Předmět smlouvy, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
	3.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu:
„Prodloužení trolejové tratě ul.Havní, Opava-Kylešovice“
(dále také jen „dílo“)
	Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace pro vybudování nové trolejbusové tratě na ul.Hlavní v Opavě-Kylešovicích včetně obratiště trolejbusů, navazující na stávající trolejbusovou trať na ul.Bílovecká v Opavě-Kylešovicích, návrh nového zemního kabelového napájení trolejového vedení, návrh výstavby nové měnírny trakční elektrické energie v areálu objednatele na ul.Bílovecká 98 v Opavě-Kylešovicích a návrh souvisejících přeložek inž.sítí  jiných správců a stavebních úprav pozemků dotčených rozsahem díla, vše na podkladu studie Prodloužení trolejbusové tratě ul.Hlavní vyhotovené ELEKTROLINE, a.s., Praha v červnu 2015, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy.
	Projektová dokumentace pro územní řízení bude vypracována v rozsahu a s obsahem dle vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  Součástí projektové dokumentace budou jednotlivé stavební, inženýrské objekty, celkové rozpočty jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a souhrnný rozpočet celé stavby.
	Projektovou dokumentaci zhotovitel dodá v jednom  grafickém vyhotovení  v termínu uvedeném v odst.5.1 . článku V. Doba plnění a v pěti grafických vyhotoveních a jednou v digitální podobě (na nosiči CD nebo .DVD nebo USB) v termínu uvedeném v odst.5.2. článku V. Doba plnění. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM. Obě smluvní strany se dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty: 
•	CDR, CPT-Corel DRAW a PHOTO-PAINT,
•	DOC, XLS, PPT pro dokumenty  Microsoft Office,
•	TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,
•	TXT a HTML pro textové a hypertextové dokumenty,
•	PDF pro Adobe Acrobat.
Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů jako soubor INDEX.HTML v kořenovém adresáři nosiče. Každý nosič bude opatřen stručným názvem a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a vyjádření příslušných orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených nemovitostí a zařízení a dalších a jiných subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele nebo přímo u zhotovitele a známé k jednotlivým termínům vyhotovení projektové dokumentace uvedeným v čl.V. Doba plnění.

2.2.	Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 29.2.2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.6.2016 a to v Článku V. Doba plnění, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
	5.1.	Projektovou dokumentaci pro územní řízení v jednom grafickém vyhotovení, se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v termínu do 30.9.2016.
	5.2.	Projektovou dokumentaci pro územní řízení a všechny příslušné podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí, v rozsahu čl.III. Předmět plnění, se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v termínu do 31.12.2016.
	5.3.	Dílo je splněno předáním a převzetím díla ve výše uvedených jednotlivých termínech bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek III.
Ostatní ujednání k Dodatku č. 1
3.1.	Dodatek č.2 smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3.2.	Dodatek č.2 smlouvy je nedílnou součástí původní Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 29.2.2016, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 24.6.2016.
3.3.	Smluvní strany se dohodl, že ostatní ujednání ze Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 29.2.2016, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 24.6.2016,  se nemění.
3.4.	Dodatek č.2 smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 29.9. 2016			V Praze dne 29.9.2016

……………………………………			………………………………………
Za objednatele						Za zhotovitele
Adam Ludvík Kwiek					Ing.Zdeněk Mrázek
předseda představenstva společnosti			místopředseda představenstva společnosti

								…………………………………………
								Ing.Josef Švehlík
								člen představenstva společnosti