DODATEK Č.l
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“
Číslo objednatele	01/2018
Číslo dodavatele	P_234_2018
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen,Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 13.04.2018,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Dětské centrum Straněice sídlo:
zastoupenou:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:	Hrdinů 175,251 63 Strančice
MUDr. Pavlem Biskupem, ředitelem příspěvkové organizace 43750672
+420 323640031
dcstrancince@dcstrancice.cz
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 30229201/0100	

DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,
A
PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.
sídlo:	Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložka 25320
Jednající:
IČO'.
DIČ:
Bankovní spojení:	Ondřej Staiý
27546268
CZ27546268
KB,a.s. číslo účtu 43-3426790277/0100
DÁLE JEN „Dodavatel“ NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.	

Článek I.
Předmět Dodatku
1.	V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady“ nebyla generálním dodavatelem, i přes písemnou dohodu v rámci zápisu z KD, zajištěna odpovídající stavební připravenost pro realizaci předmětné dodávky „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“ ze strany Dodavatele. Dodavatel nemůže instalovat zařízení do kotelny, ve které nejsou hotové finální povrchy stěn a podlahy a nemůže instalovat tepelná četpadla na střechu, jelikož zatím nebyla realizována kompletní skladba izolace a krytiny. Jedná se tedy o objektivní důvod k prodloužení doby realizace díla.
2.	Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k nedostatečné stavební připravenosti objektu, ve kterém má být předmětná dodávka realizována, se původní znění ěl. 2., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku 1. Odst 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31.7.2018."
Článek n.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento Dodatek še uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne
A©-S
Ve Strančicích dne

Objednatel
Dětské centrum Strančice, p.o.

DitsM centrum Strančice,
p^pěvkevá organizace
Hrdinů 175,25163 strančice
lěš 26 066 416, IČO: 437 50 672
telí 323 640 031
MUĎfc Pavel Biskup, ředitel

Dodavatel

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.
PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o
Ohrazenická 281, PARDUBICE 530 09
prima-Wima@prima-klima.cz; www.prima-Wima cz
Wfax: 466 632 676 * 777 308 Š18
«ČO: 27S 46 268 DIČ. CZ27546268