Mil
SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 01/2018
číslo dodavatele: P_243_2018
„Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná
čerpadla“
Smluvní strany
Objednatel
Dětské centrum Strančice, p.o.
se sídlem: Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Zastoupený: MUDr. Pavlem Biskupem,	ředitelem příspěvkové organizace
IČ:	43750672
Telefon:	+420 323640031
E-mail:	dcstrancice@dcstrancice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 30229201/0100
dále jen „objednatel“
a
Dodavatel
PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.
Sídlo: Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložka 25320
Jednající Ondřej Starý
IČO: 27546268DIČ: CZ27546268
Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu 43-3426790277/0100.
dále jen „dodavatel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:
Článek I.
Předmět smlouvy
1.1.	Dodavatel se zavazuje k provedení díla - dodávky včetně stavebních prací „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Novák a Partner inženýrská
projektová kancelář, Perucká 5, 120 00 Praha 2, IČ: 48585955 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Dětského centra Chocerady, č.p. 124 a 189, 257 24 Chocerady, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
2.	Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek Vlil. odst. 8.2. smlouvy).
3.	Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
4.	Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každý měsíc);
-	vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
náklady na případnou likvidaci havárie;
-	zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění; náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
-	zhotovení práce podle technologického předpisu;
-	veškeré nutné prostředky ochrany práce;
-	zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; letní opatření;
-	zimní opatření;
-	zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
-	zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
-	zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
-	soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
-	odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
-	v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
-	zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
-	zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
-	zabezpečení povolení kácení zeleně;
zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
-	zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením dodávek a stavebních prací;
-	náklady na případnou likvidaci havárie; náklady na obnovení geodetických bodů;
-	dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
-	zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
-	zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
-	zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
-	zkoušky a měření, revize zařízení;
-	zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
-	zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů.
1.5.	Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby pří realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
1.6.	Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Státního fondu Životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí.
1.7.	Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla

dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
1.8.	Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
-	předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
-	archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
1.9.	Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“ (dále jen „Veřejná zakázka“) - výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
1.10.	Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné dodávky jsou nezbytné pro provedení původních dodávek, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.
1.11.	Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Článek II.
Doba zhotovení díla
2.1.	Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31.5.2018 ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění.
2.2.	K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.3.	V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
2.4.	Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou
2.5.	Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
-	dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
-	nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.
2.6.	Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.
Článek III.
Cena za dílo
3.1.	Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 429 188 Kč bez DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 15% DPH ve výši 364 379 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 793 567 Kč.
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3.2.	Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
3.3.	Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné dodávky mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
3.4.	Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
3.5.	Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
3.6.	Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
Článek IV.
Platební podmínky
4.1.	Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy
4.2.	Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
4.3.	Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
4.4.	Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
4.5.	Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
CJ
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
4.6.	Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
4.7.	Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
4.8.	Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
4.9.	Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
4.10.	Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
4.11.	Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.
Článek V.
Vlastnické právo k dílu
5.1.	Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
5.2.	Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Článek VI.
Staveniště
6.1.	Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6.2.	Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.
2.2.	smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.3.	Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
6.4.	Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č.

Evropský toed pro re^onálni rozvoj OpCTOČni program Žrvotnt pnostfodl

EVROPSKÁ UNIE

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
6.5.	Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
6.6.	Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
6.7.	Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
6.8.	Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6.9.	Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran
7.1.	Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Bc. Tomáš Soukup, 9: 257 280 121, ISI: soukup@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Adolf Beránek, 9: 603 825 420, E: beranek@dcstrancice.cz, Dětské centrum Strančice, p.o., Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Ing. Aleš Řada, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 9: 739 207 686, E:
O —=■■■■
rada@ingara.cz, Rasošky 88, 552 21 Rasošky.
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele MUDr. Pavel Biskup, ředitel Dětského centra Strančice, p.o., zmocněn Radou Středočeského kraje
7.2.	Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
Stavbyvedoucí: ,775 246 690, radek@stavex.com
Osoba zodpovědného technika v oboru technika prostředí staveb: Ing. Jan Chvojka, 777 680 627, cechproiekt@gmail.com
Osoba technik BOZP a PO: Aleš Novák , 773113741 ales.novak@SIAG-GROUP.COM
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ondřej Starý, 774 308 418, ondrei.stary@prima-klima.cz
Článek Vlil.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran
8.1.	Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
8.2.	Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
8.3.	Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
8.4.	Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8.5.	Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
z, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
EVROPSKÁ UNIE
Evropský tond pfo rvyřcriůlnl ra^vcj Operační program žrvolní pros! i*rxl
8.6.	Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
8.7.	Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
8.8.	V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
8.9.	Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
8.10.	Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8.11.	Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

EVROPSKÁ UNIE Evropský toed fxe» regicnůkii rožvq Úporném' program žr^tfrui prostáni
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
8.12.	Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.13.	Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
8.14.	Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlil. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
8.15.	Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za

EVROPSKÁ UNIE
Evropský toPd pro rúflicrtókii rozvoj Oppf»tn{ proynrn 2rvoírv pro^ti*Qdi

podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlil. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
8.17.	Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
8.18.	Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
8.19.	Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
8.20.	Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
8.21.	Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
8.22.	Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
8.23.	Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci

Nl IQNQ thlMO »»O1 < RtrUBl KY

EVROPSKÁ UNIE
Evropský tortd pro re^icnůkil rozvq Operační pnxjmni Zrvoina proslf

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.
Článek IX.
Pojištění dodavatele
9.1.	Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
9.2.	Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
9.3.	Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
9.4.	Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
Článek X.
Splnění a předání díla

EvftQPSKAUNiE
Evropský ÍOfid regionální rozvoj Op^rnčm fHngnvn ?tvo(n» prasifixil

10.1.	Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem Vlil. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
10.2.	Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
10.3.	Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku Vlil. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
10.4.	Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
10.5.	Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a každý den prodlení.
10.6.	K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
10.7.	K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.
Článek XI.

Evropský fcxvd pro re^icoůtní r&zvoj Opon^ní program žftpírn prostfixií

EVROPSKÁ UNIE

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
11.1.	Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
11.2.	V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
11.3.	Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
11.4.	Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
11.5.	Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy
12.1.	Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění dle této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude
EVftOPSK^ UNIE EvTO^aXý tond pro reponólní rozvoj OpomČ/il program 2rvo(nc proslřodí
poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
12.2.	Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
12.3.	Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem Vlil. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
12.4.	Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
12.5.	Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
12.6.	Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
12.7.	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
12.8.	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale

EVROPSKÁ UNIE
fřviopaký tood ř*C» re^ortóhi rQjcvoj Opírt^éni program 2rvotn« prostředí

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
12.9.	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a)	nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
b)	zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
12.10.	Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
12.11.	Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
13.1.	V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
13.2.	Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
13.3.	Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
13.4.	Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
13.5.	Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

EVHOPSKA UNIE
EviopaKý tofxd pro regionální fOtfvOf Opomfrí p-rrxjrnm ?rvc>tni pcoslfpdl

13.6.	Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
13.7.	Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.
13.8.	Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
14.1.	V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
14.2.	Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
14.3.	Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
14.4.	Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
14.5.	Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsaným v čl. Ill odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
14.6.	Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fcxKl pro regienůkii rdzvq Opernčfií pípgnvn 2iwtn« prpstřixll

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
14.7.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
14.8.	Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
14.9.	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 26.3.2018 č. usnesení 052- 11/2018/RK.
14.10.	Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
14.11.	Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

E sro B|CE 530 09
prima-kltma cz 7t 308 518

2E7546268

Ondřej Starý \ jednatel

MUDr. Pavel Biskup
ředitel PO

EVROPSKÁ UNIE
Evropský tond pro» le^onůlřii rozvoj Operační program ^rvotr* pnxjtf edi

14.12.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

13.-04- 2018
V Pardubicích dne	

1 3 -04- 2018
Ve Strančicích dne	

Dodavatel

Objednatel

PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.

Dětské centrum Strančice, p.o.

PRIMAKLIMA PARDUI Ohrazenická 281. PARDI
prima-khma@prima-klima cz Tel./fax 466 632 676 IČO 275 46 268
Dětské centrum Strančice,
příspěvková organizace
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
IČZ 28 005 416, IČO: 437 50 672
tel,: 323 640 031
MUDr, Pavel Biskup, ředitel
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady-Tepelná čerpadla
Harmonogram 2018
pozice	Popis	týden	
l.	Převzetí staveniště	16.	
2.	zaměření konstrukce pro venkovní jednotky	I7.	
3.	instalace konstrukce	20.	
4.	příprava rozvodů pro tepelné čerpadla	21.	
5.	příprava strojovny	21.	
6.	montáž a zapojení tepelných čerpadel	21.-22.	
7.	Odzkoušení zařízení	22.	
8.	předání díla	22.	

Vzhledem k dodacímu termínu na tepelná čerpadla 6. týdnů od objednání se předpokládá, že fakturace bude celková až po předání díla.
Ondřej Starý

PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.
jednatel

LDUBICE s.r.o.
>U0ICE 530 09 www.prima-kHma.cz 777 308 518

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla“
Určeno: MUDr. Pavel Biskup, ředitel Dětského centra Strančice, p.o. (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD:
Termín plnění:
Celková cena díla:
Dodavatel:
IČO:
Oprávněná osoba:
Telefonní spojení:
Popis předmětu informace:
Popis problému:
Čeho se dodavatel domáhá:
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
Stránka 23 z 23

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé léčebny na pozemcích s.p. 175 a 237 Objekt: D.1.4.B.1 ZDROJ TEPLA
Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo: Chocerady	Datum: 12.10.2017
č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Jednotková cena zadáni	Celková cena zadání	
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		713	Izolace tepelné					
119	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AI fólií staženými drátem 1x	m2	30,000	50.00	4 000,00	
120	713	713411125	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AI fólií staženými drátem 1 x	m2	30.000	100.00	3 000,00	
132	631	631545320	pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 35/30 mm	m	24,000	95.00	2 280,00	
133	631	631545330	pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 42/30 mm	m	78,000	101.00	1 818.00	
134	631	631545740	pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólii 49/40 mm	m	24,000	127.00	3 048.00	
135	631	631546050	pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 60/50 mm	m	18.000	175,00	3 150 00	
136	631	631546070	pouzdro potrubni izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 76/50 mm	m	9,000	209,00	1 881.00	
122	631	631546080	pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 89/50 mm	m	54 000	226,00	12 204,00	
125	700	700700191	AI páska šířky 50mm	bm	200 000	10.00	2 000,00	

731	Ústřední vytápění - kotelny
96	731	731X101	Tepelné čerpadlo v provedení vzduch / voda - splitové provedeni - Q=36,4kW- 3‘400V - Ď32/3, COP 3,6 pň Te = 2°C A Tot = 35°C - kompletni dodávka vnitřní a venkovni jednotky vč. řídicího systému pro kaskádz tři TČ s bivalentnimi elektrokotli a AN	kus	3.000	499 000.00	1 497 000.00	
97	731	731X102	Montáž tepelného čerpadla komplet vč. připojovacích flexibilních hadic	sada	3 000	17 500 00	52 500,00	
106	731	731X103	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná vč pororoštu pro venkovní jednotky teplených čerpadel	kg	1 000 000	70.00	70 000.00	
107	731	731X104	Výrobní dokumentace ocelové nosné konstrukce vč. statického posudku	sad	25 000,000	2,00	50 000 00	
98	731	731X105	Zprovozění tepelného čerpadla a zaškoleni obsluhy	sada	3,000	15 000.00	45 000,00	
99	731	731X106	Propojovací kabelové a trubní vedeni mezi vnitřními a venkovními jednotkami tepelných čerpadel do vzdálenosti trasy 20m - potrubí vč. tepelných izolací	sada	3,000	24 680.00	74 040.00	
109	731	731X107	Oplechování venkonvího vedeni primárního okruhu TČ pozinkovaným plechem tl. 0,6mm	m2	20.000	250.00	5 000,00	
102	731	731X108	Bivalentní zdroj tepla - přímotopný elektrokotel - výkon Qel = 30kW/400V vč. integrovaného oběhového čerpadla a pojistného ventilu 3bar	kus	2.000	36 800.00	73 600,00	
112	731	731X109	Výrobní dokumentace zdroje tepla dle skutečně vybraného zařízení	sada	25 000,000	1.00	25 000,00	
108	731	731259617	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 60 kW	soub
oř	2.000	8 000.00	16 000.00	
103	731	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10.000	560.00	5 600,00	

732	Ústřední vytápěni - strojovny
38	731	732199100.1	Montáž a dodávka orientačních štítků	sada	20,000	80,00	1 600.00	
39	731	732211125.1	Ohřívač stacionární zásobníkový pro tepelná čerpadla s jedním výměníkem PN 1,0 o objemu 930 I v.pl. 9,0 m2 vč. originální tepelné izolace	sada	2.000	91 168.00	182 336,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé léčebny na pozemcích s.p. 175 a 237 Objekt: D.1.4.B.1 ZDROJ TEPLA
Objednatel:

Zpracoval:
Datum: 12.10.2017

Zhotovitel:
Místo: Chocerady
č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	
40	731	732231103	Akumulační nádrž topné vody bez výměníku atyp PN 0,3 o objemu (999 I) se vstupními a výstupními hrdly DN80 vč. teplené izolace tl. 100mm a povrchovou úpravou lakovaným plechem	sada	1,000	22 300 00	22 300.00	
110	731	732331621	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové pnpojení
PN 0,6 o objemu 200 litrů	sada	1,000	7 632,00	7 632,00	
111	731	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění - pracovní bod 3,1m3/h/30kPa	sada	3,000	32 000,00	96 000,00	
45	731	732X101	Hydraulický vyrovnávač ocelový DN150 - připojovací hrdla DN80 a DN50 vč. tepelné izolace	sada	1.000	39 800,00	39 800,00	

733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
113	731	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	24,000	260,00	6 240,00	
114	731	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	18,000	182,00	3 276,00	
115	731	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	24,000	196,00	4 704,00	
116	731	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	18,000	254.00	4 572.00	
117	731	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	9,000	320,00	2 880.00	
118	731	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	54.000	403 00	21 762.00	
137	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	66,000	25.00	1 650.00	

24+18+24	66,000
138	731	733190106	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	18,000	25,00	450,00	
139	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do
D 89x5,0	m	63,000	35 00	2 205 00	

9+54	63,000
62	731	733X101	Topná zkouška, provozní a dilatační zkoužka	h	48,000	300.00	14 400.00	
63	731	733X102	Fitinky neuvedené ve specifikaci, příplatky ke zhotoveni závitových přípojek.	sada	1,000	3 750,00	3 750,00	
64	R	733X103	Stavební přípomoci - vrtání, sádrování, drážkování	h	60,000	300,00	18 000,00	
66	731	733X104	Pomocný materiál pro uložení potrubí	kg	100,000	25,00	2 500,00	

734	Ústřední vytápění - armatury
140	731	734173417	Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 80	sada	6,000	380,00	2 260.00	
145	731	734193116	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	sada	6,000	634,00	3 804,00	
150	731	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	12,000	230,00	2 760,00	
152	731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	273,00	546.00	
169	731	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	398.00	1 194.00	
168	731	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 otevírací tlak 3,0 bar	kus	3,000	275.00	825,00	
155	731	734291123	Kohout plnící a vvpouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	18,000	85.00	1 530,00	
156	731	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	178,00	356,00	
170	731	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130"C s vnitřními závity	kus	3,000	277,00	831,00	
160	731	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	362.00	2 172,00	
161	731	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	515,00	3 090,00	
162	731	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	762.00	4 572,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé léčebny na pozemcích s.p. 175 a 237 Objekt: D.1.4.B.1 ZDROJ TEPLA
Objednatel:

Zpracoval:
Datum: 12.10.2017

Zhotovitel:
Misto: Chocerady
č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Jednotková cena
zadáni	Celková cena zadání	
		783	Dokončovací práce - nátěry					
131	783	7B3NA001.1	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	147,000	150,00	22 050,00	
			24+18+24+18+9+54		147,000			
			Celkem bez DPH				2 429 188,00	

541 “?44 555 www.cpp.cz
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0012949990
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanýmí osobami IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 Tel: 466 068 301
dále jen pojistitel
PRIMAKLIMA PARDUBICE s. r. o.
Sídlo: Pardubice, Polabiny, Ohrazenická 281, PSČ 530 09
Zastoupena: Michalem Zelinkou, jednatelem
IČ: 275 46 268
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25320
dále jen pojistník
uzavírají
tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.
Hlavní pojišťovací zprostředkovatel Podřízený pojišťovací zprostředkovatel Název: Pobočka Pardubice
Sjednatelské číslo: 8893703000 Jméno a příjmení Jednající osoby: Bc. Denisa Zelinková
Registrační číslo ČNB:

Vypracoval (pečovatel): Správa pojistné smlouvy:

Bc. Denisa Zelinková - dzll322 Pobočka Pardubice - 8893703000

VIENNA INSURANCE BROUP

Česko podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23, 1S6 00 Praho 8, fox: 956 449 600, e-maíl: pofisfovna@cpp.ciz |b zapsaná v obchodním raJsfFTku vGdanám Měslským soúdem v Praze - oddíl B, vložko 3433.
IČ: 63993530, DEC: CZ63996530, DIČ pro DPH: CZ69V000955. bankovní spojeni. 700135003/0300
Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy
Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:
Z důvodu navýšení pojistné částky pro pojištění odpovědnosti z 5.000.000,- Kč na 10.000.000,- Kč se sjednává nové znění čl. II, bodu 4. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:
4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM
Pojištěni odpovědnosti za škodu a pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno VPP pro pojištěni odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP OD 1/07) a DPP pro pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem DPPVV P 1/07 (dále Jen DPPVV Pl/07).
Sjednané sublimity plněni pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 4.1- (obecná odpovědnost + vadný výrobek)
1.1.	Pojištění odpovědnosti za škodu - obecná odpovědnost
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/07.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje na: všechny výrobky
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění.
Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem se sjednává s jedním limitem plněni.
Limit pojistného plnění činí	10.000.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši.... 1.000,-Kč.
Pojištění se sjednává na území: České republiky
Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem, kdy pojištěni Vstoupilo v platnost.
1.2.	Odchylně od článku 4, bodu 2, plsm. a)VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vmiklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, která má původ ve škodě na zdraví nebo na věci. Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.
Sublimit pojistného plnění (horní hranice plněni pojistitele pro Jednu pojistnou událost) činL  500.000,-Kč.
Pojištěni sě sjednává se spoluúčasti	1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území: České republiky
1J. Odchylně od článku 4, bodu 1, plsm. p) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věd, která nemá původ ve škodě na zdraví nebo věd. Pojištění se nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.
Subllmit pojistného plněni (horní hranice plnění pojistitele pro Jednu pojistnou událost) činí.		100.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčasti	1.000,-Kč
Pojištěnf se sjednává na území: České republiky
1.4.	Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. I) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje I na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnanců pojištěného v důsledku nedhalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. I) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje I na náhradu nákladu vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku nedhalostního protiprávního Jednání pojištěného.
5ubllrnlt pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro Jednu pojistnou událost) činí.	 500.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí	,.1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území: České republiky
1.5.	Odchylně od článku 4, bodu 2, pfsm. b)VPP OD 1/07 se ujednává, že se pojištěni vztahuje I na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Pojištění se nevztahuje na ztrátu věci.
Subllmit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro Jednu pojistnou událost) činí.	200.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spolu účastí	1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území: České republiky
1.6.	Odchylně od článku 4, bodu 2, pfsm.c)VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá s výjimkou škody na užívaném dopravním prostředku. Pojištění se nevztahuje na ztrátu věci.
Subllmit pojistného plněni (horní hranice plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost) činí	 200.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí	1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území: České republiky
Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy
1.	Pojištění odpovědnosti
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem 	14.505,- Kč
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem	2.941- Kč
celkové navýšení ročního pojistného činí			14.505,- Kč.
celkové poměrné pojistné činí					2.941,- Kč.
celkové poměrné pojistné po slevách činí	2.059,- Kč.
Celkové poměrné pojistné ve výši 2.059,- Kč je splatné na účet pojistitele č. 700135002/0800 k datu 16.7. 2015 VS 0012949990.
Článek HI.
Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy
1.	Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 2,1.2015
2.	Datum konce pojištění: 13.9. 2015
3.	Poj'isteni se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Bc, Denisa Zelinková	Ing. Albert Bečaver
vrchní disponent	vedoucí pobočky

Tento dodatek obsahuje 4 strany a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních z nichž 1 obdrží pojistník á 2 pojistitel.
V Pardubicích dne	1.7.2015
PRIMAKLBMA IPARpUBÍCĚ s.r.o.

V Pardubicích dne	1.7,2015

Ohrazenická 201, PARDUBICE 530 09 prlma-kllma@prinT£(d<jjpHK3fwv^rima4dlrT)a.cz Tel./fax:46fr6Š2STItt*777$es 518 IČO: 275 46 238 DC: CZ2754\268
PRIMAKLIMA PARDUBICE s. r. 0.
Mlíhal Zelinka
(jednatel

w
841 444 555 Wtó/W.Cpp.CZ

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Vienna insurance Group
úsek pojištění průmyslu a podnikatelů
Osvědčení o pojištění
Potvrzujeme, že jsme s pojištěným firma: PRIMAKLIMA PARDUBICE s. r. o., IČ: 275 46 268 dne 13. 9. 2010 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0012949990.
Pojištění se vztahuje na pojištění obecné odpovědnosti vzniklé při škodě jinému v souvislosti s Činnostmi pojištěného, jestliže pojistník za škodu odpovídá v důsledku svého jednám nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném článkem 3 VPPOD.

Limit pojistného plnění Činí

	10.000.000,-Kč.

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodná událost nastala na území České republiky.

.	. .	/ .	A.S.,
ČES,z, pne:	V.r.í.i?

podpis a otisk razítka pojistitele

Tato pojistná smlouvaje uzavřena na dobu od 14. 9. 2010 na dobu neurčitou.
V Pardubicích dne 2. 7. 2015

VIENNA INSURANCE GROUP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, ,86 00 Praha 8, (as: 956 44? 600, e-mail: po(lslovnaScpp.ei |u íopsonn v obchodním rajslříku vedeném Měslským soudem v Praze - addll B. vložka 3433.
IČ: 63998530. Dlí; CZ6399353O. DIČ pro DPH. CZ69900D955, bankovní spáleni: 700,35002/0800

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE k poddodavatelskému systému
Čestné prohlášení dodavatele k poddodavatelskému systému k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla"

Název: se sídlem: zastoupený: IČ:

PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o. Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice Ondřejem Starým
275 46 268
Varianta 1:
Prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:
Identifikační údaje poddodavatele	Část plnění předmětu veřejné zakázky	% finanční podíl	

			

Varianta 2:
Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).
V Pardubicích , dne 28.2.2018

PRIMAK

DUBICE s.r.c
UBICE 530 09 www.prima-ktíma .< TT7 30© 518 CZ27546268

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele