OBJEDNÁVKA č.: 2018/1078/OTSMI-OT	
Objednatel: 				Městská část Praha 3 
Odbor technické správy majetku a investic
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85  Praha 3		Dodavatel:		OMEGA project s.r.o.
IČ:28377664
Milady Horákové 66/103
Praha 6-Hradčany
160 00  Praha 6	
Předmět objednávky: 
Na základě nových požadavků a změny původních stanovisek Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Odboru dopravy městské části Praha 3 a Odboru ochrany životního prostředí městské části Praha 3 u Vás doobjednáváme inženýring a úpravu projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení k zakázce s názvem „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30“ v následujícím rozsahu:
-	změna rozsahu řešeného území, následná úprava opěrných zdí, vnějšího schodiště, VO atd.
-	změny řešení parteru a přilehlých chodníků vč. návazností na řešené objekty, řešeno ve variantách
-	postupná koordinace řešení přilehlých chodníků s autorem návrhu arch. Ivo Plickou, TSK, odborem dopravy a novým správcem veřejného osvětlení
-	nutné úpravy navazujících profesních částí až po získání kladných stanovisek TSK, OD a VO (dopravní řešení, VO, situační řešení atd.)
tato projekční část v hodnotě 55.500,-Kč bez DPH,

-	dále nové posouzení dendrologie a sadových úprav
tato část v hodnotě 21.600,-Kč bez DPH,

-	dále navazující inženýring, kdy je třeba převážnou část stanovisek znova vyřídit
tato část v hodnotě  28.900,-Kč bez DPH

V souvislosti s těmito nutnými úpravami dochází i k posunu termínu odevzdání projektové dokumentace.

Čas (termín) plnění: 27.07.2018	Cena plnění (bez DPH): 106 000,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 128 260,00Kč	
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) V případě, že jakýkoliv hmotně zachycený výsledek činnosti provedené při plnění předmětu objednávky, či jakákoliv jeho část naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, je součástí plnění předmětu objednávky taktéž převod práva k jeho výhradnímu užití a šíření všemi způsoby pro Městskou část Praha 3 ve smyslu § 2358 a násl. a § 2360 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel přijetím této objednávky uděluje Městské části Praha 3 souhlas s tím, aby dílo či díla, která jím budou vytvořena na základě plnění předmětu této objednávky, i bez jeho souhlasu spojila s jiným dílem nebo jej užila k jinému účelu než dle této objednávky, přičemž městská část nebude povinna poskytnutou licenci využít. Územní, časový a množstevní rozsah poskytované licence je neomezený. Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí s tím, že veškerá odměna dodavatele za převod výše uvedených práv na Městskou část Prahu 3 je již v celém rozsahu obsažena v ceně plnění této objednávky.
3) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.	
Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/1078/OTSMI-OT	
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 85  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517	Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu	
V Praze dne 22.06.2018	Ing. Martin Kadlec
vedoucí odboru technické správy majetku a investic
	razítko, podpis	
Vyřizuje: Jaroslav Truhlář, 222116309
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800