Dodatek Č. 1 
ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 2.7.2018 

1.1. 	Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 

1. Smluvní strany 
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 
60433272 

	zastoupen: 	RNDr. Boženou Čerňanskou, Ph.D., ředitelkou 
(dále jen .objednatetři 

	1.2. 	Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

Firma s.r.o. 
Na Pěšinách 247/5, 18200 Praha 8 - Kobylisy 
62412272 
CZ62412272 

	zastoupen: 	Václavem Kapalem, jednatelem 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288 
(dále jen "zhotovitel") 
(dále společně také "smluvní strany") 
2. Úvodní ustanovení 
	2.1. 	Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních 
prací (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je modemizace zařízení a vybavení tříd 
v sídle objednatele. 
	2.2. 	Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke 
Smlouvě tento "Dodatek č. 1" (dále jen "dodatek"), a to z důvodu posunutí termínu 
plnění. 
3. Předmět dodatku 
	3.1. 	Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto 
zněním: 
,,3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech: 
a)	stavební práce na díle nejpozději do 31.8. 2018; 
b)	dodávky spojené s dílem (zboží - mobiliái) nejpozději do 30.9.2018. " 
3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
	4.2. 	Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. 
	4.3. 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
1 

4.4. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
4.5. 	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění 
dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
4.6. 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru 
smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

	V Praze dne 	. 

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., ředitelka 

2 

V áclav Kapal, jednatel