SMLOUVA O DÍLO 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne ……………….. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany: 

(A) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6
sídlo: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
IČO 00638749
DIČ: CZ00638749
Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky): 
Příspěvková organizace nezapsaná v OR,
zřizovatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
(dále jen „Objednatel“) 

(B)  AZ Barvy, s.r.o.
sídlo Bílkova č 4/132, 110 00 Praha 1 – Josefov
IČO: 27434818
DIČ: CZ27434818
Zastoupena: Josefem Svobodou - jednatelem
Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky): 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112238
(dále jen „Zhotovitel“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve  výmalbě vestibulu, chodeb a schodiště v přízemí až do 4.patra, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže). 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována níže). 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pod svým osobním vedením. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy. 

2.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy, avšak nikoliv častěji než pětkrát týdně. 

3. CENA 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu bez DPH v celkové výši 463 090,- Kč (slovy: čtyřistašedesáttřitisíc devadesát korun českých) (dále též jen   „Cena“), která sestává z ceny veškerých prací včetně přípravy a základního  úklidu po provedených pracích. Objednatel je osobou povinnou k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.2 Cena za dílo uvedená v předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 
V ceně za dílo jsou zahrnuty náklady spojené s opatřením věcí, zařízení, materiál, náklady na zhotovení, montáž včetně dopravného a likvidace odpadů a předání dokumentace související s provedením Díla. 
 
3.3 Cena je splatná po dokončení a předání jednotlivých etap Díla bez vad a nedodělků, které bude rovněž zaznamenáno v protokolu o předání Díla. Cena je splatná do 30 dnů od doručení faktury Zhotovitele, který je oprávněn Cenu fakturovat teprve po převzetí Díla Objednatelem, Cenu Díla Objednatel uhradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele vedený u ……………, kód banky ……………….., číslo účtu …………..

4. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce včetně veškerých dodávek a základního úklidu vestibulu, chodeb a schodiště od přízemí až do 4.patra, v budově detašovaného pracoviště Duškova 7 Praha 5 v termínu od 23.7.2018 do 10.8.2018. (dále jen „Doba plnění“). 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO 

5.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy jsou faktury vystavené  zhotovitelem do sedmi dnů od předání provedeného díla podle čl. 7 odst. 3. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

6.2 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: 
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- datum vystavení faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účel platby – rozpis provedených prací a výkonů včetně věcí, zařízení a materiálu opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla v příloze faktury
- fakturovaná částka
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

6.3 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení díla sjednanou v této smlouvě, faktura nebyla vystavena v souladu s touto smlouvou nebo faktura neobsahuje náležitosti podle odst. 2. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.

6.4 Faktury budou vystaveny na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Faktury budou uhrazeny objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude na základě písemného oznámení Objednatele pozastaveno 10 % Ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Na dobu od oznámení Objednatele o využití práva na pozastávku do odstranění vad a nedodělků, se přerušuje lhůta pro splatnost faktur. 
6.5 Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech víceprací písemně požadovaných a odsouhlasených objednatelem. Případné jiné vícepráce pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
6.6 Zjištění rozsahu a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Faktury budou doloženy podepsaným zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, Protokolem o předání a převzetí díla odsouhlasených technickým dozorem, zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č.1 této smlouvy.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Nejpozději do dvou dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla v místě sídla Zhotovitele. 

7.2 Objednatel převezme provedené Dílo v místě sídla Zhotovitele do čtyř dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o dokončení provádění dílo. 

7.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat stav díla, vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, výhrady Objednatele a dohodu o termínu odstranění vad a nedodělků zhotovitelem. 

7.4 Objednatel si vyhrazuje právo pro případ vad a nedodělků pozastavit 10% z ceny díla.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele  v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

8.4 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám. 
8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.
8.6 Zhotovitel bude provádět práce v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 hodin, hluk při provádění prací nesmí přesáhnout limity stanovené Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
8.7 Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu, v místech kde nezasahují práce, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat.
8.8 Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací, touto osobou je Josef Svoboda – jednatel.
8.9 Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník. 
8.10 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, stavebního a montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Po ukončení prací provede zhotovitel základní úklid dotčených prostor. 
8.12 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat v koordinaci s probíhající výukou a provozem školy.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. Dílo má též vady, jestliže není provedeno v rozsahu, jakosti, provedení určeného touto smlouvou a jejími přílohami.

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo (nebo jeho příslušná část) v době jeho předání Objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla nebo jeho příslušné části Objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.
10.3 Zhotovitel touto smlouvou přebírá záruku za jakost, kterou zaručuje, že zhotovené dílo podle čl. I. bude po dobu 24 měsíců od převzetí Objednatelem způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová své obvyklé vlastnosti.
10.4 Objednatel je povinen případné vady vytknout u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
10.5 Má-li dílo vady, je objednatel po dobu záruky za jakost (odst. 10.3)  oprávněn požadovat:
a) u opravitelných vad bezplatné odstranění vad opravou nebo
b) požadovat slevu z ceny za provedení díla.
10.6 Neodstraní-li Zhotovitel vady způsobem požadovaným Objednatelem v souladu s odst. 10.5 ani v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li, že vady neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části, nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny za provedení díla. 
11.SMLUVNÍ POKUTA

11.1 Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním díla podle čl. 4 si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení, jestliže nedodržení lhůt podle čl. 4 smlouvy nezavinil.
11.2 V případě dodání vadného díla je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny za provedení díla podle čl. 3.1 této smlouvy.
11.3 Pro případ prodlení objednatele s převzetím díla nebo jeho příslušné části si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení. Objednatel však není povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže prodlení s převzetím díla nebo jeho příslušné části nezavinil.
11.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

12.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo její části odstoupit:
a) jestliže je Zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho příslušné části trvajícím déle než 15 dnů nebo
b) jestliže je Zhotovitel v prodlení se započetím díla nebo jeho příslušné části trvajícím déle než 7 dnů ,
c) v souladu s čl. 10.6 této smlouvy nebo.
d) jestliže Zhotovitel  nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle čl. 13. odst.2 nebo odst. 3 této smlouvy.
Dny pro účely celé této smlouvy se rozumí dny kalendářní. 
12.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit, jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla nebo jeho příslušné části trvajícím déle než 20 dnů.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
2.	Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. 13. odst. 1 je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. 3 odst. 1 včetně DPH. 
Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a Zhotovitel je povinen ji Objednateli předat nejpozději v den zahájení díla.
3.	Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 1 mil. Kč. Na žádost Objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.
4.	Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a poskytne součinnost při zpracování Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani majetku obce či státu. 
5.	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena na profilu zadavatele VOŠZ a SZŠ (egordion.cz), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6.	Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
-	ve věcech smluvních: Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy 
-	ve věcech technických:
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
-	ve věcech smluvních: Josef Svoboda, tel:  
-	ve věcech technických: Josef Svoboda, tel:            , Milan Rejzek, tel:                

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

14.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. 

14.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále. 

14.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do pěti pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

14.6 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 

14.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6.  

14.8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14.10 Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
14.11. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana - zhotovitel svůj souhlas se  zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Praha 1, Alšovo nábřeží 6. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
14.12 Zhotovitel vyjadřuje souhlas s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb.
14.13 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Datum:	 2.7.2018				Datum: 2.7.2018

Objednatel:________________			Zhotovitel:____________________

Přílohy:
1.	Specifikace díla a kalkulace ceny 
2.	Doklad o pojištění díla dle čl. 13. odst. 2 (na hodnotu díla včetně DPH)