DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 003/2018

(uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

SMLUVNÍ STRANY:

1. 	CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
se sídlem: Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 430 01
IČO: 27341313
DIČ: CZ27341313								                            
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
v oddíle B, vložka 1838
zastoupena: předsedou představenstva JUDr. Markem Hrabáčem, 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy na základě usnesení představenstva č. 51/18: Bc. Soňa Skalická, pověřená řízením společnosti
(dále také jen „objednatel“)

a

2. 	PETROM STAVBY a.s.
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, Strašnice
provozovna: Tušimice čp. 34, 432 01 Kadaň
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
číslo účtu: 
předseda představenstva: Marek Volák
osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech technických: 
Jakub Hanzl - stavbyvedoucí,
osoba zastupující společnost / zhotovitele na stavbě:
Jakub Hanzl a Antonín Dvořák - stavbyvedoucí 
(dále také jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

1.	Předmětem dodatku je úprava Článku II. Doba plnění, který se mění takto:

Dle ujednání smluvních stran se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo dle následujícího časového harmonogramu:

•	Termín zahájení prací:		25.06.2018
•	Termín ukončení prací: 		28.10.2018,
•	Doba realizace díla v týdnech:	    18

2.	Předmětem tohoto dodatku je dále úprava Článku III. Cena za dílo, který se mění takto:

 	Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:
•	celková cena bez DPH: 			4.021.659,- Kč,
•	výše DPH (15%): 		   	  603.249,- Kč,
•	celková cena bez DPH:		    	   68.100,- Kč
•	výše DPH (21%):		     		   14.301,- Kč	
•	celková cena včetně DPH: 		4.707.309,- Kč 
(slovy: čtyři milióny sedm set sedm tisíc tři sta devět korun českých).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2.	Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením představenstva společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. č. 51/18 per rollam.

3. 	Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chomutově, dne …………….……				V Kadani, dne ………….………

     Objednatel: 						    Zhotovitel:

_________________________ 					_____________________________
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 						PETROM STAVBY a.s.