Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.
Smluvní strany

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 
čú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx  
interní číslo zakázky: 2016/002 

na straně jedné (dále jen „objednatel") 

a

ELIZZA s.r.o.
se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4 - Chodov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena:	Ing. Milanem Stupavským, Dr. - jednatelem společností

IC:
DIČ:
bankovní spojení: č. ú.:

00334561 CZ0Q334561 xxx 
xxx

    osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 
    na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen
"smlouva"):
ÍI.
Úvodní ustanovení
2.1.	Objednatel je příjemcem dotace na registrovaný investiční záměr s názvem "UK-FF-Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 -I. etapa", reg. č. 133D21E000032.
2.2.	Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") zadávací řízení na veřejnou zakázku „UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa" zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ za účelem uzavření smlouvy.
2.3.	Nabídka zhotovitele byla v souladu se ZVZ vybrána jako nejvhodnější.
III.
Předmět smlouvy
3.1.	Předmětem smlouvy jsou stavební práce a dodávky v rámci akce „Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky" (dále též jen „dílo"). Tato akce zahrnuje celkovou stavební rekonstrukci vnitřních prostor 1. PP v traktu přilehlém k ulici Kaprova a Valentinská. Jedná se zejména o rekonstrukci a rozšíření pracovních prostor kancelářských a skladových LVT (výpočetního centra), přesunutí a modernizaci hlavní serverovny FF UK včetně realizace souvisejících technologií (EPS, EZS, klimatizace, plynové hašení), a dále o rekonstrukci dalších přilehlých prostor - komunikací, kanceláře edice, skladů a realizaci nových sociálek. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky.
3.2.	Technické parametry díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci „FF UK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky" zpracované VPU DECO Praha a.s., 11/2013, rev. 02/2016, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v předmětné projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, dodavatel to při realizaci díla bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Objednatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen a bude mít lepší parametry.
3.3.	Zhotovitel se zavazuje jako součást díla předat též závěrečnou zprávu s dokumentací, kterou zhotovitel zpracuje ve dvou vyhotoveních, spolu s výkresovou dokumentací skutečně provedeného díla ve dvou listinných provedeních a totéž také v elektronické verzi na CD.
3.4.	Zhotovitel je povinen předložit týdenní harmonogram postupu realizace díla, aby prokázal, že je schopen dílo realizovat za provozu objednatele, a že dodrží lhůtu pro požadované dokončení prací dle odst. 5.2. smlouvy. Předmětný harmonogram tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3.5.	Zhotovitel je povinen předložit v návaznosti na harmonogram prací a termíny předání a převzetí díla, resp. ucelené části díla dle odst. 3.4. smlouvy platební kalendář. Předmětný platební kalendář tvoří přílohu č. 5 smlouvy.
3.6.	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a dále potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3.7.	Objednatel se zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. IV. smlouvy. Objednatel převezme dílo na základě protokolů o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části.
3.8.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je zhotovitel povinen na základě požadavků objednatele provést soupis těchto změn, ocenit jej a předložit tento soupis k vyjádření projektantovi plnění a objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
IV,
Cena díla
4.1.	Celková cena díla je dle odst. 4.2. smlouvy určena na základě rozpočtu dle § 2620 a násl. občanského zákoníku a je stanovena jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná za celý objem prací a dodávek dle čl. III. smlouvy. Celková cena díla zahrnuje veškeré práce, materiály a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v cenové nabídce - ve vyplněném výkazu výměr, která tvoří nedílnou součást - přílohu č. 3 smlouvy.
Smluvní strany považují předmětný vyplněný výkaz výměr za úplný a závazný. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že zhotovitel ve smyslu § 2620 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku, nese nebezpečí změny okolností.
4.2.	Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:
Celková cena bez DPH v Kč:	8 998 855,-
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	1 889 760,-
Celková cena včetně DPH v Kč:	10 888 615,-
4.3.	Dohodnutá cena bude zhotovitelem navýšena o částku daně z přidané hodnoty ve výši odpovídající sazby daně. Věta první se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel na základě zákonného sdělení od zhotovitele.
4.4.	Ke změně cen uvedených v čl. IV. odst. 4.2. smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich snížením, a to na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla dojde ke snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo změny materiálů navržených objednatelem nebo zhotovitelem nebo z důvodu objednatelem poskytnutého materiálu (vznik méněprací).
V.
Místo a termíny plnění smluvních závazků
5.1.	Místem plnění i realizace díla je budova Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha 2 v Praze 1,
5.2.	Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla nebo jeho části:
•	termín převzetí staveniště a zahájení prací: do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy,
•	termín předání díla: 15. 9. 2016,
•	vyklizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 2 kalendářních dnů od dokončení díla.
5.3.	Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele a zavazuje se při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a časovým harmonogramem provádění díla ve smyslu ust. čl. III. odst. 3.4. smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně jinak.
5.4.	Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle odst. 5.2. smlouvy přístup k předmětu díla v nezbytném rozsahu a poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
VI.
Vlastnická práva, náhrada škody
6.1.	Smluvní strany ohledně vlastnictví zhotovované věci (předmětu díla) odkazují na znění ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese zhotovitel.
6.2.	Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí, potřebných pro provedení díla, je zhotovitel.

6.3.	Zhotovitel prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel s pojišťovnou se sídlem na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám vzniklým na díle v době provádění díla z titulu veškerých v úvahu připadajících pojistitelných rizik, a to do výše limitu pojistného plnění v částce min. 1 000 000 Kč z jedné pojistné události, a dále prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel s pojišťovnou se sídlem na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním plnění podle smlouvy, a to s limitem pojistného plnění nejméně v částce 3 500 000 Kč z jedné pojistné události, přičemž zhotovitel se zavazuje kdykoliv na požádání objednatele bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele předložit objednateli certifikát pojišťovny prokazující existenci příslušných smluv. O změnách týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu má zhotovitel povinnost objednatele informovat, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečněné změny. Zhotovitel se zavazuje, že pojistné smlouvy zůstanou v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu záruky na dílo.
6.4.	Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle smlouvy za stav a provoz všech zařízení a věcí uvedených v odst. 6.2. smlouvy, a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6.5.	V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení takové prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním, sjednaným ve smyslu odst. 6.3. smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vzniku škod.
6.6.	Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by sankcionovalo, že předmět plnění či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví subdodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel bude povinen mu tyto smlouvy předložit. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informace ve vztahu k objednateli.
VII.
Fakturace a platební podmínky
7.1.	Faktura za provedení díla obsahující podrobné vyúčtování ceny díla bude v souladu s platebním kalendářem (příloha č. 5 smlouvy) vystavena do 5 pracovních dnů bezprostředně následujících po dni předání a převzetí díla, resp. ucelené části díla. V případě převzetí plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
7.2.	Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků dle odst. 7.1. smlouvy ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu plnění.
7.3.	Zhotovitel - plátce DPH - vystaví objednateli na konkrétní zdanitelné plnění fakturu (účetní a daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně a řádně provedených prací, písemně odsouhlasený objednatelem. Na základě potvrzeného soupisu skutečně a řádně provedených prací vystaví zhotovitel fakturu ve výši odpovídající ceně stanovené pro provedené práce výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
7.4.	Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura je považována za včas uhrazenou, dojde-li nejpozději poslední den její splatnosti k odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

7.5.	Faktura bude kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě toho bude faktura obsahovat číslo smlouvy a den jejího uzavření a název a reg. č. investičního záměru uvedené v čl. II. smlouvy. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti a přílohu - soupis skutečně a řádně provedených prací dle odst. 7.3. smlouvy, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
7.6.	V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena a zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH, V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit,
7.7.	Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle čl. XIV. smlouvy proti splatné faktuře zhotovitele.
7.8.	Zhotoviteli nebudou hrazeny zálohy.
VIII.
Provádění dozoru nad plněním předmětu smlouvy
8.1.	Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly zhotovování díla všem osobám pověřených objednatelem.
8.2.	Osoba pověřená objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna vykonávat na místě provedení díla dozor nad plněním podmínek smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, doporučujících norem a jiných právních předpisů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup do prostor v místě provedení díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel se zavazuje poskytnout osobě vykonávající technický dozor investora součinnost nezbytnou k provádění tohoto dozoru.
8.3.	Osoba pověřená objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna zastavit práce v případech, kdy:
•	hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
•	je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
•	je ohrožena bezpečnost stavby,
•	hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla.
8.4.	Zhotovitel i objednatel jsou povinni zajistit každodenní účast pověřeného pracovníka na místě provádění díla,
IX.
Stavební deník
9.1,	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro

plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
9.2.	Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
•	název, sídlo, IČ zhotovitele
•	název, sídlo, IČ objednatele
•	název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
•	název, sídlo, IČ osoby vykonávající technický dozor investora
•	přehled všech provedených zkoušek jakosti
•	seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
•	seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
9.3.	Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbu trvale vedla kvalifikovaná osoba (stavbyvedoucí) schválená objednatelem, jejíž kvalifikaci zhotovitel objednateli doloží.
9.4.	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
9.5.	Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.
9.6.	Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
9.7.	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy.
X.
Provádění díla
10.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, řádně a včas. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla, pokud mu tyto neposkytne objednatel.
10.2.	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10.3.	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup.
10.4.	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace jeho pokynů nebo na případné rozpory či chyby v dokumentech, jež tvoří přílohy smlouvy. Veškeré práce a činnosti zhotovitele musejí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních konstrukcí, zařízení a vybavení.
10.5.	Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí (především hlukem, prašností a vibracemi), ke znečišťování komunikací, a při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
10.6.	Zhotovitel je v průběhu provádění díla odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek objednatele zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti aktivit 

v místě realizace díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
10.7.	Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů.
10.8.	Dále je zhotovitel při realizaci díla vázán pokyny objednatele (např. hlučné práce budou koordinovány dle požadavků objednatele tak, aby se minimalizovalo narušování provozu). V případě nejistoty ohledně pokynů objednatele je zhotovitel povinen si vyžádat od objednatele jejich upřesnění.
XI.
Kvalitativní podmínky předmětu díla, jakost díla
11.1.	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Tyto vlastnosti díla budou odpovídat platné a účinné právní úpravě, českým technickým normám, běžným technologickým postupům, a k tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající Prohlášení o shodě.
11.2.	Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami včetně doporučujících a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla a pokyny výrobců či dodavatelů instalovaných zařízení tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
11.3.	V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebyly uvedeny v původní specifikaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými ČSN, včetně doporučujících. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
11.4.	Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními, nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví, o nichž tuto skutečnost zhotovitel v době zabudování měl nebo mohl vědět. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
XII.
Odpovědnost za vady a záruka za dílo
12.1.	Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným a účinným normám ČSN, vztahujícím se na daný předmět plnění, standardům a pokynům výrobců a dodavatelů instalovaných materiálů a zařízení.
12.2.	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho povinností dle smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 4 smlouvy. Jinou osobu, než která je uvedena v seznamu v této příloze, je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nebude subdodavatele využívat, doloží jako přílohu č. 4 smlouvy čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez subdodavatelů.

12.3.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo jako celek v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu díla objednatelem, resp. jeho ucelené části.
12.4.	Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době s výjimkou vad, které byly způsobeny neodborným zásahem objednatele, popř. třetích osob, případně byly způsobeny běžným opotřebením.
12.5.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být uvedeno, o jakou vadu jde, příp. jak se vada projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
•	odstranění vady dodáním náhradního zboží (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
•	odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
•	přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
•	odstoupení od smlouvy.
12.6.	Zhotovitel svolá na základě tohoto oznámení ihned reklamační jednání a na reklamovaných vadách započne s odstraňováním vady tak, aby byl splněn termín dohodnutý ve smlouvě, popř. v reklamačním jednání. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned po jejím ohlášení. Vada bránící provozu díla musí být odstraněna nejpozději do 24 hod. od jejího ohlášení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Vada nebránící provozu díla musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího ohlášení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě pochybností se má za to, že se jedná o vadu bránící provozu díla.
12.7.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
12.8.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku.
12.9.	Objednatel je oprávněn odstranit vadu na předaném díle na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takovému odstranění vady písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu, sděleného písemně objednateli, neodstranil vady ve lhůtě sjednané dle odst. 12.6. smlouvy, a nezačne s odstraňováním vady ani do 15 kalendářních dnů bezprostředně následujících po doručení písemného upozornění objednatele, že vady odstraní sám. Stejný postup platí v případě, že zhotovitel bez závažného důvodu nepokračuje v odstraňování vady, nebo že vadu neodstranil do termínu stanoveného ve smlouvě.
12.10.	Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady, tedy zejména cenu vyměňovaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě, opětovné montáži a náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a materiálů.
12.11.	Trojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat výměnu vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem na své náklady odstranit.
12.12.	Záruční doba, uvedená v odst. 12.3. smlouvy, se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od zjištění vady, v důsledku níž je předmět díla vyřazen z provozu, do odstranění této vady.
12.13.	Na vyměňované díly a provedené opravy v rámci stanovené záruky poskytuje zhotovitel novou dílčí záruku v délce 60 měsíců. Trváním (resp. uplynutím) této nové dílčí záruční lhůty není dotčena záruční lhůta na celé dílo uvedená v odst. 12.3. smlouvy.
12.14.	O každé vadě, oznámené objednatelem, sepíší smluvní strany protokol - zápis z reklamačního řízení - v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad a konstatují prodloužení záruky. Zhotovitel v protokolu uvede, zda svou odpovědnost uznává či nikoliv včetně uvedení důvodu.

XIII.
Předání a převzetí díla
13.1.	Přejímací řízení bude zahájeno v následujícím dnu po termínu dokončení díla, nebo jeho ucelené části dle harmonogramu v příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným ukončením prací, čímž není dotčeno ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
13.2.	K přejímce díla nebo jeho ucelené části je zhotovitel povinen objednateli předem předložit všechny doklady, které si od zhotovitele vyžádá objednatel. Tyto doklady budou zahrnovat zejména doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů, a dále výsledky zkoušek a revizí, atesty, prohlášení o shodě a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry výrobků. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen rovněž předat objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty atd.
13.3.	O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol, ve kterém budou uvedeny tyto základní údaje:
•	označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele,
•	číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě,
•	zahájení a dokončení prací na díle,
•	prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání provozu díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění,
•	prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
•	 datum předání a převzetí díla,
•	seznam převzaté dokumentace,
•	datum ukončení záruky na dílo,
•	datum a místo sepsání protokolu,
•	jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
•	další dokumenty podle odst. 13.2 smlouvy.
13.4.	Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.
13.5.	Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se nejedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, převezme dílo tzv. s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle tohoto článku, včetně stanovení lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků.
13.6.	Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plnění, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
XIV.
Smluvní pokuty
14.1.	Pří nedodržení, resp. překročení termínu převzetí staveniště a zahájení prací sjednaného v odst.
5.2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každý i

jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností do dne jejího dodatečného splnění.
14.2.	Při nedodržení, resp. překročení termínu předání díla sjednaného v odst. 5.2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností do dne jejího dodatečného splnění.
14.3.	Při nedodržení termínu pro uklizení a vyklizení místa provedení díla (staveniště) sjednaného v odst. 5.2 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
14.4.	Při nedodržení termínu pro odstranění vady bránící provozu díla dle odst. 12.6. věta třetí smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
14.5.	Při nedodržení termínu pro odstranění vady nebránící provozu díla dle odst. 12.6. věta čtvrtá smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč.
14.6.	Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dodáno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč.
14.7.	Za každý zjištěný případ porušení předpisů BOZP a PO zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
14.8.	V případě, že zhotovitel poruší závazky uvedené v odst. 6.3. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
14.9.	Za jakékoliv porušení povinnosti stanovené v odst. 6.6 smlouvy bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
14.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
14.2.	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
14.3.	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní pokutou.
XV.
Vyšší moc
15.1.	Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy jako např. živelné pohromy, stávky, nařízený archeologický průzkum apod.
15.2.	Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat objednatele a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z ní plynoucího neplnění závazků.

15.3.	Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla písemným dodatkem ke smlouvě.
XVI.
Odstoupení od smlouvy
16.1.	Od smlouvy lze doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně odstoupit na základě zákona nebo okamžitě v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou za podmínek uvedených níže.
16.2.	Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují následující skutečnosti:
•	pokud dílo nebude prováděno v souladu s pokyny objednatele, a v průběhu prací bude vykazovat vady, přestože na tyto skutečnosti bude zhotovitel písemně objednatelem upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu;
•	 pokud zhotovitel bude porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy a nezjedná okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele;
•	prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků bránících provozu díla trvajícím déle než 10 dní oproti termínu sjednanému v odst. 5.2. smlouvy;
•	oznámení o zvýšení ceny díla oproti položkovému rozpočtu dle odst. 4.2. smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak;
•	zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16.3.	Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s občanským zákoníkem učinit tyto kroky:
•	 zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech realizovaných dodávek a provedených prací, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, na základě které byla určena cena díla (oceněný výkaz výměr);
•	zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou fakturu a předá ji neprodleně objednateli k odsouhlasení;
•	dle podmínek v čl. XIII. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání a převzetí rozpracovaného díla;
•	obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně;
•	smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady a škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo pro okolnosti vylučující odpovědnost.

16.4.	Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklý porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.
16.5.	Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude dotace odejmuta, nebo by některé z výdajů měly být prohlášeny za nezpůsobilé, Zhotoviteli budou uhrazeny náklady rozpracovanosti,
XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1.	Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k jednání za smluvní strany. Smluvní strany zároveň prohlašují, že před uzavřením smlouvy řádně splnily veškeré hmotněprávní podmínky pro platné uzavření smlouvy, vyplývající z platných a účinných právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných a účinných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.
17.2.	Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
•	řádně překontroloval veškerou dostupnou projektovou dokumentaci pro zhotovení díla, a to včetně všech jejích součástí a příloh,
•	dostatečně prověřil místní podmínky na budoucím staveništi,
•	zahrnul všechny technické a dodací podmínky plnění do kompletní kalkulace cen,
•	je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími ze smlouvy,
•	nejsou mu známy žádné překážky, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu plnění.
17.3.	Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, popř. bude považováno za zdánlivé, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
17.4.	Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
17.5.	Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
17.6.	Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
17.7.	Práva vzniklá ze smlouvy nesmí zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
17.8.	Kterákoliv ze smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
17.9.	Smluvní strany se dohodly na doručování zásilek formou doporučených dopisů s tím, že zásilka je považována za doručenou 3. den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v čl. I. smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.
17.10.	Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují smluvní strany přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu.
17.11.	Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
17.12.	Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které^ strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
17.13.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

17.14.

17.15.

Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli, a dalším kontrolním orgánům v rámci kontroly dle předchozí věty potřebnou součinnost v rozsahu daném uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací předmětu smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat své případné subdodavatele.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích případných dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu alespoň 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v jakém jsou seřazeny podle důležitosti:
•	tato smlouva
•	zadávací podmínky zadávacího řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena
•	nabídka zhotovitele
V případě, že si tyto dokumenty protiřečí, platí vždy znění dokumentu vyšší důležitosti.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
•	Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
•	Příloha č. 2 - Harmonogram prováděných prací
•	Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr
•	Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů nebo Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
•	Příloha č. 5 - Platební kalendář

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

V Praze dne 13. 7. 2016 				V Praze dne 27. 5. 2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.				Ing. Milan Stupavský, Dr. - jednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO	/

                                                    UK-FF Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 -1. etapa

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0399
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 00216208 
CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
interní číslo zakázky: 2016/002 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a
ELIZZA s.r.o

v obchodním rejstříku, vedeném

se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4zapsaná
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576

zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. ú.:

Ing. Milanem Stupavským, Dr. - jednatelem společnosti
00334561
CZ00334561
xxx
xxx

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
I.
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0399 (dále jen „Smlouva“).
II.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě
V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, a s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy způsobené administrativními důvody na straně objednatele plynoucími z prodlení na straně poskytovatele dotace, z níž je Smlouva financována, dohodly na těchto změnách Smlouvy:
a)	Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:
i.	sanace vlhkosti zdivá v místnosti č. S147 - méněpráce - dle Změnového listu č. I,
ii.	sanační omítky - vícepráce dle Změnového listu č. II,
iii.	bourání podlahy WC - vícepráce - dle Změnového listu č. III,

iv.	úprava dispozice - skleněná příčka - vícepráce dle Změnového listu č. IV,
v.	upřesnění počtu oken a dveří - méněpráce dle Změnového listu č. VI,
vi.	úprava dispozice - zrušení velínu - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č.VII,
vii.	změna výšky zdvojených podlah - vícepráce dle Změnového listu č. VIII,
viii.	vestavěný interiér - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. IX,
ix.	úprava dispozice - změny počtu přípojných míst - vícepráce dle Změnového listu č. X,
x.	propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XI,
xi.	změna požadavku akustických vlastností příčky v serv. - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XII,
xii.	stěhování nábytku, vyklízení - vícepráce dle Změnového listu č. XIII,
xiii.	úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku - vícepráce dle Změnového listu č. XIV,
xiv.	vybourání prostupu do kolektoru - vícepráce dle Změnového listu č. XV,
xv.	ochranné sloupky - vícepráce dle Změnového listu č. XVI,
xvi.	úprava podlahy na chodbě - terrazzo - vícepráce dle Změnového listu č. XVII.
Změnové listy č. I-IV a VI-XVII včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto
dodatku.
b)	ČI. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce a méněpráce

Cena bez DPH v Kč:	18 413,-
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	3867,00
Cena včetně DPH v Kč:	22 280,-
Z toho
Vícepráce - přípočty celkem bez DPH 640 535,- DPH v %:	21%
DPH v Kč:	134 512,-
Cena včetně DPH v Kč:	775 047,-
Méněpráce - odpočty celkem bez DPH -622 122,- DPH v %:	21%
DPH v Kč:	-130 646,-
Cena včetně DPH v Kč:	-752 767,-

specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:
c)	ČI. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků “, konkrétně druhý bod „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 15. 9. 2016“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 17. 10. 2016“.
III.
Závěrečná ujednání
1.	Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2.	V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4.	Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5.	Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6.	Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Příloha č. 1 - Změnové listy č. I-IV a VI-XVII
8.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne 20. 9. 2016				V Praze dne 14. 9. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.				Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel
        děkanka FF UK					             ELIZZA s.r.o.

		FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky								
		Stavební část									
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	vícepráce - Kč. Bez DPH	méněpráce - Kč. Bez DPH	
 Změnové listy celkem 	18,413 Kč	640,535 Kč	-622,122 Kč	
 ZML č.I Sanace vlhkosti zdiva v místnosti č. S147 	-12,576 Kč	0 Kč	-12,586 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Sanace vlhkosti zdiva prováděná z vnějšku budovy byla vypuštěna z důvodu přípravy realizace celkové rekonstrukce fasád a střech v rámci které, bude provedena sanace vlhkosti  v celém rozsahu budovy (nikoli jen dílčí dle tohoto projektu).  	 	 	 	 	
 1. 	ZS 04	Náklady na zábory                           ……………………m2 po dobu……………………dnů	m2	 20.0  	–  	 20.0  	               1.0 Kč 	                20 Kč 	 	 	
 2. 	VN3.01	DIO a DIR - Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí - dopravní značení po dobu výstavby	kpl	 1.0  	–  	 1.0  	               1.0 Kč 	                   1 Kč 	 	 	
 3. 	132102101	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 1 a 2, soudržná	m3	 5.04 	–  	 5.04 	-         100.0 Kč 	-             504 Kč 	 	 	
 4. 	162701605	Odvoz výkopku na skládku	m3	 1.89 	–  	 1.89 	-         100.0 Kč 	-             189 Kč 	 	 	
 5. 	171201206	Poplatek za skládku	m3	 1.89 	–  	 1.89 	-         150.0 Kč 	-             284 Kč 	 	 	
 6. 	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	 6.3  	–  	 6.3  	-         155.0 Kč 	-             977 Kč 	 	 	
 7. 	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	 3.15 	–  	 3.15 	-         174.0 Kč 	-             548 Kč 	 	 	
 8. 	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	 3.15 	–  	 3.15 	-            95.0 Kč 	-             299 Kč 	 	 	
 9. 	113106011	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2	m2	 10.5  	–  	 10.5  	-            40.0 Kč 	-             420 Kč 	 	 	
 10. 	216904391	Očištění ploch ruční - základové konstrukce pod terénem	m2	 9.45 	–  	 9.45 	-            65.0 Kč 	-             614 Kč 	 	 	
 11. 	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým  - ploch do 15 m2	m2	 10.5  	–  	 10.5  	-            37.0 Kč 	-             389 Kč 	 	 	
 12. 	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva / z původní očištěné dlažby	m2	 10.5  	–  	 10.5  	-         105.0 Kč 	-         1,103 Kč 	 	 	
 13. 	566901124	Vyspravení podkladu komunikací pro pěší plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	 10.5  	–  	 10.5  	-         100.0 Kč 	-         1,050 Kč 	 	 	
 14. 	629995101	Očištění vnějších ploch - omytím tlakovou vodou	m2	 9.45 	–  	 9.45 	-            44.0 Kč 	-             416 Kč 	 	 	
 15. 	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	 9.45 	–  	 9.45 	-         169.0 Kč 	-         1,597 Kč 	 	 	
 16. 	622909001	Kamenná podezdívka - očištění, vyspravení a impregnování	m2	 10.5  	–  	 10.5  	-         139.0 Kč 	-         1,460 Kč 	 	 	
 17. 	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	 9.45 	–  	 9.45 	-            18.0 Kč 	-             170 Kč 	 	 	
 18. 	71101	Asfaltový lak penetrační - dodávka	kg	 3.308	–  	 3.308	-            48.0 Kč 	-             159 Kč 	 	 	
 19. 	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	 9.45 	–  	 9.45 	-            90.0 Kč 	-             851 Kč 	 	 	
 20. 	71102	Asfaltový pás SBS modifikovaný - dodávka	m2	 9.45 	 15.00 	 10.868	-         136.0 Kč 	-         1,478 Kč 	 	 	
 21. 	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	- 26.573	–  	- 26.573	-              3.1 Kč 	-               81 Kč 	 	 	
 ZML č.II Sanační omítky 	30,963 Kč	47,924 Kč	-16,967 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Projekt předpokládal vnitřní sanační omítky pouze v m.č. S147. Po vyklizení místností byla zjištěna vlhkost obvodového zdiva v celém rozsahu řešené části podlaží a rozsah sanačních omítek byl  navýšen.  	 	 	 	 	
 	 	 V odpovídající ploše jsou odpočty původní povrchové úpravy stěn. 	 	 	 	 	
 1. 	612476000	Vnitřní sanační omítkový systém - minerální sanační štuk s adhezními přísadami, jádrová sanační omítka, minerální sanační podhoz / detailní specifikace viz Povrchové úpravy stěn vnitřních - Skladba M4	m2	 54.91 	–  	 54.91 	           765.0 Kč 	        42,006 Kč 	 	 	
 2. 	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva	m2	 54.91 	–  	 54.91 	             58.0 Kč 	           3,185 Kč 	 	 	
 3. 	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	 3.0  	–  	 3.0  	           311.0 Kč 	              933 Kč 	 	 	
 4. 	997006500	Odvoz odpadu na skládku	t	 3.0  	–  	 3.0  	           250.0 Kč 	              750 Kč 	 	 	
 5. 	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	 3.0  	–  	 3.0  	           350.0 Kč 	           1,050 Kč 	 	 	
 6. 	612421421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stěn - hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% / včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt - skladba M2	m2	 54.91 	–  	 54.91 	-         168.0 Kč 	-         9,225 Kč 	 	 	
 7. 	612381000	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3	m2	 54.91 	–  	 54.91 	-         141.0 Kč 	-         7,742 Kč 	 	 	
 ZML č.III Bourání podlahy WC  	32,163 Kč	32,163 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 V době zpracování projektu nebyl znám důvod dodatečného navýšení podlah v celé ploše všech WC v budově. Bylo zjištěno, že dobetonávka souvisela pouze s dvojnásobnou obnovou dlažeb a možnostmi technologie v minulých letech.  	 	 	 	 	
 	 	 Uživatel sleduje odstraňování komunikačních bariér v budově   a proto bylo rozhodnuto o vybourání dobetonávky v celém rozsahu. 	 	 	 	 	
 35. 	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm	m3	 4.2  	–  	 4.2  	       1,700.0 Kč 	           7,140 Kč 	 	 	
 44. 	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	 12.2  	–  	 12.2  	           311.0 Kč 	           3,794 Kč 	 	 	
 45. 	997006500	Odvoz odpadu na skládku	t	 12.2  	–  	 12.2  	           250.0 Kč 	           3,050 Kč 	 	 	
 46. 	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	 12.2  	–  	 12.2  	           350.0 Kč 	           4,270 Kč 	 	 	
 1. 	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	 2.185	–  	 2.185	       3,200.0 Kč 	           6,992 Kč 	 	 	
 2. 	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	 2.185	–  	 2.185	           639.0 Kč 	           1,396 Kč 	 	 	
 	 	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - síť 100/100/8	t	 0.205	–  	 0.205	     26,830.0 Kč 	           5,500 Kč 	 	 	
 ZML č.IV Úprava dispozice - Skleněná příčka 	123,585 Kč	123,585 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Vzhledem k nedostatku dalších volných prostor v budově, bylo po zpracování projektu  rozhodnuto, že v řešených prostorách uživatel potřebuje více pracovních míst včetně oddělené kanceláře pro vedoucí pracovníky. 	 	 	 	 	
 	 	  Předěl bude realizován montovanou příčkou. 	 	 	 	 	
 1. 	 	D + M OMEGA 100.1 příčky 3,0x2,75m, barva AL profilů ELOX, zasklení VSG 33.2, bez žaluzie, dveře plné s nadpanelem LTD EGGER H 1521 ST15, s padací lištou, kování HOPPE Amsterdam, klika/klika, zámek SSF, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače, bez akustické bariéry, těsnění šedé	kpl	 1.0  	 	 1.0  	   123,585.0 Kč 	      123,585 Kč 	 	 	
 ZML č.VI Upřesnění počtu oken a dveří 	-68,029 Kč	0 Kč	-68,029 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Část oken bude realizována v rámci jiné akce - kompletní rekonstrukce fasád a střech, ostatní okna byla v této realizaci ponechána, aby již obnovené prostory nebyly narušeny další stavební činností.  	 	 	 	 	
 	 	 Vypouští se vnitřní dělící stěna jako provozně nevhodná. 	 	 	 	 	
 1. 	O11	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 5 otevíravé, 2x sklopné, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ), pákový spřažený otevírací mechanismus nadsvětlíku - opravit funkčnost	 ks 	 1.0  	–  	 1.0  	-    21,000.0 Kč 	-       21,000 Kč 	 	 	
 2. 	O12	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	 ks 	 1.0  	–  	 1.0  	-    21,000.0 Kč 	-       21,000 Kč 	 	 	
 3. 	D951	replika, prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, světlý rozměr 900/2100, zárubeň - replika, rámová dřevěná, boční prosklené díly a nadsvětlík, profilace, skladebná tl. 80 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010 , kování: klika - klika, zámek s panikovou funkcí - ve směru úniku klika překoná zamčený zámek	 ks 	 1.0  	–  	 1.0  	-    26,029.0 Kč 	-       26,029 Kč 	 	 	
 ZML č.VII Úprava dispozice - zrušení velínu 	-323 Kč	5,522 Kč	-5,845 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Od doby zpracování projektu se ukázalo, že oproti původnímu, bude vhodnější z provozních důvodů situovat velín ostrahy poblíž vrátnice. Ten bude realizován v rámci jiné akce společně s celkovou rekonstrukcí vstupních prostor. Záměr se připravuje.  	 	 	 	 	
 	 	 Veškerá technologie související s ostrahou je přesouvána do vrátnice. Místnost bude využita jako jednací místnost, doplněna je příprava na projekci. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Příprava pro projektor v m.č. S152 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 2. 	 	trubka prům. 50	 	 8.0  	 	 8.0  	             97.0 Kč 	              776 Kč 	 	 	
 3. 	 	zakončení krabicí ve vícerámečku	 	 2.0  	 	 2.0  	           258.0 Kč 	              516 Kč 	 	 	
 4. 	 	Kabel HDMI 10m	 	 1.0  	 	 1.0  	           948.0 Kč 	              948 Kč 	 	 	
 5. 	 	spojka HDMI	 	 1.0  	 	 1.0  	             87.0 Kč 	                87 Kč 	 	 	
 6. 	 	Kabel HDMI 2m	 	 1.0  	 	 1.0  	           695.0 Kč 	              695 Kč 	 	 	
 7. 	 	Pomocné práce a stavební přípomoce	 	 1.0  	 	 1.0  	       2,500.0 Kč 	           2,500 Kč 	 	 	
 8. 	 	LCD monitor S-PVA, 3500: 1 kontrast, 700cd/m2, 8ms, 1920x1080, bez ppodstavce, 2x DVI, Comúponent, HDMI, LAN, S-Video, 46" NEC MultiSync LCD P462 černý	 	 odpočet 	 	- 1.0  	       5,845.0 Kč 	-         5,845 Kč 	 	 	
 9. 	 	osstatní  zařízeni části el-slabo se přesouvá do vrátnice	 	 1.0  	 	 1.0  	                   -  Kč 	                    - Kč 	 	 	
 ZML č.VIII Změna výšky zdvojených podlah 	30,031 Kč	30,031 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Po vyklizení místností a demontáži stávajících podlah zjištěna jiná potřebná výška zdvojené podlahy 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 1. 	 	Výškově nastavitelné sloupky z pozinkované oceli výška 250 mm	m2	 165.8  	 	 165.8  	           145.0 Kč 	        24,041 Kč 	 	 	
 2. 	 	Ventilační mřížky 	ks	 	 	 2.0  	       2,995.0 Kč 	           5,990 Kč 	 	 	
 ZML č.IX Vestavěný interiér 	-141,898 Kč	111,610 Kč	-253,508 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Změna souvisí se změnou navýšení pracovních míst v prostoru LVT, zrušením velínu  (ZL č. IV a VII.) a zachováním místnosti pro řidiče -zrušení skladu .  	 	 	 	 	
 						 	
 1. 	 i02 	skříňová sestava a kuchyňka velín, kuchyňská linka dl. 1800 mm a skříňová sestava dl. 4500 mm - viz nákres	kpl.	 odpočet 	 	- 1.0  	     90,740.0 Kč 	-       90,740 Kč 	 	 	
		kuchyňka, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, skřínka pro vestavnou chladničku, včetně soklu s větrací mřížkou, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolně, horní skřínky dvířka plná, police, skřínka pro mikrovlnnou troubu - hloubka a výška horních skřínek přizpůsobit dle konkrétní vestavné mikrovlnné trouby, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení, včetně vestavných spotřebičů - chladnička nízká podstavná, mikrovlnná trouba vč...									
		skříňová sestava, sestava 4 ks skříní dl. 4500 mm, hl. 600 mm, 1x šatní, 2x policová a 1x regál se zásuvkami, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, šatní tyč chrom, dvířka uzamykatelná, skříňě - dvířka plná, police nastavitelné, polozapuštěný čep, policový díl - 3x zásuvka, police nastavitelné, polozapuštěný čep, záda lamino šedé									
 2. 	 i02 	kuchyňka zasedací místnost, kuchyňská linka dl. 1800 mm - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, včetně soklu, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolně, horní skřínky dvířka plná, police, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení	kpl.	 přípočet 	 	 1.0  	     38,865.0 Kč 	        38,865 Kč 	 	 	
 3. 	i04	policová sestava vydavatelství, sestava skříní dl. 4000 mm, hl. 400 mm, 5x regál s dolními dvířky - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep	kpl.	 odpočet - 
zcela zrušeno 	 	- 1.0  	     25,450.0 Kč 	-       25,450 Kč 	 	 	
 4. 	i05	policová sestava distribuce, sestava skříní, 3x regál s dolními dvířky, 2x redál, 1x regál volný a vložený stůl - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police plně nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, stůl konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, nohy plastové zátky, police a deska LTD tl. 40 mm - důraz na stabilitu a únosnost, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná	kpl.	 odpočet - 
zcela zrušeno 	 	- 1.0  	     45,770.0 Kč 	-       45,770 Kč 	 	 	
 5. 	i06	stůl balící distribuce, obdélníkový 1500/800 mm, konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, deska LTD bříza, hrany ABS, nohy s plastovými zátkami - důraz na stabilitu a únosnost	kpl.	 přípočet 	 	 1.0  	       3,585.0 Kč 	           3,585 Kč 	 	 	
  6.  	i11	policový regál 40, regál š. 800 mm, v. 2600 mm, hl. 400 mm, 6 polic - viz nákres, včetně atypu v m.č. S149 v rohu, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, 4x noha rektifikační, nikl broušený	kpl.	 odpočet - 
zcela zrušeno 	 	- 15.0  	       4,650.0 Kč 	-       69,750 Kč 	 	 	
 7. 	i13	policový regál s dvířky, regál š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 600 mm, 5 polic, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační, nikl broušený	kpl.	 odpočet 	 	- 3.0  	       7,266.0 Kč 	-       21,798 Kč 	 	 	
 8. 	i17	policový regál 35 s dvířky, š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 350 mm (na šanon), 4 police, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně a prošroubování sestav vedle sebe, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové, madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační nikl broušený, pozn.: v m.č. S158 u jednoho kusu neosadit spodní dvířka !!!	kpl.	 nová položka 	 	 10.0  	       6,916.0 Kč 	        69,160 Kč 	 	 	
 ZML č.X Úprava dispozice - Změny pozic přípojných míst 	9,318 Kč	9,318 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Změna souvisí se změnou navýšení pracovních míst v prostoru LVT (ZL č. IV ). 	 	 	 	 	
 1. 	 	Přístrojová jednotka univerzální PA ocelově šedá RAL 7011, GES9-2 U10T 7011	ks	 3.0  	 	 1,203.5  	           650.0 Kč 	       5,560.5 Kč 	 	 	
 2. 	 	Nosič modulu 45 uzavřený pro 2+2 přístroje M45 208x76x40 PA grafitově černá RAL 9011	ks	 9.0  	 	 108.3  	             35.0 Kč 	       1,289.7 Kč 	 	 	
 3. 	 	Kabel CYKY 3x2,5 vč. Mont.	m	 75.0  	 	 13.9  	             19.0 Kč 	       2,467.5 Kč 	 	 	
 ZML č.XI Propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou 	-92,988 Kč	86,324 Kč	-179,312 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Z části jsou ze strany uživatele požadovány novější technolofie.  Odpočty souvisí s tím, že část kapitoly byla realizována v rámci jiného projektu. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH	m	 640.0  	–  	 14.0  	             18.0 Kč 	        20,480 Kč 	 	 	
 2. 	 	Pigtail E2000/APC 9/125 OS2 2m, včetně sváření	ks	 96.0  	–  	 20.0  	           300.0 Kč 	        30,720 Kč 	 	 	
 3. 	 	Adaptér E2000/APC - E2000/APC Singlemode	ks	 96.0  	–  	 42.0  	             45.0 Kč 	           8,352 Kč 	 	 	
 4. 	 	Optická vana neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1U, černá	ks	 4.0  	–  	 932.0  	           100.0 Kč 	           4,128 Kč 	 	 	
 5. 	 	Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů	ks	 4.0  	–  	 115.0  	             50.0 Kč 	              660 Kč 	 	 	
 6. 	 	Ochrana sváru 60mm	ks	 96.0  	–  	 9.0  	             25.0 Kč 	           3,264 Kč 	 	 	
 7. 	 	Měření jednoho optického vlákna metodou OTDR oboustranně, včetně protokolu	vlákno	 96.0  	–  	 	           195.0 Kč 	        18,720 Kč 	 	 	
 8. 	750.02.01.08	Optický kabel univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH	m	- 1,737.0  	–  	 14.0  	             18.0 Kč 	-       55,584 Kč 	 	 	
 9. 	750.02.01.12	Pigtail SC 9/125 OS1 2m, včetně vaření	ks	- 204.0  	–  	 20.0  	           300.0 Kč 	-       65,280 Kč 	 	 	
 10. 	750.02.01.09	Adaptér SC-SC Duplex singlemode	ks	- 104.0  	–  	 42.0  	             45.0 Kč 	-         9,048 Kč 	 	 	
 11. 	750.02.01.02	Optická vana neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá	ks	- 22.0  	–  	 932.0  	           100.0 Kč 	-       22,704 Kč 	 	 	
 12. 	750.02.01.11	Optická kazeta pro 2 x 8 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	- 30.0  	–  	 106.0  	             50.0 Kč 	-         4,680 Kč 	 	 	
 13. 	750.02.01.10	Ochrana optického spoje smršťovací	ks	- 204.0  	–  	 9.0  	             25.0 Kč 	-         6,936 Kč 	 	 	
 14. 	750.02.05.01	Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka	vývod	- 104.0  	–  	 	           145.0 Kč 	-       15,080 Kč 	 	 	
 ZML č.XII Změna požadavku akustických vlastností příčky v serv. 	24,324 Kč	110,198 Kč	-85,874 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Z důvodu zvýšení pohody pracovního prostředí v sousedství servrovny bylo orozhodnuto o navýšení akustických parametrů dělící konstrukce nad normové hodnoty. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Základní cena W111 CWUW100 1 x A 12,5mm TI 40mm	m2	 56.95 	–  	 56.95 	           750.0 Kč 	        42,713 Kč 	 	 	
 2. 	 	Druhé opláštění 1 x A 12,5mm   	m2	 56.95 	–  	 56.95 	           295.0 Kč 	        16,800 Kč 	 	 	
 3. 	 	Opláštění deskou Diamant    3 vrstvy    3 x 225	m2	 56.95 	–  	 56.95 	           795.0 Kč 	        45,275 Kč 	 	 	
 4. 	 	Příplatek na TI  80mm o obj. hm. 40kg/m3 	m2	 56.95 	–  	 56.95 	             95.0 Kč 	           5,410 Kč 	 	 	
 5. 	311238111	Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic  - skl. tl příčky 200 mm / ozn. C03	m2	 56.95 	–  	 56.95 	-         863.0 Kč 	-       49,148 Kč 	 	 	
 6. 	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tloušťky do 10 mm, včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt / provádění dle technologického předpisu výrobce materiálu, na přechodu podkladu síťovina (perlinka) - skladba M3	m2	 113.92 	–  	 113.92 	-         169.0 Kč 	-       19,252 Kč 	 	 	
 7. 	612381000	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3	m2	 113.92 	–  	 113.92 	-         141.0 Kč 	-       16,063 Kč 	 	 	
 8. 	340291112	Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	 17.0  	–  	 17.0  	-            83.0 Kč 	-         1,411 Kč 	 	 	
 ZML č.XIII Stěhování nábytku, vyklízení 	26,400 Kč	26,400 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Nebylo zahrnuto v projektu, objednatel nezajišťuje vlastními silami a nabídka dalšího subjektu byla méně výhodná i organizačně komplikovaná.  	 	 	 	 	
 1. 	 	Odvoz odpadu na skládku (komunální odpad)	kont.	 4.0  	–  	 4.0  	       3,500.0 Kč 	        14,000 Kč 	 	 	
 2. 	 	Vyklizení stávajícího nábytku	hod.	 80.0  	–  	 80.0  	           155.0 Kč 	        12,400 Kč 	 	 	
 ZML č.XIV Úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku 	9,150 Kč	9,150 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Vzhledem k souběhu vedení kabeláže tří akcí (část LVT, páteř silno i páteř slabo se ukázal předpokládaný rozsah demontáže podhledu jako nedostatečný a musel být rozšířen. 	 	 	 	 	
 1. 	 	demontáž podhledu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	 	 	 9.2  	             95.0 Kč 	              874 Kč 	 	 	
 2. 	 	Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, U - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N5	m2	 	 - 	 13.2  	           627.0 Kč 	           8,276 Kč 	 	 	
 ZML č.XV Vybourání prostupu do kolektoru 	8,250 Kč	8,250 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Dodatečný požadavek objednatele zajistit propojení do kolektoru pod dvorem hlouběji oproti stávajícímu stavu a odbourat  zvýšené zastropení propoje stávajícího (bariéra v ploše dvora omezující parkování). 	 	 	 	 	
 1. 	 	Vybourání prostupu do kolektoru -jádrové vrty, bourání venkovního soklu , kabelová průchodka, začištění	kpl	 1.0  	–  	 	       8,250.0 Kč 	           8,250 Kč 	 	 	
 ZML č.XVI Ochranné sloupky 	5,574 Kč	5,574 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Dodatečný požadavek objednatele realizovat ochranu klimatizačních venkovních jednotek  proti nárazu vozidla při parkování. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Flexi sloupek vč. montáže	kpl	 3.0  	–  	 	       1,858.0 Kč 	       5,574.0 Kč 	 	 	
 ZML č.XVII Úprava podlahy na chodbě - terrazzo 	34,485 Kč	34,485 Kč	0 Kč	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Výběr kamenné mozaiky v. 20 mm  v ploše terazza vyvolal potřebu zvýšení celkové tl. skladby - navýšení ceny 	 	 	 	 	
 2. 	773531230	Lité broušené terrazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami, včetně obrub - včetně závěrečného leštícího brusu o hrubosti 120/220 a napuštění /  barevnosti a vzoru stávajících a navazujících ploch v budově - detailní specifikace viz Skladby podlah - skladba P3- příplatek za výšku podlahy 20mm dle výběru kamenné mozaiky	m2	 75.0  	–  	 75.0  	           436.0 Kč 	        32,700 Kč 	 	 	
 2. 	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	 0.45 	–  	 0.45 	       1,700.0 Kč 	              765 Kč 	 	 	
 3. 	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	 1.12 	–  	 1.12 	           311.0 Kč 	              348 Kč 	 	 	
 4. 	997006500	Odvoz odpadu na skládku	t	 1.12 	–  	 1.12 	           250.0 Kč 	              280 Kč 	 	 	
 5. 	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	 1.12 	–  	 1.12 	           350.0 Kč 	              392 Kč 	 	 	

 	 	cena bez DPH	 	 	 	 	                          18,413    	 640,535 	- 622,122 	
 	 	DPH	 	 	 	 	                            3,867    	 134,512 	- 130,646 	
 	 	Cena vč. DPH	 	 	 	 	                          22,280    	 775,047 	- 752,767 	

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0399

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
se sídlem: 		náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: 		doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 			00216208
DIČ: 			CZ00216208
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.:			85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, xxx, e-mail: xxx
interní číslo zakázky: 2016/002
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o
se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4	zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena:	Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti
IČ:	00334561	
DIČ:	CZ00334561 
bankovní spojení:	xxx
č. ú.:	xxx
osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0399 (dále jen „Smlouva“) a dne 20. 9. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě
V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:
a)	Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:
i.	úprava vydavatelství -vícepráce – dle Změnového listu  č. XVIII,
ii.	sokl terazzo  - vícepráce dle Změnového listu  č. XIX,
iii.	doleštění terazza - vícepráce – dle Změnového listu  č. XX,
iv.	žaluzie – vícepráce dle Změnového listu  č. XXI,

	Změnové listy č. XVIII - XXI včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
b)	Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem: 
Cena bez DPH v Kč: 			190 135,-
DPH v %:					21%
DPH v Kč:					39 928,-
Cena včetně DPH v Kč: 			230 063,-

III.
Závěrečná ujednání
1.	Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2.	V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4.	Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5.	Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6.	Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
a)	Příloha č. 1 – Změnové listy č. XVIII - XXI
8.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne	22. 9. 2016				V Praze dne 	21. 9. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………………		……………………………………………
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka		Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

		Stavební část									
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	vícepráce - Kč. Bez DPH	méněpráce - Kč. Bez DPH	
 Změnové listy celkem 	190,135 Kč	190,135 Kč	0 Kč	
 ZML č.XVIII Úprava vydavatelství 	124,550 Kč	124,550 Kč	 	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Potřeba uživatele rozšířit skladové možnosti vydavatelství  - úprava m.č. S159a dispozice, přesun pracovních míst a doplnění knihovních regálů v celé ploše  m.č. S 159.  	 	 	 	 	
 	 	 V souvislosti s tím drobné stavební úpravy a malby v celém rozsahu místností  S159, 158 a 156. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Úprava SDK příčky	 kpl 	 1.0  	–  	 1.0  	       6,500.0 Kč 	           6,500 Kč 	 	 	
 2. 	 	Linoleum podlaha - doplnění pásu	 kpl 	 1.0  	–  	 1.0  	       1,500.0 Kč 	           1,500 Kč 	 	 	
 3. 	 	Policový regál vydavatelství	 kpl 	 1.0  	–  	 1.0  	     93,450.0 Kč 	        93,450 Kč 	 	 	
 4. 	 	Manipulace a likvidace zakrývání	 kpl 	 1.0  	–  	 1.0  	       4,500.0 Kč 	           4,500 Kč 	 	 	
 5. 	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,8 m - výměra=skutečně upravovaná plocha	 m2 	 161.5  	–  	 161.5  	 21.0  	           3,392 Kč 	 	 	
 6. 	784161400	Úprava podkladního povrchu před malbou - vyspravení a zatmelení větších trhlin v podkladu  - výměra 50% upravované plochy	 m2 	 80.75 	–  	 80.75 	 71.0  	           5,733 Kč 	 	 	
 7. 	784211001	Malba interiérová disperzní, otěruvzdorná, paropropustná, odstín bílá včetně  penetrsace - včetně olepování ploch páskou / na omítky - výměra = skutečně  upravovaná plocha  	 m2 	 161.5  	–  	 161.5  	 37.0  	           5,976 Kč 	 	 	
 8. 	 	Úklid a vyčištění dotčených prostor	 kpl 	 1.0  	–  	 1.0  	       3,500.0 Kč 	           3,500 Kč 	 	 	
 ZML č.XIX Sokl terazzo 	51,755 Kč	51,755 Kč	 	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Požadavek uživatele realizovat sokly v celém rozsahu upravovaných chodeb a v provedení odpovídajícímu původním obkladům.  	 	 	 	 	
 	 	 Vzhledem k tomu, že původní obklady se již nevyrábí, byla zvolena pohledově odpovídající dlažba vyráběná ovšemj ve větším formátu a její řezání na formát dle původního soklu. 	 	 	 	 	
 1. 	 	Montáž soklu z  dlaždic velikosti, v barvě a spárořezu dle navazujících prostor, výška cca 300 mm - z keramické dlažby 147/147/7 mm	m	 79.0  	–  	 79.0  	           170.0 Kč 	        13,430 Kč 	 	 	
 2. 	 	Keramická dlažba 330/330/7 mm	m2	 19.85 	 10.00 	 21.835	           324.0 Kč 	           7,075 Kč 	 	 	
 3. 	 	Kalibrace rozměru obkladu  -řezání vodním paprskem na rozměr 147/147	kpl	 1.0  	 	 1.0  	     31,250.0 Kč 	        31,250 Kč 	 	 	
 ZML č.XX Doleštění terazza 	8,330 Kč	8,330 Kč	 	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 Vzhledem k tomu, že spodní úroveň schodiště se stávajícím terazzem bez přechodu navazuje na nové terazzo v chodbě, uživatel rozhodl   o sjednocení ochranné povrchové úpravy těchto ploch (navýšení upravované plochy). 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 1. 	 	Závěrečný leštící brus terazza	m2	 7.0  	 	 7.0  	       1,190.0 Kč 	           8,330 Kč 	 	 	
 ZML č.XXI Žaluzie 	5,500 Kč	5,500 Kč	 	
 	 ODŮVODNĚNÍ:  	 V souvislosti s potřebou uživatele zachovat denní místnost řidiče (místo původního skladu) bude okno osazeno textilní žaluzií. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 1. 	 	D+M Vetrikální lamelové žaluzie	kpl	 1.0  	 	 1.0  	       5,500.0 Kč 	           5,500 Kč 	 	 	
 	celkem	cena bez DPH	 	 	 	 	                        190,135    	 190,135 	–  	
 	 	DPH	 	 	 	 	                          39,928    	 39,928 	–  	
 	 	Cena vč. DPH	 	 	 	 	                        230,063    	 230,063 	–