ZMĚNOVÝ LIST č. 1A 			
Stavba: 	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, 	
Objednatel: 	Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 959/33, Moravská Ostrava a 	
	"' 						
	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, 	
Objekt: 	Ostrava.   
0000 CZ 0 						
	xr 	rvr /\/:. "1/:.'1//\ /\//\ /\/1/:. 1\ •• 1\/1\1\1\"1/:./:.'1 

			
Vydal (Zhotovitel): 	. CONE Stavitelství a.s. 					
Odesláno/předáno - komu 	Mgr. Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy. 			
	poštou 	emailem 	faxem 	osobně 	Datum: 	
Odesláno/předáno 								
						x 		
Přílohy / poč. listů 	Položkový rozpočet prací ke ZL Č. 1 A 				
								
1) Zdůvodnění: 								
Z důvodu rychlosti provádění a nutnosti provádět vyzdívku po jednotlivých podlažích jsou ŽB bednící tvárnice 	
výhodnější, cenově jsou shodné jako cihelné zdivo. Není nutno čekat na plné vyzrání ŽB věnce, které byl součástí návrhu 	
cihelného zdiva. Bednící tvárnice jsou proarmované v celé své výšce a únosné již po 4 dnech od provedení, vlastní cednění 	
tak zčásti odpadá, protože bednící tvárnice plní funkci ztraceného bednění. 			
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): 					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 					
5) Náklady (ceny bez DPE 					-8600,70 Kč 			
- vícepráce (Kč bez DPH) 			0,00 Kč 				
- neprováděné práce, méněpráce (Kč bez DPH 	-8600,70 Kč 				
6) Vliv na termín výstavby 								
nemá vliv 								
7) Předkladatel (zhotovitel): 				rozsah ověřil: 		
	stavbyvedoucí 	hlavní 	TDS 	AD 	Objednatel 	
		stavbyvedoucí 				
Datum: 								
Podpis: 								
I ZL převzal: 
Datum: 

Kód: 
Stavba: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
ST06-18VCPaMNP 
SÚ ve vazbě na vybudováni bezbariérovosti budovy odloučeného 
pracoviště Matični 18, Ostrava 

JKSO: 
	Místo: 	Ostrava 
Objednatel: 
Střední umělecká škola Ostrava 
Zhotovitel: 
CONE - STAVITELSTVí, a.s. 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Cena bez DPH 

CC-CZ: 		
Datum: 	28. 6. 2018 	
IČ: 	00602051 	
DIČ: 	CZ00602051 	
IČ: 	25357603 	
DIČ: 	CZ25357603 	
IČ: 		
DIČ: 		
IČ: 		
DIČ: 		
-8600,70 
0,00 
-8600,70 

DPH základní 
snížená 
\cena s DPH 
Projektant 
Datum a podpis: 
Objednavatel 
Datum a podpis: 

21,00 
15,00 

ze 
ze 
v 
Razítko 
Razítko 

CZK 

-8600,70 
0,00 
Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Zhotovitel 
Datum a podpis: 

-1806,15 
0,00 
-10406,851 
Razítko 
Razítko 

Strana 1 z 3 

Kód: 
Stavba: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
ST06·18VCPaMNP 
SÚ ve vazbě na vybudováni bezbariérovosti budovy odloučeného 
pracoviště Matični 18, Ostrava 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

Ostrava 
Střední umělecká škola Ostrava 
CONE . STAVITELSTVí, a.s. 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

28. 6. 2018 

Kod 

Objekt 

Cena bez DPH [CZK] 

Cena s DPH [CZK] 

Stavební úpravy 
1)	Náklady z rozpočtů 
VCP a 
MNPZL- 
1A 
2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 3 

-8 600,70 
·8600,70
0,00 
 -8600,70 

-10406,85 
-10406,85 
0,00 
-10406,85 

Stavba: 
Objekt: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
VCP a MNPZL-1 A - Stavební úpravy 

JKSO: 	CC-CZ: 		
Místo: 	Datum: 	28_ 6_ 2018 	
Objednatel: 	IČ: 	00602051 	
Střední umělecká škola Ostrava 	DIČ: 	CI00602051 	
Zhotovitel: 	IČ: 	25357603 	
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 	DIČ: 	CZ25357603 	
Projektant: 	IČ: 		
	DIČ: 		
Zpracovatel: 	IČ: 		
	DIČ: 		
Poznámka: 			

Náklady z rozpočtu 				-8 600,70 	
Ostatní náklady 				0,00 	
Cena bez DPH 				-8600,70 	
DPH základní 	21,00 	ze 	-8600,70 	-1 806,15 	
snížená 	15,00 	ze 	0,00 	0,00 	
Cena S DPH 		v 	CZK 	-10406,851 	

Projektant 
Datum a podpis: 
Objednavatel 
Datum a podpis: 

Razítko 
Razítko 

Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Zhotovitel 
Datum a podpis: 
Strana 1 z 3 

Razítko 
Razítko 

Stavba: 
Objekt: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
VCP a MNPZL-1A - Stavební úpravy 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

Střední umělecká škola Ostrava 
CONE - STAVITELSTVí, a.s. 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

28.6.2018 

	Kód. Popis 	Cena celkem [CZK] 
1)	Náklady z rozpočtu 	-8 600,70 
	3 - Svislé a kompletní konstrukce 	1 056,80 
	015 - 279 32 Beton základových zdí železový 	-3 095,00 
	016 - 279 35 Bednění základových zdí 	-5 964,20 
	019 - 63131-2 tl. přes 50 do 80 mm 	-794,10 
	023 - 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 	0,00 
	090 - 999 28-1 Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetni 	195,80 
	2) Ostatní náklady 	0,00 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 	-8 600,70 
Strana 2 z 3 

ROZPOČET 
Stavba: 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
Objekt: 
VCP a MNPZL-1 A - Stavební úpravy 
Místo: 
Datum: 
28. 6. 2018 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Střední umělecká škola Ostrava 
CONE - STAVITELSTVí, a.s. 
Projektant: 
Zpracovatel: 
PČ Typ 
Popis 
MJ Množství 
J.cena [CZK] 
Cena celkem [CZK] 
Kód 
Náklady z rozpočtu 
-8 600,70 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
1 056,80 
			Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 					
194 	K 	311113134 	ztraceného bednění včetně výplně z beto nu tř. 	m2 	7,910 	936,00 	7403,80 	
			e 16/20 					
26 	K 	311231118 	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 	m3 	·2,373 	3200,00 	-7593,60 	
			15 na Me 15 					
195 	K 	311361821 	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 	t 	0,042 	29680,00 	1246,60 	
D15 - 279 32 Beton základových zdí železový 
-3095,00 

2500,00 
·3095,00 

... třídy c 25/30 
D16 - 279 35 Bednění základových zdí 
-5964,20 
17 	K 	279351101ROO 	... jednostranné, zřízení 	m2 	·4,140 	361,00 	-1 494,50 	
18 	K 	279351102ROO 	... jednostranné, odstranění 	m2 	-4,140 	149,00 	·616,90 	
19 	K 	279351105ROO 	... oboustranné, zřízení 	m2 	-8,250 	345,00 	-2846,30 	
20 	K 	279351106ROO 	... oboustranné, odstranění 	m2 	-8,250 	122,001 	-1 006,50 	
D19 - 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 
-794,10 

300,00 
-794,10 
Postupné podbetonování zákt. zdiva e 25/30 
D23 - 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 
D90 - 99928-1 Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetni 
0,00 
195,80 

180,00 
195,80 
... výšky do 25 m 
Strana 3 z 3 

Název akce: 
Číslo SOD: 
Číslo ZL: 

Stavební úpravy odloučeného pracoviště Matiční 18 
ST 04/18 
1A-D 

I 

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH): 

Cena dle SOD (Kč bez DPH) 	2655369,68 	
Cena dle SOD vč. dodatku č. (Kč bez DPH): 		
Cena po zapracování ZL (Kč bez DPH): 	2646768,98 	

	vícepráce 	méněpráce 	celkem 	zcenySOD 	
ZL celkem 	0.00 	860070 	-860070 		
1A 	0,00 	8600,70 	-8600,70