ZL převzal : 

"aJ 		ZMĚNOVÝ LIST č. 	lC 			
Stavba: 	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbaríérovosti budovy odloučeného pracoviště Matíční 18, Ostrava 	
Objednatel: 	Střední umělecká škola, Ostrava, prispěvková organizace, Poděbradova 959/33, Moravská Ostrava a Přívoz 	
Objekt: 	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matíční 18, Ostrava 	
	reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.01I 6_050/0002663 					
Vydal (Zhotovítel): 	CONE Stavitelství a.s. 						
Odesláno/předáno - komu 	Mgr. Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy. 				
	poštou 	emailem 	faxem 	osobně 	Datum: 	
Odesláno/předáno 							
					x 		
Přílohy / poč. listů 	Položkový rozpočet prací ke ZL é. I C 					
	Fotodokumentace ke ZL Č. IC 					
1) Zdůvodnění: 							
Po oklepání omítek a odbourání části zdi bylo zjištěno, že v obvodovém zdivu se nachází zazděné okno a komínová šachta. 	
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): 						
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 						
S) Náklady (ceny bez DPH): 			5836,60 Kč 			
- vícepráce (Kč bez DPH) 		5836,60 Kč 					
- neprováděné práce, méněpráce (Kč bez DPH) 	0,00 Kč 					
6) Vliv na termín výstavby 							
nemá vliv 							
7) Předkladatel (zhotovitel): 					rozsah ověřil: 		
	stavbyvedoucí 	hlavní 	TDS 	AD 	Ob jednatel 	
		stavbyvedoucí 				
Datum: 							
Podpis: 							
Datum: 

Kód: 
Stavba: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
ST06·18VCPaMNP 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 
18, Ostrava 

Zhotovitel: 
CONE . STAVITELSTVÍ, a.s, 
Objednatel: 
Střední umělecká škola Ostrava 
JKSO: 
Místo: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka: 

Ostrava 

CC·CZ: 		
Datum: 	28. 6. 2018 	
IČ: 	00602051 	
DIČ: 	CZ00602051 	
IČ: 	25357603 	
DIČ: 	CZ25357603 	
IČ: 		
DIČ: 		
IČ: 		
DIČ: 		

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Cena bez DPH 

DPH 	základní 	21,00 	ze 	5 836,60 	
	snížená 	15,00 	ze 	0,00 	
cena s DPH 		v 	CZK 	

   5 836,60 0,00 
5836,60 
1 225,69 
0,00 
7062,29

Projektant 
Datum a podpis: 
Objednavatel 
Datum a podpis: 

Razítko 
Razítko 

Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Zhotovitel 
Datum a podpis: 
Strana 1 z 2 

Razítko 
Razítko 

Kód: 
Stavba: 

o 
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
ST06-18VCPaMNP 
SÚ ve vazbě na vybudováni bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště 
Matiční 18, Ostrava 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Kód 

Ostrava 
Střední umělecká škola Ostrava 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 
Objekt 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena bez DPH [CZK] 

28. 6. 2018 
Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

5836,60 

7062,29 

VCP a 
MNPZL-C 

Stavební úpravy 

5836,60 

7062,29 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

0,00 
5836,60 

0,00 
7062,29 

Stavba: 
Objekt: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
VCP a MNPZL-1C - Stavební úpravy 

JKSO: 
Místo: 
Objednatel: 
Střední umělecká škola Ostrava 
Zhotovitel: 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

CC-CZ: 		
Datum: 	28. 6. 2018 	
IČ: 	00602051 	
DIČ: 	CZ00602051 	
IČ: 	25357603 	
DIČ: 	CZ25357603 	
IČ: 		
DIČ: 		
IČ: 		
DIČ: 		
5836,60 
0,00 
5836,60 

DPH základní 
snížená 
cena S DPH 
Projektant 
Datum a podpis: 
Objednavatel 
Datum a podpis: 

21,00 
15,00 

Razítko 
Razítko 

ze 
ze 
v 

CZK 

5836,60 
0,00 
Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Zhotovitel 
Datum a podpis: 
Strana 1 z 4 

Razítko 
Razítko 

1 225,69 
0,00 
  7062,291 

Stavba: 
Objekt: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
VCP a MNPZL·1 C • Stavební úpravy 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

Střední umělecká škola Ostrava 
CONE - STAVITELSTVí, a.s. 
Kód - Popis 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

28. 6. 2018 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
D020 _ 31023-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
D021 - 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 
D022 - 311 23-1 pod omítku 
9 - Ostatní konstrukce, bourání 
D061 - 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 
96 - Bourání konstrukcí 
D074 - 96809 Vybourání vnitřních parapetů 
D085 - 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
D086 - 97908-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
D087 - 97908-2 Vnitro staveništní doprava suti a vybouraných hmot 
D088 - 979 08-4 Poplatek za skládku 
99 - Staveništní přesun hmot 
D089 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
D090 _ 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
2) Ostatní náklady 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
Strana 2 z 4 

 5836,60 
414,70 
 414,70 
   0,00 
   0,00 
1 387,60 
76,80 
3486,90 
  39,40 
1188,60 
785,50 
181,40 
1 292,00 
   547,40 
547,4 
547,40 
0,00 
5836,60 

ROZPOČET 
Stavba: 
SÚ ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 
Objekt: 
VCP a MNPZL-1C - Stavební úpravy 
Místo: 
Datum: 
28. 6. 2018 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Střední umělecká škola Ostrava 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 
Projektant: 
Zpracovatel: 
PČ Typ 
Kód 
J.cena [CZK] 
Cena celkem [CZK] 
Popis 
MJ 
Množství 
Náklady z rozpočtu 
5836,60 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
020 - 310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
414,70 
414,70 

414,70 
... pro jakoukoliv maltu vápenocementovou . komín+ 
okno 
2880,00 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
;zazdívka komín 1.NP·2.NP 
0,40'1,20'0,30 
Součet 
0,144 
0,144 
021 - 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 
022 - 311 23-1 pod omítku 
0,00 
0,00 
9 - Ostatní konstrukce, bourání 
1 387,60 
192 	K 	962032230 	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 	m3 	1,402 	832,00 	1 166,50 	
			na MV nebo MVC do 1 m3 					
;obezdívka komínu 
0,4'1,2'0,1 
Součet 

144,30 
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 
64,40 
D61 - 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 
76,80 

20,00 
76,80 
... pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 
m 
96 - Bourání konstrukcí 
D74 - 968 09 Vybourání vnitřních parapetů 
3486,90 
39,40 

24,60 
39,40 
... dřevěných, šířky do 25 cm, 
D85 - 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
1188,60 

300,00 
775,20 
... za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 
Strana 3 z 4 
3,20'1,20'0,15 
; přizdívka okno 1. pp 
4,05'1,28'0,15 
;komín 1.NP-2.NP 
0,048 
0,000 
1,402 
0,576 
0,778 

PČ Typ 
Kód 
Popis 
MJ 
Množství 
J.cena [CZK) 
Cena celkem [CZK) 
119 \ K 1979011121ROO 
\ ... příplatek za každé další podlaži 
\ t \ 
5,168\ 
80,00\ 
413,40 
... příplatek za každý další 1 km 

785,50 
D86 - 97908-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
	
... do 1 km 
250,00 
646,00 
979081111RO 
6,00 
139,50 
181,40 
122 	K 	979082111ROO 	... do 10 m 	t 	2,584 	55,20 	142,60 	
123 	K 	979082121 ROO 	... příplatek k ceně za každých dalších 5 m 	t 	2,584 	15,00 	38,80 	
... stavební suti 

1 292,00 
D88 - 979 08-4 Poplatek za skládku 

500,00 
1 292,00 
	
547,40 
547,40 
547,40 
99 - Staveništní přesun hmot 
089 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
090 - 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
180,00 
547,40 
Strana 4 z 4 

... v objektech výšky do 24 m 
D87 - 97908-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

Název akce: 
Číslo SOD: 
Číslo ZL: 

Stavební úpravy odloučeného pracoviště Matiční 18 
ST 04/18 
1A-D 

I 

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH): 

Cena dle SOD (Kč bez DPH) 		2655369,68 	
Cena dle SOD vč. dodatku č. 	(Kč bez DPH): 		
Cena po zapracování ZL (Kč bez DPH): 	2655369,68 	

	vícepráce 	méněpráce 	celkem 	z ceny SOD 	
ZL celkem 	1060070 	10600,70 	0,00 		
1A 	0,00 	8600,70 	-8600,70 		
18 	4764,10 	2000,00 	2764,10 		
1C 	5836,60 	0,00 	5836,60