ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
50346 Jeníkovice
IČ: 24286923

Dodatek č. 1 k objednávce č.  48

Datum:  22.08.2018                                           

Upozornění!
Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.
Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.
(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)  

Dne 26.02.2018 jsme u Vás objednali projekt sanace krovu domu F. L. Věka v rozsahu nabídky ze dne 05.02.2018 za cenu 136.000 Kč bez DPH, resp. 164.560 Kč vč. DPH.

Termín pro vyřízení objednávky byl stanoven dle nabídky, tj.: termín zhotovení projektové dokumentace do 4 měsíců od podpisu objednávky, následně cca 5 týdnů inženýrská činnost a poté podání na stavební úřad. Objednávka byla podepsána dne 02.03.2018.

Tímto dodatkem č. 1 jsou nově stanoveny termíny pro vyřízení: 
•	Předání projektové dokumentace a zahájení inženýrské činnosti do 31.08.2018
•	Podání žádosti o příslušné povolení na stavební úřad do 08.10.2018
•	Předání rozpočtu do 08.10.2018

Dodatek vyřizuje:	Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, 
mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz	

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii a jeden výtisk tohoto dodatku nebo jeho kopii. Ve faktuře uveďte, že je fakturováno plnění dle objednávky č. 48 a jejího dodatku č. 1! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.  

Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100

IČ:    00274 879                   
DIČ: CZ00274879	          
Tel.: 494 629 580, fax: 494 629 582			

Město Dobruška je plátcem DPH.                        

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:			____________________________
								         	Ing. Petr Lžíčař, starosta		

Podpis správce rozpočtu:					____________________________
								     Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ

Akceptace dodatku dne:					____________________________
								       ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.