Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 	Národní technické muzeum 
Sídlo:			Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající:	Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
Bankovní spojení: 	
IČ: 			00023299
DIČ: 			CZ00023299
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:              Decorum spol. s r.o.
Sídlo:                           V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2
Jednající:                   	 Oldřichem Mrázkem, jednatelem
Bankovní spojení:       
IČ:                               26421259
DIČ:                            CZ26421259
Tel:                              602335447
E-mail:                       	 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80912
 (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2.8.2018, č. objednatele 320/2018 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“).  Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti po zahájení provádění prací a rozkrytí detailů, tzn. vyšší pracnosti a náročnosti prací, na změně čl. IV. Termín plnění, odst. 1).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1. 	
Čl. IV. Termín plnění se mění z původního znění:
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do 7.9.2018.

Na nové závazné znění:
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do 31.10.2018.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.8.2018, č. objednatele 320/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

3.2.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost 
končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu 
s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek č. 1 účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

					
V Praze dne …………………………….		V Praze dne………………………….

_________________________________			_________________________
         objednatel						    zhotovitel
         Národní technické muzeum				     Decorum spol. s r.o.      
	Mgr. Karel Ksandr					         Oldřich Mrázek
                 generální ředitel						       jednatel